Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва                                                                   Дело № А40-282546/19-3-1923

21.02.2020г.                                                                                                                                  

Резолютивная часть объявлена 23.01.2020г.

Дата изготовления решения в полном объеме 21.02.2020г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1,

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Синергия» (121596, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ГОРБУНОВА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 9 ПОМ II ОФ 27, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.01.2013, ИНН: 

<

***>)

к ООО «Созидание» (119331 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ ДОМ 6 ПОМЕЩЕНИЕ    VI,     ОГРН: 

<

***>,     Дата    присвоения     ОГРН: 13.04.2004, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 889 727,86 руб.

В судебное заседание явились:

От истца: ФИО2 по дов. б/н от 20.06.2019г. паспорт, диплом,

От ответчика: не явился, извещён,

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании с ООО «Созидание» в пользу ООО «Синергия» сумму задолженности по Договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 540 360 руб. 70 коп., неустойку по Договору № ПКР-000556-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 513 руб. 47 коп., неустойку по Договору № ПКР-000557-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 382 руб. 82 коп., неустойку по Договору № ПКР-000558-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 4 216 руб. 60 коп., неустойку по Договору № ПКР-000559-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 339 руб. 69 коп., неустойку по Договору № ПКР-000570-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 12 762 руб. 35 коп., неустойку по Договору № ПКР-000625-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 16 436 руб. 98 коп., неустойку по Договору № ПКР-000708-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 13 216 руб. 44 коп., неустойку по Договору № ПКР-000707-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 27 722 руб. 62 коп., неустойку по Договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 29 565 руб. 98 коп., с последующим начислением неустойки с 24.01.2020г. по дату фактической оплаты суммы задолженности по Договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 в размере 540 360 руб. 70 коп., почтовых расходов в размере 344 руб. 07 коп. и в размере 356 руб. 07 коп., судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 45 000 руб. 00 коп., с учетом принятых судом уточнений исковых требований, в соответствии со ст. 49 АПК РФ.

В судебное заседание не явился представитель ответчика. Определение суда о времени и месте проведения судебного заседания, направленное в адрес ответчика, согласно сведениям, размещенным на официальном сайте ФГУП «Почта России», вручено адресату. 

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, на основании п. 2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, в связи с чем, в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Истец представил письменные пояснения по делу, исковые требования поддержал в полном объеме по заявленным основаниям.

От ответчика поступил в суд отзыв на иск, согласно доводам которого просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, заслушав представителя истца, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, между ООО «Созидание» (ответчик, Генподрядчик) и ООО «Синергия» (истец, Субпроектировщик) заключены следующие договоры: № ПКР-000566-18/СУБ от 25.05.2018 года; № ПКР-000557-18/СУБ от 25.05.2018 года; № ПКР-000558-18/СУБ от 25.05.2018 года; № ПКР-000559-18/СУБ от 25.05.2018 года; № ПКР-000570-18/СУБ от 25.05.2018 года; № ПКР-000625-18/СУБ от 25.05.2018 года; № ПКР-000707-18/СУБ от 25.05.2018 года; № ПКР-000708-18/СУБ от 25.05.2018 года; № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 года.

Договор № ПКР-000556-18/СУБ от 25.05.2018 года на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу(ам): 

<

...>, корп. А.

Исходя из п. 2.1 Договора Генподрядчик поручает, а Субпроектировщик принимает на себя выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее «Работы»), по адресам, предусмотренным Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему договору), (далее Объект/ «Объекты»), выполняемых в соответствии с графиком производства работ по на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества (Приложение №1 к настоящему договору), в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему договору), строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

В соответствии с п. 3.1. Дополнительного соглашения №1 от 09.01.2019 г. к Договору № ПКР-000566-18 СУБ от 25.05.2018 г., цена Договора составляет 302283,41 (триста две тысячи двести восемьдесят три) рубля 41 коп., в том числе НДС 20% - 50380,57 (пятьдесят тысяч триста восемьдесят) рублей 57 коп.

Согласно п. 3.3. договора оплата выполненных работ по разработке проектной документации по объекту производится Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней (без учета выходных и праздничных) дней после предоставления Субпроектировщиком надлежаще оформленного в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора Акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации (приложение №4 к настоящему Договору), счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, в соответствии с Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему Договору), разделом 7 настоящего Договора и при условии выполнения требования, предусмотренного п. 3.4 настоящего Договора.

Пометки, исправления и подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.

Истец своевременно и в полном объеме выполнил свои обязательства по Договору и предъявил Ответчику Акт приемки выполненных работ по разработке ПСД от 01.04.2019г., справку о стоимости работ и затрат от 01.04.2019 г., счет-фактуру №0104-06 от 01.04.2019 г.

Работы были приняты Ответчиком и подлежали оплате в срок до 16 апреля 2019 года.

Однако, ответчиком работы полностью оплачены 25.04.2019 г., что подтверждается платежным поручением №289 от 25.04.2019г. на сумму 302 283,41 рубля 41 коп., в том числе НДС 20% - 50380,57 рублей 57 коп.

Просрочка исполнения ответчиком обязательства по оплате выполненных и принятых работ составляет 8 дней.

Договор № ПКР-000557-18/СУБ от 25.05.2018 года на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу(ам): г. Москва, С АО, 2-й Амбулаторный проезд, д. 15.

В соответствии с п. 2.1 Договора Генподрядчик поручает, а Субпроектировщик принимает на себя выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее «Работы»), по адресам, предусмотренным Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему договору), (далее Объект/ «Объекты»), выполняемых в соответствии с графиком производства работ по на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества (Приложение №1 к настоящему договору), в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему договору), строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Исходя из п. 3.1. Дополнительного соглашения №1 от 09.01.2019 г. к Договору № ПКР-000557-18/СУБ от 25.05.2018 г. Цена Договора составляет 225371,54 (двести двадцать пять тысяч триста семьдесят один) рубль 54 коп., в том числе НДС 20% - 37561,92 (тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 92 коп.

Согласно п. 3.3. договора оплата выполненных работ по разработке проектной документации по объекту производится Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней (без учета выходных и праздничных) дней после предоставления Субпроектировщиком надлежаще оформленного в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора Акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации (приложение №4 к настоящему Договору), счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, в соответствии с Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему Договору), разделом 7 настоящего Договора и при условии выполнения требования, предусмотренного п.3.4 настоящего Договора.

Пометки, исправления и подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.

Истец своевременно и в полном объеме выполнил свои обязательства по Договору и предъявил Ответчику Акт приемки выполненных работ по разработке ПСД от 01.04.2019г., справку о стоимости работ и затрат от 01.04.2019 г., счет-фактуру №0104-05 от 01.04.2019 г.

Работы были приняты Ответчиком и подлежали оплате в срок до 16 апреля 2019 года.

Тем не менее, ответчиком работы полностью оплачены 25.04.2019 г., что подтверждается платежным поручением №290 от 25.04.2019г. на сумму 225 371,54 рубль 54 коп., в том числе НДС 20% - 37561,92 рубль 92 коп.

Просрочка исполнения Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ составляет 8 дней.

Договор № ПКР-000558-18/СУБ от 25.05.2018 года на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу(ам): г. Москва, С АО, 2-й Амбулаторный проезд, д. 17.

В соответствии с п. 2.1 Договора Генподрядчик поручает, а Субпроектировщик принимает на себя выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее «Работы»), по адресам, предусмотренным Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему договору), (далее Объект/ «Объекты»), выполняемых в соответствии с графиком производства работ по на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества (Приложение №1 к настоящему договору), в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему договору), строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

В силу п. 3.1. Дополнительного соглашения №1 от 09.01.2019 г. к Договору № ПКР-000558-18/СУБ от 25.05.2018 г. Цена Договора составляет 225420,73 (двести двадцать пять тысяч четыреста двадцать) рублей 73 коп., в том числе НДС 20% - 37570,12 (тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 12 коп.

Согласно п. 3.3. договора оплата выполненных работ по разработке проектной документации по объекту производится Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней (без учета выходных и праздничных) дней после предоставления Субпроектировщиком надлежаще оформленного в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора Акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации (приложение №4 к настоящему Договору), счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, в соответствии с Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему Договору), разделом 7 настоящего Договора и при условии выполнения требования, предусмотренного п.3.4 настоящего Договора.

Пометки, исправления и подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.

Истец своевременно и в полном объеме выполнил свои обязательства по Договору и предъявил Ответчику Акт приемки выполненных работ по разработке ПСД от 01.04.2019г., справку о стоимости работ и затрат от 01.04.2019 г., счет-фактуру №0104-04 от 01.04.2019 г.

Работы были приняты Ответчиком и подлежали оплате в срок до 16 апреля 2019 года. 

Между тем, Ответчиком  работы  полностью  оплачены   15.07.2019   г.,  что  подтверждается платежным поручением №751 от 15.07.2019 г. на сумму 225 420,73 

рублей 73 коп., в том числе НДС 20% - 37570,12 рублей 12 коп.

Просрочка исполнения Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ составляет 89 дней.

Договор № ПКР-000559-18/СУБ от 25.05.2018 года на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу(ам): г. Москва, С АО, 2-й Амбулаторный проезд, д. 19.

В соответствии с п. 2.1 Договора Генподрядчик поручает, а Субпроектировщик принимает на себя выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее «Работы»), по адресам, предусмотренным Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему договору), (далее Объект/ «Объекты»), выполняемых в соответствии с графиком производства работ по на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества (Приложение №1 к настоящему договору), в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему договору), строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Исходя из п. 3.1. Дополнительного соглашения №1 от 09.01.2019 г. к Договору № ПКР-000559-18/СУБ от 25.05.2018 г. Цена Договора составляет 199976,72 (сто девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 72 коп., в том числе НДС 20% - 33329,45 (тридцать три тысячи триста двадцать девять) рублей 45 коп.

Согласно п. 3.3. договора оплата выполненных работ по разработке проектной документации по объекту производится Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней (без учета выходных и праздничных) дней после предоставления Субпроектировщиком надлежаще оформленного в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора Акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации (приложение №4 к настоящему Договору), счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, в соответствии с Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему Договору), разделом 7 настоящего Договора и при условии выполнения требования, предусмотренного п.3.4 настоящего Договора.

Пометки, исправления и подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.

Истец своевременно и в полном объеме выполнил свои обязательства по Договору и предъявил Ответчику Акт приемки выполненных работ по разработке ПСД от 01.04.2019г., справку о стоимости работ и затрат от 01.04.2019 г., счет-фактуру №0104-03 от 01.04.2019 г.

Работы были приняты Ответчиком и подлежали оплате в срок до 16 апреля 2019 года.

Однако, Ответчиком работы полностью оплачены 25.04.2019г., что подтверждается платежным поручением №291 от 25.04.2019г. на сумму 199 976,72 рублей 72 коп., в том числе НДС 20% - 33329,45 рублей 45 коп.

Просрочка исполнения Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ составляет 8 дней.

Договор № ПКР-000570-18/СУБ от 25.05.2018 года на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу(ам): 

<

...> Балтийский переулок, д. 4, корп.1.

В соответствии с п. 2.1. Договора Генподрядчик поручает, а Субпроектировщик принимает  на  себя  выполнение  работ  (оказание  услуг)  по  разработке  проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее «Работы») по адресу(ам), предусмотренным Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему договору), (далее «Объект» / «Объекты»), выполняемых в соответствии с графиком производства работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Приложение №1 к настоящему Договору»), в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору), строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Согласно п. 3.1. Дополнительного соглашения №1 от 09.01.2019 г. к Договору № ПКР-000570-18/СУБ от 25.05.2018 г. Цена Договора составляет 353903,93 (триста пятьдесят три тысячи девятьсот три) рубля 93 коп., в том числе НДС 20% - 58983,99 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 99 коп.

В силу п. 3.3. Договора оплата выполненных по разработке проектной документации по Объекту производится Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) после представления Субпроектировщиком надлежаще оформленного в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора Акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации (Приложение №4 к настоящему Договору), счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, в соответствии с Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему Договору), разделом 7 настоящего Договора и при условии выполнения требования, предусмотренного п.3.4. настоящего Договора.

Истец надлежащим образом, своевременно и в полном объеме исполнил свои обязательства по Договору, а именно: предъявил комиссии к приемке выполненные работы по разработке проектной и сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: 

<

...> Балтийский переулок, д.4, корп.1, в соответствии с Договором № ПКР-000570-18/СУБ от 25.05.2018 г.; направил справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 01.04.2019г., счет-фактуру № 0104-09 от 01.04.2019 г., Акт приемки выполненных работ от 01.04.2019г. к договору № ПКР-000570-18/СУБ от 25.05.2018 г. Ответчик принял результат выполненных работ, что подтверждается Актом приемки выполненных работ от 01.04.2019 года к договору № ПКР-000570-18/СУБ от 25.05.2018 г.

С момента принятия результата выполненных работ и до настоящего времени претензий, возражений от Ответчика по качеству, срокам не поступало.

В соответствии с п. 3.3. Договора оплата должна быть произведена в срок до 16 апреля 2019 года.

Выполненные работы не оплачены Ответчиком по настоящее время.

Задолженность Ответчика по оплате за выполненные работы составляет 353 903,93 рубля 93 коп., в том числе НДС 20% - 58983,99 рубля 99 коп.

Просрочка исполнения Ответчиком обязательства по оплате составляет 177 дней.

Договор № ПКР-000625-18/СУБ от 25.05.2018 года на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу(ам): 

<

...> Амбулаторный проезд, д. 15.

В соответствии с п. 2.1. Договора Генподрядчик поручает, а Субпроектировщик принимает на себя выполнение работ (оказание услуг) по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее «Работы») по адресу(ам), предусмотренным Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему договору), (далее «Объект» / «Объекты»), выполняемых в соответствии с графиком производства работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Приложение №1 к настоящему Договору»), в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору), строительными нормами и правилами, государственными 4 стандартами.

Согласно п. 3.1. Дополнительного соглашения №1 от 09.01.2019 г. к Договору № ПКР-000625-18/СУБ от 25.05.2018 г. Цена Договора составляет 396464,64 (триста девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 64 коп., в том числе НДС 20% -66077,44 (шестьдесят шесть тысяч семьдесят семь) рублей 44 коп.

В соответствии с п. 3.3. Договора оплата выполненных по разработке проектной документации по Объекту производится Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) после представления Субпроектировщиком надлежаще оформленного в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора Акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации (Приложение №4 к настоящему Договору), счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, в соответствии с Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему Договору), разделом 7 настоящего Договора и при условии выполнения требования, предусмотренного п.3.4. настоящего Договора.

Истец надлежащим образом, своевременно и в полном объеме исполнил свои обязательства по Договору, а именно: предъявил комиссии к приемке выполненные работы по разработке проектной и сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: 

<

...> Амбулаторный проезд, д. 15 в соответствии с Договором № ПКР-000625-18/СУБ от 25.05.2018 г.; направил справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 01.04.2019г., счет-фактуру № 0104-08 от 01.04.2019 г., Акт приемки выполненных работ от 01.04.2019г. к договору № ПКР-000625-18/СУБ от 25.05.2018 г. Ответчик принял результат выполненных работ, что подтверждается Актом приемки выполненных работ от 01.04.2019 года к договору № ПКР-000625-18/СУБ от 25.05.2018 г.

С момента принятия результата выполненных работ и до настоящего времени претензий, возражений от Ответчика по качеству, срокам не поступало.

В соответствии с п. 3.3. Договора оплата должна быть произведена в срок до 16 апреля 2019 года.

Ответчик произвел оплату работ 396 464,64 руб. после поступления настоящего иска, что подтверждается платежным поручением № 1285 от 08.11.2019г.

Просрочка исполнения Ответчиком обязательства по оплате составляет 206 дней.

Договор № ПКР-000708-18/СУБ от 25.05.2018 года на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу(ам): г. Москва, САО, ул. Планетная, д.7.

В соответствии с п. 2.1. Договора Генподрядчик поручает, а Субпроектировщик принимает на себя выполнение работ (оказание услуг) по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее «Работы») по адресу(ам), предусмотренным Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему договору), (далее «Объект» / «Объекты»), выполняемых в соответствии с графиком производства работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Приложение №1 к настоящему Договору»), в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору), строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Согласно п. 3.1. Дополнительного соглашения №1 от 09.01.2019 г. к Договору № ПКР-000708-18/СУБ от 25.05.2018 г. Цена Договора составляет 249330,83 (двести сорок девять тысяч триста тридцать) рублей 83 коп., в том числе НДС 20% - 41555,14 (сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 14 коп.

В силу п. 3.3. Договора оплата выполненных по разработке проектной документации по Объекту производится Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) после представления Субпроектировщиком надлежаще оформленного в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора Акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации (Приложение №4 к настоящему Договору), счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, в соответствии с Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему Договору), разделом 7 настоящего Договора и при условии выполнения требования, предусмотренного п.3.4. настоящего Договора.

Истец надлежащим образом, своевременно и в полном объеме исполнил свои обязательства по Договору, а именно: предъявил комиссии к приемке выполненные работы по разработке проектной и сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Москва, САО, ул. Планетная, д.7, в соответствии с Договором № ПКР-000708-18/СУБ от 25.05.2018г.; направил справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 01.04.2019г., счет-фактуру № 0104-02 от 01.04.2019 г., Акт приемки выполненных работ от 01.04.2019г. к договору № ПКР-000708-18/СУБ от 25.05.2018 г. Генподрядчик принял результат выполненных работ, что подтверждается Актом приемки выполненных работ от 01.04.2019 года к договору № ПКР-000708-18/СУБ от 25.05.2018 г.

С момента принятия результата выполненных работ и до настоящего времени претензий, возражений от Ответчика по качеству, срокам не поступало.

В соответствии с п. 3.3. Договора оплата должна быть произведена в срок до 16 апреля 2019 года.

Ответчик произвел оплату работ 249 330,83 руб. после поступления настоящего иска, что подтверждается платежным поручением №12 от 13.01.2020 г.

Просрочка исполнения Ответчиком обязательства по оплате составляет 272 дней.

Договор № ПКР-000707-18/СУБ от 25.05.2018 года на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу(ам): г. Москва, САО, ул. Планетная, д.47, корп.1.

В соответствии с п. 2.1. Договора Генподрядчик поручает, а Субпроектировщик принимает на себя выполнение работ (оказание услуг) по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее «Работы») по адресу(ам), предусмотренным Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему договору), (далее «Объект» / «Объекты»), выполняемых в соответствии с графиком производства работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Приложение №1 к настоящему Договору»), в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору), строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Согласно п. 3.1. Дополнительного соглашения №1 от 09.01.2019 г. к Договору № ПКР-000707-18/СУБ от 25.05.2018 г. Цена Договора составляет 590101,00 (пятьсот девяносто тысяч сто один) рубль 00 коп., в том числе НДС 20% - 98350,17 (девяносто восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 17 коп.

Исходя из п. 3.3. Договора оплата выполненных по разработке проектной документации по Объекту производится Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) после представления Субпроектировщиком надлежаще оформленного в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора Акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации (Приложение №4 к настоящему Договору), счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, в соответствии с Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему Договору), разделом 7 настоящего Договора и при условии выполнения требования, предусмотренного п.3.4. настоящего Договора.

Истец надлежащим образом, своевременно и в полном объеме исполнил свои обязательства по Договору, а именно: предъявил комиссии к приемке выполненные работы по разработке проектной и сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Москва, САО, ул. Планетная, д.7, в соответствии с Договором № ПКР-000707-18/СУБ от 25.05.2018 г.; направил справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 01.04.2019г., счет-фактуру № 0104-01 от 01.04.2019 г., Акт приемки выполненных работ от 01.04.2019г. к договору № ПКР-000707-18/СУБ от 25.05.2018 г. Ответчик принял результат выполненных работ, что подтверждается Актом приемки выполненных работ от 01.04.2019 года к договору № ПКР-000707-18/СУБ от 25.05.2018 г.

С момента принятия результата выполненных работ и до настоящего времени претензий, возражений от Ответчика по качеству, срокам не поступало.

В соответствии с п. 3.3. Договора оплата должна быть произведена в срок до 16 апреля 2019 года.

Ответчик произвел оплату работ 590 101 руб. после поступления настоящего иска, что подтверждается платежным поручением № 1416 от 09.12.2019 г.

Просрочка исполнения Ответчиком обязательства по оплате составляет 237 дней.

Договор № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 года на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу(ам): г. Москва, САО, ул. Черняховского, д.8.

В соответствии с п. 2.1. Договора Генподрядчик поручает, а Субпроектировщик принимает на себя выполнение работ (оказание услуг) по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее «Работы») по адресу(ам), предусмотренным Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему договору), (далее «Объект» / «Объекты»), выполняемых в соответствии с графиком производства работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Приложение №1 к настоящему Договору»), в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору), строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Исходя из п. 3.1. Дополнительного соглашения №1 от 09.01.2019 г. к Договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 г. Цена Договора составляет 540360,70 руб. 70 коп., в том числе НДС 20% - 90060,12 (девяносто тысяч шестьдесят) руб. 12 коп.

Согласно п. 3.3. Договора оплата выполненных по разработке проектной документации по Объекту производится Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) после представления Субпроектировщиком надлежаще оформленного в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора Акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации (Приложение №4 к настоящему Договору), счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, в соответствии с Адресным перечнем (Приложение №2 к настоящему Договору), разделом 7 настоящего Договора и при условии выполнения требования, предусмотренного п.3.4. настоящего Договора.

Истец надлежащим образом, своевременно и в полном объеме исполнил свои обязательства по Договору, а именно: предъявил комиссии к приемке выполненные работы по разработке проектной и сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Москва, САО, ул. Черняховского, д.8, в соответствии с Договором № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 г.; направил справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 01.04.2019г., счет-фактуру № 0104-07 от 01.04.2019 г., Акт приемки выполненных работ от 01.04.2019г. к договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 г. Ответчик принял результат выполненных работ, что подтверждается Актом приемки выполненных работ от 01.04.2019 года к договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 г.

С момента принятия результата выполненных работ и до настоящего времени претензий, возражений от Ответчика по качеству, срокам не поступало.

В соответствии с п. 3.3. Договора оплата должна быть произведена в срок до 16 апреля 2019 года.

Выполненные работы не оплачены Ответчиком по настоящее время.

Задолженность Ответчика перед Истцом по оплате за выполненные работы по договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 г. составляет 540 360 рублей 70 коп., в том числе НДС 20% - 90060 рублей 12 коп.

Просрочка исполнения Ответчиком обязательства по оплате составляет 282 дней.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства  должны  исполняться  надлежащим  образом  в   соответствии   с   условиями  обязательства   и требованиями закона,  иных  правовых  актов,  а  при  отсутствии  таких  условий   и  требований  -  в  соответствии с обычаями  делового  оборота  или  иными  обычно  предъявляемыми  требованиями.

Статья 310 ГК РФ указывает  на то, что односторонний  отказ  от  исполнения  обязательства и одностороннее изменение   его  условий  не  допускается.

Исходя из п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (п. 1 ст. 711 ГК РФ).

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Учитывая вышеизложенное, суд считает требования истца о взыскании задолженности  по Договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 г. правомерными и подлежащими  удовлетворению в размере 540 360 руб. 70 коп., так как от ответчика не поступили в суд документы, подтверждающие оплату выполненных истцом работ в полном объеме, согласно условиям Договора и поскольку односторонний отказ от исполнения денежных обязательств противоречит ст. ст. 309, 310 ГК РФ.

Согласно п. 9.6 Договоров, в случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств по оплате выполненных работ по настоящему Договору Субпроектировщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере, определяемом согласно ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Истцом на основании п. 9.6 Договоров начислена ответчику неустойка по Договору № ПКР-000557-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 382 руб. 82 коп., неустойку по Договору № ПКР-000558-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 4 216 руб. 60 коп., неустойку по Договору № ПКР-000559-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 339 руб. 69 коп., неустойку по Договору № ПКР-000570-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 12 762 руб. 35 коп., неустойку по Договору № ПКР-000625-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 16 436 руб. 98 коп., неустойку по Договору № ПКР-000708-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 13 216 руб. 44 коп., неустойку по Договору № ПКР-000707-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 27 722 руб. 62 коп., неустойку по Договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 29 565 руб. 98 коп., с последующим начислением неустойки с 24.01.2020г. по дату фактической оплаты суммы задолженности по Договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 в размере 540 360 руб. 70 коп.

Федеральным законом от 08.03.2015г. №42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» положения статьи 395 ГК РФ дополнены пунктом 4, который с 01.06.2015г.  устанавливает, что в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты, не подлежат взысканию.

Само по себе то обстоятельство, что истец обосновывает свое требование о применении меры ответственности в виде взыскания денежной суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства п. 1 ст. 395 ГК РФ, в то время как законом или соглашением сторон на случай этого нарушения предусмотрена соответствующая неустойка и денежные средства необходимо взыскать с ответчика в пользу истца на основании п. 1 ст. 330 или п. 1 ст. 332 ГК РФ, не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования ("Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2016)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016).

Согласно п. 65. Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. N 7 «О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).  

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др.

Отказывая в удовлетворении ходатайства ответчика о применении ст. 333 ГК РФ, суд исходит из нижеследующего.

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 14.10.2004 N 293-О гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Согласно п. 70 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 марта 2016 г. N 7 «О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» по смыслу статей 332, 333 ГК РФ, установление в договоре максимального или минимального размера (верхнего или нижнего предела) неустойки не являются препятствием для снижения ее судом.

Пунктом 73 разъяснено, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Также в п. 77 указанного постановления Верховный суд Российской Федерации указал, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств, ответчиком не представлено и судом не установлено.

Учитывая, значительный период просрочки ответчиком выполнения работ в полном объеме, отсутствие правовых обоснований и доказательств, свидетельствующих о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, суд не находит оснований для применения ст. 333 ГК РФ и признает размер неустойки соразмерным последствиям нарушения ответчиком договорного обязательства.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика 45 000 руб. судебных расходов в виде оплаты услуг представителя, в связи с заключенным с ИП ФИО2 договором оказания юридических услуг № 0504/2019 от 05.04.2019г., понесенных по платежному поручению № 999 от 16.10.2019г. на сумму 25 000 руб., №1065 от 11.11.2019г. на сумму 15 000 руб. и №859 от 30.08.2019г. на сумму 5 000 руб.

В силу статьи 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. Возможность рассмотрения арбитражным судом заявления о распределении судебных расходов в том же деле и тогда, когда оно подано, после принятия решения судом первой инстанции, постановлений судами апелляционной и кассационной инстанций АПК РФ не исключает.

В соответствии с ч. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Согласно Информационному письму ВАС РФ от 13.08.2004г. №82 при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами, стоимость экономных транспортных услуг, время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист, сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов, имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг, продолжительность рассмотрения и сложность дела. Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов.

Суд считает, что в данном случае, исходя из сложности дела, объема участия в нем представителя, сложившейся судебной практики по вопросу возмещения судебных расходов, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб.

Также истцом заявлено о взыскании почтовых расходов в размере 344 руб. 07 коп. и в размере 356 руб. 07 коп., в обоснование понесения которых истец представил кассовые чеки с описью вложения в почтовое отправление от 02.09.2019г. и от 24.09.2019г.

Учитывая изложенное, заявленные истцом почтовые расходы являются обоснованными, документально подтвержденными и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Расходы по госпошлине в сумме 31 599 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании ст. ст. 8-12, 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ, руководствуясь ст. ст.  64, 65, 67, 71, 110, 167-171, 176, 180 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Созидание» (119331 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ ДОМ 6 ПОМЕЩЕНИЕ    VI,     ОГРН: 

<

***>,     Дата    присвоения     ОГРН: 13.04.2004, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Синергия» (121596, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ГОРБУНОВА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 9 ПОМ II ОФ 27, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.01.2013, ИНН: 

<

***>) сумму задолженности по Договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 540 360 (пятьсот сорок тысяч триста шестьдесят) руб. 70 коп., неустойку по Договору № ПКР-000556-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 513 (пятьсот тринадцать) руб. 47 коп., неустойку по Договору № ПКР-000557-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 382 (триста восемьдесят два) руб. 82 коп., неустойку по Договору № ПКР-000558-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 4 216 (четыре тысячи двести шестнадцать) руб. 60 коп., неустойку по Договору № ПКР-000559-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 339 (триста тридцать девять) руб. 69 коп., неустойку по Договору № ПКР-000570-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 12 762 (двенадцать тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 35 коп., неустойку по Договору № ПКР-000625-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 16 436 (шестнадцать тысяч четыреста тридцать шесть) руб. 98 коп., неустойку по Договору № ПКР-000708-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 13 216 (тринадцать тысяч двести шестнадцать) руб. 44 коп., неустойку по Договору № ПКР-000707-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 27 722 (двадцать семь тысяч семьсот двадцать два) руб. 62 коп., неустойку по Договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 г. в размере 29 565 (двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят пять) руб. 98 коп., с последующим начислением неустойки с 24.01.2020г. по дату фактической оплаты суммы задолженности по Договору № ПКР-000769-18/СУБ от 25.05.2018 в размере 540 360 руб. 70 коп., почтовые расходы в размере 344 (триста сорок четыре) руб. 07 коп. и в размере 356 (триста пятьдесят шесть) руб. 07 коп., судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп., а также расходы по уплате госпошлины в размере 31 599 (тридцать одна тысяча пятьсот девяносто девять) руб.

В удовлетворении остальной части требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя – отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                            А.А. Федоточкин