﻿АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А59-3199/2021

г. Южно-Сахалинск

17 ноября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 10 ноября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 17 ноября 2021 года.

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Портновой О. А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Михнюк Я. В., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Хинэкс» (ОГРН: 1086501007130, ИНН: 6501198144) к обществу с ограниченной ответственностью «Ника плюс» (ОГРН: 1136509000550, ИНН: 6509022304) о взыскании 16 391 756 рублей задолженности по договору на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов от 29.09.2020 № 70,

третье лицо - Администрация МО Холмский городской округ,

в отсутствие участвующих в деле лиц,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Хинэкс» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ника плюс» о взыскании 50 000 рублей задолженности по договору на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов от 29.09.2020 № 70. 

В обоснование заявленных требований указано на нарушение ответчиком обязательств по оплате работ по договору, в рамках которого истцом выполнено работ на сумму 15 210 000 рублей, которые приняты ответчиком по акту, а также 1 181 756 рублей дополнительных работ, акт о принятии которых ответчик не подписал. 

Определением суда от 18.06.2021 исковое заявление принято к производству суда, возбуждено дело и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

28.06.2021 истец представил в суд уточнение к исковому заявлению, в соответствии с которым просит взыскать с ответчика 16 391 756 рублей за выполненные работы по договору на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов от 29.09.2020 № 70, увеличив первоначальную сумму иска на стоимость дополнительных работ.

Определением суда от 30.07.2021 суд в порядке ст. 49 АПК РФ принял заявленные истцом уточнения, в соответствии с ч. 5 ст. 227 АПК РФ перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, предварительное судебное заседание назначено на 06.09.2021.

06.09.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Администрация МО Холмский городской округ, подготовка по делу завершена, судебное разбирательство по рассмотрению дела назначено на 04.10.2021. 

04.10.2021 и 29.10.2021 судебное заседание по делу откладывалось в порядке ст. 158 АПК РФ.

Участвующие в деле лица явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежаще в порядке ст. 123 АПК РФ.

Информация о деле размещена на официальном сайте арбитражного суда Сахалинской области по адресу: info@sakhalin.arbitr.ru.

С учетом изложенного, суд признает стороны извещенным надлежащим образом и в соответствии со ст. 156 АПК РФ рассматривает дело в отсутствие представителей истца, ответчика и третьего лица.

Ответчик и третье лицо отзыв на исковое заявление не представили, заявленные требования и сумму задолженности не оспорили.

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Судом из материалов дела установлено, что 29.09.2020 истцом (Подрядчик) и ответчиком (Заказчик) на основании протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок от 24.09.2020 заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов № 70, по условиям которого подрядчик в установленные договором сроки обязался выполнить работы по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» по объекту: - капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 30Б по ул. Школьной в с. Правда Холмского района в соответствии с проектной документацией, сводным/локальным сметным расчетом стоимости (приложение № 1) и графиком выполнения работ (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью договора и сдать результаты выполненных работ заказчику в порядке, установленном договором (п. 1.1).

Источник финансирования оплаты по договору: бюджет муниципального образования «Холмский городской округ», в том числе субсидии областного бюджета Сахалинской области бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» (п. 1.4).

Стоимость (цена) работ, выполняемых по договору, в том числе с НДС, составляет 15 210 000 рублей 00 коп. (п. 2.1).

Сроки выполнения работ по договору (в редакции дополнительного соглашения от 20.11.2020 № 1): Начало работ: 30.09.2020. Окончание выполнения работ: 31.01.2021 (п. 3.1).

Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта приемки в эксплуатацию объектов капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» по форме, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.06.2020 № 583 (п. 3.2).

В установленные договором сроки подрядчик передает заказчику работу по акту форма КС-2. Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2» и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3» (п. 6.1).

Приемка работы заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения актов формы КС-2, справки по форме КС-3. В указанный срок заказчик обязан подписать акт приемки выполненных работ комиссионно или направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного сроки при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми заказчиком (п. 6.2).

В случае отказа заказчика от приемки работ, сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения подрядчиком мотивированного отказа составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недоделки и дефекты в установленные в акте сроки и за свой счет. Требования заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для подрядчика (п. 6.3).

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки в эксплуатацию объектов капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» (форма акта, состав комиссии и порядок работы комиссии отображен в постановлении администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.06.2020 № 583), после предоставления подрядчиком следующих документов:

- подписанные акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4-х экземплярах;

- акты освидетельствования скрытых работ, в 3-х экземплярах;

- сертификаты и паспорта на примененные материалы (п. 6.5).

Согласно п. 7.2 договора, заказчик производит расчет с подрядчиком после выполнения работ по договору, включая устранения недоделок, дефектов, выявленных в ходе приемки работ, после предъявления следующих документов:

- подписанного акта приемки в эксплуатацию объектов капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования «Холмский горподской округ» - в 4-х экземплярах;

- подписанного акта приемки выполненных работ по форме КС-2 – в 4-х экземплярах;

- подписанной справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 4-х экземплярах;

- счет-фактуры, с указанием общей стоимости выполненных работ за расчетный период.

Оплата производится в течение 30 банковских дней с даты подписания актов выполненных работ. 

Согласно п. 11.4 договора, любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или дополнения, подписанных надлежаще уполномоченными представителями сторон.

В связи с изменением итоговой цены за выполненные работы дополнительным соглашением от 23.11.2020 № 2 стороны изменили указанную в п. 2.1 раздела 2 стоимость (цену) работ по договору, увеличив ее до 16 391 756 рублей (п. 1).        

В соответствии со ст. 307, 309, 310 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодекса.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Статьей 702 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Во исполнение обязательств по договору истец выполнил основные работы на общую сумму 15 210 000 рублей и дополнительные работы на общую сумму 1 181 756 рублей, всего на общую сумму 16 391 756 рублей, что подтверждается актами КС-2 и справками КС-3.

Акт КС-2 № 3 и  справка КС-3 № 2 от 12.02.2021 о выполнении дополнительных работ по договору на общую сумму 1 181 756 рублей не подписаны заказчиком ООО «Ника плюс», вместе с тем факт их выполнения истцом подтверждается комиссионным актом от 09.11.2020 о необходимости производства дополнительных объемов работ по договору и актом по приемке в эксплуатацию объектов капитального ремонта жилищного фонда и мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.03.2021 № 1.

Ответчик договорные обязательства по оплате выполненных истцом работ не исполнил.

О необходимости погашения задолженности в заявленном размере истцом в адрес ответчика направлена досудебная претензия от 09.04.2021 Исх № 026.

Наличие и сумма задолженности подтверждается материалами дела, ответчиком не оспорены, в связи с чем суд находит обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование заявленных требований в порядке ч. 3 ст. 70 АПК РФ доказанными и взыскивает с ответчика в пользу истца 16 391 756 рублей задолженности по оплате выполненных по договору работ.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат возмещению судебные расходы по оплате государственной пошлины.

В соответствии со ст. 177 АПК РФ в редакции, действующей с 19.06.2020, решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

В случае, если решение выполнено только на бумажном носителе, арбитражный суд направляет копии решения лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия решения заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает им под расписку.

Настоящее решение изготовлено в форме электронного документа, участвующие в деле лица о возбуждении производства по настоящему делу уведомлены, информация о движении дела размещена на сайте суда, в связи с чем настоящее решение суда подлежит размещению на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня его принятия и направлению сторонам не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного  процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ника плюс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Хинэкс» 16 391 756 рублей задолженности по договору на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов от 29.09.2020 № 70 и 2 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 16 393 756 (шестнадцать миллионов триста девяносто три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ника плюс» в федеральный бюджет 102 959 (сто две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья                                                                             О. А. Портнова