Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(мотивированное)

Дело № А56-26862/2022

15 июня 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Решение в виде резолютивной части принято 19 мая 2022 года. Мотивированное решение составлено 15 июня 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Рагузиной П.Н.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (197227, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ ВН.ТЕР.Г., ГАККЕЛЕВСКАЯ УЛ., Д. 21, ЛИТЕРА А, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «ВЭлСи» (150044, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ Г.О., ЯРОСЛАВЛЬ Г., ЯРОСЛАВЛЬ Г., ПОЛУШКИНА РОЩА УЛ., Д. 16, СТР. 78А, ПОМЕЩ. 4, ОГРН: 

<

***>

без вызова сторон

установил:

Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ВЭлСи» о взыскании 23279 руб. 34 коп. неустойки на основании договора от 14.12.2020 №20-16883. 

Дело было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства на основании главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Ответчик представил отзыв.

Истец представил возражения на отзыв.

Решение в виде резолютивной части принято 19.05.2022.

От ответчика в суд поступило заявление о составлении мотивированного решения.

От ответчика также поступила апелляционная жалоба на данное решение.

В соответствии со статьей 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Как следует из материалов дела, ПАО «Россети Ленэнерго» и ООО «ВЭлСи» заключили договор на выполнение ремонтных работ от 14.12.2020 № 20-16883.

В соответствии с пунктом 5.1.2 договора окончание выполнения работ: не позднее 18.07.2021.

Как указал истец, подрядчик сдавал работы с нарушением срока, что подтверждается Актом от 04.05.2021 на сумму 685 745 руб. 38 коп., Актом от 04.05.2021 на сумму 685 745 руб. 41 коп., Актом от 01.07.2021 на сумму 142 830 руб. 72 коп., Актом от 01.07.2021 на сумму 108 752 руб. 03 коп., Актом от 10.12.2021 на сумму 1 151 017 руб. 98 коп.

В соответствии с пунктом 9.1 договора за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, заказчик имеет право начислить подрядчику (как в полной сумме, так и частично) пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х (трех) месяцев со дня нарушения подрядчиком условий договора.

Объем работ, выполненных с нарушением срока, составляет 1 151 017 руб. 98 коп. 

Ответчик представил отзыв на исковое заявление.

Доводы ответчика опровергаются пояснениями и доказательствами истца.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по государственной пошлине относятся на ответчика и взыскиваются в пользу истца

Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВЭлСи» в пользу публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» 23279 руб. 34 коп. неустойки и 2000 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

   Судья Рагузина П.Н.