И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-207890/24-89-877

г. Москва

10 февраля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 10.12.2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 10.02.2025 года

Арбитражный суд в составе судьи О.А. Акименко,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Успуном Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.11.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 771401001, 125167, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 49/2), Д. 14, К. 1) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРСЕРВИС" (Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.02.2008, ИНН: 

<

***>, КПП: 772201001, 111024, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, Д. 50, СТР. 2, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. XI, КОМ. 25, ОФИС А04) о взыскании 5 169 013, 60 руб.

при участии:

от истца: ФИО1 по дов. от 01.01.2024 г.;

от ответчика: ФИО2 по дов. от 11.01.2024 г., ФИО3 по дов. от 06.05.2024 г.;

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании неустойки по контракту №0373100015723000307 от 22.12.2023 в размере 5 169 013 руб. 60 коп.  

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

Представитель истца требования поддержал. 

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам. 

Согласно доводам искового заявления, между По результатам открытого аукциона в электронной форме 22 декабря 2023 г. между Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) (далее – Заказчик, Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Горсервис» (далее – Подрядчик, Ответчик), совместно именуемые Стороны, заключен Контракт № 0373100015723000307 на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерного оборудования систем вентиляции, систем холодоснабжения, VRF/VRV мультизональных и сплит-систем кондиционирования воздуха, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, электрооборудования (электрощитовых и вводно-распределительных устройств, АВР серверной и крышных информационных конструкций), а также поверка (калибровка) приборов учета тепловой энергии, воды, контрольно-измерительных приборов в зданиях Финансового университета (далее – Контракт), идентификационный код закупки 231771408642277140100100013400000000.

По условиям вышеуказанного Контракта Подрядчик, руководствуясь законодательством Российской Федерации, обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по техническому обслуживанию инженерного оборудования систем вентиляции, систем холодоснабжения, VRF/VRV мультизональных и сплит-систем кондиционирования воздуха, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, электрооборудования (электрощитовых и вводно-распределительных устройств, АВР серверной и крышных информационных конструкций), а также осуществить поверку (калибровку) приборов учета тепловой энергии, воды, контрольно-измерительных приборов в зданиях Финансового университета, в соответствии с требованиями Контракта, в порядке и сроки, установленные в Техническом задании, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в порядке и сроки, установленные Контрактом.

В соответствии с п. 3.1 Контракта общая стоимость Работ в соответствии Приложением № 1 «Таблица цен» к Контракту составляет 54 674 232 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи двести тридцать два) рубля 00 копеек.

Согласно п. 5.1 Контракта Предусмотренные Контрактом Работы выполняются поэтапно. При этом этап равен 1 (одному) календарному месяцу. Стоимость и сроки сдачи этапов определены Приложением №1. к Контракту. Согласно Техническому заданию (Приложение №2 к Контракту), часть работ проводится единожды за все время исполнения согласно графику исполнения, часть работ производится периодически.

05.02.2024 г. Подрядчик направил Заказчику посредством ЕИС подписанный Документ о приемке за Работы, выполненные в январе 2024 года (с учетом Исправлений № 1 от 26.02.2024 и Исправлений № 2 от 13.03.2024).

Заказчик принял часть Работ за январь 2024 года в фактически выполненном объеме, соответствующем требованиям Контракта, а в остальной части отказал в приемке, направив посредством ЕИС мотивированный отказ с перечнем не устраненных Подрядчиком замечаний:

№ п/п

Наименование объекта закупки

Ед. изм.

Кол-во по Контракту

Кол-во по факту

Кол-во не выполненных

работ

1

Техническое обслуживание инженерного оборудования вытяжной системы вентиляции

шт

275

172

103

2

Техническое обслуживание инженерного оборудования приточной системы вентиляции

шт

130

77

53

3

Техническое обслуживание тепловых завес

шт

62

48

14

4

Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха (серверные)

шт

54

33

21

5

Техническое обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Еженедельное техническое обслуживание (ТО-2), 4 раза в месяц

шт

72

11

61

6

Техническое обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3)

шт

18

11

7

7

Техническое обслуживание электрощитовых

шт

49

28

21

8

Техническое обслуживание крышных информационных конструкций

шт

2

1

1

9

Техническое обслуживание АВР серверной, включая схему электропитания.

шт

1

1

0

10

Поверка приборов учёта тепловой энергии в комплекте, январь (2024- 1)

шт

1

1

0

Таким образом, Подрядчик не полностью выполнил Работы за январь в объеме, предусмотренном Контрактом.

Согласно результатам экспертизы по 1 этапу, а также счетам, предъявленным Подрядчиком и УПД, подписанному сторонами работы по 1 этапу были выполнены на сумму 660 635 (Шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать пять) 21 коп. Согласно платежному поручению № 610707 от 27.03.2024, указанная сумма была выплачена Подрядчику в полном объёме.

В соответствии с п. 6.1.5. Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее - Правила). Штраф, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1.6 - 6.1.8 Контракта, определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены этапа в случае, если цена этапа не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Цена 1 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 184 450,45 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 184 450,45 руб.*10% = 118 445,05 руб.

В соответствии с п. 5.3. Контракта Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня завершения соответствующего этапа выполнения Работ обязан сформировать с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и разместить в ЕИС Документ о приемке.

В соответствии с п. 5.7. Контракта в случае наличия в заключении, подготовленном по результатам проведения экспертизы, нарушений требований Контракта, препятствующих приемке результатов выполненных Работ, либо наличия замечаний к сведениям, содержащимся в Документе о приемке, и/или к содержанию (оформлению) приложенных к Документу о приемке документам, которые считаются его неотъемлемой частью, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения проведения экспертизы, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания Документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и в срок не более 5 (пяти) рабочих дней повторно направить Заказчику документы, указанные в пункте 5.3 настоящего раздела, либо мотивированный отказ от устранения выявленных недостатков с указанием причин такого отказа.

В соответствии с актом проверки устранения недостатков в установленный срок ООО «Горсервис» по контракту от 22 декабря 2023 года № 0373100015723000307 «На выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерного оборудования систем вентиляции, систем холодоснабжения, VRF/VRV мультизональных и сплит-систем кондиционирования воздуха, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, электрооборудования (электрощитовых и вводно-распределительных устройств, АВР серверной и крышных информационных конструкций), а также поверка (калибровка) приборов учета тепловой энергии, воды, контрольно-измерительных приборов в зданиях Финансового университета» недостатки, указанные Подрядчику для устранения в установленный срок не устранены.

Таким образом, Подрядчик не выполнил обязательство, предусмотренное п. 5.7. Контракта и не устранил недостатки, указанные Заказчиком при направлении Исправления № 1 от 26.02.2024 к Документу о приемке № 240131016.

В соответствии с п. 6.1.6. Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Расчет суммы штрафа: 

1*10000,00 руб. = 10000,00 руб.

Общая сумма начисленной неустойки по 1 этапу составляет 128 445 (Сто двадцать восемь тысяч четыреста сорок пять) руб. 05 коп., исходя из расчета:

118 445,05 руб. + 10 000,00 руб.= 128 445, 05 руб.

05.03.2024 г. Подрядчик направил Заказчику посредством ЕИС подписанный Документ о приемке № 240229003 за Работы, выполненные в феврале 2024 года (с учетом Исправлений № 1 от 18.03.2024).

Заказчик принял часть Работ за февраль 2024 года в фактически выполненном объеме, соответствующем требованиям Контракта, а в остальной части отказал в приемке, направив посредством ЕИС мотивированный отказ с перечнем не устраненных Подрядчиком замечаний:

№ п/п

Наименование объекта закупки

Ед. изм.

Кол-во по Контракту

Кол-во по факту

Кол-во не выполненных

работ

1

Техническое обслуживание инженерного оборудования вытяжной системы вентиляции

шт

275

185

90

2

Техническое обслуживание инженерного оборудования приточной системы вентиляции

шт

130

72

58

3

Техническое обслуживание тепловых завес

шт

62

33

29

4.

Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха (серверные)

шт

54

0

54

5

Техническое обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Еженедельное техническое обслуживание (ТО-2), 4 раза в месяц

шт

72

39

33

6

Техническое обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3)

шт

18

8

10

7

Техническое обслуживание электрощитовых

шт

49

49

0

8.

Техническое обслуживание крышных информационных конструкций

шт

2

0

2

9.

Техническое обслуживание АВР серверной, включая схему электропитания.

шт

1

0

1

10

Поверка приборов учёта тепловой энергии в комплекте, февраль (2024- 1)

шт

1

1

0

Таким образом, Подрядчик не полностью выполнил Работы за февраль в объеме, предусмотренном Контрактом.

Согласно результатам экспертизы по 2 этапу, а также счетам, предъявленным Подрядчиком и УПД, подписанному сторонами работы по 2 этапу были выполнены на сумму 641 198 (Шестьсот сорок одна тысяча сто девяносто восемь) 33 коп. Согласно платежному поручению № 610702 от 27.03.2024, указанная сумма была выплачена Подрядчику в полном объёме.

В соответствии с п. 6.1.5. Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее - Правила). Штраф, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1.6 - 6.1.8 Контракта, определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены этапа в случае, если цена этапа не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Цена 2 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 149 742.29 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 149 742,29 руб.*10% = 114 974,23 руб.

Общая сумма начисленной неустойки по 2 этапу составляет 114 974 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб. 23 коп.

03.04.2024 г. Подрядчик направил Заказчику посредством ЕИС подписанный Документ о приемке № 240331010 за Работы, выполненные в марте 2024 года (с учетом Исправлений № 1 от 08.04.2024).

Заказчик принял часть Работ за март 2024 года в фактически выполненном объеме, соответствующем требованиям Контракта, а в остальной части отказал в приемке, направив посредством ЕИС мотивированный отказ с перечнем не устраненных Подрядчиком замечаний:

№ п/п

Наименование объекта закупки

Ед. изм.

Кол-во по Контракту

Кол-во по факту

Кол-во не выполненных

работ

1

Техническое обслуживание инженерного оборудования вытяжной системы вентиляции

шт

275

189

86

2

Техническое обслуживание инженерного оборудования приточной системы вентиляции

шт

130

85

45

3

Техническое обслуживание тепловых завес

шт

62

0

62

4.

Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха (серверные)

шт

54

8

46

5

Техническое обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Еженедельное техническое обслуживание (ТО-2), 4 раза в месяц

шт

72

35

37

6

Техническое обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3)

шт

18

10

8

7

Техническое обслуживание электрощитовых

шт

49

34

15

8.

Техническое обслуживание крышных информационных конструкций

шт

2

2

0

9.

Техническое обслуживание АВР серверной, включая схему электропитания.

шт

1

0

1

10

Испытание электрооборудования с оформлением технического отчета, март (2024-1)

шт

1

0

1

Таким образом, Подрядчик не полностью выполнил Работы за март в объеме, предусмотренном Контрактом.

Согласно результатам экспертизы по 2 этапу, а также счетам, предъявленным Подрядчиком и УПД, подписанному сторонами работы по 2 этапу были выполнены на сумму 575 738 (Пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать восемь) 28 коп. Согласно платежному поручению № 819079 от 17.04.2024, указанная сумма была выплачена Подрядчику в полном объёме.

Цена 3 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 118 504,95 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 118 504,95 руб.*10% = 111 850,50 руб.

Общая сумма начисленной неустойки по 3 этапу составляет 111 850 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб. 50 коп.

Вышеуказанные факты послужили основанием для принятия Заказчиком решения об отказе в одностороннем порядке от исполнения Контракта.

Согласно п. 8.6 Контракта любая из Сторон Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Таким образом, основания для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения обязательств по Контракту предусмотрены как Гражданским кодексом Российской Федерации, так и самим Контрактом.

Принимая во внимание, изложенное выше, и то, что на момент вынесения принятия решения, нарушения условий Контракта не были устранены Подрядчиком, Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от договора.

08 апреля 2024 г. Заказчик с использованием единой информационной системы сформировал решение о расторжении контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения и разместил данное решение в единой информационной системе (далее – ЕИС).

Надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44 – ФЗ такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик. 

19 апреля 2024 года решение Заказчика об одностороннем отказе от Контракта вступило в силу (10 дней от даты надлежащего уведомления).

Соответственно, работы, предусмотренные этапами 4-36 Подрядчиком не выполнялись. 

Цена 4 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 775 877,63 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 775 877,63 руб.*10% = 177 587,76 руб.

Цена 5 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 706 045,31 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 706 045,31 руб.*10% = 170 604,53 руб.

Цена 6 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 3 021 621,81 руб., таким образом размер штрафа составляет 5 % от цены этапа.

5 % цены этапа: 3 021 621,81 руб.*5% = 151 081,09 руб.

Цена 7 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 507 237,29 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 507 237,29 руб.*10% = 150 723,73 руб.

Цена 8 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 2 279 145,90 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 2 279 145,90 руб.*10% = 227 914,59 руб.

Цена 9 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 118 504,95 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 118 504,95 руб.*10% = 111 850,50 руб.

Цена 10 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 184 450,54 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 184 450,54 руб.*10% = 118 445,05 руб.

Цена 11 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 187 921,27 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 187 921,27 руб.*10% = 118 792,13 руб.

Цена 12 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 118 504,95 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 118 504,95 руб.*10% = 111 850,50 руб.

Цена 13 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 118 504,95 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 118 504,95 руб.*10% = 111 850,50 руб.

Цена 14 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 083 796,79 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 083 796,79 руб.*10% = 108 379,68 руб.

Цена 15 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 146 271,47 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 146 271,47 руб.*10% = 114 627,15 руб.

Цена 16 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 737 698,65 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 737 698,65 руб.*10% = 173 769,87 руб.

Цена 17 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 674 807,97 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 674 807,97 руб.*10% = 167 480,80 руб.

Цена 18 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 3 146 571,17 руб., таким образом размер штрафа составляет 5 % от цены этапа.

5 % цены этапа: 3 146 571,17 руб.*5% = 157 328,56 руб.

Цена 19 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 507 237,29 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 507 237,29 руб.*10% = 150 723,73 руб.

Цена 20 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 2 310 383,24 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 2 310 383,24 руб.*10% = 231 038,32 руб.

Цена 21 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 149 742.29 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 149 742,29 руб.*10% = 114 974,23 руб.

Цена 22 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 083 796,79 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 083 796,79 руб.*10% = 108 379,68 руб.

Цена 23 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 153 213,11 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 153 213,11 руб.*10% = 115 321,31 руб.

Цена 24 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 118 504,95 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 118 504,95 руб.*10% = 111 850,50 руб.

Цена 25 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 153 213,11 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 153 213,11 руб.*10% = 115 321,31 руб.

Цена 26 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 083 796,79 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 083 796,79 руб.*10% = 108 379,68 руб.

Цена 27 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 156 683,95 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 156 683,95 руб.*10% = 115 668,40 руб.

Цена 28 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 775 877,63 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 775 877,63 руб.*10% = 177 587,76 руб.

Цена 29 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 633 158,17 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 633 158,17 руб.*10% = 163 315,82 руб.

Цена 30 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 2 986 913,64 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 2 986 913,64 руб.*10% = 298 691,36 руб.

Цена 31 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 510 708,11 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 510 708,11 руб.*10% = 151 070,81 руб.

Цена 32 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 2 313 854,06 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 2 313 854,06 руб.*10% = 231 385,41 руб.

Цена 33 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 153 213,11 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 153 213,11 руб.*10% = 115 321,31 руб.

Цена 34 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 083 796,79 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 083 796,79 руб.*10% = 108 379,68 руб.

Цена 35 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 156 683,93 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 156 683,93 руб.*10% = 115 668,39 руб.

Цена 36 этапа Контракта в соответствии с Таблицей цен (Приложение № 1 к Контракту) составляет 1 083 796,79 руб., таким образом размер штрафа составляет 10 % от цены этапа.

10 % цены этапа: 1 083 796,79 руб.*10% = 108 379,68 руб.

Таким образом, общий размер неустойки (штрафа), начисленный по всем этапам Контракта, составляет 5 169 013 (Пять миллионов сто шестьдесят девять тысяч тринадцать) руб. 60 коп.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд. 

Удовлетворяя требования в части, суд руководствуется положениями ст. 8, 10, 12, 307-310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее. 

Проверив представленные в материалы дела доказательства, а также расчеты истца, положенные в обоснование суммы заявленных требований, судом установлено, что расчеты истца выполнены методологически и арифметически не верно ввиду следующего. 

19 апреля 2024 года решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в силу.

В рамках заявленных исковых требований Истцом рассчитан штраф за неисполнение всех этапов по Контракту.

В связи с вступление в законную силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта после 19 апреля 2024 у Подрядчика прекратилось обязательство по выполнению работ, в силу п. 3 ст. 425 ГК РФ. Поэтому за пределами этого срока неустойка не может быть начислена.

Таким образом, начисление штрафов за невыполнение работ, предусмотренных этапами 4-36 Контракта, является незаконным и не подлежит удовлетворению.

Частью 8 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Как следует из правовой позиции, приведенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 N 5467/14 по делу N А53-10062/2013, неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации также указал, что начисление неустойки на общую сумму контракта без учета надлежащего исполнения части выполненных и принятых работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному п. 1 ст. 1 ГК РФ, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом. Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.

Таким образом, при расчете неустойки, предъявленной к взысканию, Заказчику необходимо исключить работы, выполненные надлежащим образом.

05.02.2024 Исполнитель направил Заказчику посредством Единой информационной системы (далее — ЕИС) подписанный Документ о приемке № 240131016 за Работы, выполненные в январе 2024 в объеме на общую сумму 454 398, 92 руб.

05.03.2024 Подрядчик направил Заказчику посредством ЕИС подписанный Документ о приемке № 240229003 за Работы, выполненные в феврале 2024 в объеме на общую сумму 473 835, 80 руб.

Только за январь 2024 года и февраль 2024 года Заявитель выполнил работы в объеме на сумму 928 234,72 руб.

31.03.2024 годя между Заявителем и заказчиком был подписан Документ о приемке № 240331010 за Работы, выполненные в марте 2024 в объеме на общую сумму 575 738, 28 руб.

Согласно Приложению 1 «Таблица цен» к Контракту этапность и цена определены следующим образом.

Дата начала исполнения этапа

Дата окончания исполнения этапа

Цена этапа

01.01.2024

15.03.2024

1 184 450.45 руб.

01.02.2024

12.04.2024

1 149 742.29 руб.

Дата расторжения

19.04.2024

Стоимость работ выполненных за период с 01.01.2024 по 31.03.2024

1 503 973 руб.

Стоимость работ, невыполненных к дате расторжения

(1 184 450, 45 + 1 149 742, 29) - 1503 973 =

830 219,74 руб.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца к ответчику в части неустойки на сумму 830 219 руб. 74 коп.

В остальной части требований суд отказывает. 

Оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ учитывая не верный расчет неустойки, произведенный истцом, судом не установлено. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в части.  

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании статей 8, 10, 12, 307-310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРСЕРВИС" (ИНН: 

<

***>) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 830 219, 74 руб., госпошлину в размере 7 845, 23 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.А. Акименко