АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина 76, тел. 61-92-78  http://www.altai-krai.arbitr.ru е-mail: а03.info@arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть)

Дело № А03-6006/2017

г. Барнаул

09 июля 2018 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело  

-по иску общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр  Витотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Новотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 613 358 руб.  79 коп. долга, 65 138 руб. 70 коп. неустойки, взыскании с 14 июня 2018г. неустойки до дня  исполнения денежного обязательства, 18 168 руб. расходов по оплате государственной  пошлины,  

- по иску общества с ограниченной ответственностью «Новотех», г. Барнаул (ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Инженерный центр  Витотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 57 065 руб. неустойки за период  с 30 августа 2016г. по 21 декабря 2016г. за нарушение срока выполнения монтажных и  пусконаладочных работ, 175 602 руб. неустойки за период с 09 января 2016г. по 26  октября 2016г. за нарушение срока поставки оборудования, 34 833 руб. убытков,  

- по иску общества с ограниченной ответственностью «Новотех», г. Барнаул (ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Инженерный центр  Витотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) об истребовании документов,  

при участии представителей сторон: от истца: ФИО2 (доверенность, паспорт), от ответчика: Коренная А.А. (доверенность, паспорт), 

На основании статей 309, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137,  пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края   

Р Е Ш И Л :

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью  «Инженерный центр Витотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Новотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о  взыскании 613 358 руб. 79 коп. долга, 68 328 руб. 17 коп. неустойки за период с 30  декабря 2016г. по 09 июля 2018г., 24 000 руб. расходов по оплате экспертизы, 16 634 руб.  расходов по оплате государственной пошлины.  

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью  «Новотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Инженерный центр Витотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о  взыскании 164 067 руб. 92 коп. неустойки за нарушение срока поставки оборудования за  период 12 января 2016г. по 09 сентября 2016г., 51 870 руб. неустойки за нарушение срока  монтажа и пусконаладочных работ за период с 30 августа 2016г. по 21 декабря 2016г.,  12 740 руб. 12 коп. расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречного иска о взыскании имущественных  требований в виде убытков и неустойки отказать.  

В результате зачета первоначальных и встречных имущественных требований  взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новотех», г. Барнаул (ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр  Витотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) 425 314 руб. 75 коп. долга, 68 328 руб. 17  коп. неустойки за период с 30 декабря 2016г. по 09 июля 2018г.  

Взыскивать с общества с ограниченной ответственностью «Новотех», г. Барнаул  (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инженерный центр Витотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>), начиная с 10 июля  2018г. неустойку за нарушение срока оплаты работ по ставке 0,02% за каждый день  просрочки, начисляемую на сумму оставшегося не оплаченным долга до дня исполнения  обязательства по оплате долга.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр  Витотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) передать обществу с ограниченной  

ответственностью «Новотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) в течение 10 дней со дня  вступления решения суда в законную силу следующую документацию:  

-строительный паспорт надземного газопровода, построенного ООО «ИЦ Витотех»  «Газовая котельная, мощностью 1,5 МВт для теплоснабжения административного здания  по ул. Партизанская, 187 в г. Барнауле»;  

-акт проведения входного контроля качества материалов и оборудования на  объекте: «Газовая котельная, мощностью 1,5 МВт для теплоснабжения  административного здания по ул. Партизанская, 187 в г. Барнауле»;  

-протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом № 60  от 28 июля 2016г., выполненной ООО «Алтайдиагностика»;  

-протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 60  от 16 июля 2017., выполненных ООО «Алтайдиагностика»;  

-протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 60/1  от 15 июля 2017г., выполненных ООО «Алтайдиагностика»;  

-строительный паспорт подземного (надземного) газопровода (ввода) «Газовая  котельная, мощностью 1,5 МВт для теплоснабжения административного здания по ул.  Партизанская, 187 в г. Барнауле»;  

-протокол № 171 проверки (испытаний) электроустановки; 

-результаты проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств, от  26 сентября 2016г., выполненной ООО «Элсервис ЛТД»;  

-результаты проверки наличия цепи между заземлителями и заземляющими  устройствами от 26 сентября 2016г., выполненные ООО «Элсервис ЛТД»;  

-акт проведения проверки входного контроля качества материалов и оборудования  на объекте «Газовая котельная, мощностью 1,5 МВт для теплоснабжения  административного здания по ул. Партизанская, 187 в г. Барнауле»;  

-протокол механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода   № 48 от 01 августа 2016г., выполненных ООО «Алтайдиагностика»;  

-протокол механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода   № 49 от 01 августа 2016г., выполненных ООО «Алтайдиагностика»;  

-протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 57  от 01 августа 2016г., выполненных ООО «Алтайдиагностика»;  

-протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 80  от 01 августа 2016г., выполненных ООО «Алтайдиагностика»;  

-протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом № 61  от 16 августа 2016г., выполненной ООО «Алтайдиагностика»;  

-протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом №  61/1 от 17 августа 2016г., выполненной ООО «Алтайдиагностика»;  

-протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом №  81/1 от 01 августа 2016г., выполненной ООО «Алтайдиагностика»;  

-техническое описание котла Lamborghini Mega Prex; -технический отчет по пусконаладочным работам без приложений. 

Производство по иску в части истребования общего журнала работ № 1, журнала  сварочных работ № 1, договора № 87К от 15 июля 2016г., письма от 11 августа 2016г.,  протокола № 11 заседания аттестационной комиссии прекратить в связи с отказом истца  от иска.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Новотех», г. Барнаул  (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 3 909 руб. государственной пошлины,  уплаченной по платежному поручению № 15 от 22 января 2018г.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Инженерный центр  Витотех», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 1 534 руб.  государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 8 от 14 февраля  2017г.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.Н. Пашкова