ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело  №А40-302772/23-114-649

г. Москва

31 мая 2024 года

резолютивная часть решения объявлена 13 мая 2024 года

полный текст решения изготовлен 31 мая 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы

в составе судьи Тевелевой Н.П.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ивановой Д.А.,

при участии: по протоколу  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Федеральная служба войск национальной гвардии РФ  (ИНН: 

<

***>)

к ответчику ООО «СТЦ» (ИНН: 

<

***>)

о взыскании 14 453 085 руб. 70 коп.

УСТАНОВИЛ:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее – Истец, Росгвардия, Заказчик) обратился в суд с требованием к ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (далее – Ответчик, Поставщик) о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 29.09.2022г. по 09.11.2023г. в размере 5 976 435 руб. 70 коп., пени за период с 01.07.2023г. по 24.10.2023г. в размере 7 803 900 руб., штрафа в размере 672 750 руб., в связи с нарушением обязательств по государственному контракту № 222318020395200

<

***>/0195400000222000254 от 05.09.2022г.

Стороны поддержали свои правовые позиции. 

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, заслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии обоснованности требований истца в виду следующего.

Как следует из материалов дела, 05.09.2022г. Росгвардия (Заказчик) и ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (Поставщик) заключили государственный контракт № 222318020395200

<

***>/0195400000222000254 на поставку мобильных комплексов технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам для нужд Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - Контракт).

В соответствии с п. 1.1 Контракта, поставщик обязуется поставить Товар, качество и технические характеристики, а также количество которого указаны в Спецификации поставляемого товара (Приложение № 2 к Контракту) (далее - Спецификация), в сроки и адрес Грузополучателя(лей), определенных в Разнарядке (Приложение № 1 к Контракту) (далее - Разнарядка), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом.

Контракт заключен в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно п. 1.2 Контракта, поставляемый Товар по своим функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, иным требованиям, предъявляемым Заказчиком к Товару, должен соответствовать требованиям Контракта, Спецификации, нормативно-технической документации на Товар.

Цена Контракта составила 134 550 000 руб.

В соответствии с п. 2.6 Контракта ответчику был выплачен аванс в размере 67 275 000 руб., что подтверждается платежными поручениями от 29.09.2022г. №569925 на сумму 46  025 400 руб., от 02.02.2023г. №552859 на сумму 21 249 600 руб.

В соответствии с п. 3.2 Контракта, срок исполнения Поставщиком обязательств по поставке всего объема Товара, предусмотренного Контрактом - по 30 июня 2023 года включительно (окончательный срок поставки Товара). Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата подписания Грузополучателем Акта о приемке.

На основании части 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В силу части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Пунктом 7.3 Контракта, предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня стечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени оставляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

Пунктом 7.4 Контракта, предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за включением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации г 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 0,5% цены Контракта.

Пунктом 2.8.1. Контракта предусмотрено, в случае расторжения Контракта по инициативе Поставщика или в связи с неисполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислении процентов за пользование чужими денежными средствами по правилам ст. 395 ГК РФ. Проценты начисляются начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующая части), по день поступления денежных средств на счет Заказчика; по инициативе Заказчика аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения соглашения о расторжении Контракта. 

Истец мотивирует настоящие требования тем, что Ответчик принятые на себя обязательства в установленные Контрактом сроки не исполнил, товар не поставил, Заказчик принял решение от 12.10.2023г. об одностороннем отказе от исполнения Контракта и начислил предусмотренные п. 7.3 и 7.4 Контракта пени и штраф, а также проценты в порядке ст. 395 ГК РФ.

Поскольку в добровольно порядке оплаты не последовало, истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В силу статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно положениям статьи 516 ГК РФ, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения.

Суд соглашается с доводами Ответчика в виду следующего.

В соответствии с частью 7 статьи 34 Закон № 44-ФЗ и п.7.3 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчикам, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени

В соответствии со статьей 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям Оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

На основании ч. 9 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Из анализа представленных документов установлено, что между сторонами заключен государственный контракт от 05.09.2022 № 222318020395200

<

***>/0195400000222000254  на  поставку  мобильных  комплексов технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам. 

Отношения сторон урегулированы положениями Федерального закона 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положениями общей части ГК РФ об обязательствах, главы 30 ГК РФ о купле-продаже в части, не урегулированной положениями названных законов, а также условиями Контракта. 

Контракт заключен с ООО «СТЦ» как с единственным поставщиком на основании п. 2 ч. 2 4 ст. 77 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), в связи с тем, что соответствующий закрытый аукцион в электронной форме был признан несостоявшимся.

В соответствии с п. 1.1. Контракта, Поставщик принимал на себя обязательства поставить 3 единицы Мобильного комплекса технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам, технические характеристики и количество которого указаны в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), а сроки и адрес Грузополучателя(лей), определены в Разнарядке (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязался принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом.

В связи с задержкой поставки комплектующих изделий, обусловленной нестабильной геополитической обстановкой, введёнными санкциями, а также нарушением логистических цепочек Ответчиком допущено нарушение срока поставки Товара. В этой связи ООО «СТЦ» обратилось в Росгвардию с письмом исх. № 2307/26-063ДО от 26.07.2023 о продлении срока поставки до 30.08.2023 года.

В ответ на данное обращение Росгвардия письмом исх. № 21/6386 от 17.08.2023 согласовала новый срок поставки - не позднее 30 августа 2023 года.

В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

Согласно п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса.

Пунктом 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» установлено, что акцепт, в частности, может быть выражен путем совершения конклюдентных действий до истечения срока, установленного для акцепта. В этом случае договор считается заключенным с момента, когда оферент узнал о совершении соответствующих действий, если иной момент заключения договора не указан в оферте и не установлен обычаем или практикой взаимоотношений сторон.

Следовательно, Истцом согласован измененный срок поставки по Контракту, о чем свидетельствуют конклюдентные действия, произведенные в результате исполнения обязательств сторонами.

В этой связи, новый предельный срок поставки Товара, согласованный сторонами, является 30 августа 2023 года. 

В силу положений п. 6.1.6 Контракта Истец вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 523 ГК РФ допускается односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) в случае существенного нарушения условий договора, в частности существенным нарушением со стороны поставщика предполагается неоднократное нарушение сроков поставки товара или поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый срок для покупателя.

Решением исх. от 09.10.2023 № 21/7763 «О принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта» Истец в одностороннем порядке отказался от обязательств по Контракту.

Письмом исх. от 12.10.2023 № 21/7893 Истец направил Ответчику уведомление об отзыве решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта исх. от 09.10.2023 № 21/7763.

Гражданский кодекс Российской Федерации в пункте 4 статьи 450.1 устанавливает презумпцию добросовестного поведения стороны, наделенной правом на односторонний отказ от исполнения договора. Вместе с тем, пункт 5 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что, если при наличии оснований для отказа от договора (исполнения договора) сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, последующий отказ по тем же основаниям не допускается.

Однако, не смотря на положения пункта 5 статьи 450.1 ГК РФ, Решением исх. от 12.10.2023 № 21/7894 «О принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта» Истец повторно отказался от исполнения контракта по тем же основаниями, что указаны в решении исх. от 09.10.2023 №21/7763.

Повторный отказ от исполнения Контракта противоречит положениям пункта 5 статьи 450.1 ГК РФ. 

Ответчик в срок, согласованный сторонами, произвел поставку Товаров, согласно условиям Контракта.

28.08.2023г. при проведении оценки соответствия Товаров Истцом составлен акт недостатков № 10 (далее - Акт недостатков).

Протоколом рабочего совещания от 08.09.2023 № РТК/16 по обсуждению вопросов выполнения государственного контракта на поставку комплексов «Страж», проведенного между сторонами, установлено:

1) Ответчику провести работу по устранению 13 недостатков, зафиксированных в Акте недостатков, организовать работу по определению независимой экспертной организации и проведению независимой экспертизы Мобильного комплекса технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам в целях подтверждения улучшения характеристик комплекса;

2) ДТП и УАВиР Росгвардии проработать вопрос по изменению некорректной формулировки требований 3 пунктов спецификации, отраженных в Акте недостатков, при поступлении экспертного заключения рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений с ООО «СТЦ».

Так, конструкторская документация на Мобильный комплекс технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам, которая разработана и подготовлена ООО «СТЦ» (Технические условия АЦИЕ.462715.041ТУ), и предполагала использование шасси на базе автомобиля «Ford Transit», между тем, с учетом существенно изменившимися обстоятельствами, использовать продукцию компании «Ford» не представляется возможным по объективным причинам.

Таким образом, главным «недостатком» по мнению истца, является то обстоятельство, что Мобильный комплекс технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам смонтирован на отечественном автомобильном шасси на базе автомобилей Горьковского автомобильного завода «GAZelle NEXT C45R02», имеющей практически идентичные характеристики по сравнению с шасси на базе автомобиля «Ford Transit». Под изменившееся шасси утверждена 13.10.2023 года обновленная конструкторская документация Технические условия АЦИЕ.462715.041ТУ.

Таким образом, изготовленный ООО «СТЦ» и предложенный к принятию Росгвардией Товар лишь в некоторых незначительных тонкостях отличается от первоначальных Технических условий АЦИЕ.462715.041 ТУ в части используемого автомобильного шасси, но при этом соответствует требованиям Контракта.

Ответчиком получено заключение эксперта № 264А23, согласно выводам которого следует, что технические характеристики транспортного средства, указанные в Контракте, не подходят ни к одному из транспортных средств, присутствующих на рынке, поставка транспортных средств, отвечающих требованиям, указанным в техническом задании невозможна. Предложенный вариант исполнения Ответчиком является лучшим возможным вариантом транспортного средства при исполнении обязательств, при этом изделие, изготовленное поставщиком, удовлетворяет требования к функциональным качествам, заявленным Контрактом.

Поставщик письмом исх. от 28.08.2023 №2308/28-23дсп «О поставке МКТС ПД БЛА» направил Заказчику уведомление о том, что в связи с недобросовестными действиями иностранных компаний, в том числе автопроизводителей, ушедших и прекративших деятельность на территории Российской Федерации, использование автомобиля производства Ford не представляется возможным.

Как следует из положений п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Ответчиком приняты все необходимые меры для исполнения обязательств, принятых по Контракту, однако ввиду беспрецедентных ограничительных мер, со стороны стран Европейского Союза и примкнувших к ним государств и международных организаций, возникли трудности, повлиявшие на сроки исполнения обязательств. Официальные дилеры сняли с продажи прекратили поставки на территорию Российской Федерации автомобили марки Ford, являющиеся составной частью поставляемых Товаров.

Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Верховный Суд Российской Федерации в п. 8 Постановления Пленума от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение исполнения обязательств» дал разъяснения о том, что требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.

Объективная невозможность использования автомобильного шасси на базе продукции зарубежного автоконцерна «Ford» из недружественной страны при изготовлении Товара, является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, которое невозможно спрогнозировать, преодолеть подобное поведение производителя автомобиля «Ford Transit», завершившего в октябре 2022 деятельность на территории Российской Федерации.

Также, Ответчик с 29 декабря 2016 года находится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц (список SDN), о чем издан указ президента США. Кроме того, Совет Европейского союза принял решение о сохранении ООО «СТЦ» в списке физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, указанные в Приложении к Решению Совета 2014/145/CFSP, с учетом поправок, внесенных Решением Совет (CFSP) 2023/5721, и Регламента Совета (ЕС № 269/2014), введенном в действие Исполнительным распоряжением Совета (ЕС № 2023/5712), касательно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Министерством финансов Российской Федерации в адрес Ответчика направлено уведомление от 29.06.2023 № 657дсп «О включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Министерства финансов Российской Федерации».

Таким образом, Ответчик не мог осуществить закупку автомобильного шасси на базе продукции зарубежного автоконцерна «Ford», в том числе и по механизму «параллельного импорта».

Ответчиком получено письмо исх. от 27.09.2023 № 21/7458, согласно которому технические характеристики и конструкторская документация на МКТС ПД БЛА должны соответствовать требованиям Контракта и нормативной технической документации.

Вместе с тем, согласно с п. 14 ст. 6.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» государственный заказчик обязан утвердить техническую документацию, необходимую для создания и серийного производства вооружения, военной и специальной техники, военного имущества.

Однако, вопреки установленным положениям Истцом не исполнены обязательства, установленные федеральным законом, что существенным образом повлияло на исполнение обязательств Ответчиком.

Согласно п. 1 ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Исходя из обстоятельств дела, обязанность Ответчика по поставке Мобильных комплексов технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам является встречной по отношению к обязанности Истца утвердить техническую документацию, необходимую для создания и серийного производства вооружения, военной и специальной техники, военного имущества.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 328 ГК РФ если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

В соответствии с п. 3 ст. 328 ГК РФ ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

С учетом изложенного, Ответчик не имел объективной возможности произвести монтаж на базе шасси автомобиля «Ford Transit», и в данном случае отсутствует просрочка исполнения обязательства на стороне Ответчика.

Согласно п. 1 ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

В соответствии с п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Таким образом, основания для начисления и уплаты пени отсутствуют, в связи с чем требование Истца не подлежит удовлетворению.

Также, не подлежат выплате проценты за пользование чужими денежными средствами. 

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Предусмотренные ст. 395 ГК РФ проценты подлежат взысканию лишь при наличии полного состава правонарушения, закрепленного в этой статье (Определение Верховного Суда РФ от 19.08.2011 № 78-В11-24, Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2011 № 78-В10-42, Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2011 № 78-В10-41, Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2009 № 14-В09-6, Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2008 № 70-В08-2).

При этом ответственность по ст. 395 ГК РФ наступает в случае противоправного пользования чужими денежными средствами, которые поступили должнику для целевого использования и реально находятся в его распоряжении. Учитывая обстоятельства исполнения Ответчиком обязательств, отсутствие вины, а также противоречивое и незаконное поведение Истца, противоправность, как элемент конструкции несения ответственности за пользование чужими денежными средствами отсутствует, что в свою очередь делает невозможным применение к Ответчику положений ст. 395 ГК РФ. (Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.1999 N° 3459/99, Постановление Президиума ВАС РФ от 25.02.1997 № 4296/96 по делу №Г-112/11).

В отношении требований о взыскании процентов за пользование авансовыми денежными средствами, ссылка Истца на положения п. 2.8 Контракта в качестве обоснования взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами несостоятельна, поскольку указанный пункт содержит только указание на возможность взыскания денежных средства за пользование, однако случаи и порядок раскрыты в подпунктах 2.8.1. - 2.8.3 Контракта.

Вместе с тем, положения п. 2.8.2. Контракта о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами по правилам ст. 395 ГК РФ имеют место в случае расторжения Контракта по инициативе Заказчика и проценты начисляются по истечение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения соглашения о расторжении Контракта. Соглашения о расторжении Контракта между сторонами не заключалось. Однако, платежными поручениями от 09.11.2023 № 99850 и № 99851 аванс по Контракту возвращен Ответчиком Истцу в полном объеме.

Таким образом, в процессе исполнения обязательств по Контракту Истцом выбрана неоднозначная и противоречивая тактика осуществления субъективных гражданских прав, при которой после наступления сроков поставки Истец согласует изменение условий поставки Товаров, а также принимает обязательства по устранению недостатков формулировок пунктов спецификации, что в совокупности является недобросовестным поведением, противоречит обычаям делового оборота, а также положениям п. 5 ст. 450.1 ГК РФ. Требования о взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами не основаны на нормах права и не подлежат удовлетворению по причине отсутствия вины в действиях Ответчика.

Суд также принимает во внимание, что Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере (далее - Комиссия) закупок решением по делу № 23/44/104/378 отказала Истцу во включении информации об Ответчике в реестр недобросовестных поставщиков, мотивируя свое решение тем, что ненадлежащее исполнение условий Контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Кроме того, Комиссией дана оценка тому факту, что Ответчиком представлены к приемке Товары незначительно отличающиеся от характеристик, указанных в технических условиях к Контракту, при этом функциональные качества соответствуют требованиям Контракта.

Соответственно, в действиях Поставщика, направленных на исполнение Контракта, отсутствовал умысел на ненадлежащее исполнение Контракта, а само ненадлежащее исполнение в виде нарушения срока поставки произошло по причине отсутствия на рынке шасси на безе автомобиля «Ford Transit», а неисполнение Контракта в целом - по причине необоснованного отказа Заказчика от исполнения Контракта.

При таких обстоятельствах Ответчик не может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Контрактам в виде уплаты неустойки на основании п.1 ст. 401 ГК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Частью 2 статьи 9 АПК РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Согласно требованиям ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Из совокупности исследованных доказательств, принимая во внимание отсутствие опровергающих, представленных ответчиком доказательств, суд приходит к выводу, что требования удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 10, 307, 309, 310, 329, 330,  401, 405, 450, 451, 506 , 523Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 65-71, 75, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Отказать в иске. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия.

Судья:                                                                                    Н.П.Тевелева