АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075  

http://fasuo.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ Ф09-2601/23 

Екатеринбург

30 июня 2023 г.

 

Дело № А34-20880/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2023 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 июня 2023 г. 

 

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Полуяктова А.С.,

судей Татариновой И.А., Тороповой М.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на решение Арбитражного суда Курганской области от 12.10.2022 по делу №А34- 20880/2021 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2023  по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа, явку представителей в судебное заседание не обеспечили. 

Государственное бюджетное учреждение «Курганская поликлиника № 2» (далее – учреждение  «Курганская поликлиника № 2») обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» (далее -  общество  «АПС ТЕХНОЛОДЖИ») о взыскании задолженности в сумме                              767 533 руб. 00 коп.

Определением от 04.04.2022 судом принято к производству встречное исковое заявление  общества  «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» к  учреждению  «Курганская поликлиника № 2» о взыскании задолженности по оплате фактически выполненных работ на сумму 1 007 410 руб. 80 коп.

Определением суда от 31.05.2022 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курганской области» (далее – учреждение  «УКС Курганской области»), общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Плюс» (далее также -  общество  «Комфорт Плюс»), индивидуальный предприниматель ФИО1.

Определением суда от 22.09.2022 выделено в отдельное производство из дела № А34-20880/2021 требование  общества  «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» к  учреждению  «Курганская поликлиника № 2» о взыскании задолженности по оплате фактически выполненных работ на сумму 1 007 410 руб. 80 коп., делу присвоен номер А34-15562/2022.

Решением Арбитражного суда Курганской области от 12.10.2022 исковые требования удовлетворены.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2023  решение суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе общество «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» просит   указанные судебные акты отменить,  принять по делу новое решение. По мнению, отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований, поскольку подрядчиком были выполнены дополнительные работы. Отсутствие дополнительного соглашения само по себе не доказывает факт отсутствия правоотношений по выполнению дополнительных работ между истцом и ответчиком. Заявитель ссылается на недоказанность условий возникновения неосновательного обогащения.

В отзыве на кассационную жалобу учреждение «Курганская поликлиника № 2» с доводами кассационной жалобы не согласно, считает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными. 

Как следует из материалов дела,  03.09.2021 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен контракт № П-ИМЗ-2021-003910-24  капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения  ГБУ  «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1), локальным сметным расчетом (приложение № 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения  ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 488 000 рублей 00 копеек, без НДС (подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика сумму аванса в размере 146 400 рублей 00 копеек на основании счета на оплату.

Оставшаяся часть в размере 341600 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса.

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 настоящего контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по контракту считается принятым заказчиком с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 настоящего контракта.

Учреждение «Курганская поликлиника № 2» платежным поручением от 2-092021 № 381880 перечислило  обществу «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003910-24.

Предусмотренные контрактом работы выполнены ответчиком на общую сумму 9806 руб., что подтверждается, подписанными сторонами без замечаний и возражений, справкой о стоимости выполненных работ и затрат  от 15.11.2021  № 1 в размере 9806 руб., а также актом о приемке выполненных работ  от 15.11.2021 № 1 в размере 9806 руб. 

Между сторонами 16.11.2021 подписано соглашение о расторжении контракта, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта общая стоимость фактически выполненных работ составила 9806 руб., НДС не облагается; с момента расторжения контракта стороны не считают себя связанными обязательствами по настоящему контракту, за исключением обязательств по возврату выплаченного заказчиком поставщику аванса в размере 136594 руб., НДС не облагается, уменьшенного на сумму выполненных работ по контракту; также сторонами обусловлено, что возврат аванса должен быть произведен поставщиком в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен контракт от  03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003912-25 капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ "Курганская поликлиника № 2" по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение N 1), локальным сметным расчетом (приложение N 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ "Курганская поликлиника № 2" по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 333 000 рублей 00 копеек, без НДС (подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***> рублей 00 копеек на основании счета на оплату.

Оставшаяся часть в размере 233100 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса.

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 настоящего контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по контракту считается принятым заказчиком с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 настоящего Контракта.

Учреждение  «Курганская поликлиника № 2» платежным поручением от 20.09.2021  № 381883 перечислило  обществу  «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003912-25.

Предусмотренные контрактом работы ответчиком не выполнены.

Между сторонами 29.11.2021 подписано соглашение о расторжении контракта, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта работы подрядчиком не выполнены в полном объеме; цена контракта при заключении составила 333000 руб., без НДС; в соответствии с п. 2.3 контракта заказчиком на расчетный счет подрядчика был перечислен аванс в размере 30% от суммы контракта в размере 

<

***> руб., НДС не облагается, на основании счета на оплату, возврат заказчику выплаченного по контракту аванса должен быть произведен подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) 03.09.2021 заключен контракт № П-ИМЗ-2021-003913-26  капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ "Курганская поликлиника N 2" по адресу: 

<

...> в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение N 1), локальным сметным расчетом (приложение N 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ "Курганская поликлиника N 2" по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 353 рублей 00 копеек, без НДС (подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по Контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***> рублей 00 копеек на основании счета на оплату.

Оставшаяся часть в размере 247100 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса.

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 настоящего контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 настоящего Контракта.

Учреждение  «Курганская поликлиника № 2» платежным поручением от 20092021 № 381882 перечислило  обществу  «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003913-26.

Предусмотренные контрактом работы выполнены ответчиком на общую сумму 16314 руб., что подтверждается, подписанными сторонами без замечаний и возражений, справкой о стоимости выполненных работ и затрат  от 08.11.2021 № 1  в размере 16314 руб., а также актом о приемке выполненных работ от 08.11.2021 № 1 в размере 16314 руб. 

Между сторонами 16.11.2021 подписано соглашение о расторжении контракта № П-ИМЗ-2021-003913-26, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта общая стоимость фактически выполненных работ составила 16314 руб., НДС не облагается; с момента расторжения контракта стороны не считают себя связанными обязательствами по настоящему контракту, за исключением обязательств по возврату выплаченного заказчиком поставщику аванса в размере 89586 руб., НДС не облагается, уменьшенного на сумму выполненных работ по контракту; также сторонами обусловлено, что возврат аванса должен быть произведен поставщиком в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) 03.09.2021 заключен контракт № П-ИМЗ-2021-003914-27 капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ "Курганская поликлиника N 2" по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение N 1), локальным сметным расчетом (приложение N 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ "Курганская поликлиника N 2" по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 288000 рублей 00 копеек, без НДС (подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика сумму аванса в размере 

<

***> рублей 00 копеек на основании счета на оплату.

Оставшаяся часть в размере 201600 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса.

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 настоящего контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 настоящего Контракта.

Учреждение «Курганская поликлиника № 2»  платежным поручением от 20.09.2021  №  381881 перечислило  обществу  «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003914-27.

Предусмотренные контрактом работы ответчиком не выполнены.

Между сторонами 29.11.2021 подписано соглашение о расторжении контракта № П-ИМЗ-2021-003914-27, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта работы подрядчиком не выполнены в полном объеме; цена контракта при заключении составила 288000 руб., без НДС; в соответствии с п. 2.3 контракта заказчиком на расчетный счет подрядчика был перечислен аванс в размере 30% от суммы контракта в размере 

<

***> руб., НДС не облагается, на основании счета на оплату, возврат заказчику выплаченного по контракту аванса должен быть произведен подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) 03.09.2021 заключен контракт № П-ИМЗ-2021-003979-28 капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ "Курганская поликлиника N 2" по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение N 1), локальным сметным расчетом (приложение N 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ "Курганская поликлиника N 2" по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 488000 рублей 00 копеек, без НДС (подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика сумму аванса в размере 

<

***> рублей 00 копеек на основании счета на оплату.

Оставшаяся часть в размере 341600 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса.

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 настоящего контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по контракту считается принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта.

Учреждение «Курганская поликлиника № 2» платежным поручением от 20.09.2021  №  381884 перечислило  обществу  «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003979-28.

Предусмотренные контрактом работы ответчиком не выполнены.

Между сторонами 29.11.2021 подписано соглашение о расторжении контракта № П-ИМЗ-2021-003979-28, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта работы подрядчиком не выполнены в полном объеме; цена контракта при заключении составила 488000 руб., без НДС; в соответствии с п. 2.3 контракта заказчиком на расчетный счет подрядчика был перечислен аванс в размере 30% от суммы контракта в размере 

<

***> руб., НДС не облагается, на основании счета на оплату, возврат заказчику выплаченного по контракту аванса должен быть произведен подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) 24.09.2021 заключен контракт № П-ИМЗ-2021-004459-500 капитальный ремонт помещения отделения ГБУ "Курганская поликлиника N 2", расположенных по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение N 1), локальным сметным расчетом (приложение N 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ "Курганская поликлиника N 2" по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 375000 рублей 00 копеек, без НДС (подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по Контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***> рублей 00 копеек на основании счета на оплату.

Оставшаяся часть в размере 262500 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса.

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по контракту считается принятым заказчиком с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 настоящего Контракта.

Учреждение  «Курганская поликлиника № 2» платежным поручением от 06.10.2021  № 484806 перечислило  обществу  «АПС ТЕХНОЛОДЖИ»  на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт от 24.09.2021 № П-ИМЗ-2021-004459-500.

Предусмотренные контрактом работы выполнены ответчиком на общую сумму 4036 руб., что подтверждается, подписанными сторонами без замечаний и возражений, справкой о стоимости выполненных работ и затрат  от 03.11.2021 № 1 в размере 4036 руб., а также актом о приемке выполненных работ  от 03.11.2021 №1 в размере 4036 руб.

Между сторонами 12.11.2021 подписано соглашение о расторжении контракта № П-ИМЗ-2021-004459-500, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта общая стоимость фактически выполненных работ составила 4036 руб., НДС не облагается; с момента расторжения контракта стороны не считают себя связанными обязательствами по настоящему контракту, за исключением обязательств по возврату выплаченного заказчиком поставщику аванса в размере 108464 руб., НДС не облагается, уменьшенного на сумму выполненных работ по контракту; также сторонами обусловлено, что возврат аванса должен быть произведен поставщиком в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) 24.09.2021 заключен контракт № П-ИМЗ-2021-004460-501 капитальный ремонт помещения отделения ГБУ "Курганская поликлиника N 2", расположенных по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение N 1), локальным сметным расчетом (приложение N 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ "Курганская поликлиника N 2" по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 407000 рублей 00 копеек, без НДС (подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика сумму аванса в размере 

<

***> рублей 00 копеек на основании счета на оплату.

Оставшаяся часть в размере 284900 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса.

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по контракту считается принятым заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта.

 Учреждение «Курганская поликлиника № 2» платежным поручением от  06.10.2021 №  484807 перечислило  обществу  «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт от 24.09.2021 № П-ИМЗ-2021-004460-501.

Предусмотренные контрактом работы выполнены ответчиком на общую сумму 21911 руб., что подтверждается, подписанными сторонами без замечаний и возражений, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 03.11.2021  № 1 в размере 21911 руб., а также актами о приемке выполненных работ от 03.11.2021 № 1,2.

Между сторонами 12.11.2021 подписано соглашение о расторжении контракта № П-ИМЗ-2021-004460-501, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта общая стоимость фактически выполненных работ составила 21911 руб., НДС не облагается; с момента расторжения контракта стороны не считают себя связанными обязательствами по настоящему контракту, за исключением обязательств по возврату выплаченного заказчиком поставщику аванса в размере 100189 руб., НДС не облагается, уменьшенного на сумму выполненных работ по контракту; также сторонами обусловлено, что возврат аванса должен быть произведен поставщиком в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения.

Поскольку ответчик свои обязательства по возврату выплаченных авансов надлежащим образом не исполнил, истец, с соблюдением обязательного претензионного порядка, установленного частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчик работы выполнил не в полном объеме, в силу чего ответчик утратил право на удержание полученной и не освоенной суммы авансового платежа.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал. 

Суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов. 

Правоотношения сторон в рамках настоящего дела регулируется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что предоставленное Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором.

На основании части 9 статьи 95  Закона № 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пунктом  11.1 контрактов предусмотрено, что стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения подрядных обязательств.

Существенным нарушением условий контракта со стороны подрядчика является:

- нарушение срока начала работ более чем на 10 календарных дней;

- несоблюдение графика производства работ более чем на 10 календарных дней;

- нарушение технологии производства работ, СП, ГОСТ более 3 раз и не устранение мотивированных замечаний заказчика в течение 10 календарных дней.

В связи с существенным нарушением условий контрактов в части невыполнения оговоренных в контрактах работ, сторонами подписаны соглашения о расторжении контрактов от 03.09.2021  № П-ИМЗ-2021-003910-24 от 03.09.2021, от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003912-25, от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003913-26, от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003914-27, от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003979-28, от 24.09.2021 № П-ИМЗ-2021-004459-500, от 24.09.2021 № П-ИМЗ-2021-004460-501.  В указанных соглашениях стороны также согласовали условие о возврате заказчику выплаченных по контрактам и неосвоенных подрядчиком авансов.

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (пункт 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» разъяснено, что положения пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела  доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе платежные поручения,  акты о приемке  выполненных работ и справки о стоимости выполненных  работ, подписанные заказчиком и подрядчиком, суды установили, что заказчиком  обязательства по оплате авансовых платежей были  исполнены,  однако  подрядчиком работы  выполнены частично, в частности по контракту от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003910-24  на сумму 9806 руб., по контракту от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003913-26 на сумму 16314 руб., по контракту от 24.09.2021 № П-ИМЗ-2021-004459-500 на сумму 4036 руб., по контракту от 24.09.2021 № П-ИМЗ-2021-004460-501 на сумму 21911 руб.

По условиям соглашений о расторжении контрактов в течение 5 рабочих дней с момента их подписания подрядчик (ответчик) должен был возвратить заказчику полученный и неотработанный аванс по контрактам за вычетом стоимости фактически выполненных подрядчиком работ.

Ответчик доказательств возврата полученных денежных средств в установленные соглашениями о расторжении контрактов сроки, либо надлежащих доказательств наличия обстоятельств, освобождающих его от возврата спорных денежных средств, суду не представил (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ссылка ответчика в обоснование довода о выполнении скрытых работ  на локальные сметные расчеты на общую сумму 1007410 руб. 80 коп.,  судами не приняты, поскольку с заказчиком согласованы не были.  Доказательств иного ответчиком не представлено.

            Судами правомерно учтено, что ответчик, являясь профессиональным участником в области производства подрядных работ, ознакомившись с контрактами, действуя без принуждения и в условиях конкурентной среды, принял на себя обязательства по выполнению согласованного объема работ в установленные сроки. Учитывая предъявляемые к работам требования,  ответчик  соотнес все подлежащие учету показатели и документы, определил сроки выполнения работ, подписав контракты, содержащие сроки выполнения работ, принял их в качестве обязательного условия контрактов. Подписав соглашения о расторжении контрактов, ответчик обязался возвратить указанный в соглашениях неосвоенный аванс в течение 5 рабочих дней с момента их подписания.

Судами установлено, что работы, которые фактически не были выполнены ответчиком по контрактам, были выполнены  третьими лицами  – обществом  «КОМФОРТ-ПЛЮС» и предпринимателем  ФИО1 по договорам  с истцом от 15.12.2021 № 196  и от 15.12.2021 № 212. 

Поскольку ответчиком не представлено доказательств освоения перечисленного ему авансового платежа, принимая во внимание отсутствие сведений о согласии заказчика на выполнение и оплату дополнительных работ, у  ответчика  отсутствуют правовые основания для удержания  неиспользованного аванса по указанным  контрактам, суды   обосновано удовлетворили исковые требования  о взыскании с ответчика 767533 руб. на основании статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, судом кассационной инстанции отклоняются, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами первой и апелляционной инстанций норм права и сводятся лишь к переоценке имеющихся в деле доказательств и сделанных на их основании выводов судов о фактических обстоятельствах, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции (ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, а выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального права,  нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены обжалуемых судебных актов, судом кассационной инстанции не выявлено, решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда  подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Курганской области от 12.10.2022 по делу №А34-20880/2021 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2023  по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» – без удовлетворения.

          Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Председательствующий                                               А.С. Полуяктов 

 

Судьи                                                                               И.А. Татаринова

 

                                                                                           М.В. Торопова