Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-53334/2020

08 октября 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  02 октября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  08 октября 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Пономаревой О.С.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д.46, лит.А, пом.65, ОГРН: 1177847085195, дата присвоения ОГРН: 06.03.2017, ИНН: 7842129505);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «АКВА МАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД» (адрес: 195269, Санкт-Петербург, ул. Учительская, д.23, лит.А, пом.323-1, ОГРН: 1109847014925, дата присвоения ОГРН: 26.11.2010, ИНН: 7802732650)

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.2020;

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 28.07.2020.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «АКВА МАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД» (далее – ответчик) 2.047.576 руб. 92 коп. задолженности по договору от 10.10.2018 № 28 (далее – Договор).

Стороны направили в судебное заседание своих представителей. Истец полностью поддержал исковые требования. Ответчик против удовлетворения иска возражал.

В соответствии с ч.4 ст.137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства:

10.10.2018 между сторонами заключен Договор, согласно условиям которого истец выполнил часть работ по капитальному ремонту объектов, находящихся на балансе или в оперативном управлении СПб ГКУ «Парк «Екатерингоф».

Дополнительным соглашением от 01.12.2018 № 2 стоимость работ по Договору установлена в размере 13.482.503 руб. 40 коп. 

31.10.2018 сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 на выполнение комплекса работ по восстановлению дренажной сети на территории парка стоимостью 850.000 руб.

В нарушение принятых на себя обязательств ответчик произвел оплату выполненных работ не в полном объеме, в результате чего у общества с ограниченной ответственностью «АКВА МАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД» перед обществом с ограниченной ответственностью «СтройСервис» образовалась задолженность в размере 2.047.576 руб. 92 коп.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия, содержащая требование оплатить задолженность. 

Поскольку указанное требование оставлено без удовлетворения, истец, посчитав свои права нарушенными, обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии со ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Статьями 309, 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указывал, что дополнительным соглашением от 01.12.2018 № 2 цена Договора была снижена до 13.482.503 руб. 40 коп., в связи с чем в удовлетворении требования о взыскании стоимости работ, превышающей данную сумму, надлежит отказать.

Общая цена работ по Договору (в редакции дополнительного соглашения № 2) и дополнительному  соглашению № 1 составляет 14.332.503 руб. 40 коп. 

Сторонами без замечаний подписаны акты о приемке выполненных работ формы КС-2 на сумму 14.347.576 руб. 92 коп., из которых 865.073 руб. 52 коп. – по дополнительному соглашению от 31.10.2018 № 1.

Таким образом, ответчик согласовал выполнение работ на сумму 15.073 руб. 52 коп.

Довод ответчика о необходимости исключения 5% от стоимости работ подлежит отклонению.

Работы выполнены истцом в полном объеме, доказательства направления каких-либо претензий по объему работ не представлены.

Суд признает обоснованной позицию истца о том, что гарантийный срок надлежит исчислять с даты подписания последнего акта о приемке работ.

Принимая во внимание, что ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения своих обязательств, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением расходов по госпошлине на ответчика.

Учитывая, что истцу при подаче искового заявления была предоставлена отсрочка по уплате госпошлины, в соответствии со ст.110 АПК РФ с ответчика в доход федерального бюджета надлежит взыскать государственную пошлину в размере 33.238 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АКВА МАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» 2.047.576 руб. 92 коп. задолженности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АКВА МАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД» в доход федерального бюджета 33.238 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Пономарева О.С.