АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

г. Новосибирск                                                                        Дело № А45-2354/2020

Резолютивная часть решения принята 12 мая 2020 года

Мотивированное решение составлено 09 июня 2020 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи   Гребенюк Д.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СИАСК-Энергогазсервис» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Импульс» (ОГРН 

<

***>), п. Садовый Новосибирского района Новосибирской области,

о взыскании задолженности по договору подряда № 28БМК-18 от 02.04.2018 и № 28 ГП-18 от 08.08.2018 в размере 281 256 рублей 98 копеек,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СИАСК-Энергогазсервис»  (далее – ООО «СИАСК-Энергогазсервис») обратилось в арбитражный суд иском к обществу с ограниченной ответственностью «Импульс» (далее – ООО «Импульс») о взыскании задолженности по договорам  подряда № 28БМК-18 от 02.04.2018 и № 28 ГП-18 от 08.08.2018 в размере 281 256 рублей 98 копеек.

В обоснование исковых требований истец ссылается на выполнение подрядных работ для ответчика, которые последним в нарушение условий договоров оплачены не в полном объеме.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Стороны, в порядке, предусмотренном главой 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, надлежащим образом извещены о рассмотрении заявления в порядке упрощенного производства, что подтверждается почтовыми уведомлениями, а также отчетом о публикации на официальном сайте www.arbitr.ru определения о принятии к производству заявления в порядке упрощенного производства.

В деле имеются доказательства надлежащего извещения сторон в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о принятии заявления в порядке упрощенного производства.

Дело рассмотрено в порядке статьей 226 - 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

12.05.2020 арбитражным судом по правилам части  1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения настоящего дела принята резолютивная часть решения, которая размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

08.06.2020 по средствам подачи документов в электронном виде, от ответчика  поступила апелляционная жалоба. 

Решением от 12.05.2020, изготовленным в виде резолютивной части, исковые требования удовлетворены в полном объеме, с общества с ограниченной ответственностью «Импульс» взыскана задолженность по договорам  подряда  № 28БМК-18 от 02.04.2018 и № 28 ГП-18 от 08.08.2018  в размере 281 256 рублей 98 копеек.

При принятии резолютивной части решения суд исходил из следующего.

Как следует из материалов дела, 02.04.2018 между ООО «СИАСК - Энергогазсервис» (подрядчик)  и ООО «Импульс» (заказчик) заключен договор №28БМК-18, согласно условиям которого подрядчик  принял на себя обязательства по выполнению работ на  объекте - «Производственно- торговый складской комплекс расположенный по адресу: НСО, 

<

...> участок №1А, Логистический терминал №1.», а именно устройство и пуск газовой крышной котельной, в соответствии с паспортом ТУ 4938-002-21001021 -2016, ТГУ0,5 МВт ООО «СИАСК- Энергогазсервис», согласно проекта шифр 422-1-2018, а ООО «Импульс» обязалось принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость.

Согласно пункту 2.1 договора цена договора составляет 3 850 000 рублей.

Расчет согласно пункту 2.2 договора производится поэтапно:

I этап - заказчик оплачивает подрядчику аванс в размере 1 925 000 (один миллион девятьсот двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%-293 644 рублей 07 копеек в течение 5 календарных дней со дня заключения  договора на основании счета подрядчика;

II этап - заказчик оплачивает подрядчику очередной аванс в сумме              1 155 000 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 176 186 рублей 44 копеек в течение 30 дней с момента выплаты аванса;

III этап - заказчик оплачивает подрядчику за выполненный работы в размере 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч)  рублей , в т.ч. НДС 18% -           58 728 рублей 81 копеек в течение 30 банковских дней со дня подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

IV этап - окончательный расчет производится заказчиком на основании счета и подрядчиком в размере 385 000 (триста восемьдесят пять) рублей, в т.ч. НДС 18%- 58 728 рублей 81 копеек в течение 20 банковских дней со дня подписания акта, законченного строительством объекта газораспределительной системы, полномочным представителем Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора и Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Пунктом 3.1  договора стороны согласовали сроки выполнения работ:

начало выполнения работ 02 апреля 2018 года, срок окончания  выполнения работ – 31 июня 2018 года. 

В подтверждение факта выполнения работ по договору № 28БМК-18 от  02.04.2018 в материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ №1 от 19.12.2018, акт приемки законченного строительного объекта газораспределительной системы от 27.12.2018, подписанный заказчиком без замечаний.

Согласно статьям 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров и иных оснований, предусмотренных законом, и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Основанием для возникновения обязательства заказчика произвести оплату в соответствии с положениями статей 711, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации является сдача подрядчиком результата работ заказчику.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что истцом выполнены работы по договору на общую сумму 3 850 000 рублей (л.д.34-42).

Ответчиком частично произведена оплата выполненных работ на сумму 3 665 000 рублей. Таким образом, размер задолженности по договору                            № 28БМК-18 от  02.04.2018 составляет 185 000 рублей.

Кроме того, 08.08.2018 между ООО «СИАСК - Энергогазсервис» (подрядчик)  и ООО «Импульс» (заказчик) заключен договор №28ГП-18, согласно условиям которого подрядчик  принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ и услуг на строящемся объекте: «Производственно- торговый складской комплекс расположенный по адресу: НСО, 

<

...> участок №1А, Логистический терминал №1»., а именно произвести прокладку газопровода среднего и низкого давления; выполнить монтаж шкафного газорегуляторного пункта; выполнить пусконаладочные работы на ГРУ; обеспечить специализированный строительный контроль выполняемых работ; совместно с заказчиком получить акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы для проведения пусконаладочных работ, выданного Сибирским управлением Ростехнадзора; изготовление РД раздел ГСН, получить акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, подписанный Сибирским Управлением Ростехнадзора, Инспекцией государственного строительного надзора Новосибирской области, а ООО «Импульс» обязалось принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость.

Согласно пункту 2.1 договора цена договора составляет 396 256 рублей 98 копеек.

Расчет согласно пункту 2.2 договора производится поэтапно:

I этап - заказчик оплачивает подрядчику аванс в размере 300 000 рублей, в т.ч. НДС 18% в течение 5 календарных дней со дня заключения  договора на основании счета подрядчика;

II этап - заказчик оплачивает подрядчику выполнение работ на основании счёта и счёта-фактуры в течении 10 банковских дней со дня подписания заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за вычетом авансового платежа и суммы окончательного расчета;

III этап - окончательный расчет производится заказчиком на основании счёта и счёта-фактуры подрядчиком в размере 10% от стоимости выполненных работ в течении 20 банковских дней со дня подписания акта законченного строительством объекта газораспределительной системы, полномочным представителем Западно-Сибирским управлением Ростехнадзора и Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Пунктом 3.1  договора стороны согласовали сроки выполнения работ:

начало работ 10 августа 2018 года, срок окончания  выполнения работ – 09 октября 2018 года. 

В подтверждение факта выполнения работ по договору № 28ГП-18 от  08.08.2018 в материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ №1 от 21.11.2018, акт №189/12 сдачи-приемки выполненных работ от 10 декабря 2018 года, подписанный заказчиком без замечаний.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что истцом выполнены работы по договору № 28ГП-18 от 08.08.2018 на общую сумму 396 256 рублей 98 копеек, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 21.11.2019 (л.д.34-42).

Ответчиком частично произведена оплата выполненных работ на сумму 300 000 рублей. Таким образом, размер задолженности по договору № 28ГП-18 от  08.08.2018 составляет 96 256 рублей 98 копеек.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательств оплаты ответчиком истцу выполненных работ в полном размере в материалы дела не представлено.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд признает требование о взыскании задолженности в размере 281 256 рублей 98 копеек подлежащим удовлетворению.

В соответствии со статьями 104, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по иску в размере              8 625 рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, частью 5 статьи 170, статьей 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Импульс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СИАСК-Энергогазсервис» задолженность по договорам подряда № 28БМК-18 от 02.04.2018, № 28 ГП-18 от 08.08.2018 в размере 281 256 рублей 98 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 625 рублей. 

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области. 

 

Судья                                                                                                     Д.В. Гребенюк