АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-26245/2023

15 декабря 2023 года

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения подписана 04.10.2023

Мотивированное решение изготовлено   15.12.2023 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Запорожко Е.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства материалы дела № А53-26245/2022

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 319619600015648, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Внешстройторг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании500 054, 25 руб. задолженности по договору подряда №6 от 05.04.2019, 86 673, 09 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.07.2019 по 31.03.2022,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Внешстройторг» о взыскании 500 054, 25 руб. задолженности по договору подряда №6 от 05.04.2019, 86 673, 09 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.07.2019 по 31.03.2022.     

Определением суда от 11.08.2022 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установлен срок для представления сторонами отзыва на исковое заявление, доказательств и иных документов.

Стороны о рассмотрении дела извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения соответствующей информации на официальном сайте суда, с направлением данных, необходимых для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде.

Ответчик отзыв в материалы дела не направил. В адрес суда возвращены конверты, направленные по всем известным суду адресам ответчика, с отметками органа связи об истечении срока хранения и отсутствии адресата, в связи с чем ответчик считается уведомленным о рассмотрении дела надлежащим образом в порядке пунктов 2 и 3 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в соответствии с правилами главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и 04.10.2022 по делу принято решение путем подписания резолютивной части решения. Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 05.10.2022.

Согласно части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

От УФНС по РО  27.11.2023 через систему «Мой арбитр» поступила апелляционная жалоба, в связи с чем, суд принимает решение по данному делу по правилам, установленным главой 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и составляет мотивированное решение по настоящему делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

При рассмотрении спора на основании материалов дела судом установлено следующее.

Между ИП ФИО1 (подрядчик/истец) и ООО «Внешстройторг» (заказчик/ответчик) заключен договор подряда № 6 от 05.04.2019, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы на объекте «Крытая автостоянка института береговой охраны ФСБ РФ» в г. Анапа Краснодарского края, а именно - изготовить и смонтировать металлоконструкции каркаса «корпуса А» и «корпуса Б», предусмотренные договором, а заказчик принял обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Пунктом 1.2 договора установлено, что работы, подлежащие выполнению подрядчиком в соответствии с условиями договора, включают в себя работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций корпуса А и Б.  

Истец исполнил свои обязательства по изготовлению и монтажу  на общую сумму   2 000 054,25 руб., что подтверждается подписанным между сторонами универсальным передаточным документом № 25 от 28.06.2019. 

Однако ответчик произвел оплату изготовленных истцом металлоконструкций частично, в размере 1 500 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 100 от 28.06.2019. 

Остаток задолженности составил 500 054,25 руб. 

Между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов за           1 полугодие 2019 года на сумму 500 054,25 руб.  

Металлоконструкции были переданы истцом ответчику 28.06.2019 по УПД № 25, следовательно, разумный срок для исполнения ответчиком своих обязательств по оплате истек в силу статьи 314 ГК РФ 05 июля 2019 года. 

В установленный законом разумный срок ответчик оплату за изготовленные металлоконструкции не произвёл в полном объёме.

Истец свои обязательства по изготовлению металлоконструкций исполнил, тогда как ответчик, свои обязательства по оплате изготовленной продукции произвёл не в полном объёме.

Истцом 31.05.2021 в адрес ответчика была направлена претензия б/н, которая осталась без ответа и финансового удовлетворения. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с исковыми требованиями.

В силу пункта 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Из пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Проанализировав условия договора, суд пришел к выводу, что между сторонами заключен смешанный договор поставки и подряда, в связи, с чем их правоотношения регулируются положениями в соответствующей части договора нормами о договоре подряда и поставки (главы 30, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно статьям 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары, а покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В силу пункта 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации настоящим, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику, которая оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Материалами дела – первичными документами, подписанными в двухстороннем порядке – подтверждается наличие задолженности, при таких обстоятельствах,  требование  о взыскании задолженности подлежит удовлетворению в указанном размере.

Предметом спора также является требование о взывании 86 673, 09 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.07.2019 по 31.03.2022.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Судом проверен представленный истцом расчет процентов и признан верным, а потому требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в заявленном размере. 

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, присуждаются стороне, в пользу которой состоялось решение суда. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Внешстройторг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 319619600015648, ИНН 

<

***>) 500 054, 25 руб. задолженности по договору подряда № 6 от 05.04.2019, 86 673, 09 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.07.2019 по 31.03.2022. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Внешстройторг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета Российской Федерации 14 735 руб. государственной пошлины. 

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья    Е.В. Запорожко