АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-15/2023

г. Барнаул

24 июля 2023 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении  протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  по исковому заявлению Федерального казенного учреждения «Управление Федеральных  автомобильных дорог» «Алтай» Федерального дорожного агентства», г. Барнаул,  к обществу с ограниченной ответственностью «Санрайс», с. Петровка, Омская область,  

об обязании ответчика в течение 10 дней с момента вступления в силу решения суда  устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки выполненных работ по  государственному контракту на выполнение работ по ремонту искусственных  сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования федерального значения   № 2014.73350 от 22.04.2014, указанные в Заключении эксперта от 26.06.2023 № 166С/23  общества с ограниченной ответственностью Центр независимой профессиональной  экспертизы «Алтай- Эксперт», а именно:  

-  разрушение обетонки поверхности тела шкафных стенок на опорах № 1 и № 4 у  крайних пролетных балок с наружной их стороны (на схеме № 1 позиции 1,2 на обоих  опорах в районе водоприемных лотков и подхода к ним деформационных швов);  

-  трещины в защитных покрытиях обетонки поверхности тела шкафных стенок на  опорах № 1 и № 4 в пролетах между пролетными балками (на схеме № 1 позиции  3,4,5,6,7,8 на обоих опорах).  

По первому варианту для устранения дефектов и ремонта поверхности шкафных  стенок в местах разрушения защитного слоя бетона выполнить работы, указанные в  приложении № 1 к контракту и его пунктах:  

«п.9. Разборка железобетона защитного и выравнивающего слоев  п. 12. Частичная разборка железобетона плит крайних балок  

в п. 16. указана работа «Срубка железобетона существующих шкафных стенок» 

в п. 22. «Восстановление шкафных стенок на береговых опорах» указаны работы:  

п. 22.1. Установка в просверленные отверстия анкерных стержней из арматуры AIII  диаметром 12 мм L=320 мм, 420 мм, 740 мм с заполнением отверстий двухкомпонентным  составом для крепления анкеров MASTERFLOW 935  

22.2 Бетонирование шкафных стенок с открылками монолитным бетоном B25F300  W8, Арматура АI диаметром 8 мм - 58 кг, диаметром 10 мм - 27,4 кг, AIII диаметром  12 мм - 1 161 кг, диаметром 22 мм - 30 кг. Металл закладных частей - 16,44 кг.  

24. Ремонт всех бетонных поверхностей всех опор смесью EMACO S88С с  толщиной нанесения слоя 2 см.  

27. Нанесение защитного состава MASTERSEAL 588 на все отремонтированные  бетонные поверхности опор в 2 слоя».  

По второму варианту для устранения разрушений обетонки поверхности тела  шкафных стенок на опорах № 1 и № 4 у крайних пролетных балок, с наружной их  стороны (на схеме № 1 позиции 1,2 на обоих опорах в районе водоприемных лотков и  подхода к ним деформационных швов) выполнить следующие работы:  

- подготовка основания к восстановлению - механическая с использованием,  перфоратора, другого инструмента, помогающего удалить ненужные участки бетона;  

 - термическая подготовка, основанная на наг реве поверхности бетонного основания  горелкой до температуры 90° С. Обжиг устраняет загрязнители с искусственного камня;  

- пескоструйная очистка - холодная обработка поверхности обычным кварцевым  песком, распыляемым потоком воздуха;  

- приготовление бетонной смеси, раствора; - крепление стальной армосетки дюбелями к восстанавливаемому основанию; - увлажнение основания; 

- нанесение смеси для ремонта тела бетона шкафной стенки (на восстанавливаемое  основание) методом торкретирования (бетонным или цементным раствором, подаваемом  под давлением при помощи - цемент-пушки);  

 - уход за покрытием до полного схватывания и набора прочности;  

- нанесение защитных слоев на отремонтированную поверхность в соответствии с  п.п. 24,27 приложения № 1 к контракту.  

Устранить возможность попадания воды с поверхности моста на  отремонтированные поверхности.  

Способ заделки трещин в защитных покрытиях обетонки поверхности тела  шкафных стенок на опорах № 1 и № 4 в пролетах между пролетными балками (на схеме   № 1 позиции 3,4,5,6,7,8 на обоих опорах, зависит от глубины дефекта.  

- мелкие паутинообразные трещины необходимо устранить нанесением жидких  

составов, образующих защитное покрытие; 

- средние трещины необходимо расшить, компрессором выдуть пыль, заполнить  

раствором при помощи пневмоинъектора; 

- глубокие трещины с двух сторон расшить и углубить, компрессором выдуть пыль,  

методом инъекции ввести полимерный состав или нагнетать состав при помощи ручного  

насоса либо другого оборудования. Состав смеси для инъекции, технология ее подачи зависит от размера трещины. 

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  

требований относительно предмета спора - ФИО2  

(ИНН 

<

***>), с. Иртыш, при участии в заседании представителей: от истца: ФИО3 по доверенности от 09.01.2023, от ответчика: не явился, извещен,  от третьего лица: не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Санрайс», с. Петровка,  Омская область (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в течение 10 дней с момента  вступления в силу решения суда устранить выявленные в период гарантийного срока  недостатки выполненных работ по государственному контракту на выполнение работ по  ремонту искусственных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования  федерального значения № 2014.73350 от 22.04.2014, указанные в Заключении эксперта от  26.06.2023 № 166С/23 общества с ограниченной ответственностью Центр независимой  профессиональной экспертизы «Алтай- Эксперт», а именно:  

- разрушение обетонки поверхности тела шкафных стенок на опорах № 1 и № 4 у  крайних пролетных балок с наружной их стороны (на схеме № 1 позиции 1,2 на обоих  опорах в районе водоприемных лотков и подхода к ним деформационных швов);  

-  трещины в защитных покрытиях обетонки поверхности тела шкафных стенок на  

опорах № 1 и № 4 в пролетах между пролетными балками (на схеме № 1 позиции  

3,4,5,6,7,8 на обоих опорах). 

По первому варианту для устранения дефектов и ремонта поверхности шкафных  

стенок в местах разрушения защитного слоя бетона выполнить работы, указанные в  

приложении № 1 к контракту и его пунктах: 

«п.9. Разборка железобетона защитного и выравнивающего слоев  п. 12. Частичная разборка железобетона плит крайних балок  

в п. 16. указана работа «Срубка железобетона существующих шкафных стенок  

в п. 22. «Восстановление шкафных стенок на береговых опорах» указаны работы:  п. 22.1. Установка в просверленные отверстия анкерных стержней из арматуры AIII  

диаметром 12 мм L=320 мм, 420 мм, 740 мм с заполнением отверстий двухкомпонентным  

составом для крепления анкеров MASTERFLOW 935 

22.3 Бетонирование шкафных стенок с открылками монолитным бетоном B25F300  

W8, Арматура АI диаметром 8 мм - 58 кг, диаметром 10 мм - 27,4 кг, AIII диаметром  

12 мм - 1 161 кг, диаметром 22 мм - 30 кг. Металл закладных частей - 16,44 кг. 

24. Ремонт всех бетонных поверхностей всех опор смесью EMACO S88С с  

толщиной нанесения слоя 2 см. 

27. Нанесение защитного состава MASTERSEAL 588 на все отремонтированные  

бетонные поверхности опор в 2 слоя». 

По второму варианту для устранения разрушений обетонки поверхности тела  

шкафных стенок на опорах № 1 и № 4 у крайних пролетных балок, с наружной их  

стороны (на схеме № 1 позиции 1,2 на обоих опорах в районе водоприемных лотков и  

подхода к ним деформационных швов) выполнить следующие работы:  

- подготовка основания к восстановлению - механическая с использованием,  

перфоратора, другого инструмента, помогающего удалить ненужные участки бетона;  

 - термическая подготовка, основанная на наг реве поверхности бетонного основания  

горелкой до температуры 90° С. Обжиг устраняет загрязнители с искусственного камня;  - пескоструйная очистка - холодная обработка поверхности обычным кварцевым  

песком, распыляемым потоком воздуха; - приготовление бетонной смеси, раствора; 

- крепление стальной армосетки дюбелями к восстанавливаемому основанию;  - увлажнение основания;  

- нанесение смеси для ремонта тела бетона шкафной стенки (на восстанавливаемое  основание) методом торкретирования (бетонным или цементным раствором, подаваемом  под давлением при помощи - цемент-пушки);  

 - уход за покрытием до полного схватывания и набора прочности; 

- нанесение защитных слоев на отремонтированную поверхность в соответствии с  п.п. 24,27 приложения № 1 к контракту.  

Устранить возможность попадания воды с поверхности моста на  отремонтированные поверхности.  

Способ заделки трещин в защитных покрытиях обетонки поверхности тела  шкафных стенок на опорах № 1 и № 4 в пролетах между пролетными балками (на схеме   № 1 позиции 3,4,5,6,7,8 на обоих опорах, зависит от глубины дефекта.  

- мелкие паутинообразные трещины необходимо устранить нанесением жидких  составов, образующих защитное покрытие;  

- средние трещины необходимо расшить, компрессором выдуть пыль, заполнить  раствором при помощи пневмоинъектора;  

- глубокие трещины с двух сторон расшить и углубить, компрессором выдуть пыль,  методом инъекции ввести полимерный состав или нагнетать состав при помощи ручного  насоса либо другого оборудования.  

Состав смеси для инъекции, технология ее подачи зависит от размера трещины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Санрайс», с. Петровка,  Омская область (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в пользу Федерального  казенного учреждения «Управление Федеральных автомобильных дорог» «Алтай»  Федерального дорожного агентства», г. Барнаул (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>), 50 400 руб. 00 коп. расходов на оплату судебной экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Санрайс», с. Петровка,  Омская область (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в доход Федерального  бюджета Российской Федерации 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения.  

Судья С.В. Янушкевич  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 12.04.2023 22:26:00

 Кому выдана Янушкевич Светлана Викторовна