195/2017-46521(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 23-93-12; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А57-17034/2016

г. Саратов

20 марта 2017 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Гамма2004» (ОГРН 

<

***>  

ИНН 

<

***>), г. Саратов в течение одного месяца с момента вступления в законную силу  

решения суда безвозмездно выполнить следующие виды работ: 1. Облицевать парапетную часть кровли здания кровельной сталью; 

2. Произвести ремонт примыкания кровли к парапетам и вентиляционным шахтам;  

3. Уложить дополнительно слоя водоизоляционного ковра на местах примыкания кровли  

к стенам вентиляционных шахт и парапетов; 

4. Облицевать парапетную часть кровли машинного помещения здания кровельной  

сталью; 

5. Установить на приточные вентиляционные каналы металлические крышки и решетки,  

прорезать отверстие в оцинкованном коробе; 

6. Установить на сливные воронки дождеприемников решётки. Уложить дополнительно  

слоя водоизоляционного ковра на местах примыкания к сливным воронкам; 

7. Выполнить монтаж узла примыкания стального футляра к асбестовому дымоходу  

горячего вентиляционного канала; 

8. Уложить дополнительно слоя водоизоляционного ковра деформационного шва кровли  

здания. Выполнить оголовок вентиляционной шахты над кровлей здания; 

9. Выполнить оголовки вентиляционных шахт на кровле здания по осям «3с» и «4с»  

каждой блок-секции; 

10. Выполнить козырьки над вентиляционными шахтами согласно проектной  

документации. Очистить каналы вентиляционных шахт от цементно-песчаного раствора;  

11. Облицевать парапетную часть кровли козырьков над входом в подъезды жилых  

помещений и козырьков над входом в нежилые помещения здания кровельной сталью; 12. Установить металлический компенсатор на температурный шов здания; 

13. Заделать места примыканий лестничных маршей к стенам в подъездах жилых  

помещений; 

14. Закрыть ниши под кабельные каналы в местах установки этажных электрических  

щитков в подъездах жилых зданий; 

15. Привести в соответствие поверхность пола в подъездах жилых помещений в  

соответствии требованиям СП 29.13330.2011 пункт 5.18; 

16. Оборудовать подвальные входные группы здания лестничными маршами и  ограждающими перилами, выполнить защитное покрытие на парапетах подвальных входных  групп;  

17. Оборудовать подвальные входные группы навесами, защищающие от атмосферных  осадков;  

18. Оборудовать места прохода труб водоснабжения через стены и перекрытия футлярами  и произвести их заделку сальников;  

19. Оборудовать места прохода небронированных кабелей через несгораемые стены  коробами, выполнить их заделку легко удаляемой массой из несгораемого материала;  

20. Выполнить заделку мест прохода вводных кабелей легко удаляемой массой из  несгораемого материала;  

21. Выполнить благоустройство оконных приямков подвала; 

22. Устранить сквозные отверстия со стороны жилых помещений у входа в подъезд в  наружной стене здания;  

23. Передать проектную и техническую документацию на лифтовое оборудование,  расположенное в жилом доме № 1/3 по ул. им. Тулайкова Н.М. города Саратова: паспорт с  копиями сертификата на лифт, сертификата на противопожарные двери, сертификата на узлы  безопасности, зарегистрированную декларацию, инструкцию по монтажу, пуску,  регулированию и обкатке; руководство по эксплуатации; монтажный чертеж; принципиальную  электрическую схему с перечнем элементов (2 экземпляра); описание электропривода и  автоматики; электрическую схему соединения лифта - 2 экземпляра на каждый лифт.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гамма2004» (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>), г. Саратов в пользу Товарищества собственников  недвижимости «Академик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Саратов расходы по  оплате судебной строительной экспертизы в размере 19000 руб..  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гамма2004» (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>), г. Саратов в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6000 руб..  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или кассационную  инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба подается через  принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии  с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья Ю.С. Святкина