АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, 

<

...>, тел. 

<

***>, факс 

<

***>

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

г. Архангельск	 Дело № А05-13595/2025

от 06 февраля 2026 года

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

заявленные исковые требования комитета жилищно-коммунального хозяйства,транспорта и

связи администрации Северодвинска (ИНН 

<

***>) удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Севзапдорстрой"

(ИНН 

<

***>) в срок до 01.06.2026 устранить недостатки работ, выполненных по

муниципальному контракту от 17.03.2023 № 014-23-КЖКХ, а именно:

1) в рамках первого этапа исполнения контракта:

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка

ул. ФИО1 и ул. Торцева (24 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка

ул. ФИО1 и ул. Советской (7 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка

ул. ФИО1 и ул. Плюснина (8 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку в районе д. 16 по ул. ФИО1 (3 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка

ул. ФИО1 и ул. Индустриальной (1 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка

ул. ФИО1 и ул. Лесной (10 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка

ул. ФИО1 и ул. Ломоносова (4 шт.);

- выполнить посадку газонных трав на всем протяжении восстановленного газона в

местах его отсутствия;

2) в рамках второго этапа исполнения контракта:

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка

ул. Комсомольской и ул. Полярной (9 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка

ул. Комсомольской и ул. Профсоюзной (1 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка ул. Комсомольской и ул. Пионерской (19 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка ул. Комсомольской и пр. Беломорского (8 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка ул. Комсомольской и ул. Железнодорожной (5 шт.);

- выполнить посадку газонных трав на всем протяжении восстановленного газона в местах его отсутствия;

3) в рамках третьего этапа исполнения контракта:

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка ул. Лесной и ул. Бойчука (2 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка ул. Лесной и пр. Ленина (21 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка ул. Лесной и ул. Профсоюзной (6 шт.);

- заменить наземную тактильную плитку на тротуаре в районе перекрестка ул. Лесной и пр. Беломорского (7 шт.);

- выполнить посадку газонных трав на всем протяжении восстановленного газона в местах его отсутствия.

В случае неисполнения настоящего решения в установленный судом срок взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Севзапдорстрой" (ИНН 

<

***>) в пользу комитета жилищно-коммунального хозяйства,транспорта и связи администрации Северодвинска (ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день неисполнения решения суда.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Севзапдорстрой" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 50 000 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья А.С. Рябков