Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва                                                                                         Дело №А40-118497/23-43-949

28.08.2023 г.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

ФКР Москвы (ОГРН 

<

***>) к ООО "ОЙЛБЕРГ" (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 50 000 руб. 00 коп. - суммы неотработанного аванса по Договору ПКР-005039-20 от 30.03.2020 г.,

без вызова лиц, участвующих в деле,

Изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

У С Т А Н О В И Л :

Иск заявлен о взыскании 50 000 руб. 00 коп. - суммы неотработанного аванса по Договору ПКР-005039-20 от 30.03.2020 г.

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10.05.2023 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 АПК РФ.

22.06.2023г. Ответчик представил отзыв на исковое заявление.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

18.08.2023 г. принята резолютивная часть решения в порядке, предусмотренном ст. 229 АПК РФ.

23.08.2023г. в суд поступило, в установленный ст. 229 АПК РФ срок, заявление истца о составлении мотивированного решения.

Суд, с учётом изложенных истцом обстоятельств и доводов, возражений ответчика, в соответствии с имеющимися в материалах дела, документами, пришёл к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

В обоснование заявленных требований Истец указывает, что между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (Фонд, Заказчик, Истец) и ООО "Ойлберг" (Генподрядчик, Ответчик) был заключен Договор № ПКР-005039-20 от 30.03.2020 г., на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ЮВАО, Ухтомская ул. 17; г. Москва, САО, ул. Астрадамская д. 5А.

В соответствии с разделом 4 Договора, ООО "ОЙЛБЕРГ" приняло на себя обязательство выполнить Работы по Договору в соответствии с Графиком производства и стоимости работ. Дата начала работ - 19.03.2020 г.; дата окончания работ— 10.11.2020 г.

Согласно п. 10.2.3 в случае нарушения сроке в выполнения работ по вине Генподрядчика, повлекшее невозможность сдачи работ по Договору в сроки, установленные Графиком производства и стоимости работ, Генподрядчик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения обязательств по Договору соразмерно увеличению указанного в настоящем пункте срока выполнения работ, увеличив срок действия банковской гарантии не менее чем на 6 месяцев.

С учетом условий Договора, срок действия банковской гарантии, обеспечивающей — обязательства Генподрядчика по возврату суммы неиспользованного аванса истекает 30.03.2022.

По состоянию на дату решения Генподрядчиком в адрес Заказчика дополнительное соглашение о продлении срока действия Договора и банковская гарантия со сроком действия до 01.09.2022 не поступали, соответственно обязательства, предусмотренные п. 10.2.3 Договора Генподрядчиком не исполнены.

В соответствии с п. 14.7.6. Договора «нарушение Генподрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 дней по любому из объектов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора от 20.01.2022 ФКР-ПИР-77/22 и об возврате неиспользованного аванса направлено на юридический адрес Генподрядчика, что подтверждается почтовым реестром.

Договор считается расторгнутым через 15 дней (без учета выходных и праздничных дней) с даты направления уведомления о расторжении договора Генподрядчику.

С учетом возврата части аванса генподрядчиком в размере 1 120 497,99 руб., остаток неотработанного аванса составляет 50 000 руб., однако Генподрядчик, ссылаясь на факт оплаты штрафа за нарушение качества ПСД в размере 50 000 руб., делает, по мнению Истца, необоснованный вывод о возврате полной суммы неотработанного аванса. (Что следует из назначения платежа пп. 1157 от 13.10.2021.)

Таким образом, по мнению Истца, сумма неиспользованного аванса по Договору составляет 50 000 руб.

В силу ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч. 2 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (ч. 4 ст. 71 АПК РФ).

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя  из смысла указанной  нормы, обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факту приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости  собственного  имущества приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранение того  имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за  счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества одним лицом за  счет другого. Из материалов дела усматривается, что работы по договору были выполнены ответчиком в полном объеме и приняты истцом без замечаний, что Истцом не оспаривается.

Спор в рамках указанного договора уже рассматривался по делу А40-161907/2022 в Арбитражном суде г. Москвы и по которому имеется решение об отказе в удовлетворении исковых требований. В данном деле Ответчик выступал соответчиком. Указанное решение не обжаловалось Истцом в вышестоящих инстанциях.

О указанных выше обстоятельствах Ответчик сообщал Истцу в письменном ответе от 20.01.2023 года на уведомление от 16.01.2023 года.

 Учитывая изложенное, требования истца суд считает необоснованными, недоказанными и не подлежащим удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки, понесенные истцом, относятся на истца в порядке, предусмотренном статьями 110, 112 АПК РФ.

На основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 316, 401, 420-425, 431-434, 702, 1102, 1103 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Иск ФКР Москвы (ОГРН 

<

***>) к ООО "ОЙЛБЕРГ" (ОГРН 

<

***>) о взыскании 50 000 руб. 00 коп. - суммы неотработанного аванса оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на истца.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле соответствующего заявления.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет ».

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцать дней со дня его принятия.

Судья

ФИО1