ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Аэродромная, 11 «А»

Самара, 443070

тел.: (846)  273-36-45, факс: 372-62-54

E-mail: info@11aas.arbitr.ru

 http://www.11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

Дело № А65-28468/2020

город Самара

19 апреля 2021 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Кузнецова С.А., рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МосЭнергоМонтаж-Поволжье" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.02.2021 (судья Сотов А.С.) по делу №. А65-28468/2020 в порядке упрощенного производства по иску акционерного общества "Татэнерго" к обществу с ограниченной ответственностью "МосЭнергоМонтажПоволжье" о взыскании неустойки, 

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Татэнерго" (далее – АО "Татэнерго", истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МосЭнергоМонтажПоволжье" (далее – ООО "МосЭнергоМонтажПоволжье", ответчик) о взыскании 531 770 руб. 64 коп. неустойки.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам, предусмотренным главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.02.2021 иск удовлетворен.

Ответчик обжаловал судебный акт суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В апелляционной жалобе ответчик просит решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.02.2021 отменить и принять новый судебный акт.

Апелляционная жалоба мотивирована несоответствием изложенных в обжалуемом судебном акте выводов обстоятельствам дела, нарушением и неправильным применением норм материального и процессуального права.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В возражениях на апелляционную жалобу истец просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции отказал в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, приложенных к возражениям на апелляционную жалобу, в связи с отсутствием предусмотренных частями 2, 3 статьи 268, частью 2 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для принятия судом апелляционной инстанции дополнительных доказательств.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 15 июня 2020г. между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор № 2020/Д377/286 на выполнение проектных работ, по условиям которого ответчик взял на себя обязательства, по поручению истца, по разработке проектной и рабочей документации по капитальному ремонту тепловых сетей города Казань, запланированному на 2021 год, для нужд филиала истца по следующим объектам: 

1. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 17 (кв. №71) на участке от ТК-1 через ТК-5, ТК-6, ТК-7 до ТК-8 с ответвлениями на ж/д Чистопольская, 81 и адм. здание по ул. Чистопольская, 83; 

2. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 6 (кв. № 23) на участках от УТ-1 через ТК-5, ТК-6 до ТК-7 с ответвлениями на ж/д ФИО1, 79, 79а; 

3. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 6 (кв. № 26) на участках от ТК-25 до ТК-5а, ТК-4 и до ж/д Декабристов, 89, ФИО1, 93/191, 95, 97 и от насосной «Водоканал» до ТК-7 и ж/д ФИО1, 99; 

4. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 8 (кв. № 35) на участке от ТК-7 до ТК-5 о ответвлениями на ж/д Тунакнова, 56, 58, 60 и д/с № 118 по ул. Тунакова, 54а; 

5. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 10 (кв. ФИО2) на участке от ТК-9 до ТК-12 с вводами на ж/д Карагандинская, б, 6а, ФИО3, 49, ФИО4 25а, 29, 31; 

6. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 2 на участках от ТК2-10/34 через ТК2-10/35, ТК2-10/36 до ТК2-10/37 с ответвлениями на ж/д Татарстан 43, 49, от ТК2-10/35 до ТК2-10/39 с ответвлениями на ж/д Татарстан 45, 47, от ТК2-10/38 до ж/д Татарстан, 53 и через ж/д Татарстан 1 до адм. зд. Татарстан, 47а и от ТК2- 10/40 до ж/д Татарстан, 13; 

7. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 2 на участке от т.А до ж/д ФИО5, 14 и ТК2-46/3 с переходом ул. К.Маркса; 

8. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 6 (кв. № 21) на участках от ТКб-34 до ТК-4, от ТК-4 до ж/д Короленко, 44а, 50, 50а; 

9. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 6 (кв. № 21) на участках от ТК-7а до УТ-11а через ТК-11, от УТ-11а до ТК-12 и до ДШИ № 15 по ул. Голубятникова, 7а; 

10. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 18 (кв. № 27/1) на участке по тех. подполью ж/д Гаврилова, 24; 

11. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 18 (кв. № 27-3) на участке от ж/д Гаврилова, 28 через ТК-13 до КНС ул. Гаврилова, 23б; 

12. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 11 (кв. № 34) на участке от ТК21 до ж/д Декабристов, 156; 

13. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 11 (кв. № 44) на участке от ТК11а до ж/д Энергетиков, 18; 

14. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 11 (кв. № 46/2) на участке от ж/д ФИО6, 33 до ж/д ФИО6, 35; 

15. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 11 (кв. № 50) на участке от ж/д Окольная, 30 до ж/д Окольная, 28; 

16. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 11 (кв. № 50) на участке от ж/д Кулахметова, 9 до ж/д Кулахметова, 11; 

17. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 10 (кв. 1 Соцгород) на участке от ТК-15 через ТК-16 до ж/д Тимирязева,4; 

18. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 10 (кв. 1 Соцгород) на участке от ТК-26 до ж/д Лядова, 2; 

19. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 10 (кв. Юнгородок) на участке от ТК-4 до ТК-6 с вводами на ж/д ФИО2, 24, ФИО7, 1, 3; 

20. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 10 (кв.№ 10) на участке от ТК10-59 через тех. подполье ж/д ФИО7, 45 (транзит) до ж/д ФИО7, 47; 

21. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 4 на участке от ТК4-11/29 до адм. зд. по ул. Х.Такташ, 125; 

22. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 2 на участке от ТК2-24/2 до ж/д Университетская, 5/37;

23. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 2 на участках от ТК2-36/76 до ТК2-36/7а по ул. ФИО8, 22; 

24. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 4 на участке от ТК4-7 до т.А (надземного трубопровода) по ул. ФИО9; 

25. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 4 на участках от ТК4-11/21 до ТК4-11/22 и ж/д ФИО9, 5б; 

26. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 22 на участках от ж/д Сахарова, 27 через тех. подполье ж/д Сахарова, 29 (транзит) до ж/д Сахарова, 31 и от т.А до Пр. Победы, 146; 

27. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 21 (кв. № 11-1) на участках от ТК21-22/1 через тех. подполье ж/д Фучика, 105 (транзит) до ж/д Фучика, 107; 

28. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 22 на участках от ТК22-21/12-37 до ж/д Туганлык, 10, 12; 

29. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 21 (кв. № 11-1) на участках от ж/д Кул Гали.З через ТК 21-22/6 до ж/д Кул ГалиД; 

30. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 21 (кв. № 11-1) на участке от ТК21 -22/5 до ж/д Фучика 99. 

Стоимость работ определена пунктом 3.1 договора и составляет 2 188 356 руб. 45 коп. 

Согласно пункту 2.1 договора сроки начала и окончания работ устанавливаются в приложении № 2 к договору, а именно до 16.07.2020. 

В соответствии пункта 4.1 договора ответчик передает истцу в сроки, установленные календарным планом работ (Приложение № 2 к договору), 4 экземпляра проектной, рабочей и сметной документации (далее - ПСД) на бумажном носителе, один экземпляр в электронном виде , обеспечивающем возможность поиска и копирования произвольного формата текста, в том числе: проектную документацию - в формате Portable Document Format (PDF), рабочую документацию - в формате графического редактора AutoCAD или КОМПАС, сметную документацию в формате XML Dokument программного комплекса «Гранд-Смета» и в формате XLS Microsoft Office. 

При наличии замечаний истца не позднее 10 (десяти) рабочих дней и за собственный счет устраняет замечания (ошибки) при получении от ответчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты ПСД или их несоответствия требованиям Договора (п. 2.2 договора). После получения положительного заключения о проверке истцом ПСД, утверждения истцом ПСД, стороны подписывают акт сдачи-приемки проектной продукции (п.4.3 договора). 

По состоянию на 16 ноября 2020г. ответчик проектные работы не выполнил, истцу не предоставил проектную сметную документацию в полном объеме, акты выполненных работ, сторонами не подписаны. 

Поскольку ответчик нарушил сроки выполнения работ, истец обратился с претензией о взыскании неустойки, а затем в суд с иском. 

Истец просил взыскать неустойку за нарушение сроков предоставления проектной сметной документации в размере 531 770 руб. 64 коп. 

Согласно пункту 7.1.1 договора при нарушении установленных договором сроков выполнения работ по каждому объекту, указанному в приложении 2 к договору, а также сроков доработки проектной, рабочей, сметной документации по замечаниям истца и/или органов Государственной экспертизы (при условии необходимости проведения государственной экспертизы) и/или негосударственной экспертизы (при условии её проведения), ответчик оплачивает истцу за каждый день просрочки пени в размере 0,1 % от стоимости работ по объекту, указанной в приложении 2 к договору. 

Ответчик представил отзыв на иск, иск не признал, пояснил, что уведомлял истца о невозможности выполнения работ по договору ввиду отклонения от технического задания, указанные обстоятельства отражены в письмах, приложенных к отзыву. 

Суд первой инстанции отклонил доводы ответчика, поскольку переписку о невозможности выполнения работ по договору ответчик начал вести уже после предусмотренного пунктом 2.1 договора срока окончания работ - 16.07.2020, в частности, к отзыву приложены письма от 21.08.2020 № 706, от 26.08.2020 № 710, от 28.08.2020 № 711, от 31.08.2020 № 721, от 03.09.2020 № 723.

Иных доводов и доказательств ответчик не представил. 

Представленный истцом расчет неустойки по договору по каждому объекту суд первой инстанции проверил, признал арифметически верным и обоснованным, контррасчет ответчик не представил. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, руководствуясь статьями 309, 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 65, 70, 110, 112, 167-169, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции правомерно и обоснованно удовлетворил иск.

В апелляционной жалобе не приведено доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции.

Обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, содержащиеся в нем выводы, соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено. 

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268-271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.02.2021 по делу № А65-28468/2020  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Арбитражный суд Поволжского округа.

Судья                  С.А. Кузнецов