АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-13872/2025

г. Нижний Новгород «19» августа 2025 года

резолютивная часть решения объявлена «14» августа 2025 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Елисейкина Евгения Петровича (шифр дела в отделе судьи 27-361) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бандиной А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Нижавтодорстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Девис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

о взыскании 1 650 654 руб. 72 коп.,

при участии в судебном заседании:

- от истца – ФИО1 (доверенность от 20.03.2025),

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Нижавтодорстрой» с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Девис» о взыскании неустойки по договору субподряда от 25.05.2022 № 44/22-НАДС в сумме 1 307 796 руб. 42 коп., по договору субподряда от 25.05.2022 № 45/22-НАДС в сумме 342 858 руб. 30 коп., а также расходов по уплате госпошлины в размере 74 520 руб. 00 коп.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 16.05.2025 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 14.08.2025.

В ходе судебного заседания представитель истца поддержал заявленные требования.

Руководствуясь правилами части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая отсутствие возражений со стороны лиц, участвующих в деле, суд счел возможным завершить предварительное судебное заседание и продолжить рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

Между ООО «Нижавтодорстрой» (Генподрядчик, Истец) и ООО «Девис» (Субподрядчик, Ответчик) заключен договор субподряда от 25.05.2022 № 44/22-НАДС в редакции дополнительного соглашения от 07.06.2022 № 1, согласно которого Генподрядчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Субподрядчик обязуется собственными и привлеченными силами и средствами выполнить работы по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Краснооктябрьском и Сеченовском районах Нижегородской области, в соответствии с Ведомостями дефектов и намечаемых работ (Приложения № 3-5 к Договору № 44), Требованиями к качеству работ (Приложение № 7), Расчетом цены договора (Приложение № 8), Календарным планом производства работ (Приложение № 9) и сдать Объект Генподрядчику по акту приемки законченных работ в установленные Договором сроки.

В соответствии с пунктом 1.2 существенными условиями Договора для Сторон являются: предмет Договора, цена Договора, сроки выполнения работ, предусмотренные Договором, качество работ.

Сроки выполнения Работ установлены разделом 2 Договора:

2.1 Начало выполнения работ – с даты заключения Договора, окончание выполнения работ – 23 сентября 2022 года; в том числе:

9 этап: Ремонт участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2504) Пошатово – Кечасово – Салганы км 13+500 – км 15+500, км 17+242 – км 23+500 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области – до 24 августа 2022 года;

12 этап: Ремонт участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное – ФИО2 – ФИО3 км 0+003 – км 0+466, км 0+673 – км 6+000 в Сеченовском районе Нижегородской области – до 23 сентября 2022 года;

14 этап: Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0088) Сеченово – В.Талызино – Булдаково – граница с Республикой Мордовия км 0+004 – км 2+385 в Сеченовском районе Нижегородской области – до 24 августа 2022 года.

Согласно пункту 3.1 Договора цена составляет 145 992 277 руб. 69 коп., в том числе НДС 20%.

В силу пункта 5.2.4 Договора, Субподрядчик обязан выполнить собственными и привлеченными силами и средствами все работы, предусмотренные настоящим Договором, в полном объеме в установленный срок.

Ответчик выполнил работы с нарушением установленных Договором сроков, что подтверждается подписанными Генподрядчиком и Субподрядчиком актами по форме КС-2, КС-3 №1 от 30.06.2022 на сумму 23 375 000 руб. 00 коп., №2 от 24.09.2022 на сумму 24 298 499 руб. 48 коп., №3 от 15.11.2022 на сумму 47 710 070 руб. 00 коп., №4 от 29.11.2022 на сумму 50 608 707 руб. 56 коп.

В связи с нарушением ООО «Девис» промежуточных и конечного сроков выполнения работ Истец произвел расчет неустойки на основании пункта 7.3 Договора № 44 и с учетом Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 №497.

Сумма неустойки за нарушение Ответчиком сроков выполнения работ по договору субподряда от 25.05.2022 № 44/22-НАДС составляет 1 307 796 руб. 42 коп.

Кроме того, между ООО «Нижавтодорстрой» (Генподрядчик, Истец) и ООО «Девис» (Субподрядчик, Ответчик) заключен договор субподряда от 25.05.2022 № 45/22-НАДС в редакции дополнительного соглашения от 07.06.2022 № 1, согласно которого Генподрядчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Субподрядчик обязуется собственными и привлеченными силами и средствами выполнить работы по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Краснооктябрьском и Сеченовском районах Нижегородской области, в соответствии с Ведомостью дефектов и намечаемых работ (Приложения № 3), Требованиями к качеству работ (Приложение № 5), Расчетом цены договора (Приложение № 6), Календарным планом производства работ (Приложение № 7) и сдать Объект Генподрядчику по акту приемки законченных работ в установленные Договором сроки.

В соответствии с пунктом 1.2 существенными условиями Договора для Сторон являются: предмет Договора, цена Договора, сроки выполнения работ, предусмотренные Договором, качество работ.

Сроки выполнения Работ установлены разделом 2 Договора:

2.1 Начало выполнения работ – с даты заключения Договора, окончание выполнения работ – 23 сентября 2022 года; в том числе:

11 этап: Ремонт автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3819) Подъезд к с. Алферьево от а/д Сеченово-В.Талызино-Булдаково-граница с Республикой Мордовия км 0+003 – км 3+656 в Сеченовском районе Нижегородской области – до 23 сентября 2022 года.

Согласно пункту 3.1 Договора цена составляет 29 813 765 руб. 27 коп., в том числе НДС 20%.

В силу пункта 5.2.4 Договора, Субподрядчик обязан выполнить собственными и привлеченными силами и средствами все работы, предусмотренные настоящим Договором, в полном объеме в установленный срок.

Ответчик выполнил работы с нарушением установленных Договором сроков, что подтверждается подписанными Генподрядчиком и Субподрядчиком актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 15.11.2022 на сумму 29 813 765 руб. 27 коп.

В связи с нарушением ООО «Девис» промежуточных и конечного сроков выполнения работ Истец произвел расчет неустойки на основании пункта 7.3 Договора № 45 и с учетом Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 №497.

Сумма неустойки за нарушение Ответчиком сроков выполнения работ по договору субподряда от 25.05.2022 № 45/22-НАДС составляет 342 858 руб. 30 коп.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора Истцом в адрес Ответчика направлена претензия от 11.07.2023 № 531 с требованием произвести оплату в сумме 5 116 97 руб. 74 коп. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Исходя из положений статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 ГК РФ).

Расчет неустойки произведен Истцом, исходя из пункта 7.3 Договоров, согласно которому в случае просрочки исполнения Субподрядчика обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора при наличии этапов исполнения Договора) и фактически исполненных Субподрядчиком (п.7.3.1 договора).

Наличие задолженности подтверждено материалами дела. Контррасчет Ответчиком не представлен.

Оценив по вышеуказанным правилам совокупность представленных доказательств, суд пришел к выводу, что исковое требование ООО «Нижавтодорстрой» о взыскании с ООО «Девис» неустойки является правомерным в заявленном размере 1 650 654 руб. 72 коп.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 15 419 руб. 00 коп. в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Девис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Нижавтодорстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по договору субподряда от 25.05.2022 № 44/22-НАДС в размере 1 307 796 руб. 42 коп., неустойку по договору субподряда от 25.05.2022 № 45/22-НАДС в размере 342 858 руб. 30 коп., а также 74 520 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Судья Е.П. Елисейкин