Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«23» марта 2021 года

                                 Дело № А12-30081/2020

Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен 23 марта 2021 года. 

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Бударина Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «АПС-ПРОЕКТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании убытков,

при участии в  судебном заседании:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности № 6 от 11.01.2021; 

от ответчика – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – истец, УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов») обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АПС-ПРОЕКТ» (далее – ответчик, ООО «АПС-ПРОЕКТ») о взыскании убытков в размере 30 000 руб., судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 2 000 руб.

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. 

Между УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов» (Заказчик) и ООО «АПС-ПРОЕКТ» (Подрядчик) 22.10.2018 заключен договор о проведении капитального ремонта № 101064771-В-СМР(ГР)-2015 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах г. Волгограда Волгоградской области, расположенных по адресам: г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода № 8, д. 7 (капитальный ремонт подвала (отмостки), г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода № 8 , д. 8 (капитальный ремонт подвала (отмостки): г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода № 8, д. 9 (капитальный ремонт подвала (отмостки).

Цена договора в соответствии с пунктом 4.1 договора составляет 258 989 руб. 94 коп.

В соответствии с пунктом 8.1 Договора после окончания работ в полном объеме (этапа) работ Подрядчик не позднее 3-х дней с момента окончания производства работ, установленного графиком производства работ предъявляет Заказчику с сопроводительным письмом следующие документы: акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 (в сшитом виде в трех экземплярах, подписанные со своей стороны, согласованные с организацией, осуществляющей строительный контроль, а также акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 в электронном виде); справки о стоимости выполненной работы и затрат по форме № КС-3 (в трех экземплярах); акты на скрытые работы; акты испытаний; техническую и исполнительную документацию в трех экземплярах (оригинал (1 экземпляр), надлежащим образом заверенные копии (2 экземпляра).

В случае предъявления Подрядчиком неполного пакета документа Заказчик имеет право отказать в приемке документации.

Согласно 8.2.Договора приемка выполненных работ осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента получения Заказчиком документации, указанной в пункте 8.1 настоящего договора и подписания актов выполненных работ, в случае отсутствия замечаний.

Заказчик после получения, указанных в пункте 8.1 документов проверяет выполненные работы, проверяет комплектность и правильность оформления исполнительной документации, проверяет правильность и соответствие примененных расценок договорной проектно-сметной документации, после чего передает проверенные акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 Подрядчику для согласования их с органами местного самоуправления, а также лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

Подрядчик после согласования актов приемки выполненных работ но форме № КС-2 с органами местного самоуправления, а также лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме возвращает подписанные документы Заказчику до окончания сроков приемки выполненных работ, установленных настоящим пунктом договора.

В соответствии с пунктом 9.1. Договоров, Подрядчик гарантирует соответствие объекта требованиям действующего законодательства, государственных стандартов, строительным нормам и правилам технической документации, сметам и иным условиям Договора, а также возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, установленного Договором и действующим законодательством РФ, и несет ответственность за отступления от них.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается продолжительностью 5 лет со дня подписания акта по форме КС-2 и КС-3 по последнему этапу.

В соответствии с пунктом 8.3. Договора в случае обнаружения дефектов или недоделок выполненных работ в течение гарантийного срока Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с приглашением к участию в составлении соответствующего акта с указанием даты и времени.

Инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области 09.09.2019 УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов» выданы предписания № 1444-4, 1444-5, 1444-6 на принятие региональным оператором всех предусмотренных действующим законодательством мер, направленных на обеспечение выполнения подрядной организацией обязательств по приведению в надлежащее техническое состояние отмостки домов № 7, 8, 9 на тер. Поселок Кирпичного завода № 8.

Срок исполнения предписаний – 01.11.2019.

В установленный срок выявленные нарушения не устранены.

В адрес УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов» 20.11.2019 Инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области повторно выданы предписания № 1897-2, 1897-3, 1897-4, сроком исполнения до 15.05.2020.

В связи с неисполнением в установленный срок предписаний Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, истец привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 30 000 руб., что подтверждается постановлениями по делам об административном правонарушении, представленными в материалы дела.  

Уклонение ответчика от возмещения убытков, понесенных истцом, явилось основанием для обращения последнего в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям - обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. 

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно статье 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможности эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.

Согласно пункту 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии с пунктом 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве

Последствия выполнения подрядчиком работ с нарушением качества регламентированы статьей  723 ГК РФ.

Так, согласно пунктам 1, 3 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Из материалов дела следует, что в ходе исполнения договора сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат без каких-либо замечаний и возражений со стороны заказчика.

Частью 1 статьи 743 ГК РФ установлено, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Статьей 756 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей. При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 настоящего Кодекса. При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет.

Инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области 09.09.2019 УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов» выданы предписания № 1444-4, 1444-5, 1444-6 на принятие региональным оператором всех предусмотренных действующим законодательством мер, направленных на обеспечение выполнения подрядной организацией обязательств по приведению в надлежащее техническое состояние отмостки домов № 7, 8, 9 на тер. Поселок Кирпичного завода № 8, срок исполнения которых – 01.11.2019.

В установленный срок выявленные нарушения не устранены.

В адрес УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов» 20.11.2019 Инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области повторно выданы предписания № 1897-2, 1897-3, 1897-4, сроком исполнения до 15.05.2020.

В связи с неисполнением в установленный срок предписаний Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области № 1444-4, 1444-5, 1444-6, истец привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 30 000 руб., что подтверждается постановлениями по делам об административном правонарушении, представленными в материалы дела.  

В соответствии с пунктом 8.3. Договора в случае обнаружения дефектов или недоделок выполненных работ в течение гарантийного срока Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с приглашением к участию в составлении соответствующего акта с указанием даты и времени.

Таким образом, заказчик обязан уведомить подрядчика о выявленных недостатках, пригласить на осмотр объекта для составления акта и согласования даты устранения выявленных недостатков.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что заказчик не известил подрядчика о выявленных недостатках, не вызывал его для составления двустороннего акта и не предлагал в добровольном порядке устранить дефекты.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, установив, что результаты работы ответчика были переданы истцу по актам приемки-сдачи выполненных работ, подписанным истцом без претензий к качеству работ, что свидетельствует об отсутствии с его стороны замечаний относительно выполненных обществом работ, отсутствие доказательств несоответствия результата работ требованиям условий контракта, технического задания, суд пришел к выводу о недоказанности нарушения обществом своих обязательств по контракту, не качественности выполненных работ. Более того, истцом не соблюден предусмотренный договором порядок фиксации дефектов.

В силу положений статьи 15 ГК РФ следует, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере; под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии со статьей 393 ГК РФ предусмотрено, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства; убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 названного Кодекса; при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

В постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» содержатся следующие разъяснения по применению статей 15 и 393 Гражданского кодекса. По делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков. Размер убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности.

Так, причиненный ущерб должен находиться в прямой причинно-следственной связи с ненадлежащим выполнением работ, что может являться основанием несения ответственности за причиненный вред подрядчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, убытки представляют собой негативные имущественные последствия, возникающие у лица вследствие нарушения его неимущественного или имущественного права. Реализация такого способа защиты, как возмещение убытков, возможна лишь при наличии общих условий гражданско-правовой ответственности: совершение причинителем вреда незаконных действий (бездействия); наличие у субъектов гражданского оборота убытков с указанием их размера; наличие причинной связи между неправомерным поведением и возникшими убытками; наличие вины лица, допустившего правонарушение. В свою очередь ответчик вправе доказывать отсутствие своей вины в причинении убытков, если в соответствии со ст. 401 ГК РФ вина является условием ответственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Применяя статью 15 ГК РФ, следует учитывать, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством (пункт 11 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

По делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ) Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности.

Поскольку истцом не доказана вина ответчика в причинении убытков, а также не приведены надлежащие доказательства, обосновывающие данную позицию, суд полагает требования истца не подлежащими удовлетворению. 

Согласно статье 168 АПК РФ при принятии решения суд решает вопросы о распределении судебных расходов. 

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, производится судом в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                          Е.С. Бударина