ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-16050/2021

г. Москва                                                                                             Дело № А40-178261/20

«31» мая 2021 г.             

Резолютивная часть постановления объявлена «25» мая 2021 г.

Постановление изготовлено в полном объеме «31» мая 2021 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи В.И. Тетюка

Судей: Е.В. Бодровой, Е.Е. Кузнецовой

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «ЛИДЕР»

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 февраля 2021 года по делу № А40-178261/20

по иску ООО «ФИРМА ТАМИ»

к ООО «ЛИДЕР»

о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – дов. от 01.09.2020

от ответчика: ФИО3 – дов. от 21.01.2021                  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА ТАМИ» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (далее – ответчик) о взыскании суммы долга в размере 11 742 094,91 руб. по контракту от 15.11.2018, суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 63 535,99 руб. за период с 01.10.2019 по 31.10.2019.

Судом в порядке ст. 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для совместного рассмотрения с первоначальным, был принят встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» к Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма ТАМИ» о взыскании генподрядных услуг в размере 2 579 266,08 руб., неустойки за просрочку по оплате генподрядных услуг в размере 1 353 103,48 руб., штрафа за непредоставление исполнительной документации и отчетов в размере 2 047 041,98 руб., всего 5 979 411,54 руб., об обязании представить исполнительную документацию (с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением суда от 25.02.2021г. взысканы с Общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ФИРМА ТАМИ» задолженность в размере 11 742 094,91 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 63 535,99 руб., госпошлина в размере 82 028 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 70 000 руб.

В остальной части иска первоначального иска отказано.

Взысканы с Общества с ограниченной ответственностью «ФИРМА ТАМИ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» задолженность в размере 2 579 266,08 руб., госпошлина в размере 25 405,68 руб.

В остальной части встречного иска отказано.

Произведен зачет, в результате которого взысканы с Общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ФИРМА ТАМИ» задолженность в размере 9 162 828,86 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 63 535,99 руб., госпошлина в размере 56 622,32 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 70 000 руб.

ООО «ЛИДЕР», не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным и необоснованным, принятым при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, при недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными, при несоответствии выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела, с неправильным применением норм материального и процессуального права.

В своей жалобе заявитель указывает на то, что истец выполнил работы на сумму, не превышающую размер перечисленных ему ответчиком денежных средств.

Также заявитель жалобы указывает на то, что истцом не передана ответчику исполнительная документация по выполненным работам.  

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить полностью, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении первоначального иска полностью, об удовлетворении встречного иска в полном объеме.

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддерживает в полном объеме.

Истец с доводами жалобы не согласен, решение суда считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Дело рассмотрено Девятым арбитражным апелляционным судом в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

Апелляционный суд, изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, проверив доводы жалобы и возражений по ней, пришел к выводу, что решение суда первой инстанции подлежит изменению.

Как следует из материалов дела, между Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма ТАМИ» (субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (подрядчик) 15.11.2018 заключен Контракт №181918737854255416000000/1СП (далее – контракт) на завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство жилого дома № 2 из 5 (пяти) жилых домов на территории Центра специального назначения по адресу: Московская область, н.п. Кубинка-2, военный городок № 120, в/ч 01355».

Контракт заключен в целях реализации государственного оборонного заказа в рамках договорных отношений между ООО «ЛИДЕР» и ФГУП «ГВСУ по Специальным объектам».

Цена контракта составляет 64 704 198 руб. (п. 3.1 контракта в редакции дополнительного соглашения от 23.04.2019 № 6).

Дата начала работ – дата вступления контракта в силу (п. 5.1 контракта).

Дата окончания работ:

- выполнение строительно-монтажных работ – 30.11.2018;

- подписание итогового акта приемки выполненных работ – 20.02.2019. 

Как указал истец, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-339411/19-116-2611 от 12.08.2020, установлено, что строительно-монтажные работы и услуги по вводу домов № 2 и № 3 в эксплуатацию и их оформлению в собственность Российской Федерации выполнены истцом - ООО «Фирма ТАМИ», в полном объеме.

В силу ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному  делу, не доказываются вновь при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Как усматривается из материалов дела, ответчик перечислил истцу за выполненные строительно-монтажные работы аванс в размере 52 962 103,09 руб.

Согласно пояснениям истца, задолженность ответчика перед истцом составляет 14 107 123 руб. Истцом были переданы Заказчику на генподрядное выполнение по домам № 2 и 3 (КС-2, КС-3, КС-6а, КС-14 между Заказчиком и Генподрядчиком), исполнительная, проектная и эксплуатационная документация всем заинтересованным организациям, что обеспечило сдачу дома Государственной приемочной комиссии и его надлежащую эксплуатацию.

Заказчик в составе Государственной приемной комиссии принял по Акту приемки законченного объекта строительства дом № 2 без замечаний и возражений.

Поскольку оплата задолженности со стороны ответчика не произведена, истец 28.05.2020 обратился к ответчику с претензионным письмом № 2 исх. № 01-05/294, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

На основании изложенного истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Выслушав представителей истца и ответчика, рассмотрев материалы дела, суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

Факт использования результата работ по назначению - заселенного жильцами дома № 2 установлен Государственной приемочной комиссией с двумя представителя ответчика, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-339411/19-116-2611 по иску ответчика по данному делу к истцу.

По объекту имеется Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требования энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов № 111.06.19.11-12 от 17.06.2019, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.08.2019 № 50-50511103-1617-2019-153, Акты приемки законченного строительства объекта формы КС-14, подписанные Государственной приемочной комиссией. Дом введен в эксплуатацию и заселен жильцами.

Государственная регистрация права собственности Российской Федерации на объект недвижимости, построенный ООО «Фирма ТАМИ» произведена, объект поставлен на кадастровый учет, получена выписка из ЕГРП, технические планы.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве на первоначальный иск, оценены судом первой инстанции, признаны необоснованными и несостоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам.

В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Исходя из положений ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Суд первой инстанции посчитал факт наличия задолженности документально подтвержденным, поэтому требования в части ее взыскания удовлетворены в полном объеме.

В силу ч. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно представленному истцом расчету, размер процентов за пользование чужими денежными средствами составил 63 535,99 руб. за период с 01.10.2019 по 31.10.2019

Проверив расчет взыскиваемых процентов, суд первой инстанции посчитал его правильным, разумным, отвечающим условиям заключенного контракта и гражданского законодательства, и посчитал целесообразным взыскать c ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 63 535, 99 руб.

Кроме того истцом заявлено требование о взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 110 000 руб.

В соответствии с ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В соответствии с постановлением Пленума ВС РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле.

Истцом представлены документы, подтверждающие расходы на услуги представителя в заявленном размере.

Судом первой инстанции дана оценка имеющимся в деле доказательствам, проведен анализ действий представителя истца, размера судебных расходов, количества часов, затраченных на проведенные мероприятия. Суд посчитал заявленную сумму расходов на оплату услуг представителя несоразмерной с учетом конкретных обстоятельств дела. Принимая во внимание уровень сложности настоящего дела и продолжительность его рассмотрения, суд первой инстанции признал разумными понесенные расходы в размере 70 000 руб.

Однако апелляционный суд не может согласиться с выводом суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения требований по первоначальному иску, в связи со следующим.

Как указано выше, суд сослался в решении на судебный акт по делу № А40-339411/19-116-2611. Между тем, при рассмотрении данного дела суд не выяснял объем и стоимость выполненных работ по спорному Контракту.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.   

Из представленных в материалы настоящего дела доказательств следует, что истец фактически выполнил работы по Контракту на сумму 37 958 494 руб. 83 коп. Акты о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на иную сумму, а также доказательства их направления в адрес ответчика, истцом в материалы дела не представлены.

Согласование твердой цены в Контракте само по себе не влечет безусловной обязанности заказчика оплачивать полную изначально согласованную сторонами стоимость, независимо от объема выполненных работ, поскольку цена контракта определяется применительно к согласованному в нем объему работ.

Иной подход противоречит принципам возмездности гражданско-правовых договоров, нарушая баланс прав и интересов сторон.

Как указал ответчик, в материалы дела не представлены доказательства исполнения истцом своих обязательств по Контракту в части выполнения (исходя из единичной расценки ФЕР-2017 (Федеральная единичная расценка) (с изм. 1-4) и сметной стоимости Сметы РД 156/688-11.5-СМ ТОМ 1 следующих своих обязательств:

- Смета № 02-02, 03-10, Монтаж электроплит в размере 1 784 743,83 руб.;

- Смета № 02-02, 03-19, Монтаж лифтов в размере 1 698 800,72 руб.;

- Смета № 02-02, 03-06, изм. 1, Архитектурные решения в размере 7 412 221,32 руб.;

- Смета № 02-02, 03-09, Электромонтажные работы в размере 1 036 537,31 руб.;

- Смета № 02-02, 03-08, Отопление и вентиляция в размере 1 012 349,22 руб.;

- Смета № 02-02, 03-07, Водопровод и канализация в размере 3 261 552,36 руб.;

- Смета № 02-02, 03-14, ЭОМ и ИТП в размере 2 038 530,51 руб.;

- Смета № 02-02, 03-12, ИТП ТХ в размере 895 149,83 руб.;

- Смета № 02-02, 03-11, АТМ ИТП в размере 252 197,67 руб.;

- Смета № 02-02, 03-13, Узел учета ИТП в размере 74 645,89 руб.;

- Локальный сметный расчет (ЛСР № 1), Пусконаладочные работы по лифтам в размере 1 063 577,74 руб.;

-  Локальный сметный расчет (ЛСР № 2), Пусконаладочные работы по системам вентиляции в размере 818 282,12 руб.;

- Локальный сметный расчет (ЛСР № 3), Пусконаладочные работы по ЭМР в размере 294 526,25 руб.;

- Локальный сметный расчет (ЛСР № 4), Пусконаладочные работы ИТП в размере 2 497 359,48 руб.

Истцом данные обстоятельства не опровергнуты.

Оплате подлежат фактически выполненные работы на ту стоимость, которая указана сторонами в актах о приемке выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ и затрат.

Согласно п. 1 ст. 710 ГК РФ в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

По смыслу данной нормы, экономия подрядчика может быть связана с использованием более эффективных методов работы либо с изменением цен на материалы и оборудование, учтенных при определении цены, а не с выполнением меньшего объема работ.

Между тем, истцом не доказано наличие оснований для применения в данном случае указанной нормы. Более того, истец не ссылается в исковом заявлении на указанную норму в обоснование заявленных требований.

Согласно ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.  

В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Как указано выше, из представленных в материалы дела актов о приемке выполненных работ КС-2 следует, что истцом выполнены работы по Контракту на сумму 37 958 494 руб. 83 коп. При этом ответчик произвел оплату по Контракту в размере 52 962 109 руб. 09 коп., что превышает сумму фактически выполненных истцом работ.

В обжалуемом решении суд первой инстанции сослался на Акт КС-14, как доказательство исполнения истцом своих обязательств.

Между тем, Акт КС-14 не является документом, подтверждающим исполнение истцом своих обязательств по спорному Контракту в полном объеме. Обязательства истца указаны в предмете Контракта и включают в себя работы, которые истец должен проводить и после сдачи объекта в эксплуатацию.

Более того, приобщенный в материалы дела Акт КС-14 является предварительным Актом по приемке и вводу объекта в эксплуатацию, так как пункты данного Акта - стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации и стоимость принимаемых основных фондов - не заполнялись.

Исходя из пунктов 2.1. и 23.2.2.6. Контракта следует, что введение объекта в эксплуатацию не является подтверждением исполнения истцом всех своих обязательств.

Согласно пункту 2.1. Контракта истец обязан осуществить:

-  строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Контракта, в том числе раздела 23 Контракта;

- обеспечить Авторский надзор;

- выполнить работы (услуги), необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями Контракта.

Согласно пункту 13.13. Раздела 13 Сдача-приемка выполненных работ:

Выполнение всех обязательств Субподрядчиком (за исключением гарантийных), в том числе государственная регистрация права собственности Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта (в том числе на нежилые помещения, объекты инженерной инфраструктуры, на каждую квартиру, входящую в состав объекта (жилого многоквартирного дома)), передача выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора, на каждый объект капитального строительства, входящий в состав объекта (в том числе на нежилые помещения, объекты инженерной инфраструктуры, на каждую квартиру, входящую в состав объекта (жилого многоквартирного дома)), подтверждается Итоговым актом приемки выполненных работ, который подписывается Подрядчиком и Субподрядчиком в 4 (четырех) экземплярах. При этом Субподрядчик предоставляет Подрядчику документацию, указанную в пунктах 4-9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иную документацию, предусмотренную Контрактом.

Согласно пункту 1.1.11. Контракта:

ФИО4 акт приемки выполненных работ - документ, подтверждающий Субподрядчиком выполнение всех обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением гарантийных обязательств), в том числе государственная регистрация права собственности Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав объекта (в том числе на нежилые помещения, объекты инженерной инфраструктуры, на каждую квартиру, входящую в состав объекта (жилого многоквартирного дома)), передачи Субподрядчиком выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора, на каждый объект капитального строительства, входящий в состав объекта (в том числе на нежилые помещения, объекты инженерной инфраструктуры, на каждую квартиру, входящую в состав объекта (жилого многоквартирного дома)), и являющийся основанием для окончательного расчета за выполненные работы.

Вышеуказанное означает, что стороны в рамках Контракта согласовали порядок сдачи-приемки всех выполненных работ, который предполагает следующее:

Истец после выполнения всех работ по Контракту направляет ответчику ФИО4 акт приемки выполненных работ, а ответчик со своей стороны обязан его рассмотреть и подписать либо направить мотивированный отказ.

Данный порядок предусмотрен сторонами в Контракте и закреплен в пунктах 1.1.11, 13.13,13.14. Иной порядок сдачи Объекта в Контракте не предусмотрен.

Пунктом 13.15. Контракта предусмотрено, что после получения Итогового акта приемки выполненных работ ответчик имеет право провести проверку качества выполненных работ, в том числе путем создания приемочной комиссии.

Как указал ответчик, на данный момент в его адрес ФИО4 акт не направлялся. Истцом данное обстоятельство не опровергнуто.

При этом, пунктом 4.9. Контракта установлено, что Окончательный расчет по Контракту производится в течение 35 (тридцати пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 2 к Контракту.

Пунктом 1 ст. 711 ГК РФ предусмотрено, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Учитывая изложенное, апелляционный суд приходит к выводу, что истец не доказал правомерность и обоснованность заявленного им требования о взыскании задолженности за выполненные работы исходя из согласованной сторонами цены Контракта, в связи с чем оснований для удовлетворения данного требования не имеется.

В связи с отсутствием оснований для взыскания задолженности за выполненные работы, также не имеется оснований для удовлетворения требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму задолженности.

В части встречного искового заявления, суд первой инстанции пришел к выводу, что оно подлежит удовлетворению в части ввиду следующего.

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма ТАМИ» (субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (подрядчик) 15.11.2018 заключен Контракт № 181918737854255416000000/1СП (далее – контракт) на завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство жилого дома № 2 из 5 (пяти) жилых домов на территории Центра специального назначения по адресу: Московская область, н.п. Кубинка-2, военный городок № 120, в/ч 01355».

В соответствии с п. 4.5. Контракта Субподрядчик оплачивает Подрядчику оказанные им генподрядные услуги по Форме акта приемки оказанных генподрядных услуг в размере 7,25 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде работ, в следующем порядке:

- Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ, Акта приема-передачи оборудования по количеству и комплектности за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг. Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг.

В случае нарушения указанного срока, акт приемки оказанных генподрядных услуг считается оформленным Сторонами, а услуги Подрядчика подлежащими оплате согласно условиям Контракта.

- оплата генподрядных услуг, оказанных Подрядчиком, будет производиться Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента оплаты Подрядчиком выполненных и принятых Работ на основании подписанного Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Как установлено судом первой инстанции, истцом в материалы дела представлены подписанные в двустороннем порядке акт приемки оказанных генподрядных услуг, а также счета-фактуры от 25.12.2018 на сумму 455 001,80 руб., от 25.04.2019 на сумму 1 134 800,46 руб., от 29.10.2019 на сумму 775 308,78 руб., от 29.10.2019 на сумму 214 155,04 руб.

Таким образом, по мнению ответчика, задолженность Субподрядчика перед Подрядчиком составляет 2 579 266, 08 руб.

Подрядчик 28.09.2020 направил в адрес Субподрядчика претензию № 386-20 на сумму задолженности, которая оставлена без удовлетворения.

Доводы ответчика по встречному иску судом первой инстанции оценены и приняты во внимание.

Ввиду отсутствия в материалах дела доказательств оплаты задолженности за генподрядные услуги, суд первой инстанции посчитал требования истца в указанной части обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В данной части возражений сторонами не заявлено. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 18.3 Контракта в случае просрочки исполнения Субподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Субподрядчиком исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1% от цены Контракта, уменьшенной на стоимость фактически выполненных Работ, что подтверждается подписанным Актом о приемке выполненных работ (услуг), за каждый факт просрочки.

Согласно представленному истцом расчету, размер неустойки на сумму генподрядных услуг составил сумму в размере 1 353 103, 48 руб.

Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд первой инстанции не усмотрел оснований для его принятия ввиду следующего.

Пунктом 4.5 Контракта установлено, что оплата генподрядных услуг, оказанных Подрядчиком, будет производиться Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента оплаты Подрядчиком выполненных и принятых Работ на основании подписанного Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Как следует из положений статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (статья 431 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как указал суд в решении, с учетом тех обстоятельств, что истцом по встречному иску в полном объеме не оплачены выполненные и принятые им же работы по Контракту, суд не принимает представленный расчет неустойки и не усматривает оснований для удовлетворения требований в указанной части.

Однако, учитывая установленные выше апелляционным судом обстоятельства, в частности, отсутствие в материалах дела надлежащих доказательств наличия у ответчика задолженности за выполненные работы, апелляционный суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования по встречному иску о взыскании неустойки за просрочку оплаты генподрядных услуг. При этом ответчиком произведен перерасчет неустойки, с учетом установленного Контрактом срока оплаты генподрядных услуг, согласно которому размер неустойки составляет 1 345 595 руб. 88 коп. Данный расчет проверен апелляционным судом.

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ в данном случае не имеется, поскольку истцом не представлено доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. 

Учитывая изложенное, требование по встречному иску о взыскании неустойки за просрочку оплаты генподрядных услуг подлежит удовлетворению в размере 1 345 595 руб. 88 коп.             

Ответчиком также было заявлено требование о взыскании штрафа за непредставление исполнительной документации в размере 647 041, 98 руб.

В соответствии с п. 18.7 Контракта, за несвоевременное предоставление Субподрядчиком исполнительной документации Подрядчику, в том числе при досрочном расторжении настоящего Контракта, Субподрядчик обязан уплатить неустойку (штраф) Подрядчику в размере, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042.

В соответствии с подпунктом в) пункта 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 настоящих Правил): 1 (один) процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), т.е. размер штрафа составляет 647 041,98 руб.

В соответствии с пунктами 8.3, 8.3.1 Контракта Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику, ежемесячные отчеты не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, ежемесячные отчеты об остатке денежных средств на отдельном расчетном счете на первое число текущего месяца и отчет о ходе отработки полученного аванса за истекший месяц с приложением подтверждающих документов. Вместе с отчетом в обязательном порядке Субподрядчик направляет в адрес Подрядчика копии платежных поручений, копии заключенных договоров на поставку материалов, оборудования, субподрядные договоры, договоры на оказание услуг строительных машин и механизмов, а также прочие договоры, заключённые Субподрядчиком с третьими лицами в связи выполнением обязательств по настоящему Контракту.

В соответствии с п. 18.9 Контракта в случае нарушения Субподрядчиком требований о предоставлении отчетов, указанных в пункте 8.3. Контракта, и включенных в него подпунктах, в пункте 8.4 Контракта, предоставления неполных, недостоверных отчетов, не приложения к отчетам необходимых документов, а равно нарушения сроков предоставления отчётов, Подрядчик вправе потребовать, а Субподрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 рублей за каждый факт нарушения.

Общая сумма штрафный санкций по вышеуказанным пунктам Контракта составила сумму в размере 2 047 041, 98 руб.

Как указал суд в решении, в рассматриваемом случае действительным экономическим смыслом установления штрафов являлась защита прав подрядчика от несвоевременных действий субподрядчика по документальному сопровождению хода выполнения работ, которые могли бы нарушить законные интересы истца, в том числе связанные с правом на контроль над ходом выполнения работ, а также своевременным ведением собственной бухгалтерии.

Однако вопреки доводам истца по встречному иску, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-339411/19-116-2611 от 12.08.2020 установлено, что в подтверждение выполнения обязательств по контрактам ответчик представил переписку с истцом, свидетельствующую о передаче истцу актов по форме КС-2 и КС-3, а также КС-14 по дому № 2 и дому № 3, исполнительную документацию, ведомости исполнительно-технической документации.

Акты передачи исполнительной документации, представленные ответчиком по встречному иску в Сводном реестре подтверждают передачу заинтересованным организациям по принадлежности:

-  Ответчику - ООО «Лидер»;

- ТУ ФКП «Управление заказчика капитального строительства» Министерства обороны   Российской Федерации;

- Управляющей компании - УК ООО «Альфа ЖКХ»;

- В/Ч 01355;

- ЖКС № 4 ФГБУ ЦЖКУ» Министерства обороны РФ.

Государственный Заказчик работы принял Актом государственной приемочной комиссией с двумя членами истца по встречному иску.

Также суд указал в решении, что не предоставление отчетной и исполнительной документации само по себе не является основанием не принимать и не оплачивать фактически выполненную работу, если без соответствующей документации использование результата работы по назначению возможно.

Управление государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны РФ выдало Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов № 111.06.19.11-12 от 17.06.2019.

Департамент строительства Министерства обороны РФ 21.08.2019 выдал разрешение на ввод объекта № 2 в эксплуатацию № 50-50511103-1617-2019-153.

Строительно-монтажные работы и услуги по вводу дома № 2 в эксплуатацию, постановке на кадастровый учет и оформлению в собственность Российской Федерации выполнены, дом заселен жильцами и эксплуатируется управляющей компанией.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения требований в данной части.

Кроме того, ООО «ЛИДЕР» заявлено требование об обязании передать исполнительную документацию по контракту.

Рассмотрев указанное требование, суд первой инстанции не усмотрел оснований для его удовлетворения в силу следующего.

Обязательство ООО «ФИРМА ТАМИ» по окончанию выполнения работ передать ООО «ЛИДЕР» исполнительную документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе + 1 (один) экземпляр в электронном виде, а также требования по составу и содержанию к исполнительной документации указаны в пункте 23.2.2.6 раздела № 23 Контракта.

Полный перечень исполнительной документации поименован в Разделе № 24 Контракта, а именно:

- перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, с указанием видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии у этих организаций соответствующих лицензий;

- комплект рабочих чертежей на строительство, предъявляемого к приемке объекта, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, выполненным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- исполнительная документация в составе, установленном требованиями строительных норм и правил на соответствующие здания, сооружения и конструкции, на исполнительную геодезическую документацию, а также условиями Контракта;

- сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие документы, удостоверяющие качество и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве Работ;

- ведомость передаваемого и смонтированного оборудования;

- акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов;

- акты индивидуальных испытаний и комплексного опробования смонтированного оборудования;

- акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, тепло-, газоснабжения, дренажных устройств, а также испытаний сварных соединений;

- акты выполнения уплотнений (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом;

- акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

- акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации, автоматизации и др.;

- акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывную, пожарную и радиационную безопасность, молниезащиту, системы противопожарной системы;

- акты испытаний прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;

- журналы производства работ и авторского надзора, материалы обследований и проверок   в   процессе   строительства   федеральными   органами   исполнительной   власти Российской Федерации (территориальными органами);

- акты и протоколы по результатам проверок, проведенных в процессе строительства федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации;

- технические паспорта на установленное оборудование, поставляемое Субподрядчиком.

В соответствии с п. 13.1.2 контракта, субподрядчик предоставляет подрядчику первичные учетные документы, а также Исполнительную документацию на выполненные работы, оформленные должным образом, с сопроводительным письмом в срок не позднее 23 (двадцать третьего) числа текущего (отчетного) месяца.

Пунктом 11.1 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, после окончания строительства объекта капитального строительства лицо, осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта.

На основании вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к выводу о необоснованности заявленного требования о передаче исполнительной документации, поскольку, как усматривается из материалов дела, объект введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.08.2019 № 50-50511103-1617-2019-153), исполнительная документация передана заказчику, что подтверждается представленными в материалы дела документами.

Кроме того, суд отметил, что ввод объекта в эксплуатацию невозможен без передачи исполнительной документации.

Апелляционный суд соглашается с выводами суда в части требований по встречному иску о взыскании штрафов и обязании передать исполнительную документацию, доводы жалобы ответчика эти выводы не опровергают и не являются основанием для удовлетворения указанных требований.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что решение суда первой инстанции подлежит изменению.

Расходы по оплате госпошлины подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 110, 266, 267, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 февраля 2021 года по делу № А40-178261/20 изменить.

В удовлетворении первоначального иска отказать в полном объеме.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ФИРМА ТАМИ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» задолженность в размере 2 579 266 руб. 08 коп., неустойку в размере 1 345 595 руб. 88 коп., расходы по оплате госпошлины по встречному иску в размере 34 721 руб., расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобе в размере 2 596 руб. 13 коп.

В остальной части встречного иска отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий:          В.И. Тетюк

Судьи:          Е.В. Бодрова

          Е.Е. Кузнецова

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.