Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

http://kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-15427/2023

«20»

сентября

2024 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«09» 

сентября

2024 года

Решение изготовлено в полном объеме   

 «20»

 сентября

2024 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «СЕГМЕНТ» к ООО «УШАКОВСКИЕ ВЕРФИ» о взыскании  задолженности в сумме 1 052 396,4 рублей

при участии в заседании:

от истца: ФИО2, ФИО3 по доверенностям

от ответчика: ФИО4 по доверенности 

установил. 

Общество с ограниченной ответственностью «СЕГМЕНТ» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «УШАКОВСКИЕ ВЕРФИ» о взыскании задолженности за услуги хранения в сумме 1 052 395,4 рулей.

В судебном заседании 02.09.2024 года истец уточнил требования. Просил взыскать задолженность за услуги хранения в сумме 462 726 рублей. Уточненные требования приняты судом к рассмотрению.    

Судом установлено.

Между сторонами был заключен договор от 10.08.2020 года № 121.

По условиям договора ООО «СЕГМЕНТ» (подрядчик)  обязалось выполнить работы по строительству составных частей (секций)  №№ 6, 9  пассажирского парома, а ООО «УШАКОВСКИЕ ВЕРФИ» (заказчик) обязалось работы принять и оплатить.

 В соответствии с пунктом 1.7 договора работы выполняются на территории подрядчика.

В соответствии с пунктом 5.2.16 договора заказчик обязался за свой счет организовать вывоз секций с территории подрядчика в срок не позднее 3 рабочих дней с даты подписания актов сдачи-приемки работ.

В соответствии с пунктом 8.3 договора в случае нарушения сроков вывоза секций по положениям пункта 5.2.16 договора заказчик обязался оплатить стоимость хранения на основании требования об оплате по расценкам подрядчика за каждые сутки. Оплата производится в течение 7 календарных дней со дня направления подрядчиком счета на оплату.

Акт № 1 о выполнении работ по строительству блок-секции № 9 подписан сторонами 21.09.2020 года. 

Акт № 2 о выполнении работ по строительству блок-секции № 6 подписан сторонами 01.12.2020 года.

Блок-секции были вывезены заказчиком 11.09.2021 года.

Согласно первоначальному расчету подрядчика услуги хранения блок-секции № 9 за период с 25.09.2020 года по 10.09.2021 года составили 265 350 рублей.

В обоснование расчета подрядчик представил договоры аренды производственных  помещений. При расчете была учтена вся площадь арендованных помещений 80 кв.м., затем 1102 кв.м., 310 кв.м. и ставка арендной платы 122 рубля за 1 кв.м. в месяц.

Согласно первоначальному расчету подрядчика услуги хранения блок-секции № 6 за период с 05.12.2020 года по 10.09.2021 года составили 787 046,4 рублей.

В обоснование расчета подрядчик представил договор аренды производственных  помещений. При расчете была учтена вся площадь арендованных помещений 792 кв.м. и ставка арендной платы 122 рубля за 1 кв.м. в месяц.

Заказчик требования по размеру не признал, пояснив, что площадь блок-секции № 9 составляет 45 кв.м., а блок-секции № 6 – 74,88 кв.м.; для хранения секций таких размеров не требуются площади 1102 кв.м. и 792 кв.м., арендованные площади подрядчик использовал в своих производственных целях, поскольку оплачивал электроэнергию; поскольку стороны не согласовали стоимость услуг по хранению просил назначить по делу экспертизу с целью определения рыночной стоимости услуг хранения конструкций таких размеров на производственных площадях города.

Стороны планировали решить спор мирным путем, но соглашения не достигли.

По уточненному расчету услуги хранения блок-секции № 9 за период с 25.09.2020 года по 10.09.2021 года составили 210 000 рублей.

При расчете была учтена площадь арендованных помещений 80 кв.м., ставка арендной платы 225 рублей за 1 кв.м. в месяц.

По уточненному расчету подрядчика услуги хранения блок-секции № 6 за период с 05.12.2020 года по 10.09.2021 года составили 252 845,9 рублей.

При расчете была учтена площадь арендованных помещений 120,06 кв.м. и ставка арендной платы 225 рублей за 1 кв.м. в месяц.

Заказчик требования по размеру не признал, пояснив, что материалами дела подрядчик подтвердил другую ставку арендной платы, в отношении площадей хранения конструкций возражений представлено не было.

Суд полагает, что требования истца подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям.

При заключении договора заказчик принял на себя обязательства по оплате услуг подрядчика по хранению изготовленных блок-секций в случае нарушения сроков их вывозу.

В договоре стороны не согласовали тариф по хранению.

Материалами дела подтверждено, что сроки вывоза блок-секций были нарушены. 

Подрядчик при определении стоимости  услуг по хранению учел  затраты по аренде площади производственных площадей, необходимых  для хранения блок-секций 80 кв.м. и 120,06 кв.м.

Такой подход с учетом площадей блок-секций 45 кв.м., 74,88 кв.м. не был оспорен  заказчиком.

Подрядчик представил в материалы дела документы, согласно которым арендная плата за 1 кв.м. производственных площадей на которых  изготавливались и хранились блок-секции  составляла 122 рублей  в месяц.

Поскольку эта ставка подтверждена первичными документами, именно она  должна быть учтена в расчете стоимости хранения блок-секций.

Стоимость хранения блок-секций на площадях  80 кв.м. и 120,06 кв.м. за заявленный подрядчиком период с учетом указанной выше ставки  составит 250 900,32 рублей.

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УШАКОВСКИЕ ВЕРФИ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СЕГМЕНТ» за услуги хранения 250 900,32 рублей, расходы по госпошлине в сумме 6645 рублей. 

Во взыскании остальной суммы отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СЕГМЕНТ» из Федерального бюджета госпошлину в суме 11 269 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                    О.Н.Шкутко