АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-28129/20

г. Уфа

09 апреля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 09.04.2021

Полный текст решения изготовлен 09.04.2021

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола судебного заседания        секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "УССМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "АльянсСпецСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании долга в размере 4 345 120 руб. 68 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 70 563 руб. 58 коп.

и встречное исковое заявление 

Общества с ограниченной ответственностью "АльянсСпецСтрой" 

к  Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "УССМ" 

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «БРИГ»

о взыскании долга по договору № 6 от 20.05.2019 г. в размере 5 816 504 руб. 36 коп.,  по договору уступки № 06-11/20 от 06.11.2020 г., процентов в размере 319 819 руб. 78 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 01.02.2021 г.

от ответчика – представитель ФИО3 по доверенности от 23.03.2021 г.

от третьего лица – представитель ФИО3 по доверенности от 15.12.2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "УССМ" /далее – истец, ООО СК "УССМ" / обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "АльянсСпецСтрой"/далее – ответчик, ООО "АльянсСпецСтрой"/ о взыскании долга в размере     4 415 684 руб. 26 коп. по договору № 4 П/2019 от 20.12.2019 г., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.02.2020 г. по 12.11.2020 г. в размере 70 563 руб. 58 коп. 

Общество с ограниченной ответственностью "АльянсСпецСтрой"  /далее истец по встречному иску/  обратилось Арбитражный суд Республики Башкортостан  с встречным исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "УССМ" /далее – ответчик по встречному иску/ о взыскании долга  в размере 5 816 504 руб. 36 коп. по договору  № 6 от 20.05.2019 г., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.11.2020 г. по 07.04.2021 г. в размере 31 224 руб. 60 коп., уступленного по договору № 06-11/20 от 06.11.2020 г. согласно уточнению от 05.04.2021 г. 

Судом уточнение принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено по уточненным исковым требованиям.

Определением суда от 15.02.2021 г. года встречный иск принят к рассмотрению совместно с первоначальным иском.

Определением суда от 15.02.2021 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «БРИГ» /далее третье лицо, ООО «БРИГ»/.

От ответчика поступил отзыв, в котором общество не согласилось с исковыми требованиями, сообщило о зачете. 

От истца поступили возражения, в которых общество не согласилось с доводами ответчика, указал, что уведомление об уступке права требования и зачете не получал.

От третьего лица отзыв не поступал.

В прениях представитель Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "УССМ" исковые требования поддержал.

В прениях представитель Общества с ограниченной ответственностью "АльянсСпецСтрой" встречные исковые требования поддержал.

Представители ответчика в судебное заседание не явились,  надлежащим образом извещены о месте и времени судебного заседания по последнему известному суду адресу,  в силу ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на интернет-сайте, дело рассмотрено в отсутствие ответчика в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства и материалы дела, при участии представителя истца, суд

УСТАНОВИЛ:

Между ответчиком  (подрядчик) и истцом (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 4 П/2019 от 20.12.2019 г. (приложение к иску), в соответствии с которым  Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Подрядчика работы на объекте - «Автосалон складской техники в с. Зубово в административных границах сельского поселения Зубовский сельсовет MP Уфимский район РБ» (далее Объект/Жилой дом), а Подрядчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их на условиях предусмотренных настоящим договором (далее Работы).

В силу 1.2.договора № 4 П/2019 от 20.12.2019 г. виды работ, стоимость, объем, сроки выполнения конкретных видов работ указанных в п. 1.1 договора согласовываются сторонами до начала их выполнения Субподрядчиком в приложениях к настоящему договору (дополнительные соглашения, локально-сметные расчеты, ведомости договорной цены и прочие подобные документы). Изменение стоимости и объемов работ возможна только после подписания соответствующего дополнительного соглашения. После подписания приложений в соответствии с настоящим пунктом, Субподрядчик не вправе в одностороннем порядке требовать изменения видом, объемов и стоимости работ.

На основании п. 1.3.договора № 4 П/2019 от 20.12.2019 г.  если иные сроки выполнения Работ по договору не указаны в приложениях заключаемых в соответствии п. 1.2 договора, то Субподрядчик обязан выполнить полностью все Работы по договору в следующие сроки:

-начало: дата подписания Договора;

-окончание: согласно графику производства работ. Работы будут выполняться согласно графику производства работ.

В соответствии с п. 1.4. договора № 4 П/2019 от 20.12.2019 г. Субподрядчик оплачивает Подрядчику услуги за осуществление им функций генерального подряда. Стоимость услуг по осуществлению функций генерального подряда определена соглашением сторон и составляет 2,5 % от общей стоимости выполненных Субподрядчиком работ.

Согласно п. 3.1 договора № 4 П/2019 от 20.12.2019 г.  Субподрядчик до 19 числа каждого календарного месяца, представляет Подрядчику акты выполненных работ формы КС-2 (далее КС-2) и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (далее КС-3) на фактически выполненные объемы работ.

Исходя из п. 3.2договора № 4 П/2019 от 20.12.2019 г. одновременно с передачей КС-2 и КС-3 указанных в п. 3.1 Субподрядчик обязан предоставить:

-полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной всем участниками строительного процесса исполнительной документации на работы указанные в соответствующих КС-2, КС-3 предусмотренные законодательством, нормативными требования для соответствующих видов работ и договором. Исполнительная документация предоставляется на бумажном носителе в 3-х подлинных экземплярах, а также в электронном виде в формате WORD;

-счет-фактуру оформленную в соответствии с законодательством.

В п. 3.3 договора № 4 П/2019 от 20.12.2019 г. Подрядчик изучает представленные Субподрядчиком документы указанные в п. 3.1 и п. 3.2 и в течение 10 дней и передает Субподрядчику его подписанные экземпляры, или в тот же срок предоставляет мотивированное возражение от их подписания.

В силу п. 4.2.1-4.2.3 договора № 4 П/2019 от 20.12.2019 г. оплата за фактически выполненные Субподрядчиком работы Подрядчик производит в следующие сроки:

- 95 % от стоимости выполненных работ указанных в соответствующих КС-2, КС-3 оплачиваются в течение 30 дней с даты их подписания сторонами, при условии предоставления Субподрядчиком документов указанных в п. 3.2., а также устранения всех выявленных недостатков в Работе Субподрядчика (при наличии недостатков). Если ранее был выплачен аванс, то платеж по настоящему пункту производится за вычетом произведенного аванса.

- 2,5 % от стоимости выполненных работ указанных в соответствующих КС-2, КС-3 Подрядчик удерживает в качестве оплаты услуг за осуществление им функций генерального подряда. Если Субподрядчик оплатил Подрядчику услуги за осуществление функций генерального подряда, то удержание в соответствии с настоящим пунктом не производится.

- оставшиеся 2,5 % от стоимости выполненных работ указанных в соответствующих КС-2, КС-3 (от общей стоимости выполненных работ по договору) оплачивается в течение 30 дней с даты истечения гарантийного срока по договору. Указанная сумма являются гарантией исполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору, в том числе в Гарантийный период. Стороны признают, что Отложенный платеж не является удержанием имущества Субподрядчика, а представляют собой согласованный сторонами способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со ст.329 Гражданского Кодекса РФ. На отложенный платеж на весь период его нахождения у Подрядчика проценты начислению и выплате не подлежат.

В силу пункта 1 и пункта 2 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключённым, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В договоре стороны согласовали все существенные условия, в частности его предмет, сроки, стоимость работ, порядок принятия выполненных работ и порядок их оплаты, что позволяет сделать вывод о заключенности данного договора (пункт 1.1 и пункт 2 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Сторонами не заявлено о несогласованности предмета договора, о различном понимании сроков выполнения работ.

В силу положений ст. ст. 702, 711, 746, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном порядке является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Правила приемки объекта строительства (либо отдельных его этапов) предусмотрены в ст. 753 ГК РФ. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

На основании положений статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с условиями пунктов 3.5, 3.6. договора № 4 П/2019 от 20.12.2019 г., истец как субподрядчик выполнил и сдал результат работ ответчику, которое было оформлено следующими документами:

В январе 2020 года на общую сумму 2 366 000,02 руб. в том числе НДС 20% - 394 333,34 руб.:

-Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 1 от 20.01.2020 г. на сумму 1 989,75 руб.

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 2 от 20.01.2020 г. на сумму 62 128,50 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 3 от 20.01.2020 г. на сумму 282 819,91 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ№4 от 20.01.2020 г. на сумму 82 955,3 1 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 5 от 20.01.2020 г. на сумму 88 534,62 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ №6 от 20.01.2020 г. на сумму 7 349,69 руб. 

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.01.2020 г на сумму 2 366 000,02 руб. в том числе НДС 20% - 394 333,34 руб.

В июле 2020 года на общую сумму 2 172 934,10 руб. в том числе НДС 20% - 362 155,68 руб.:

-Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 3 от 30.07.2020 г. на сумму 44 161.91 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работе № 4 от 30.07.2020 г. на сумму 138,37 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 5 от 30.07.2020 г. на сумму 10 039,13 руб.

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 6 от 30.07.2020 г. на сумму 4 157,56 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 7 от 30.07.2020 г. на сумму 34 239,74 руб.

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 8 от 30.07.2020 г. на сумму 1 336,02 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ №9 от 30.07.2020 г. на сумму 6 822,27 руб.

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 10 от 30.07.2020 г на сумму 170 331,05 руб.

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 11 от 30.07.2020 г на сумму 103 270,69 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 13 от 30.07.2020. на сумму 22 979,20 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 14 от 30.07.2020 на сумму 10 027,3 7 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 18 от 30.07.2020 на сумму 32 908,85 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 19 от 30.07.2020 г. на сумму 8 762,82 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 26 от 30.07.2020 на сумму 24 798,19 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 29 от 30.07.2020 на сумму 5 761,62 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 30 от 30.07.2020 на сумму 39 738,61 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ№31 от 30.07.2020г. на сумму 490,78 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 32 от 30.07.2020 г. на сумму 8 079,14 руб. 

- Акт по форме КС-2о приемке выполненных работ №33 от 30.07.2020 на сумму 37 382,49 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 34/1 от 30.07.2020 на сумму 569,55 руб. 

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.07.2020 г., на сумму 2 172 934, 10 руб. в том числе НДС 20% - 362.155,68 руб.

В августе 2020 года на общую сумму 1 087 508,71 руб. в том числе НДС 20% - 181.251,45 руб.:

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 1 от 31.08.2020 г. на сумму 20 836,25 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 10 от 31.08.2020 г. на сумму 2 482,5 2 руб. 

-Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ№ 12 от 31.08.2020 г. на сумму 29 052,96 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 13 от 31.08.2020 г. на сумму 7 763,29 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 14 от 31.08.2020 г. на сумму 5 473,78 руб.

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 15 от 3 1.08.2020 г. на сумму 4 620,8 1 руб. 

Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 16 от 31.08.2020 г. на сумму 27 089,65 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 17 от 31.08.2020 г. на сумму 2 419,67 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ №20 от 31.08.2020 г. на сумму 5 997,80 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ№ 21 от 31.08.2020 на сумму 12 420,71 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ№22 от 31.08.2020г. на сумму 1 340,97 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ№ 23 от 31.08.2020 на сумму 38 114,57 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 24 от 31.08.2020 на сумму 16 954,61 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 25 от 31.08.2020 г. на сумму 1 735,17 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ№26 от 3 1.08.2020 на сумму 19 629,58 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ №27 от 31.08.2020 на сумму 29 618,54 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ№28 от 31.08.2020 г. на сумму 8 327,10 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ №31 от 31.08.2020 на сумму 42 923,66 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 32 от 31.08.2020 г. на сумму 6 815,52 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 33 от 31.08.2020 г. на сумму 127,18 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 35 от 31.08.2020 г. на сумму 5 727,07 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 36 от 3 1.08.2020 г. на сумму 6 682,98 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ № 37 от 3 1.08.2020 г. на сумму 3 543,17 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ№38 от 3 1.08.2020 на сумму 10 914,86 руб. 

- Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ№40 от 31.08.2020 на сумму 16 576,98 руб.

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат N° 3 от 31.08.2020 г., на сумму 1 087 508,71 руб. в том числе НДС 20% - 181.251,45 руб.(приложение к иску).

Всего выполненных работ по двусторонние подписанным актам КС-2 на сумму 5 626 442,83 руб.

Со стороны Ответчика была произведена частичная оплата платежными поручениями:

- платежное поручение № 10 от 03.03.2020 г. на сумму 245 500,00 руб.;

- платежное поручение № 14 от 03.03.2020 г. на сумму 254 500,00 руб.;

- платежное поручение № 20 от 10.03.2020 г. на сумму 256 800,00 руб.;

- платежное поручение № 22 от 10.03.2020 г. на сумму 243 200,00 руб.(приложение к иску); Итого оплачена сумма в размере 1 000 000,00 руб.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия № 106 от 22.10.2020 г. (приложение к  иску), оставлена без удовлетворения, что послужило основаниям для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

 Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При оценке представленных в деле доказательств, суд руководствуется также положениями ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований и возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Стороны, согласно ст.ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными процессуальными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе в части непредставления доказательств в обоснование своей правовой позиции.

Ответчиком факт выполнения работ истцом не оспорен, акты выполненных работ подписаны без замечаний, доказательств оплаты не представлено.

На основании вышеизложенного, требования ситца о взыскании долга в размере   4 345 120 руб. 68 коп. подлежат удовлетворению.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своей обязанности по оплате долга истцом заявлено требование о взыскании   процентов за пользование чужими денежными средствами.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации  за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

 В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации", вступившей в силу с 01.06.2015, размер процентов определяется существующими в месте нахождения кредитора опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.

Исходя из п. 6.1договора № 4 П/2019 от 20.12.2019 г. ответственность сторон по настоящему договору регулируется нормами действующего законодательства РФ и договором.

Согласно представленному истцом расчету сумма процентов за пользование чужими денежным средствами за период с 20.02.2020 г. по 12.11.2020 г. составила 70 563 руб. 58 коп.

Ответчик возражений, контррасчета не представил.

Судом расчет процентов истца проверен, признан арифметически верным.

Принимая во внимание требования приведенных норм материального и процессуального права, учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд пришел к выводу, что требования истца о взыскании процентов за пользование чужим денежными средствами подлежат удовлетворению.

Между ответчиком  (подрядчик) и третьим лицом (генподрядчик) был заключен договор подряда № 6 от 20.05.2019 г.  (приложение к встречному иску), в соответствии с которым  Подрядчик обязуется выполнить но заданию Генподрядчика работы па объекте - «Автосалон складской техники в с.Зубово в административных границах СП Зубовский сельсовет MP Уфимский район РБ», а Генподрядчик обязуется принять качественно выполненные работы п оплатить их па условиях предусмотренных настоящим договором (далее Работы).

В силу п. 1.2. договора № 6 от 20.05.2019 г. виды работ, стоимость, объем, сроки выполнения конкретных видов работ указанных в п. 1.1 договора согласовываются сторонами до начала их выполнения Подрядчиком в приложениях к настоящему договору (дополнительные соглашения, локально-сметные расчеты, ведомости договорной цепы и прочие подобные документы). Изменение стоимости и объемов работ возможна только после подписания соответствующего дополнительного соглашения. После подписания приложений в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик не вправе в одностороннем порядке требовать изменения видом, объемов и стоимости работ.

На основании п. 1.3.договора № 6 от 20.05.2019 г. если иные сроки выполнения Работ по договору не указаны в приложениях заключаемых в соответствии и. 1.2 договора, то Подрядчик обязан выполнить полностью все Работы по договору в следующие сроки:

-начало: дата подписания Договора;

-окончание: 31.12.2019г.

В соответствии с п. 1.4. договора № 6 от 20.05.2019 г.  Подрядчик оплачивает Генподрядчику услуги за осуществление им функций генерального подряда. Стоимость услуг по осуществлению функций генерального подряда определена соглашением сторон и составляет 2,5 % от общей стоимости выполненных Подрядчиком работ.

Исходя из п 3.1. договора № 6 от 20.05.2019 г. Подрядчик до 25 числа каждого календарного месяца, представляет Генподрядчику акты выполненных работ формы КС-2 (далее КС-2) и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (далее КС-3) на фактически выполненные объемы работ.

Согласно п. 3.2договора № 6 от 20.05.2019 г. одновременно с передачей КС-2 и КС-3 указанных в п. 3.1 Подрядчик обязан предоставить:

-полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной всем участниками строительного процесса исполнительной документации па работы указанные в соответствующих КС-2, КС-3 предусмотренные законодательством, нормативными требования для соответствующих видов работ и договором. Исполнительная документация предоставляется па бумажном носителе в 3-х подлинных экземплярах, а также в электронном виде в формате WORD, PDF, AutoCAD;

-счет-факту оформленную в соответствии с законодательством.

Подрядчик вправе запросить иные документы.

В соответствии  с п. 3.3 договора № 6 от 20.05.2019 г.  Генподрядчик изучает представленные Подрядчиком документы указанные в п. 3.1 и п. 3.2 и в течение 10 дней и передаст Подрядчику его подписанные экземпляры, или в тот же срок предоставляет мотивированное возражение от их подписания.

В силу п. 4.1 договора № 6 от 20.05.2019 г. Генподрядчик вправе выплатить аванс. Размер аванса определяется дополнительным соглашением сторон. При выплате аванса, Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика предоставить счет-фактуру на аванс. Срок предоставления счет-фактуры в соответствии с настоящим пунктом три дня с момента выставления требования.

Исходя из п 4.2.1-4.2.3 договора № 6 от 20.05.2019 г. оплата за фактически выполненные Подрядчиком работы Генподрядчик производит в следующие сроки:

- 95 % от стоимости выполненных работ' указанных в соответствующих КС-2, КС-3 оплачиваются в течение 30 дней с даты их подписания сторонами, при условии предоставления Подрядчиком документов указанных в п. 3.2., а также устранения всех выявленных недостатков в Работе Подрядчика (при наличии недостатков). Если раннее был выплачен аванс, то платеж по настоящему пункту производится за вычетом произведенного аванса.

-2,5 % от стоимости выполненных работ укачанных в соответствующих КС-2, КС-3 Генподрядчик удерживает в качестве оплаты услуг за осуществление им функций генерального подряда. Если Подрядчик оплатил Генподрядчику услуги за осуществление функций генерального подряда, то удержание в соответствии с настоящим пунктом не производится.

- оставшиеся 2,5 % от стоимости выполненных работ указанных в соответствующих КС-2, КС-3 (от общей стоимости выполненных работ по договору) оплачивается в течение 30 дней с даты ввода объекта в эксплуатацию но договору.

ООО «БРИГ» оплатило ООО СК «УССМ» 7 200 000 руб., что подтверждается:

- платежное поручение № 2078 от 20.09.2019 г. на сумму 1 000 000 руб.;

- платежное поручение № 2393 от 10.10.2019 г. на сумму 500 000 руб.;

- платежное поручение № 2590 от 25.10.2019 г. на сумму 1 000 000 руб.;

- платежное поручение № 2693 от 05.11.2019 г. на сумму 500 000 руб.;

- платежное поручение № 68 от 06.12.2019 г. на сумму 350 000 руб.;

- платежное поручение № 69 от 06.12.2019 г. на сумму 350 000 руб.;

- платежное поручение № 70 от 06.12.2019 г. на сумму 400 000 руб.;

- платежное поручение № 71 от 06.12.2019 г. на сумму 400 000 руб.;

- платежное поручение № 3065 от 09.12.2019 г. на сумму 500 000 руб.;

- платежное поручение № 3062 от 09.12.2019 г. на сумму 500 000 руб.;

- платежное поручение № 3138 от 13.12.2019 г. на сумму 1 000 000 руб.;

- платежное поручение № 3303 от 27.12.2019 г. на сумму 700 000 руб.(приложение к встречному иску);

 при этом ООО СК «УССМ» выполнило работы на общую сумму 1 418 969,89 руб., что сторонами не оспаривается.

ООО СК «УССМ» по Договору прекратило 31.10.2019 г., и фактически отказалось от его исполнения, 

ООО «БРИГ» письмом исх. № 255 от 03.11.2020 г. (приложение к встречному иску) уведомило об отказе от Договора и потребовало возвратить ранее полученный аванс в сумме 5 816 504,36 руб., в срок не превышающие десять календарных дней с момента получения настоящей претензий (требований).

Между истцом по встречному иску  (далее – новый кредитор) и третьим лицом (далее –кредитор) заключен договор уступки № 06-11/20 от 06.11.2020 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2020 г. (приложение к встречному иску), согласно которому  к ООО «АльянсСпецСтрой» перешли права требования задолженности с ООО С К «УССМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в размере 5 816 504,36 руб. возникшей на основании следующих документов:

- договор подряда № 6 от 20 мая 2019 г.;

- платежное поручение № 2078 от 20.09.2019 г. на сумму 1 000 000 руб.;

- платежное поручение № 2393 от 10.10.2019 г. на сумму 500 000 руб.;

- платежное поручение № 2590 от 25.10.2019 г. на сумму 1 000 000 руб.;

- платежное поручение № 2693 от 05.11.2019 г. на сумму 500 000 руб.;

- платежное поручение № 68 от 06.12.2019 г. на сумму 350 000 руб.;

- платежное поручение № 69 от 06.12.2019 г. на сумму 350 000 руб.;

- платежное поручение № 70 от 06.12.2019 г. на сумму 400 000 руб.;

- платежное поручение № 71 от 06.12.2019 г. на сумму 400 000 руб.;

- платежное поручение № 3065 от 09.12.2019 г. на сумму 500 000 руб.;

- платежное поручение № 3062 от 09.12.2019 г. на сумму 500 000 руб.;

- платежное поручение № 3138 от 13.12.2019 г. на сумму 1 000 000 руб.;

- платежное поручение № 3303 от 27.12.2019 г. на сумму 700 000 руб.;

- письмо ООО «БРИГ» исх. № 255 от 03.11.2020 г.

в силу п. 3.1.договора № 06-11/20 от 06.11.2020 г.  за уступаемые права требованья по настоящему договору Новый Кредитор выплачивает Кредитору денежные средства в размере 4 345 120 руб.

Согласно п. 1 ст. 388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех и более сторон (многосторонняя сделка). Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах, как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону (ст. 388 ГК РФ).

Актом приема-передачи от 06.11.2020 г. (приложение к встречному иску) третье лицо передало истцу по встречному иску  документацию во исполнение  п. 2.1. № 06-11/20 от 06.11.2020 г.

Письмами за исх. № 258 от 06.11.2020 г., № 294 от 15.12.2020 г. (приложение к встречному иску) ООО «БРИГ» уведомило ООО СК «УССМ» об уступке праве права требования.

Письмом за исх. № 145 от 18.11.2020 г. (приложение к встречному иску) ООО «АльянсСпецСтрой» уведомило ООО СК «УССМ» о зачете встречных однородных требований на сумму 4 345 120 руб.

Письмом № 152 от 15.12.2020 г. ООО «АльянсСпецСтрой» обратилось к ООО СК «УССМ» с претензией о возврате долга в размере 5 816 504 руб. 36 коп.

Поскольку ООО «АльянсСпецСтрой» подан встречный иск в суд по настоящему делу судом зачете встречных однородных требований на сумму 4 345 120 руб. рассматривается в качестве встречного искового заявления.

Ответчиком по встречному иску выполнения работ по договору  № 6 от 20.05.2019 г. в части не оспаривается, получения аванса от третьего лица не оспаривается, документы о возврате неотработанного аванса не представлены.

Таким образом, долг (сумма неотработанного аванса) в размере 5 816 504 руб. 36 коп. подлежит возврату.

Ответчик по встречному иску оспаривает уведомление его об уступке права требования,  получение заявления зачете истца по встречному иску.

Доводы ответчика по встречному иску подлежат отклонению по следующим основаниям. Истцом по встречному иску представлены в материалы дела доказательства направления ООО СК «УССМ» заявления о зачете № 145 от 18.11.2020 г. (приложение к встречному иску), в том числе опись вложения, квитанция от 18.11.2020 г., также претензии  № 152 от 15.12.2020 г. (квитанция с описью вложения от 15.12.2020 г.) Кроме того, представлены доказательства направления третьим лицом писем № 258 от 06.11.2020 г., № 294 от 15.12.2020 г.  (уведомление об уступке права требования), в том числе с отчетами отслеживания почтовых отправлений, где указан верный индекс ООО СК «УССМ» (450080). 

Таким образом, ответчик по встречному иску был надлежаще уведомлен об уступке права по договору  № 06-11/20 от 06.11.2020 г. и о заявлении о зачете ООО «АльянсСпецСтрой».

На основании вышеизложенного, учитывая, что договор  № 06-11/20 от 06.11.2020 г. недействительным, незаключенным не признан, требования ООО «АльянсСпецСтрой» о взыскании долга в размере 5 816 504 руб. 36 коп. подлежат удовлетворению.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком по встречному  своей обязанности по оплате долга истцом заявлено требование о взыскании   процентов за пользование чужими денежными средствами.

Согласно п. 5.1 договора № 6 от 20.05.2019 г.  в случае  неисполнения или ненадлежащего  исполнения сторонами  принятых  на себя обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

Исходя из уточненного истцом по  встречному иску расчету сумма процентов за пользование чужими денежным средствами за период с 10.11.2020 г. по 07.04.2021 г.  составила 31 224 руб. 60 коп., с учетом проведения зачета первоначальных и встречных исковых требований 20.11.2020 г. (дата вручения ООО СК «УССМ» уведомления о зачете согласно отслеживанию почтового отправления № ED186039508RU/

Ответчик возражений, контррасчета не представил.

Судом расчет процентов истца проверен, признан арифметически верным.

Принимая во внимание требования приведенных норм материального и процессуального права, учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд пришел к выводу, что требования истца о взыскании процентов за пользование чужим денежными средствами подлежат удовлетворению.

При удовлетворении первоначального и встречного исков  сумма, подлежащая взысканию  определяется судом в результате зачета.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика и истца  в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "УССМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АльянсСпецСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  в пользу  Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "УССМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  долг в размере 4 345 120 руб. 68 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 70 563 руб. 58 коп.. судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 45 078 руб.

Встречные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "АльянсСпецСтрой"  удовлетворить.

Взыскать  с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "УССМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "АльянсСпецСтрой"  долг в размере 5 816 504 руб. 36 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 31 274 руб. 60 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины  в размере 52 239 руб.

В результате зачета встречных и первоначальных исковых требований взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "УССМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "АльянсСпецСтрой"  взыскать  сумму задолженности в размере 1 432 094 руб. 70 коп., судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 7 161 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "АльянсСпецСтрой"   из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 1 443   руб. по платежному поручению № 123 от 11.02.2021 г.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья И.Р. Юсеева