РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-236222/19-110-1912

12 февраля 2020 года

город Москва

Резолютивная часть решения объявлена 05 февраля 2020 года 

Решение в полном объеме изготовлено 12 февраля 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (123317, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2, , ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу "ТРИАДА-ХОЛДИНГ"(119049, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КРЫМСКИЙ ВАЛ, ДОМ 8, ОФИС ЭТ 1 ПОМ IV КОМ 9, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 19 784 648,37 руб.,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов.  от  19.12.2019 №МД-92073/14

от ответчика - ФИО3 по дов.  от  20.08.2019 №13/20

УСТАНОВИЛ:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обратилось с иском к акционерному обществу "ТРИАДА-ХОЛДИНГ" о взыскании 19 784 648,37 руб. субсидии предоставленной по договору от 14.10.2016 №16412.1660168460.17.006.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 14 октября 2016 г. Минпромторг России и АО «Триада-Холдинг» заключили договор о предоставлении субсидии № 16412.1660168460.17.006 (далее - договор), согласно которому Минпромторг России предоставляет АО «Триада-Холдинг» в порядке и на условиях договора и Правил субсидию из федерального бюджета на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов.

Объем предоставляемой субсидии составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1312 утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов (далее - Правила).

Согласно пункту 1.2 договора субсидия предоставляется на финансовое обеспечение (компенсацию) затрат, указанных в пункте 1.3. договора, связанных с реализацией комплексного инвестиционного проекта «Разработка технологии и освоение на цементной и полимерной основе с целью экстренного ремонта аэродромных и дорожных покрытий, мостов, тоннелей, метрополитенов и других объектов, требующих введения в эксплуатацию в кратчайшие сроки после проведения ремонтных работ» (далее - проект).

В соответствии с пунктом 2.2 договора и Планом-графиком финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (Приложение № 2 к договору), Истец предоставил Ответчику в 2016 году субсидию в размере 20 000 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями от 16.12.2016 № 280300, от 19.12.2016 № 321507, от 20.12.2016 № 430984, от 21.12.2016 № 507941.

Согласно отчету о целевом использовании субсидии от 31.01.2017 Ответчик использовал бюджетные средства в размере 19 784 648,37 рублей, остаток субсидии в размере 215 351,63 рублей был возвращен в федеральный бюджет.

В соответствии с планом-графиком реализации инвестиционного проекта (Приложение № 1 к договору) Ответчик в рамках этапа 3.4 (июнь 2016 - май 2017), этапа 3.8 (ноябрь 2017 - февраль 2018) и этапа 4.3 (I квартал 2018 - III квартал 2018) должен был обеспечить достижение целевого индикатора (показателя эффективности реализации инвестиционного проекта) «количество полученных патентов» в количестве 3 единицы.

31 января 2019 г. в Минпромторг России поступило от Ответчика письмо от 30.01.2019 № 01-70 с приложением отчета о реализации инвестиционного проекта, согласно которому по состоянию на 01.01.2019 Ответчиком получено 0 патентов в рамках реализации инвестиционного проекта.

Таким образом, по мнению истца,  со стороны Ответчика имеет место нарушение условий предоставления субсидии.

В соответствии с пунктом 5.2 договора субсидия в случае нарушения Ответчиком условий, установленных при ее предоставлении, а также в случае недостижения целевых показателей, предусмотренных планом-графиком реализации проекта, подлежит возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем в соответствии с договором о предоставлении субсидии № 16412.1660168460.17.006 от 14 октября 2016г. заключенный между Минпромторгом России и АО «Триада-Холдинг» на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013г. №1312.

В соответствии с указанным договором АО «Триада-Холдинг» взяло на себя обязанность реализовать проект:«Разработка технологии и освоение производства быстротвердеющих составов на цементной основе и анкеровочных составов на цементной и полимерной основе с целью экстренного ремонта аэродромных и дорожных покрытий, мостов, тоннелей, метрополитенов и других объектов» в соответствии с Планом-графиком реализации инвестиционного проекта. Срок реализации проекта -начало 2015 г. - окончание - 2019г.

По состоянию на 27 августа 2019г. в соответствии с Планом-графиком реализации инвестиционного проекта АО «Триада-Холдинг»:

-разработало полезную модель «Устройство для определения проникающей способности инъектируемого раствора в пористую среду»;

-разработало полезную модель «Установка для подачи высоковязких быстросхватывающихся ремонтных составов»;

-разработало полезную модель «Стенд для определения рабочих характеристик быстросхватывающего цемента»-все изделия выполнены в металле.

Все указанные полезные модели прошли все испытания, опытную отработку и переданы в производство (ООО ИТЦ «Пищмашсервис», АО «Некрасовский  машиностроительный  завод»  г. Ярославль).

Проведен анализ итогов оценки соответствия - отчеты НИОКР; -составлены Акты о выпуске опытной партии продукции;

Составлены протоколы контроля качества опытного образца и протоколы испытаний; 

Составлены   заключения   на   применение   и   документация   для   организации   серийного производства;

Вновь создано высокопроизводительных рабочих мест - 11 - по плану заявлено -8;

В апреле 2019г. на все модели поданы заявки на получение патентов, на модели «Установка для подачи высоковязких быстросхватывающих ремонтных составов» и «Установка для подачи высоковязких быстросхватывающихся ремонтных составов» решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) выданы патенты на полезную модель, на модель Стенд для определения рабочих характеристик быстросхватывающего цемента» получено решениеб о выдаче патента - 23.10.2019 г.

По состоянию на 23.10.2019г. Договор полностью выполнен.

Срок договора о предоставлении субсидии № 16412.1660168460.17.006 от 14 октября 2016г., в соответствии с Планом-графиком реализации инвестиционного проекта установлен - 2019г., следовательно - 31.12.2019г.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В. Мищенко