АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

Дело №А48-2149/2021

г. Орёл

12 мая 2021 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Родиной Г.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра – «Орелэнерго» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ИВ Центр» (302020, 

<

...>, лит. 1, офис 1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 41810990 от 27.05.2019 и взыскании 10450 руб. 00 коп., из которых 550 руб. 00 коп. – задолженность по договору № 41810990 от 27.05.2019, 9900 руб. 00 коп. – неустойка за период с 27.09.2019 по 17.03.2021, 

при участии в судебном заседании представителя истца –  ФИО2 (доверенность от 01.06.2020, копия диплома), в отсутствие представителя ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания

установил:

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра – «Орелэнерго» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ИВ Центр» (далее - ответчик) о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 41810990 от 27.05.2019 и взыскании 10450 руб. 00 коп., из которых 550 руб. 00 коп. – задолженность по договору № 41810990 от 27.05.2019, 9900 руб. 00 коп. – неустойка за период с 27.09.2019 по 17.03.2021.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в  полном объеме.

Ответчик письменный отзыв на иск не представил.

Учитывая, что у арбитражного суда имеется наличие надлежащего доказательства извещения ООО «ИВ Центр» о рассмотрении дела по существу, спор рассмотрен по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, оценив представленные арбитражному суду доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат  удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено арбитражным судом, 27 мая 2019 года между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра – «Орелэнерго» (сетевой организацией) и ООО «ИВ Центр» (заявителем) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 41810990, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимаюших устройств Заявителя (далее – технологическое присоединение) вводное устройство нежилого помещения, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектировать, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений, с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих, им объектов электросетевого хозяйства (знергопринимаюших устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 2,3 (кВт); категория надежности Ш; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 (кВ); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п.1 настоящего договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения вводного устройства нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>.

В силу пунктов 4, 5 договора от 27.05.2019 №41810990 технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

Прав и обязанности сторон содержатся в разделе 2 настоящего договора. 

В соответствии с пунктом 8 вышеуказанного договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривавших технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная. документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Пунктом 10 договора установлено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом от 25.12.2018 №661-т Управления  по тарифам и ценовой политике Орловской области и составляет 550 руб. 00 коп. в т.ч. НДС 20% -91 руб. 67 коп.

В силу пункта 11 вышеуказанного договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 15 календарных дней с момента вступления настоящего договора в силу.

Согласно пункту 17 договора №41810990 от 27.05.2019 сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой: стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый лень просрочки. При этом совокупный размер такой неустойкипри нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию (пункт 21 договора).

Поскольку документов, свидетельствующих об исполнении мероприятий по технологическому присоединению со стороны ответчика, в адрес истца не поступало, истец направил в адрес ООО «ИВ Центр» уведомление от 27.11.2020 №МР1-ОР/22-1/5530, в котором предложил ответчику в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления: 

- в случае выполнения мероприятий по договору для завершения процедуры технологического присоединения и оформления необходимых документов, предусмотренных Правилами ТП письменно уведомить филиал о  выполнении мероприятий, приложив заполненную форму уведомления о выполнении технических условий; 

- в случае отсутствия необходимости технологического присоединения подписать соглашение о расторжении Договора и направить его в филиал; 

- оплатить неустойку в соответствии с условиями договора.

Также истцом в адрес ответчика направлено соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 41810990 от 27.05.2019.

Ссылаясь на вышеизложенные обстоятельства, ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра – «Орелэнерго» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло - и энергоснабжения.

Так, применительно к энергоснабжению такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Правила № 861).

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 №861 (далее - Правила техприсоединения), определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Частью 2 статьи 452 ГК РФ установлено, что требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

При расторжении договора в судебном порядке обязательства сторон прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора (статья 453 ГК РФ).

Как установлено в ходе рассмотрения дела, стороны не достигли взаимного соглашения расторгнуть договор.

В силу статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В качестве основания для расторжения спорного договора истец ссылается на то, что ООО «ИВ Центр» не выполнены возложенные на него мероприятия, перечисленные в технических условиях.

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, ответчик, в силу п. 8 договора, обязан был уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Ответчик своих обязательств по договору не исполнил. Доказательств обратного в материалы дела в порядке ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не представил.

Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора об осуществлении технологического присоединения.

Следовательно, ответчиком  допущено существенное нарушение обязательств по договору, что в силу пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для его расторжения.

Кроме того, в дело не представлено доказательств заинтересованности ответчика в продолжении с истцом договорных отношений и исполнения условий договора.

С учётом вышеизложенного, суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 41810990 от 27.05.2019.

Истцом также заявлено требование о возмещении ему фактически понесенных расходов в размере 550 руб. 00 коп., составляющих плату за техническое присоединение.

В силу пункта 5 статьи 453 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора. 

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В данном случае исковые требования в части возмещения фактически понесенных расходов в размере 550 руб. 00 коп. обоснованы и подлежат удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании неустойки в сумме 9900 руб. 00 коп. за период с 27.09.2019 по 17.03.2021.

За нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению истец на основании статьи 330 ГК РФ и пункта 17 договора № 41810990 от 27.05.2019 вправе требовать уплаты неустойки, расчет которой арбитражным судом проверен и признан верным.

Таким образом, с учетом вышеизложенных обстоятельств, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 41810990 от 27.05.2019, заключенный между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) лице филиала ПАО «МРСК Центра – «Орелэнерго» (302030, 

<

...>) и обществом с ограниченной ответственностью «ИВ Центр» (

<

...>, лит. 1, офис 1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИВ Центр» (

<

...>, лит. 1, офис 1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра – «Орелэнерго» (302030, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 10450 руб. 00 коп., из которых 550 руб. 00 коп. – задолженность по договору № 41810990 от 27.05.2019, 9900 руб. 00 коп. – неустойка за период с 27.09.2019 по 17.03.2021 и расходы по государственной пошлине в сумме 8000 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца с о дня его принятия.  

Судья                                                                                                              Г.Н. Родина