Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, 

www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-4585/2018

09 августа 2018 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г.Л., при  

ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению  

государственного казенного учреждения "Служба государственного заказчика Республики  

Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  

ответственностью Строительная компания "Северный дом" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о безвозмездном устранении недостатков работ, 

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

решил:

Уточнение иска принять. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Строительная компания  

"Северный дом" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в месячный срок со дня  

вступления в законную силу судебного акта безвозмездно устранить на объекте «Детский  

сад на 200 мест в с. Амга Амгинского улуса» недостатки (дефекты), указанные в акте от  

05.10.2017, а именно: 1. Помещение ГВС: - утеплить водонагреватели – 11,304 м2; - установить и подключить ТЭН – 2 шт.; 2. Вентиляционная камера: 

- установить противопожарную дверь ДПМ-01-60 – 1 шт.;  - выполнить внутреннюю отделку помещения – 139,2 м2;  - установить металлическую лестницу – 0,215 тн.;  

- утеплить и оштукатурить стены – 6,95 м3; 

- выполнить стяжку пола – 134,56 м2;  

- выполнить обшивку и утеплить венткороб – 14,4 м2;  - выполнить покраску труб отопления – 25м2;  

3. Чердачное помещение, кровля: 

- выполнить штукатурку лифтовой шахты – 10,52 м2;  - выполнить обработку деревянных конструкций противопожарным составом – 4991,2  

м2; - выполнить сварку снегоуловителя – 4 п.м.; 4. Территория: - установить ограждение мусорных контейнеров – 0,72 м3; 

- укрепить оборудование детских площадок - 1,58 м3;  - установить скамейки (2 шт.) и мусорники (3 шт.) - комплект;  

- забетонировать въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным  постройкам; к контейнерной площадке, тротуары - 32 м2;  

- восстановить целостность бордюров – 6 п.м.; - засыпать и уплотнить грунт около септика – 30 м3. 

В случае неисполнения вступившего в законную силу судебного акта в течение  установленного срока, взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания "Северный дом" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  государственного казенного учреждения "Служба государственного заказчика Республики  Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 193 757,09 руб. в порядке части 3  статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  "Северный дом" в пользу государственного казенного учреждения "Служба  государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" 6 000 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

Судья Николаева Г. Л.