224/2018-34491(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  27 марта 2018 года А46-7876/2017  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Департамента строительства  

Администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  

ограниченной ответственностью Фирма «Графит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  

понуждении выполнить проверку достоверности, качества и полноты инженерных изысканий,  

выполненных в рамках исполнения муниципального контракта от 27.10.2014 года № 55- 

2014/П, при участии в заседании суда: от истца – ФИО2 по доверенности от 15.01.2018; от ответчика – не явились; 

руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью Фирма «Графит» в течение 30  

календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки  

в результатах выполненных работ по муниципальному контракту от 27.10.2014 года № 55- 

2014/П, а именно: 

- выполнить дополнительные инженерные изыскания в соответствии с  

требованиями технических регламентов, сводов правил и положениям стандартов,  

внести изменения в проектно - сметную документацию, в том числе: 

- в отчет по инженерно - геологическим изысканиям (шифр 14/11-01 -ИИ, книга 2);  - в отчет по инженерно - геодезическим изысканиям (шифр 14/11-01 -ИИ, книга 1);  - в отчет по инженерно - экологическим изысканиям (шифр 817/14-ИЭИ);  

- в проектную документацию в разделы с 1 по 10 включительно; 

- в документацию (раздел 11) «Смета на строительство объектов капитального  

строительства» (Книга СМ «Смета на строительство объектов капитального строительства»,  

шифр 817/14 СМ, том 11); 

- в документацию (раздел 12) «Книга ТОБЭ «Требования к обеспечению  

безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» (шифр 817/14-  

ТОБЭ, том 12); - в декларацию пожарной безопасности.  В остальной части иска отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Фирма «Графит» в  

федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 6 000 руб.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме).  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья В.А. Баландин