13_856634  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru факс 460-952 тел. 460-945 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-8479/2018

г. Южно-Сахалинск

07 марта 2019 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой  Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Че С.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-8479/2018  

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Сахалин-Строй-Механизация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Управлению Судебного департамента в Сахалинской области  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о возложении обязанности заключить дополнительное соглашение к  государственному контракту от 10.12.2013 № 2013.36874,  

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Принять отказ истца от иска в части требования об изложении в  новой редакции Календарного плата-графика выполнения строительных  работ, являющегося приложением № 3 к Контракту, и изложения в новой  редакции Графика поставки Генеральным подрядчиком оборудования и  

материалов, являющегося Приложением № 4 к Контракту. Производство  по делу № А59-8479/2018 в части данных требований прекратить.  

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Управление Судебного департамента в Сахалинской  области заключить с обществом с ограниченной ответственностью  «Сахалин-Строй-Механизация» дополнительное соглашение к  государственному контракту от 10.12.2013 года № 2013.36874 на  строительство объекта «Здание Южно-Сахалинского городского суда и  Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда в г.Южно-Сахалинске».  Первый этап», изложив пункт 3.1 в новой редакции:  

«Календарные сроки выполнения работ определены «Сторонами»:  

Начало работ – с момента подписания «Сторонами»  государственного контракта;  

Окончание работ: 30 июля 2019 года. Ввод объекта в эксплуатацию  10 октября 2019 года.».  

Взыскать с Управления Судебного департамента в Сахалинской  области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сахалин- Строй-Механизация» судебные расходы на оплату государственной  пошлины в сумме 6 000 рублей.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья Т.С. Горбачева