АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-19070/2024

г. Новосибирск

05 августа 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении  протокола судебного заседания помощник судьи Контратова К.В., рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города  Новосибирска «Гормост» (ОГРН: 

<

***>,: 5406186468), г. Новосибирск к обществу с  ограниченной ответственностью СУ «Сибстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  г. Новосибирск о понуждении к исполнению обязанности по муниципальному контракту №  0351300107022000007 от 17.05.2022 в натуре. Лица, участвующие в деле и процессе: от  истца - ФИО1 (доверенность № 45 от 11.06.2024, удостоверение служебное,  диплом (онлайн)); от ответчика – ФИО2 (доверенность от 04.09.2023, паспорт,  диплом).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. обязать ООО СУ «СибСтрой» в течение 30 дней с даты вступления решения суда в  законную силу выполнить следующие работы на объекте мост через р. Тула по ул. Ватутина  в г. Новосибирске в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту №  0351300107022000007 от 17.05.2022:  

- окрасить закладные элементы под стойки перильного ограждения с предварительной  очисткой - 0,8 кв.м.,  

- локально окрасить пролетное строение и опоры с предварительной очисткой - 5,5  кв.м.,  

- провести ремонт деформационных швов №№ 1,2, 3, 4 - 84,4 п.м.,  

- выполнить ремонт пришовной переходной зоны к ДШ № 1, ДШ № 2, ДШ № 3, ДШ №  4, заменить материал - 2 кв.м.,  

- выполнить ремонт бетонных поверхностей цоколя перильного ограждения и  открылков - 47,2 кв.м.,  

- переустроить покрытие тротуара (слева) с организацией водоотвода - 150,5 кв.м., 

- отремонтировать бетонные поверхности бетона цоколя барьерного ограждения52,8 кв.м.,  

- восстановить защитное покрытие крепежных элементов барьерного ограждения  (локально) - 0,1 кв.м.,  

- окрасить поврежденные элементы водоотводного лотка с предварительной очисткой32 кв.м.,  

- окрасить поврежденные элементы опорных частей (опора № 1, опора № 2, опора № 3,  опора № 4) - 2,65 кв.м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СУ «Сибстрой» (ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000  руб.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Д.Н.Дорофеева