Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-78383/17

25 января 2018 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2018 года

Полный текст решения изготовлен 25 января 2018 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Корень А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску федерального казенного предприятия «Научно-исследовательский институт «Геодезия» к обществу с ограниченной ответственностью «Москапстрой» об устранении недостатков выполненных работ,

при участии в судебном заседании:

от истца – Кирова В.Г. по дов. от 02.11.2017 № 294/10,

от ответчика – Бочарова В.А. по дов. от 06.12.2011 № 11688,

УСТАНОВИЛ:

федеральное казенное предприятие «Научно-исследовательский институт «Геодезия» (далее – ФКП «НИИ Геодезия», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Москапстрой» (далее – ООО «Москапстрой», ответчик) об обязании устранить конкретные недостатки выполненных работ, выявленные в период гарантийного срока по государственному контракту от 11.11.2014 № 0548100000214000023/251.3803.К14.

Представитель истца в судебном заседании уточнил исковые требования

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования признал, представил письменное заявление.

Согласно абзацу 3 пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Исследовав материалы дела и установив, что факт обнаружения ФКП «НИИ Геодезия» недостатков в выполненных ООО «Москапстрой» по государственному контракту от 11.11.2014 № 0548100000214000023/251.3803.К14 работах подтверждается имеющимися в деле доказательствами и признается ответчиком, суд считает возможным принять признание иска ответчиком в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Москапстрой» до 01 марта 2018 года устранить недостатки и дефекты, возникшие в результате выполнения строительно-монтажных работ по государственному контракту от 11.11.2014 № 0548100000214000023/251.3803.К14 в рамках гарантийных обязательств, а именно:

Недостатки

Мероприятия по устранению

 

ЗД.951

1. Не установлены полотенцесушители

Установить полотенцесушители

2. Дверь в пом.3.2 (форкамера) не установлена 

Установить герметичную дверь

3. Не выполнены работы по монтажу системы телефонизации и пожарной сигнализации

Выполнить монтаж системы телефонизации и пожарной сигнализации

4. Не выполнены работы по монтажу дренчерной системы пожаротушения

Закончить монтаж дренчерной системы пожаротушения

5. Не выполнены работы по монтажу системы автоматического пожаротушения

Выполнить монтаж системы автоматического пожаротушения

6. Не выполнены работы по автоматизации систем отопления и вентиляции

Выполнить работы по автоматизации систем отопления и вентиляции

 

МОЛНИЕОТВОДЫ ЗД.951

1. Не выполнены работы по устройству молниеотводов (2шт.) 

Выполнить устройство молниеотводов по проекту

 

СООРУЖЕНИЕ 962

1. Швы бетонных блоков не обработаны гидроизоляционным раствором Пенекрит 

Выполнить гидроизоляцию швов 

2. Не выполнена гидроизоляция стен ниже отм.0.000 раствором Пенетрон

Выполнить гидроизоляцию стен 

3. Стены ниже отм.0.000 не оштукатурены и не окрашены

Стены необходимо оштукатурить и окрасить 

4.Трубопровод системы хозпитьевого, противопожарного водоснабжения не окрашен за 2-ой раз

Окрасить трубопровод за второй раз

5.Бетонно - мозаичная плитка пола не уложена

Уложить бетоно-мозаичную плитку

6. Обеззараживатель хозпитьевого водопровода (В1) не установлен  

Установить обеззараживатель 

7. Металлические поверхности пола, лестницы не очищены и не окрашены

Металлические поверхности окрасить с предварительной очисткой щетками

8. Не выполнены работы по отделке фасадов

Выполнить наружные отделочные работы 

9. Не выполнены работы по устройству отмостки

Выполнить устройство отмостки

10. Не установлены конвекторы

Установить конвекторы

11. Не выполнены работы по монтажу электроосвещения

Выполнить электроосвещение

12. Не выполнены работы по монтажу силового электрооборудования

Выполнить монтаж силового электрооборудования

13. Не выполнены работы по монтажу пожарной сигнализации 

Выполнить монтаж пожарной сигнализации

14. Не выполнены работы по монтажу системы автоматизации водопровода (В1), (В2)

Выполнить монтаж системы автоматизации водопровода (В1), (В2)

15. Не установлен дренажный насос LOWARA  DOC 7/A

Установить дренажный насос LOWARA  DOC 7/A

16. Не установлен погружной насос ЭЦВ 8-25-180 для скважины

Установить погружной насос ЭЦВ 8-25-180

 

СООРУЖЕНИЕ 963

1. Не обработаны поверхности внутренних стен  обмазочной гидроизоляцией

Обработать гидроизоляционным раствором все поверхности стен

2. Лестницы в резервуар не смонтированы и не окрашены

Выполнить монтаж лестниц и окрасить

3. Не выполнены работы по восстановлению штукатурки стен камер лаза 

Выполнить штукатурку стен лаза

4. Не выполнены работы по замене зонта дефлектора 

Выполнить замену зонта дефлектора

5. Не выполнена замена задвижки ø 150мм

Заменить задвижку  150мм

 

КПП (об.952)

1. Не окрашены стены за второй раз

Окрасить стены за второй раз

2. Не выполнен монтаж пожарной сигнализации

Выполнить монтаж пожарной сигнализации

 

Наружные сети водоснабжения

1.Не выполнен монтаж запорной арматуры  в колодцах

Установить запорную арматуру

2.Не выполнены работы по установке пожарных гидрантов в колодцах

Установить пожарные гидранты

 

Наружные сети связи и сигнализации

1.Не выполнены работы по монтажу системы связи и сигнализации

Выполнить монтаж системы связи и сигнализации

.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Москапстрой» в пользу федерального казенного предприятия «Научно-исследовательский институт «Геодезия» 6 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия. 

 

Судья                                                                                                               М.В. Досова