Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

город Волгоград  

«23» мая 2023 года Дело № А12-14670/2022 Резолютивная часть оглашена 18 мая 2023 года Полный текст изготовлен 23 мая 2023 года 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.В., рассмотрел дело по  иску Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «НС-Строй» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о  понуждении исполнить гарантийные обязательства.  

Представители сторон в судебное заседание не явились. 

Унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального  ремонта многоквартирных домов» (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд  Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью «НС-Строй» (далее – ответчик) о понуждении в рамках гарантийных  обязательств по договору договор № 681803-В-СМР-2017 от 06.06.2017 устранить  недостатки капитального ремонта многоквартирного дома по адресу 

<

...> выявленные в ходе комиссионного обследования:  

-привести наружную систему водостока крыши в надлежащее техническое  состояние, а именно горизонтальный желоб наружной системы водостока, а также о  взыскании расходов по оплате государственной госпошлины в размере 6 000 руб.  

Определением от 28 октября 2022 года по делу № А12-14670/2022 по ходатайству  ответчика назначена судебная экспертиза, производство которой поручено ООО  «Лаборатория судебных экспертиз по Южному Округу» (400005, город Волгоград, улица 7- й Гвардейской, дом 2, помещение 4, офис 232) – эксперту ФИО1. Срок проведения экспертизы судом установлен до 07 декабря 2022 года.  

Определением от 12.12.2022 срок проведения экспертизы продлен до 20.01.2023  года. Определением от 09.01.2023 проведению судебной экспертизы по делу № А1214670/2022 в качестве второго эксперта привлечен ФИО2.  Определением от 26.01.2023 срок проведения экспертизы продлен до 30.03.2023 года  Определением от 05.04.2023 срок экспертизы продлен до 14 апреля 2023 года. 18 апреля  2023 года поступило заключение эксперта и материалы дела, производство по делу  возобновлено.  

Представители сторон в судебное заседание не явились. По результатам рассмотрения спора, суд  установил: 

 Между УНО «Региональный фонд капремонта» (Фонд) ООО «НС-СТРОЙ»  (Подрядчик) был заключен договор № 681803-В-СМР-2017 от 06.06.2017 на выполнение  

работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенного по  адресу: 

<

...> (далее - МКД).  

Гарантийный срок на выполненные работы устанавлен, в соответствии с п.9  Договора, продолжительностью 5 лет со дня подписания акта по форме КС-2 и КС-3 по  последнему этапу работ. Работы приняты Фондом 01.12.2017.  

В адрес Фонда 06.07.2021 № 9972вх поступило предписание № 1059-4 от инспекции  государственного жилищного надзора Волгоградской области (далее-ГОСЖИЛНАДЗОР)  по вопросу устранения выявленных дефектов по крыши после проведенного капитального  ремонта, а именно в ходе проведения проверки с кровельного покрытия по периметру дома  происходит проливание воды, при котором установлен факт перелива воды через  горизонтальные желоба наружной системы водоотведения на МКД. Монтаж  горизонтальных желобов выполнен с нарушением нормативных требований, а именно  деформация и уклоны данных конструкций, ввиду чего отвод атмосферных осадков  осуществляется ненадлежащим образом, происходит намокание наружных ограждающих  конструкций фасада дома.  

В связи с возникшими гарантийными обязательствами в адрес  Подрядчика было направлено требование от 25.03.2022 № 1928и о необходимости  устранения выявленных недостатков.  

Фонд ответа от Подрядчика не получил, недостатки не устранены, в связи с чем  были предъявлены настоящие требования.  

Ответчик иск не признал, указав, что работы выполнены им должным образом, в  соответствии с установленными требованиям.  

По ходатайству ответчика по делу назначалась судебная экспертиза на предмет  определения качества выполнения спорных работ.  

Проведя два осмотра и гидравлические испытания эксперты определили, что  монтаж горизонтальных желобов наружной системы водоотведения на крыше  многоквартирного дома, расположенного в городе Волгограде по адресу: улица имени  Михаила Паникахи, дом 7, соответствует установленным нормативным требованиям при  производстве капитального ремонта ООО «НС-Строй» по договору № 681803-В-СМР-2017  от 06.06.2017. Эксперты установили, что ненадлежащий отвод атмосферных осадков при их  выпадении является следствием загрязнения желоба, а не недостатков работ по монтажу  горизонтальных желобов на указанном объекте.  

Истец в судебное заседание не явился, возражений по существу заключения  судебной экспертизы не предоставил.  

Исходя из вышесказанного, оснований для удовлетворения иска не имеется. 

На основании ст. 110 АПК РФ, судебные расходы возлагаются на истца в полном  объеме.   

 Руководствуясь ст.ст. 110,167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд решил:  В удовлетворении иска отказать. 

 Взыскать с Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд  капитального ремонта многоквартирных домов» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  в пользу обществу с ограниченной ответственностью «НС-Строй» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) расходы за проведение экспертизы в размере 30 000 руб.  

 Полный текст решения изготовлен в течение пяти рабочих дней с момента принятия  резолютивной части.  

 Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с момента изготовления в  полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Волгоградской области.  

 Судья Эле ктронная  подпис ь действ ительна. Попова Т.В.  

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 15.02.2023 11:19:00Кому выдана Попова Татьяна Владимировна