АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-39455/2023

г. Нижний Новгород                                                                                            21 мая 2024 года

Дата объявления резолютивной части решения 7 мая 2024 года 

Дата изготовления решения в полном объеме 21 мая 2024 года

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Паутовой Юлии Сергеевны (шифр дела 31-129),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Голубевой В.А., после перерыва секретарем судебного заседания Епифановой Д.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Арена Н» (ОГРН 

<

***>,                   ИНН 

<

***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные системы и сети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

при участии в деле третьего лица без самостоятельных требований  относительно предмета спора акционерного общества «Нижегородский водоканал»                              (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора,

 

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО1 – директор, паспорт; ФИО2 – доверенность                              от 02.10.2023;

от ответчика: ФИО3 – доверенность от 04.03.2024;

от третьего лица: ФИО4 – доверенность от 01.01.2022; 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Арена Н» обратилось                              в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу                                   с ограниченной ответственностью «Инженерные системы и сети» о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора от 20.06.2023                           № 20/06/23-01 на основании уведомления о расторжении договора от 21.11.2023                          исх. № 268.

            К участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований  относительно предмета спора привлечено акционерное общество «Нижегородский водоканал».

            Истец в судебном заседании предъявленное требование поддержал.

            Ответчик в отзыве и дополнениях к нему против удовлетворения иска возразил, указав, что согласованные сторонами промежуточные сроки выполнения работ                      ООО «Арена Н» неоднократно нарушались, доказательства выполнения работ                                      истцом не представлено, односторонний отказ от исполнения договора заявлен ответчиком правомерно.

            Истец представил возражения на позицию ООО «Инженерные системы и сети».

            Третье лицо отзыв на иск не представило, указало, что договор между ним                         и ООО «Инженерные системы и сети», в рамках исполнения которого заключался договор от 20.06.2023 № 20/06/23-01, расторгнут.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Между ООО «Арена Н» (Субподрядчик) и ООО «Инженерные системы и сети» (Подрядчик) заключен договор на выполнение комплекса работ по проектированию                      и строительству магистральных сетей водоснабжения и водоотведения под жилищное строительство в п. Ольгино и п. Новинки (1 этап – проектирование и строительство сетей водоснабжения).

Согласно пункту 2.1 договора Субподрядчик обязался по заданию Подрядчика                   в установленный договором срок, указанный в Графике производства работ (приложение № 2 к договору), собственными и (или) привлеченными силами                            и средствами, с поставкой материалов Подрядчиком, выполнить в полном объеме работы на объекте, указанные в приложении № 2 к договору, а также иные работы (услуги), определенно не упомянутые в договоре, но необходимые для реализации договора и оформленные сторонами соответствующими дополнительными соглашениями к договору. Подрядчик обязался создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить обусловленную договором цену.

В соответствии с пунктами 4.1 – 4.3 договора начальный срок выполнения работ:           с момента подписания договора, приемки Субподрядчиком от Подрядчика рабочей документации, предоставления фронта работ. Конечный срок выполнения всех работ                  по договору составляет 20.11.2023 и устанавливается в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 2 к договору). Стороны договорились, что в любом случае конечный срок выполнения всех работ по настоящему договору, будет зависеть                от сроков, которые регулируются договором № 23-22-670 от 13.07.2022, заключенного между АО «Нижегородский водоканал» (Генеральный подрядчик) и ООО «Инженерные системы и сети», а также заключенных дополнительных соглашений к нему, предусматривающих увеличение сроков выполнения работ по договору № 23-22-670                от 13.07.2022. Промежуточные, обязательные к соблюдению, сроки выполнения работ по договору определяются сторонами в Графике производства работ (приложение № 2            к договору).

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 21.09.2023 окончательный срок выполнения работ согласован на 10.12.2023. Также сторонами подписан График выполнения работ, включающий в себя отдельные виды работ и сроки их выполнения (промежуточные сроки выполнения работ).

Согласно пункту 4.11 договора, в случае, если Субподрядчик допустил срыв промежуточных сроков производства работ по договору более, чем на 10 (десять) календарных дней, Подрядчик вправе в одностороннем порядке принять решение                   об изменении договора в части объема работ, выполняемых Субподрядчиком, а именно                      об исключении из объема работ по договору части работ, которые Подрядчик вправе выполнить собственными силами либо с привлечением третьих лиц, единичные расценки по договору при этом остаются неизменными. Срыв таких сроков является существенным условием, являющимся также основанием для расторжения договора.

Договор может быть расторгнут Подрядчиком в одностороннем порядке                                в соответствии с условиями, установленными пунктами 4.11 и 5.1.28 договора, при этом расторжение договора оформляется без составления дополнительного письменного соглашения путем направления Субподрядчику соответствующего уведомления,                     и расторжение договора в данном случае наступает с момента получения его Субподрядчиком (пункт 8.3 договора).

            Ответчик направил в адрес ООО «Арена Н» уведомление от 21.11.2023 № 268                       об одностороннем отказе от исполнения договора от 20.06.2023№ 20/06/23-01 со ссылкой на пункты 8.3 и 4.11 договора, в связи с нарушением Субподрядчиком промежуточных сроков выполнения работ по договору более чем на 10 (десять) календарных дней.

            Не согласившись с решением Подрядчика, ООО «Арена Н» обратилось                                      в арбитражный суд с настоящим иском.

            В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации                         (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии                                 с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

            Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (пункт 3 статьи 405 ГК РФ).

   Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы                и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации                        если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда                              или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Право заказчика на односторонний отказ от исполнения договора подряда также предусмотрено статьей 717 Кодекса и условиями упомянутых договоров.

В силу положений действующего законодательства отказ от договора является сделкой, направленной на прекращение договорных отношений.

Согласно статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой,                            если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения,                       не связанные с недействительностью сделки. Сделка, нарушающая требования закона                или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права               и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует,                что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения,                      не связанные с недействительностью сделки.

В соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами                  или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора)                   (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается                     с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью                     или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым                             или измененным.

Требуя признать недействительным односторонний отказ от исполнения договора от 20.06.2023№ 20/06/23-01, истец указал, что промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ сторонами не согласованы, своего согласия на расторжение договора ООО «Арена Н» не давало, что предусмотренные графиком производства работ сроки соразмерно увеличивались за счет несвоевременного предоставления Подрядчиком давальческого материала, а также по независящим от Субподрядчика обстоятельствам (дождь).

Довод истца относительного того, что промежуточные сроки выполнения работ сторонами по делу не согласованы, судом отклоняется в силу следующего.

Согласно подписанному сторонами дополнительному соглашению № 2                         от 21.09.2023 к договору от 20.06.2023 № 20/06/23-01 окончательный срок выполнения работ изменен на 10.12.2023.

Приложением № 2 к договору сторонами по делу согласован график выполнения работ, включающий в себя отдельные виды работ и сроки их выполнения (промежуточные сроки выполнения работ):

1.Участок от ВК2 до ВК 24 (разработка траншеи – с 11.09.2023 по 29.09.2023, прокладка трубопровода Ф630 – с 02.09.2023 по 17.10.2023, разработка грунта под камеры – с 30.09.2023 по 02.10.2023, устройство камер до фундаментных плит – с 02.10.2023              по 11.10.2023, монтаж колодцев – с 30.09.2023 по 11.10.2023, засыпка трубопровода-                       с 02.10.2023 по 17.10.2023, устройство камер до фундаментных плит – с 18.10.2023                 по 26.10.2023, монтаж запорной арматуры– с 18.10.2023 по 26.10.2023, обратная засыпка камер – с 24.10.2023 по 29.10.2023);

2. Участок от ВК2 до В-5 (разработка траншеи – с 06.09.2023 по 29.09.2023, прокладка трубопровода Ф500 – с 18.09.2023 по 10.10.2023, устройство камер                           до фундаментных плит– с 18.09.2023 по 24.09.2023, монтаж колодцев – с 25.09.2023                   по 01.10.2023, засыпка трубопровода – с 30.09.2023 по 10.10.2023, устройство камер               до фундаментных плит–с 11.10.2023 по 19.10.2023, монтаж запорной арматуры –                       с 11.10.2023 по 19.10.2023, обратная засыпка камер – с 20.10.2023 по 23.10.2023);

3. Участок от В-5 до ВК5 (разработка траншеи – с 30.09.2023 по 13.10.2023, прокладка трубопровода Ф400 – с 11.10.2023 по 24.10.2023, монтаж колодцев –                        с 14.10.2023 по 18.10.2023, засыпка трубопровода – с 19.10.2023 по 29.10.2023, монтаж запорной арматуры - с25.10.2023 по 29.10.2023);

4. Участок от ВК5до ВК 24 (разработка траншеи – с 02.10.2023 по 15.10.2023, прокладка трубопровода Ф500 и Ф560 – с 25.10.2023 по 02.11.2023, разработка грунта              под камеры – с 08.10.2023 по 15.10.2023, устройство камер до фундаментных плит –                           с 16.10.2023 по 25.10.2023, засыпка трубопровода – с 30.10.2023 по 04.11.2023, устройство камер до фундаментных плит – с 03.11.2023 по 15.11.2023, монтаж запорной арматуры, обратная засыпка камер - с 03.11.2023 по 15.11.2023);

5. Участок от ВК2 до ВК12 (разработка траншеи – с 06.10.2023 по 10.10.2023, прокладка трубопровода Ф630 – с 18.10.2023 по 24.10.2023, устройство камер                            до фундаментных плит – с 18.09.2023 по 20.09.2023, монтаж колодцев – с 06.10.2023                по 07.10.2023, засыпка трубопровода – с 22.10.2023 по 27.10.2023, устройство камер до фундаментных плит–с 03.11.2023 по 15.11.2023, монтаж запорной арматуры – с 03.11.2023 по 15.11.2023, обратная засыпка камер – с 10.11.2023 по 15.11.2023);

6. Участок от ВК12 до В-16/17 (разработка траншеи – с 01.09.2023 по 14.10.2023, прокладка трубопровода Ф710 – с 18.09.2023 по 27.10.2023, разработка грунта под камеры – с 15.10.2023 по 16.10.2023, устройство камер до фундаментных плит – с 18.10.2023                   по 21.10.2023, монтаж колодцев – с 15.10.2023 по 27.10.2023, засыпка трубопровода –                 с 17.10.2023 по 01.11.2023, устройство камер до фундаментных плит – с 28.10.2023                   по 09.11.2023, монтаж запорной арматуры – с 28.10.2023 по 09.11.2023, обратная засыпка камер - с 04.11.2023 по 09.11.2023);

7. Участок от В-16/17 до ВК16 (прокол) (пайка труб Ф1000 – с 25.09.2023                      по 10.10.2023, пайка труб Ф710– с 25.09.2023 по 10.10.2023, устройство прокола –                       с 25.09.2023 по 10.10.2023, протаскивание трубы – с 11.10.2023 по 19.10.2023);

8 Участок от ВК16 до ВК18 (разработка траншеи – с 20.10.2023 по 02.11.2023, прокладка трубопровода Ф710 – с 28.10.2023 по 17.11.2023, разработка грунта под камеры – с 11.10.2023 по 19.10.2023, устройство камер до фундаментных плит – с 20.10.2023                  по 27.10.2023, монтаж колодцев – с 20.10.2023 по 27.10.2023, засыпка трубопровода –                   с 07.11.2023 по 17.11.2023, устройство камер до фундаментных плит – с 18.11.2023                      по 30.11.2023, монтаж запорной арматуры – с 18.11.2023 по 30.11.2023, обратная засыпка камер – с 25.11.2023 по 30.11.2023);

9. Участок от ВК18 до ВК19 (овраг) (разработка траншеи с 19.10.2023                              по 03.11.2023, прокладка трубопровода Ф710 и Ф1000 – с 28.10.2023 по 17.11.2023, монтаж колодцев – с 04.11.2023 по 10.11.2023, засыпка трубопровода - 07.11.2023                    по 20.11.2023);

10. Участок от ВК19 до ВК21/22 (разработка траншеи – с 09.10.2023 по 18.10.2023, прокладка трубопровода Ф710 – с 11.10.2023 по 27.10.2023, разработка грунта под камеры – с 02.10.2023 по 08.10.2023, устройство камер до фундаментных плит – с 04.10.2023                 по 12.10.2023, засыпка трубопровода – с 19.10.2023 по 27.10.2023, устройство камер                 до фундаментных плит – с 28.10.2023 по 09.11.2023, монтаж запорной арматуры –                       с 28.10.2023 по 09.11.2023, обратная засыпка камер – с 04.11.2023 по 09.11.2023).

В соответствии с пунктом 2.2 договора от 20.06.2023№ 20/06/23-01 Субподрядчик обязался выполнить по заданию Подрядчика полный комплекс работ, предусмотренных договором, рабочей документацией, утвержденной Подрядчиком сметной документацией, включая, но не ограничиваясь: 

            - выполнение строительно-монтажных работ по объекту; 

            - выполнение пуско-наладочных работ;

            - проведение необходимых испытаний, экспертиз; 

            - оформление и предоставление Подрядчику комплекта исполнительной                         и технической документации в части выполненных работ, необходимого для ввода объекта в эксплуатацию и его последующей эксплуатации, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, протоколов испытаний, исполнительных схем, а также иной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами, техническими регламентами; 

            - сдачу результата работ Подрядчику по «Акту приемки результата работ», в том числе работы, выполняемые в течение гарантийного срока;

            - сдачу совместно с Подрядчиком результата выполненных работ по договору специализированным эксплуатирующим и контролирующим службам и организациям.

Если иное прямо не предусмотрено настоящим договором (сметой/расчетом стоимости работ) или дополнительным соглашением сторон, выполнение работ Субподрядчиком осуществляется строительными материалами, предоставляемыми Подрядчиком (пункт 2.7 договора).

Согласно пункту 4.5 договора Субподрядчик подтверждает, что сроки, указанные                  в договоре, являются реально достижимыми и выполнимыми. 

            В случае, если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в График производства работ (приложение № 2 к договору), которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения работ, то такие изменения производятся                      по согласованию сторон в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к договору (пункт 4.6 договора).

            В силу пункта 4.9 договора Субподрядчик обязан приложить все усилия для предотвращения каких-либо остановок выполнения работ, а при фактической остановке выполнения работ оперативно устранять послужившие этому обстоятельства, если таковые будут иметь место, в том числе, в результате споров, возникших в отношении предписаний Подрядчика, касающихся порядка выполнения работ (требований, предъявляемых к характеру, качеству и объему выполняемых работ).

            В случае существенного отставания от срока выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ, Субподрядчик обязан устранить указанное отставание путем привлечения дополнительной рабочей силы к выполнению работ или путем выполнения работ в дополнительное время (дополнительная рабочая смена). При этом общая стоимость работ (стоимость отдельных видов работ), предусмотренная договором, изменению не подлежит (пункт 4.10 договора).

            В соответствии с пунктом 4.12 договора Субподрядчик имеет право на продление срока выполнения работ, или продление сроков выполнения отдельных видов работ, определенных Графиком производства работ (приложение № 2 к договору) по следующей причине:

            - несвоевременное исполнение Подрядчиком обязательств, принятых на себя                       по договору, если неисполнение Подрядчиком обязательств по договору не является следствием неисполнения Субподрядчиком обязательств, принятых на себя по договору.

            Продление срока выполнения работ (сроков выполнения отдельных видов работ)                  в соответствии с настоящим пунктом договора производится посредством подписания сторонами дополнительного соглашения к договору. Субподрядчик, в целях продления указанных сроков, обязан обратиться к Подрядчику, путем направления в адрес последнего письменного обращения. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней             с даты получения указанного обращения рассматривает его и уведомляет Субподрядчика                              о принятом решении в письменной форме.

            При согласии Подрядчика на продление срока выполнения работ (сроков выполнения отдельных видов работ), последний направляет в адрес Субподрядчика                          на подписание дополнительное соглашение. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного дополнительного соглашения обязан подписать его и направить (в двух экземплярах, подписанных со стороны Субподрядчика) дополнительное соглашение на подписание Подрядчику. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения дополнительного соглашения, подписанного со стороны Субподрядчика, Подрядчик производит его подписание и направляет в адрес Субподрядчика 1 (один) экземпляр дополнительного соглашения, подписанного со своей стороны.

            Согласно пункту 4.13 договора при не подписании сторонами вышеуказанного дополнительного соглашения, а также при отказе Подрядчика от продления срока выполнения работ (сроков выполнения отдельных видов работ), выполнение работ (выполнение отдельных видов работ) по договору производится Субподрядчиком                                в соответствии с ранее согласованными сторонами сроками их выполнения.

            Ежемесячно (не позднее 19-го числа каждого месяца) Субподрядчик обязан представлять Подрядчику «месячно-суточный график выполнения работ» (приложение               № 8 к договору). Ежемесячно (не позднее 25-го числа каждого месяца) Субподрядчик обязан представлять Подрядчику акт сдачи-приемки выполненных работ на объекте                       по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,                               и комплект промежуточной исполнительной документации на весь объем выполненных                  в  отчетном периоде работ (пункты 5.1.15 и 5.1.16 договора).

            В соответствии с пунктом 6.2 договора Субподрядчик предъявляет Подрядчику   для приемки выполненные работы ежемесячно не позднее 25-го числа отчетного месяца           с предоставлением нижеуказанных документов: 

            - «Журнал учета выполненных работ» (ф. № КС-6а), завизированный представителем Подрядчика или представителем организации, осуществляющей строительный контроль;

            - акт о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) в 2-хэкземплярах;

            - справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) в 2-х экземплярах;

            - комплект промежуточной исполнительной документации (в бумажном                          и электронном виде, подписанный всеми поименованными в документах лицами); 

            - счет на оплату выполненных работ (с обязательным указанием стоимости выполненных работ, суммы гарантийного удержания, суммы зачета аванса, итоговой суммы к оплате) – 1 экз.;

            - извещение об устранении замечаний по предписаниям; 

            - реестр предписаний с отметкой об устранении.

Вся вышеуказанная документация комплектуется реестрами и передается                                  по сопроводительному письму.

Предусмотренная пунктом 6.2 ежемесячная отчетная документация                              ООО «Арена Н» не сдавалась, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2                      и исполнительная документация ответчику не передавались, обратного суду не доказано.

В силу пунктов 1, 4 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны                        в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора                  в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями                           и смыслом договора в целом (статья 431 ГК РФ).

Доказательства предъявления к приемке результатов выполненных по договору                 от 20.06.2023 № 20/06/23-01 работ, сдачи предусмотренной договором ежемесячной отчетной документации, истцом в материалы дела не представлено.

В соответствии с позицией самого истца, на момент заявления об одностороннем отказе от исполнения договора (21.11.2023), им не выполнены или не выполнены                       в полном объеме следующие виды работ: 

1.Участок от ВК2 до ВК 24: устройство камер до фундаментных плит – выполнено 50 %, монтаж колодцев – не выполнено, засыпка трубопровода - не выполнено (отсутствие запорной арматуры), устройство камер до фундаментных плит – выполнено 50 %, монтаж запорной арматуры - не выполнено (отсутствие запорной арматуры),  обратная засыпка камер –не выполнено (отсутствие запорной арматуры);

2. Участок от ВК2 до В-5: прокладка трубопровода Ф500 – остаток пайки 700 м, монтаж колодцев – не выполнено, засыпка трубопровода - не выполнено (отсутствие запорной арматуры),  устройство камер до фундаментных плит – выполнено 50 %, монтаж запорной арматуры - не выполнено (отсутствие запорной арматуры), обратная засыпка камер – не выполнено (отсутствие запорной арматуры);

3. Участок от В-5 до ВК5: прокладка трубопровода Ф400, монтаж колодцев -                  не выполнено (отсутствие трубы), засыпка трубопровода - не выполнено (отсутствие запорной арматуры),  монтаж запорной арматуры - не выполнено (отсутствие запорной арматуры);

4. Участок от ВК5 до ВК 24: засыпка трубопровода – не выполнено (отсутствие трубы и запорной арматуры), устройство камер до фундаментных плит – не выполнено, монтаж запорной арматуры - не выполнено (отсутствие трубы и запорной арматуры),обратная засыпка камер – не выполнено (отсутствие трубы и запорной арматуры);

5. Участок от ВК2 до ВК12: устройство камер до фундаментных плит – выполнено 50 %, монтаж колодцев – не выполнено, засыпка трубопровода, монтаж запорной арматуры, обратная засыпка камер – не выполнено (отсутствие трубы и запорной арматуры);

6. Участок от ВК12 до В-16/17: монтаж колодцев – не выполнено, засыпка трубопровода - не выполнено (отсутствие трубы и запорной арматуры), устройство камер до фундаментных плит – выполнено 50 %, монтаж запорной арматуры, обратная засыпка камер –не выполнено (отсутствие трубы и запорной арматуры);

7. Участок от В-16/17 до ВК16 (прокол): пайка труб Ф710– остаток пайки 1000 м, протаскивание трубы - не выполнено (отсутствие трубы и запорной арматуры);

8 Участок от ВК16 до ВК18: прокладка трубопровода Ф710 –– остаток пайки                 1000 м, монтаж колодцев – не выполнено, засыпка трубопровода - не выполнено (отсутствие запорной арматуры),устройство камер до фундаментных плит – выполнено 50 %,монтаж запорной арматуры, обратная засыпка камер – не выполнено (отсутствие запорной арматуры);

9. Участок от ВК18 до ВК19 (овраг): прокладка трубопровода Ф710 - остаток пайки 1000 м, монтаж колодцев – не выполнено, засыпка трубопровода - не выполнено (отсутствие запорной арматуры);

10. Участок от ВК19 до ВК21/22: прокладка трубопровода Ф710 - остаток пайки 1000 м, засыпка трубопровода - не выполнено (отсутствие запорной арматуры); устройство камер до фундаментных плит – выполнено 50 %, монтаж запорной арматуры, обратная засыпка камер – не выполнено (отсутствие запорной арматуры).

Таким образом, сам истец подтверждает, что ряд работ, срок выполнения которых установлен утвержденным сторонами графиком производства работ, им не выполнен.

Из содержания письма истца от 18.10.2023 следует, что по состоянию на 18.10.2023 ООО «Арена Н» выполнило работы по пайке полиэтиленовой трубы диаметром 630 мм, 560 мм, 500 мм и 1000 мм, при этом факт предъявления данных работ к приемке Субподрядчиком не подтвержден. 

Из представленной истцом сводной таблицы выполненных работ следует, что               на участке от ВК2 до В-5 остаток пайки трубопровода Ф500 составляет 700 м.

Истцом представлена в материалы дела объемная переписка между сторонами               по делу, из содержания которой следует, что часть давальческого материала ответчиком не поставлена либо поставлена с задержкой, при этом ряд писем датирован июлем 2023 года (№ 24 от 10.07.2023, № 25 от 12.07.2023, № 47 от 31.07.2023), то есть до того момента, как сторонами согласован актуальный график выполнения работ.

Субподрядчик указал, что срок выполнения работ автоматически пролонгировался после даты фактической поставки материала.

Довод ООО «Арена Н» судом отклоняется, так как условиями договора (пункты 4.12, 4.13) стороны согласовали порядок продления сроков выполнения отдельных видов работ, в том числе, в случае несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, принятых на себя по договору. 

Истец указал, что график производства работ, утвержденный дополнительным соглашением к договору № 2 от 21.09.2023, утратил свою актуальность в связи                           с направлением ответчиком в адрес ООО «Арена Н» нового графика производства работ (приложение к дополнительному соглашению № 3 от 23.10.2023).

В материалы дела представлены два экземпляра дополнительного соглашения № 3 от 23.10.2023 к договору от 20.06.2023 № 20/06/23-01, один из которых подписан только истцом, другой - ответчиком, при этом их содержание отличается, графики выполнения работ содержат разные временные периоды выполнения отдельных видов работ.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что дополнительное соглашение № 3 от 23.10.2023 сторонами не заключено, промежуточные и конечный сроки выполнения работ не изменены.

Также истец указал, что периодически работы не могли выполняться ввиду неблагоприятных погодных условий (дождь) (письмо от 16.10.2023).

Наличие осадков не является обстоятельством непреодолимой силы                                   и не является препятствием для выполнения работ, обратного суду не доказано. Ответчик в письмах рекомендовал Субподрядчику применять специальные защитные средства, обеспечить водопонижение в камерах, колодцах и траншеях (письма № 218 от 16.10.2023 и № 250 от 30.10.2023).

            В качестве подтверждения факта выполнения работ истец представил переписку                      из месседжера "WhatsApp", а также отчет об использовании авансовых платежей, при этом сам факт выполнения работ ответчиком не оспаривается, а представленная документация не может заменить акты выполненных работ и подтвердить выполнение работ в согласованные сроки.      

Также Субподрядчик представил график выполнения работ по устройству камер, при этом данный документ никем не подписан и не может быть принят в качестве надлежащего доказательства по делу.

С учетом изложенного, оценив в совокупности и взаимосвязи представленные                 в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу, что факт нарушения истцом сроков выполнения отдельных видов работ по договору от 20.06.2023 № 20/06/23-01                     (промежуточных) судом установлен.

            Кроме того, договор между АО «Нижегородский водоканал» и ООО «Инженерные системы и сети», в рамках исполнения которого заключался договор от 20.06.2023                   № 20/06/23-01, на момент рассмотрения настоящего спора расторгнут.

Прочие доводы сторон судом рассмотрены и отклонены, поскольку                             не подтверждены надлежащими доказательствами, не основаны на нормах права,                         не способны повлиять на исход спора.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим                         в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств (части 1 статей 64 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании части 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства                         в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив по вышеуказанным правилам процессуального законодательства представленные в материалы дела доказательства, суд отказал ООО «Арена Н»                          в удовлетворении иска.

При таком исходе дела, расходы по государственной пошлине в сумме                               6000 руб. в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска отказать.

            Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его                  в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                                       Ю.С. Паутова