6/2020-2443(1) 

ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,  

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А12-30551/2019

г. Саратов

20 января 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена «16» января 2020 года. 

Полный текст постановления изготовлен «20» января 2020 года.  

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  председательствующего судьи Камериловой В.А.,  

судей – Клочковой Н.А., Телегиной Т.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

лица, участвующие в деле - не явились, извещены надлежащим образом в порядке  статьи 186 АПК РФ,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью «Волгоградская машиностроительная компания  «ВГТЗ» на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 7 ноября 2019  года по делу № А12-30551/2019, судья Е.В. Пономарева,  

по иску акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

к обществу с ограниченной ответственностью «Волгоградская  машиностроительная компания «ВГТЗ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

о взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными  средствами;  

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (далее -  истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым  заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Волгоградская  машиностроительная компания «ВГТЗ» (далее - ответчик) о взыскании неустойки  за просрочку выплаты аванса, начисленной за период с 11.01.2018 по 22.05.2019, в  размере 1078490 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами на  сумму 2104200 руб., взысканную по решению суда, за период с 20.03.2019 по  

22.05.2019 (с учетом уточненных в порядке, предусмотренном статьей 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исковых  требований).  

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 7 ноября 2019 года с  общества с ограниченной ответственностью «Волгоградская машиностроительная  компания «ВГТЗ» в пользу акционерного общества «Научно-производственное  предприятие «Рубин» взыскана неустойка за просрочку выплаты аванса,  начисленная за период с 11.01.2018 по 22.05.2019, в размере 1078490 руб., а также  23444 руб. 18 коп. расходов по уплате государственной пошлины. В  удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Акционерному  обществу «Научно-производственное предприятие «Рубин» из федерального  бюджета возвращено 1083 руб. государственной пошлины как излишне  уплаченной.  

Не согласившись с принятым судебным актом, общество с ограниченной  ответственностью «Волгоградская машиностроительная компания «ВГТЗ»  обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой  инстанции отменить как незаконное и необоснованное, принять по делу новый  судебный акт.  

Заявитель апелляционной жалобы считает, что судом первой инстанции  неправильно применены нормы материального и процессуального права, выводы,  содержащиеся в решении, не соответствуют обстоятельствам дела: вина ответчика  отсутствует, истец не имеет права на взыскание аванса в судебном порядке до  сдачи работ, работы не приняты Министерством обороны Российской Федерации.  

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились. Надлежащим  образом извещены о месте и времени судебного разбирательства путем  направления определения, выполненного в форме электронного документа, в  соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме  ограниченного доступа.  

Дело рассматривается в апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Как следует из материалов дела, между акционерным общество «Научно- производственное предприятие «Рубин» (исполнитель) и обществом с  ограниченной ответственностью «Волгоградская машиностроительная компания  «ВГТЗ» (заказчик) заключён договор от 21.04.2014 №  1316187321142010120000907/475/9000-14/ВМК-251/4490, в соответствии с  условиями которого исполнитель обязуется в установленный договором срок  выполнить составную часть опытно-конструкторской работы «Оснащение  модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25М  унифицированным комплектом программно-технических средств управления»,  соответствующую качеству, результату, объёму и иным требованиям,  установленным договором и своевременно сдать заказчику её результаты, а  заказчик обязуется принять и оплатить их.  

Согласно пункту 2.2 вышеупомянутого договора содержание, сроки  выполнения работ, цена этапов работ, определяются ведомостью исполнения СЧ  ОКР, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1).  

Согласно пункту 6.1 договора, в редакции протокола согласования  разногласий, за выполненную в соответствии с условиями настоящего договора  работу заказчик выплачивает исполнителю фиксированную сумму, которая  складывается из стоимости каждого этапа ведомости исполнения.  

В соответствии с пунктом 6.2 договора, в редакции протокола согласования  разногласий, цена договора составляет 52500000 руб. Цена является предельной и  не подлежит изменению за исключением указанных в договоре случаев.  

Согласно пункту 6.3 договора ориентировочная сумма этапов устанавливается  для оплаты аванса и штрафных санкций.  

В соответствии с пунктом 6.4 договора в редакции протокола согласования  разногласий заказчик производит авансирование исполнителя в размере 60  процентов от цены этапа договора, установленной в протоколе цены.  

В силу пункта 6.5 договора, в редакции протокола согласования разногласий,  авансовые платежи производятся заказчиком исполнителю в течение 10  банковских дней с момента начала срока выполнения работ по этапу, а по 1 этапу в  течение 10 банковских дней с момента подписания протокола разногласий к  договору.  

На основании пункта 6.8 договора окончательный расчёт за выполненные  работы производится в течение 30 банковских дней с даты подписания заказчиком  акта приёмки выполненных работ в соответствии с протоколом твёрдой  фиксированной цены и соответствующего заключения Министерства обороны  Российской Федерации, направляемого вместе с актом сдачи-приёмки работ, с  учётом ранее выплаченного аванса.  

В соответствии с ведомостью исполнения работ по договору производство  работ исполнителем производится в 6 этапов. При этом согласно ведомости  исполнения работ по договору 5 этап включает в себя два подэтапа (5.1 и 5.2).  

Сторонами не оспаривается выполнение исполнителем этапов 1 - 4 и подэтапа  5.1 работ по договору.  

В соответствии с протоколом согласования цены, являющимся приложением   № 3 к договору, стоимость выполнения работ в рамках этапа 5 составляет 14000000  руб.  

Письмами от 30.03.2016 № НТЦ-2/559-2779 и от 28.09.2016 №  НТЦ2/1966/8627 исполнитель в рамках выполнения работ по договору направлял в  адрес заказчика счёт на выплату аванса по 5 этапу договора на сумму 8400000 руб.  Заказчик в нарушение условий договора (пункты 6.4, 6.5) не исполнил  предусмотренной соглашением сторон обязанности по перечислению исполнителю  авансового платежа для выполнения 5 этапа работ по договору в размере 8400000  руб.  

Исполнитель направил заказчика претензию от 12.01.2018 № 3400/158 с  требованием произвести авансирование по 5 этапу работ и уплатить неустойку в  размере 2174340 руб.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения  акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин» в  Арбитражный суд Волгоградской области с требованием взыскания задолженности  и неустойки за просрочку исполнения обязательств.  

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 30.07.2018 по делу   № А12-14816/2018, оставленным в силе постановлением Арбитражного суда  Поволжского округа от 19.03.2019, с ООО «Волгоградская машиностроительная  

компания «ВГТЗ» в пользу АО «НПП «Рубин» взыскана неустойка за просрочку  исполнения обязательства по авансированию 5 этапа СЧ ОКР за период с  15.04.2015 по 10.01.2018 в размере 2104200 руб.  

Обязательства по авансированию 5 этапа СЧ ОКР по спорному договору и  оплате неустойки ответчиком не исполнены.  

Ссылаясь на неисполнение ООО «Волгоградская машиностроительная  компания «ВГТЗ» обязательства по авансированию 5 этапа СЧ ОКР по договору, а  также решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12- 14816/2018, АО «НПП «Рубин» обратилось в арбитражный суд с требованием  взыскания неустойки в связи с просрочкой оплаты 8400000 руб. аванса по 5 этапу  СЧ ОКР, начисленной за период с 11.01.2018 по 22.05.2019, в размере 1078490 руб.,  а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на  сумму неустойки 2104200 руб., взысканной на основании вступившего в законную  силу решения суда по делу № А12-14816/2018.  

Исходя из условий пунктов 6.1, 6.2, 6.3, 6.8 договора соглашением сторон  предусмотрена обязанность заказчика уплатить исполнителю обусловленную цену  работ после окончательной сдачи их результата, оплата отдельных этапов и  подэтапов работ не предусмотрена.  

В соответствии с ведомостью исполнения договора сроки осуществления 5  этапа работ установлены с 01.04.2015 по 31.10.2016.  

Руководствуясь указанными условиями договора, исполнитель начислил  заказчику неустойку за несвоевременное перечисление суммы аванса по 5 этапу  работ в размере 2104000 руб. за период с 15.04.2015 по 10.01.2018.  

Указанная сумма неустойки взыскана решением Арбитражного суда  Волгоградской области от 30.07.2018 по делу № А12-14816/2018, оставленным в  силе постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 19.03.2019.  

Изучив доводы апелляционной жалобы, оценив представленные  доказательства, в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не  находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской  Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом,  удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией,  задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения.  

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать  кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие  вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед  кредитором.  

Уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного предоставления  по сути является кредитованием. Начисление неустойки в случае просрочки  внесения авансового платежа допускается, если это установлено законом или явно  выражено в соглашении сторон.  

Как следует из материалов дела и установлено судами в рамках дела № А12- 14816/2018, сторонами в договоре прямо регламентированы размер авансирования,  сроки выплаты и размеры авансового платежа, а также явно отражена воля сторон  на начисление неустойки в случае нарушения заказчиком договорных обязательств  по внесению авансового платежа.  

Поскольку судом при рассмотрении настоящего дела на основании  представленных в материалы дела доказательств установлено нарушение  заказчиком условий договора об авансировании выполнения работ, просрочка  внесения авансового платежа подтверждена материалами дела, суд пришел к  выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований в  части взыскания неустойки за просрочку выплаты аванса по 5 этапу СЧ ОКР за  период с 11.01.2018 по 22.05.2019 в размере 1078490 руб.  

ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВГТЗ» размер  неустойки не оспорило, контррасчет по данному требованию не представило,  ходатайство о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации не заявляло.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения  или несовершения ими процессуальных действий (пункт 2 статьи 9 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации).  

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации).каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть  подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в  арбитражном суде иными доказательствами.  

Обращаясь с требованием о взыскании процентов на основании статьи 395  Гражданского кодекса Российской Федерации, истец начислил проценты за  пользование чужими денежными средствами на сумму неустойки, взысканной по  решению суда.  

Статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена  ответственность должника перед кредитором за неисполнение денежного  обязательства.  

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойка  по своей правовой природе является способом обеспечения исполнения  обязательства и одновременно мерой ответственности за его ненадлежащее  исполнение, в частности в случае просрочки исполнения, она служит целям  восстановления нарушенного права кредитора посредством денежной  компенсации.  

Статьей 183 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  предусмотрена индексация присужденных судом денежных сумм на день  исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены  федеральным законом или договором.  

Поскольку названный федеральный закон до настоящего времени не принят,  сложившейся судебной практикой в целях индексации используется механизм,  предусмотренный статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.  Согласно указанной статье за пользование чужими денежными средствами  

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной  просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет  другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств, размер которых  определяется учетной ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования; в  редакции, действовавшей до 01.06.2015) или средними ставками банковского  процента по вкладам физических лиц (в редакции, действовавшей с 01.06.2015 до  01.08.2016).  

Указанная норма является мерой гражданско-правовой ответственности и  средством защиты стороны в обязательстве от неправомерного пользования  должником денежными средствами кредитора, направленным на исключение  последствий инфляционных процессов, влекущих обесценение денежных средств  (в том числе безналичных) и снижение их покупательной способности.  

Учитывая назначение института неустойки и ее роль для надлежащего  исполнения сторонами возникших гражданско-правовых обязательств, в пункте 65  постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №  7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что по  смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе  требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства  (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара,  завершения работ).  

Истец вправе воспользоваться данным механизмом взыскания неустойки до  дня фактического исполнения.  

Таким образом, как правомерно отмечено судом первой инстанции, взыскание  процентов за пользование чужими денежными средствами при неисполнении  судебного акта в части взысканной по делу № А12-14816/2018 суммы неустойки,  приводит к применению двойной меры ответственности.  

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.10.2017 № 309- ЭС17-7211 сформулирована правовая позиция, согласно которой взыскание  процентов за неисполнение судебного акта на проценты, взысканные по нему,  приводит к несоблюдению принципа соразмерности ответственности (статья 395  Гражданского кодекса Российской Федерации) последствиям нарушения  обязательства, в связи с чем, принимая во внимание, что меры защиты  нарушенного права не должны служить средством обогащения одной стороны за  счет другой (принцип соразмерности гражданско-правовой ответственности  последствиям нарушения обязательства), законодателем в части 5 статьи 395  Гражданского кодекса Российской Федерации введен запрет начисления сложных  процентов (процентов на проценты).  

Соответствующий правовой подход, исходя из системного толкования  вышеуказанных норм закона и разъяснений Верховного Суда Российской  Федерации, суд полагает применимым также в случае начисления процентов на  сумму присужденной неустойки.  

В настоящем случае истцом, предъявившим ко взысканию проценты за  пользование чужими денежными средствами, по сути взыскивается компенсация за  неисполнение судебного акта, ранее предусмотренная пунктом 2 постановления  Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 22  «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за  неисполнение судебного акта».  

Однако указанный пункт постановлением Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых  положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»  признан не подлежащим применению.  

Применение же специального механизма защиты гражданских прав –  денежной меры ответственности (судебной неустойки - штрафа за  несвоевременное исполнение судебного решения) - к денежным обязательствам  законодательством не предусмотрено, что отражено в пункте 30 разъяснений,  изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского  кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».  

На основании изложенного, в удовлетворении исковых требований в части  взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами  на сумму присужденной неустойки отказано правомерно.  

Довод апеллянта о том, что вина ответчика отсутствует, истец не имеет права  на взыскание аванса в судебном порядке до сдачи работ, работы не приняты  Министерством обороны Российской Федерации подлежат отклонению судебной  коллегией как необоснованные.  

Поскольку в силу статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации,  если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или  ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении  предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что  надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы,  то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К  таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со  стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения  товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.  

Иные указанные в апелляционной жалобе доводы судом не принимаются,  поскольку по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств,  установленных судом первой инстанции в процессе разрешения спора по  результатам оценки доказательств, представленных в дело.  

Вынесенное судом первой инстанции решение, является законным и  обоснованным, принято с правильным применением норм материального и  процессуального права, изложенные в нем выводы соответствуют установленным  по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. В  силу изложенного, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.  

Судебные расходы распределены судом первой инстанции по правилам статьи  110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 7 ноября 2019 года по делу   № А12-30551/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без  удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгоградская  машиностроительная компания «ВГТЗ» в доход федерального бюджета Российской  

Федерации государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в  размере 3000 руб.  

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд  Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в  полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.  

Председательствующий В.А. Камерилова 

Судьи Н.А. Клочкова  

 Т.Н. Телегина