АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-880/2024  

от 11 марта 2025 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Принять отказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (ИНН 

<

***>) от следующих требований: произвести удаление сухих ветвей на кустах пузыреплодника калинолистного (место посадки обозначено цифрами "1" и "8" на схеме № 1 акта от 23.05.2024); произвести повторный посев травы на газонах, включая работы по подготовке почвы для посева, на участке с буквенно-цифровым обозначением "14Г". Производство по делу в части данных требований прекратить.  

В остальной части исковые требования Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Северодвинска (ИНН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать закрытое акционерное общество "Северная Роза" (ИНН 

<

***>) в срок не позднее 16 июня 2025 года устранить недостатки работ по муниципальному контракту  

 № 403-21-КЖКХ от 28.01.2022, а именно: 

- произвести посадку двух кустов пузыреплодника калинолистного (место посадки обозначено цифрой "1" на схеме № 1 акта от 23.05.2024);  

- удалить не прижившееся зеленое насаждение в количестве 1 шт. и произвести посадку нового - одного саженца клена остролистого (место посадки обозначено цифрой "32" на схеме № 1 акта от 23.05.2024);  

- произвести повторный посев травы на газонах, включая работы по подготовке почвы для посева, на участках со следующими буквенно-цифровыми обозначениями  

(в соответствии со схемой № 2 акта от 23.05.2024): с "1г" по "3г", "5г", с "8г" по "13г", "15г", "16г" "19г", "21г".  

Обязать закрытое акционерное общество "Северная Роза" (ИНН 

<

***>) 

в срок не позднее 16 июня 2025 года выполнить работы по восстановлению благоустройства, нарушенного в процессе производства работ по муниципальному контракту № 403-21-КЖКХ от 28.10.2024 на территории зеленой зоны НТЦ "Звездочка", расположенной на улице Мира, а именно: произвести подсев газонной травы на следующих участках:  

- вдоль тротуара, расположенного от участка "16г" в сторону дома № 13 

по ул. Мира (буквенно-цифровое обозначение в соответствии со схемой № 2 акта от 23.05.2024 - "П2"),  

- вдоль тротуара от участка "17г" до участка "8г" (в местах производства работ по прокладке кабеля наружного освещения), буквенно-цифровое обозначение в соответствии со схемой № 2 акта от 23.05.2024 - "ПЗ",  

- вдоль тротуара из бетонной плитки, расположенного от участка "21г" в сторону здания № 13 по ул. Мира, буквенно-цифровое обозначение в соответствии со схемой № 2 акта от 23.05.2024 - "П1",  

- вдоль деревянных тротуаров, буквенно-цифровое обозначение в соответствии со схемой № 2 акта от 23.05.2024 - "Д1", "Д2", "ДЗ".  

На случай неисполнения закрытым акционерным обществом "Северная Роза" (ИНН 

<

***>) решения Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-880/2024 взыскать с закрытого акционерного общества "Северная Роза" 

(ИНН 

<

***>) в пользу Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (ИНН 

<

***>) 500 руб. 00 коп. судебной неустойки за каждый день неисполнения, начиная со дня, следующего после истечения установленного решением суда срока, по день фактического исполнения.  

Взыскать с закрытого акционерного общества "Северная Роза" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья Н.В. Бутусова.