РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   16 мая 2024 года    по делу А33-35746/2023 Красноярск  

16 мая 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Продлить срок действия договора о развитии застроенной территории от 22 мая  2017 года № 1-18 до 22 мая 2030 года, путем внесения изменений в договор о  развитии застроенной территории от 22 мая 2017 года № 1-18, заключенный между  администрацией города Красноярска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и  обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная  компания «Красноярскстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), изложив  условия пункта 4.1 договора в редакции дополнительного соглашения, а именно:  

«п. 4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами  и действует до «22» мая 2030 года».  

Взыскать с администрации города Красноярска (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-строительная компания «Красноярскстрой» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 6000 руб. в возмещение расходов на уплату государственной  пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть  обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной  жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья И.В. Летников