АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

19 октября 2020 года

Дело № А33-18705/2020

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена  14 октября 2020 года 

В полном объеме решение изготовлено   19 октября 2020 года 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Строй-Енисей" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью "Зодчий" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о взыскании неустойки (пени),

в присутствии в судебном заседании:

от истца-  ФИО1, представителя по доверенности от 12.10.2020, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Строй-Енисей" (далее – ООО "Строй-Енисей", истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Зодчий" (далее – ООО "Зодчий", ответчик) о взыскании 1 821 733 рублей 60 копеек неустойки (пени) за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объектов долевого строительства по Договорам № 21 от 14.04.2015, № 22 от 14.04.2015, № 23 от 14.04.2015, №24 от 14.04.2015, № 25 от 22.04.2015 о долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловский район, ул. Прибойная, 37 строения 6,7 (строительный адрес).

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 17 июня 2020 года исковое заявление принято к производству суда.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания уведомлён надлежащим образом, возражений относительно рассмотрения дела в его отсутствие не заявил, в связи с чем суд рассматривает дело в отсутствие представителей ответчика.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

14.04.2015 между ООО «Зодчий» (Застройщик) и ООО «Строй-Енисей» (Участник долевого строительства) заключен Договор № 21 о долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловский район, ул.Прибойная, 37 строения 6,7 (строительный адрес). 

В соответствии с п. 1.1 Договора, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) многоэтажный жилой дом № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловского района, на земельном участке с кадастровым номером 24:50:07 00 142:19 по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. Прибойная 37, строения 6 и 7.

По условиям п. 1.2. Договора № 21 от 14.04.2015 Застройщик привлекает Участника к финансированию строительства Жилого дома и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома передает Участнику Объект долевого строительства (Квартиру):

Строительный № 70, блок-секция 1, этаж 7, количество комнат - 1, общая площадь 33,73 м , площадь с учетом лоджии 34,74 м2.

Согласно п. 2.1 договора цена расчетной площади квартиры на момент заключения Договора составляет 1 737 000 рублей.

Исполнение ООО «Строй-Енисей» своих обязательств по Договору № 21 от 14.04.2015, подтверждается справкой ООО «Зодчий» исх. № 236/17 от 27.04.2017, согласно которой ООО «Зодчий» подтверждает, что квартира № 70 оплачена ООО «Строй-Енисей» в полном объеме.

14.04.2015 между ООО «Зодчий» (Застройщик) и ООО «Строй-Енисей» (Участник долевого строительства) был заключен Договор № 22 о долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловский район, ул. Прибойная, 37 строения 6,7 (строительный адрес). 

В соответствии с п. 1.1 данного Договора, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) многоэтажный жилой дом № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловского района, на земельном участке с кадастровым номером 24:50:07 00 142:19 по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. Прибойная 37, строения 6 и 7.

По условиям п. 1.2. Договора № 22 от 14.04.2015 Застройщик привлекает Участника к финансированию строительства Жилого дома и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома передает Участнику Объект долевого строительства (Квартиру):

Строительный № 94, блок-секция 1, этаж 9, количество комнат - 1, общая площадь             33,82 м2, площадь с учетом лоджии 34,83 м2.

Согласно п. 2.1 договора цена расчетной площади квартиры на момент заключения Договора составляет 1 741 500 рублей.

Исполнение ООО «Строй-Енисей» своих обязательств по Договору № 22 от 14.04.2015, подтверждается справкой ООО «Зодчий» исх. № 237/17 от 27.04.2017, в соответствии с которой, ООО «Зодчий» подтверждает, что квартира № 94 оплачена ООО «Строй-Енисей» в полном объеме.

14.04.2015 между ООО «Зодчий» (Застройщик) и ООО «Строй-Енисей» (Участник долевого строительства) был заключен Договор № 23 о долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловский район, ул. Прибойная, 37 строения 6,7 (строительный адрес). 

В соответствии с п. 1.1 данного Договора, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) многоэтажный жилой дом № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловского района, на земельном участке с кадастровым номером 24:50:07 00 142:19 по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. Прибойная 37, строения 6 и 7.

По условиям п. 1.2. Договора № 23 от 14.04.2015  Застройщик привлекает Участника к финансированию строительства Жилого дома и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома передает Участнику Объект долевого строительства (Квартиру):

Строительный № 106, блок-секция 1, этаж 10, количество комнат - 1, общая площадь 33,82 м , площадь с учетом лоджии 34,83 м .

Согласно п. 2.1 договора цена расчетной площади квартиры на момент заключения Договора составляет 1 741 500 рублей.

Исполнение ООО «Строй-Енисей» своих обязательств по Договору № 23 от 14.04.2015 г., подтверждается справкой ООО «Зодчий» исх. № 238/17 от 27.04.2017, в соответствии с которой, ООО «Зодчий» подтверждает, что указанная квартира № 106 оплачена ООО «Строй-Енисей» в полном объеме.

14.04.2015 между ООО «Зодчий» (Застройщик) и ООО «Строй-Енисей» (Участник долевого строительства) был заключен Договор № 24 о долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловский район, ул. Прибойная, 37 строения 6,7 (строительный адрес). 

В соответствии с п. 1.1 Договора, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) многоэтажный жилой дом № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловского района, на земельном участке с кадастровым номером 24:50:07 00 142:19 по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. Прибойная 37, строения 6 и 7.

По условиям п. 1.2 Договора № 24 от 14.04.2015 Застройщик привлекает Участника к финансированию строительства Жилого дома и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома передает Участнику Объект долевого строительства (Квартиру): Строительный № 118, блок-секция 1, этаж 11, количество комнат - 1, общая площадь 33,82 м , площадь с учетом лоджии 34,83 м .

Согласно п. 2.1 договора цена расчетной площади квартиры на момент заключения Договора составляет 1 741 500 рублей.

Исполнение ООО «Строй-Енисей» своих обязательств по Договору № 24 от 14.04.2015, подтверждается справкой ООО «Зодчий» исх. № 240/17 от 27.04.2017 года, в соответствии с которой, ООО «Зодчий» подтверждает, что указанная квартира № 118 оплачена 000 «Строй-Енисей» в полном объеме.

22.04.2015 между ООО «Зодчий» /Застройщик/ и ООО «Строй-Енисей» /Участник долевого строительства/ был заключен Договор № 25 о долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловский район, ул. Прибойная, 37 строения 6,7 (строительный адрес).

 В соответствии с п. 1.1 Договора, Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) многоэтажный жилой дом № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске Свердловского района, на земельном участке с кадастровым номером 24:50:07 00 142:19 по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. Прибойная, 37 строения 6 и 7.

По условиям п. 1.2 договора № 25 от 22.04.2015 Застройщик привлекает Участника к финансированию строительства Жилого дома и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома передает Участнику Объект долевого строительства (Квартиру):

Строительный № 111, блок-секция 1, этаж 11, количество комнат - 1, общая площадь 32,60 м , площадь с учетом лоджии 33,61 м .

Согласно п. 2.1 договора цена расчетной площади квартиры на момент заключения Договора составляет 1 680 500 рублей.

Исполнение ООО «Строй-Енисей» своих обязательств по договору № 25 от 22.04.2015, подтверждается справкой ООО «Зодчий» исх. № 239/17 от 27.04.2017, в соответствии с которой, ООО «Зодчий» подтверждает, что указанная квартира № 111 оплачена ООО «Строй-Енисей» в полном объеме.

Вышеуказанные Договоры о долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловский район, ул. Прибойная, 37 строения 6,7 (строительный адрес) № 21 от 14.04.2015, № 22 от 14.04.2015, № 23 от 14.04.2015, № 24 от 14.04.2015, № 25 от 22.04.2015 содержат идентичные положения.

В соответствии с пунктами п. 1.4 Договоров, ориентировочный срок окончания строительства Жилого дома – 31.12.2016. Срок передачи Квартир Участнику - не позднее 31.03.2017.

Согласно п. 5.4 Договоров стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

В соответствии с п. 5.6 Договоров при невозможности ввода Жилого дома в эксплуатацию в срок, указанный в п. 1.4, Застройщик имеет право продлить срок действия договора. При этом Застройщик обязан не позднее чем за 2 месяца до истечения предполагаемого срока ввода Жилого дома в эксплуатацию, направить Участнику предложение о внесении соответствующих изменений в Договор.

02.112016 в адрес ООО «Строй-Енисей» направлено уведомление исх.№ 592/16 об установлении срока передачи объекта участникам долевого строительства до 30.05.2017 в связи с переносом срока ввода дома в эксплуатацию на 1 квартал 2017 года и предложением внести изменения в Договоры о долевом участии в строительстве жилого дома № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярск, Свердловский район, ул. Прибойная, 37, строения 6 и 7 (строительный адрес).

25.10.2020 в нарушение срока окончания строительства установленного в п. 1.4 вышеуказанных Договоров, многоэтажный жилой дом № 1 со встроенными нежилыми помещениями  и  инженерным  обеспечением  в  г.   Красноярск,  Свердловский  район,  ул. Прибойная 37, строения 6, 7, был введен в эксплуатацию, что подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № 24-308-1302014-2014 от 25.10.2019.

19.02.2020 ООО «Зодчий» произвело передачу объектов долевого строительства в собственность ООО «Строй-Енисей» по Договорам № 21 от 14.04.2015 , № 22 от 14.04.2015 № 23 от 14.04.2015, № 24 от 14.04.2015, № 25 от 22.04.2015, с нарушением установленного договором срока не позднее 31.03.2017, что подтверждается актами приема-передачи от 19.02.2020, подписанными обеими сторонами.

Длительность просрочки исполнения ООО «Зодчий» обязательств по Договорам о долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловский район, ул. Прибойная, 37 строения 6,7 (строительный адрес), за период с 01.04.2017 по 18.02.2020 составила 1054 дня.

Согласно иску, с учетом общей стоимости квартир по договорам № 21 от 14.04.2015, № 22 от 14.04.2015, № 23 от 14.04.2015, № 24 от 14.04.2015, № 25 от 22.04.2015 (8 642 000 рублей) размер неустойки (пени) составляет 1 821 733 рубля 60 копеек.

27.02.2020 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить неустойку (пени) за нарушение предусмотренного Договорами срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства в размере 1 821 733 рублей 60 копеек. Претензия получена ответчиком 30.04.2020, оставлена без удовлетворения.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Предметом настоящего иска является требование о взыскании неустойки за невыполнение обязательств по договорам  долевого строительства № 21 от 14.04.2015 , № 22 от 14.04.2015 № 23 от 14.04.2015, № 24 от 14.04.2015, № 25 от 22.04.2015.

По смыслу положений градостроительного законодательства и Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ) застройщик передает объект долевого строительства после ввода в эксплуатацию созданного объекта недвижимости. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства является существенным условием договора об участии в долевом строительстве (часть 4 статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве).

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об участии в долевом строительстве) по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Статьей 6 Закона об участии в долевом строительстве предусмотрена обязанность застройщика передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

Частью 2 указанной статьи установлено, что в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Из приведенных положений закона следует, что условие о сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику этого строительства является существенным для данного договора.

Согласно пункту 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно статье 10 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

По смыслу части 3 статьи 31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" неустойка уплачивается именно за нарушение предусмотренных названной статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя (в данном случае - требование о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы).

Из материалов дела следует, что  ООО «Зодчий» произвело передачу объектов долевого строительства в собственность ООО «Строй-Енисей» по Договорам № 21 от 14.04.2015 ,              № 22 от 14.04.2015 № 23 от 14.04.2015, № 24 от 14.04.2015, № 25 от 22.04.2015, с нарушением установленного договором срока не позднее 31.03.2017, что подтверждается актами приема-передачи от 19.02.2020, подписанными обеими сторонами.

Длительность просрочки исполнения ООО «Зодчий» обязательств по оговорам о долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома № 1 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярске, Свердловский район, ул. Прибойная, 37 строения 6,7 (строительный адрес), за период с 01.04.2017 по 18.02.2020 составила 1054 дня.

Таким образом, ответчиком нарушены условия договора о сроке передачи предмета договоров – квартир.

Доказательства обратного ответчиком вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлены.

Исходя из  общей стоимости квартир по договорам № 21 от 14.04.2015,  № 22 от 14.04.2015, № 23 от 14.04.2015, № 24 от 14.04.2015, № 25 от 22.04.2015  (8 642 000 рублей) размер неустойки (пени) составляет 1 821 733 рубля 60 копеек.

В силу ч. 2 ст. 6 названного закона в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная данной частью неустойка (пеня) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 4 Закона N 214-ФЗ договор участия в долевом строительстве должен содержать срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства.

Из приведенных положений закона следует, что договор участия в долевом строительстве должен содержать условие о сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику этого строительства, то есть это условие является существенным для такого договора.

Согласно статье 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если указанные правила не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

При этом в силу приведенных положений статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит установлению не только воля застройщика на заключение договора с определенным сроком исполнения, но и воля участника долевого строительства.

Указанные выводы приведены в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018) (ред. от 26.12.2018).

Проверив расчет неустойки, суд признает его арифметически верным и подлежащим применению.

Ответчик отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Часть 5 статьи 70 Кодекса предусматривает, что обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу. Таким образом, положения части 5 статьи 70 Кодекса распространяются на обстоятельства, которые считаются признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 Кодекса.

С учетом изложенного, принимая во внимание процессуальное поведение ответчика и отсутствие своевременно представленных возражений на иск, обстоятельства дела, указанные истцом, считаются признанными ответчиком.

В отсутствие возражений ответчика суд не вправе отклонять представленные истцом в обоснование иска доказательства, обратное свидетельствовало бы об исполнении судом обязанности ответчика по опровержению доказательств, представленных другой стороной, и нарушении таких фундаментальных принципов арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон.

Ответчиком не заявлено о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного суд приходит к выводу об удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью "Строй-Енисей" в полном объеме.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы истца по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в арбитражном суде относятся на ответчика.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Зодчий" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строй-Енисей" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 1 821 733 руб. 60 коп. неустойки, а также 31 217 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

С.А. Красовская