АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А28-311/2023

г. Киров

28 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 апреля 2023 года 

В полном объеме решение изготовлено 28 апреля 2023 года  

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Кулдышева О.Л., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев исковое заявление 

министерства лесного хозяйства Кировской области (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610020, Россия, 

<

...>) 

к АО «Мокинское» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 613363, Россия, Кировская область, с. Мокино, Советский район, ул. Октябрьская, д. 14А)

об обязании выполнить лесовосстановительные мероприятия в срок до 01.06.2023

 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – ФИО2, по доверенности от 11.01.2023, 

от ответчика –ФИО3, по доверенности от 29.03.2023 

 

установил:

министерство лесного хозяйства Кировской области (далее – истец, министерство) обратилось в суд с исковым заявлением к АО «Мокинское» (далее – ответчик, Общество) об обязании АО «Мокинское» выполнить работы по лесовосстановлению на площади 2,3 га взамен погибших культур в 2021году в срок до 01.06.2023года.

Ответчик исковые требования не признал в части и заявил о возможности фактического выполнения работ до 01.10.2023года.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие фактические обстоятельства по делу.

Между истцом (арендодатель) и ответчиком (арендатор) заключен договор аренды лесного участка № 30-30 от 27.12.2021 (далее – договор)  расположенного по адресу Кировская область, Советский район, Суводское лесничество, Советское сельское участковое лесничество, условный номер 43-43-01/524/2011-705, площадью 3936га.

В соответствии с пунктом 11 договора, арендатор обязан использовать лесной участок по назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим договором и разработанным в установленном порядке проектом освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы.

Арендатор обязан за свой счет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия , лесовосстановление и уход за лесом на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 6 к договору.

На основании Актов на списание лесных культур от 10.11.2021 и от 19.11.2021, утвержденных руководителем Министерства 01.12.2021 и 24.01.2022, в 2021году министерством списаны погибшие лесные культуры в выделе 2 квартала 60 на площади 2,6 га, в выделе 29 квартала 24 на площади 3,1 га, в выделе 37 квартала 36 на площади 3га, всего на общей площади 8,7 га.

Ответчиком в 2022году произведено искусственное лесовосстановление и произведена посадка саженцев основных древесных пород, осуществлен уход на площади 6,4 га.

Задолженность по выполнению работ по лесовосстановлению составила на площади 2,3 га.

Министерством направлена в адрес Общества претензия от 26.01.2022 с требованием о проведении работ по лесовосстановлению взамен погибших лесных культур в срок до 01.06.2022.

В ответ на письмо Общества, министерством направлено в адрес ответчика письмо от 20.06.2022, в соответствии с которым сроки для проведения работ по лесовосстановлению взамен погибших лесных культур установлены до 01.10.2022.

В связи с невыполнением ответчиком указанных работ в полном объеме, истцом заявлено в арбитражный суд требование о понуждении ответчика выполнить работы по лесовосстановлению взамен погибших лесных культур в срок до 01.06.2023года на оставшейся площади 2,3 га.

Ответчик в отзыве на иск и в ходе судебного заседания подтвердил фактические обстоятельства гибели лесных культур на площади 8,7 га, заявил о частичном выполнении работ по лесовосстановлению взамен погибших лесных культур на площади 6,4 га, и согласен с требованием истца о необходимости выполнения работ по лесовосстановлению лесных культур на площади 2,3 га.

Однако, по мнению ответчика, выполнение указанных работ в срок до 01.06.2023 невозможно по объективным обстоятельствам, в том числе ввиду необходимости проведения полевых и посевных работ в весенний период, поскольку основным видом деятельности Общества является производство молока, мяса, зерна.

Подробное изложение своих доводов представлено сторонами в письменных пояснениях по делу.

Заслушав доводы сторон, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Обязанность ответчика по проведению работ по лесовосстановлению лесных культур взамен погибших культур в результате природных погодных условий, сторонами признается и не оспаривается ответчиком.

Указанная обязанность предусмотрена условиями договора аренды лесного участка от 27.12.2021 (пункт 11 договора), статьями 309, 310 ГК РФ, статьей 62 Лесного Кодекса РФ.

Обстоятельства гибели лесных культур подтверждаются представленными в суд актами на списание лесных культур от 10,11.2021, от 19.11.2021, утвержденных руководителем Министерства лесного хозяйства Кировской области.

Таким образом, сторонами признается обязанность ответчика по выполнению работ по лесовосстановлению лесных культур взамен погибших культур на площади 2, 3 га.

Ответчик пояснил, что может провести указанные работы по лесовосстановлению в период до 01.10.2023, и заявил об объективной невозможности их проведения в установленный министерством период до 01.06.2023.

Доводы сторон по установлению периода проведения работ по лесовосстановлению судом рассмотрены.

Как следует из письма Министерства от 20.06.2022, министерство со ссылкой на пункт 49 Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 04.12.2020 № 1014, признало возможным  и обоснованным произвести посадку лесных культур ответчиком в срок до 01.10.2022года.

С учетом представленных ответчиком доводов о реальной возможности выполнения лесовосстановительных работ, а также с учетом основного вида деятельности Общества, не связанного с лесозаготовительной деятельностью, необходимостью обеспечения выполнения посевных работ весной 2023года, суд приходит к выводу об обоснованности доводов ответчика и признает объективно реальным срок для выполнения работ по лесовосстановлению лесных культур взамен погибших культур на площади 2, 3га в срок до 01.10.2023года.

Требования истца об установлении срока для выполнения работ по лесовосстановлению до 01.06.2023, судом признаются необоснованными и не подтвержденными объективными доказательствами, не имеющими реального обоснования, умозрительными.

Таким образом, суд приходит к выводу о правомерности требований истца и удовлетворяет иск об обязании АО «Мокинское» выполнить работы по лесовосстановлению на площади 2,3 га взамен погибших культур частично, устанавливая срок для выполнения указанных работ до 01.10.2023года, заявленного ответчиком.

В соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ, с ответчика подлежит уплате государственная пошлина. В силу статьи 333.22 НК РФ, суд уменьшает размер государственной пошлины по делу в связи с имущественным положением ответчика до 2 000рублей 00копеек.

 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично и обязать АО «Мокинское» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 613363, Россия, Кировская область, с. Мокино, Советский район, ул. Октябрьская, д. 14А) выполнить работы по лесовосстановлению на площади 2,3 га (взамен погибших культур в 2021году) в срок до 01.10.2023года.

Взыскать с АО «Мокинское» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 613363, Россия, Кировская область, с. Мокино, Советский район, ул. Октябрьская, д. 14А) в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 2000рублей 00копеек, уменьшив размер госпошлины по делу.

Исполнительные листы подлежат выдаче в порядке, предусмотренном главой VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

 

Судья                                                                                О.Л. Кулдышев