Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«17»_февраля  2021г.

                                       Дело № А12-31083/20

Резолютивная часть решения объявлена 10 февраля  2021 года. 

Полный текст решения изготовлен  17 февраля 2021 года. 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены Викторовны,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией Александровной, 

при участии в судебном заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью «Энерголинк-Волгоград»     -  ФИО1, доверенность от 28.10.2020; ФИО2, генеральный директор, решение учредителя № 07/2020 от 25.01.2021;

от общества с ограниченной ответственностью  «Брав-ТР»   - ФИО3, доверенность 10.07.2018 №07-2018;                        

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Энерголинк-Волгоград»                                    (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью                «Брав-ТР» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности и неустойки;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Энерголинк-Волгоград»   обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением  к обществу с ограниченной ответственностью «Брав-ТР» о взыскании задолженности по договору от 19.02.2018 №07-У/2018  подряда в размере 1 352 351 рублей, неустойки за нарушение срока оплаты  за период с 04.10.2020 по 03.11.2020 в размере 81 141 рубля, судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 27 335 рублей.                            

Ответчик   против  удовлетворения  исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление. 

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. 

Как следует из документов, представленных в материалы дела, обществом с ограниченной ответственностью «Энерголинк-Волгоград» (подрядчик») и обществом с ограниченной ответственностью «БРАВ-ТР» (заказчик) заключен договор от 19.02.2018 №07-У/2018  подряда, согласно  условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по проведению лабораторных испытаний с оформлением отчета по итогам испытаний и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.

Место выполнения работ:  Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 76 Сектор «С» (пункт 1.2 договора). 

Согласно пункту 1.4. вышеупомянутого договора начало работ - с момента подписания договора сторонами, предоставления документации и выполнения пункта  4.3. настоящего договора подряда. Окончание работ - в течение 14 календарных дней с момента подписания настоящего договора подряда и выполнения пункта  4.1. договора подряда.

В соответствии с пунктом 4.1.договора общая стоимость работ по договору составляет 1 016 949 рублей 15 копеек.  Указанная цена договора является предварительной. Окончательная цена договора определяется исходя из стоимости фактически выполненных работ. При этом стоимость фактически выполненных работ, превышающая стоимость договора, оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору подряда.

Согласно пункту 4.2. договора  оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 5 банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и предъявления подрядчиком соответствующего счета, с учетом выплаченных авансов.

В пункте 4.3. договора сторонами оговорено, что заказчик перечисляет аванс на расчетный счет подрядчика в размере 355 932 рублей 20 копеек в течение 3 рабочих дней с момента получения счета.

Юридическим днем начала работ по договору считается совершение перевода подрядчику аванса и выполнение пункта 3.1. договора (пункт 4.5 договора). 

Перед началом производства работ заказчик обязан предоставить всю необходимую  техническую и иную документацию для проведения лабораторных испытаний  (пункт 3.1 договора). 

Пунктом 2.2. договора предусмотрено, что заказчик  обязан обеспечить подходы и подъезды к объекту работ. Объектом работ является строительная площадка сектора «С» стадиона на 45000 зрительских мест, расположенная в Волгограде, проспект им. В.И. Ленина,76; передать подрядчику рабочую документацию Шифр 27-02-01B-К ЭО1.1. Система электроснабжения (Силовое электрооборудование 0,4кВ). Групповая сеть. Сектор С» ЭМ2.3.; Шифр 27-02-01В-К Э01.3. «Система электроснабжения (Силовое электрооборудование 0.4кВ). Внутреннее электроосвещение. Сектор С» и иную техническую документацию,  подтверждающую факт выполнения строительно-монтажных работ с целью производства работ в пригодном для выполнения последующих работ по лабораторным испытаниям.

Заказчик осуществляет приемку работ в течение 5 рабочих дней после получения уведомления подрядчика о готовности работ к сдаче (пункт 3.6 договора). 

Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ при отсутствии замечаний к качеству и объему выполнения работ (пункт 3.7 договора). 

В течение 7 календарных дней после окончания работ подрядчик обязан: возвратить заказчику все предаваемые по акту приема - передачи документы на оборудование и материалы, используемые для производства работ, в том, состоянии, в котором они приняты перед началом работ, если от заказчика не поступило иных указаний (пункт 3.8 договора). 

Итогом работы подрядчика является выдача оформленного отчета о проведенных лабораторных испытаниях электрооборудования установленной формы Нижне-Волжского управления Ростехнадзора (пункт 3.9 договора).

В пункте 6.3. договора подряда сторонами предусмотрена  ответственность заказчика с случае нарушения установленного договором срока оплаты выполненных работ в виде неустойки в размере 0,1 процента  от стоимости работ за каждый день просрочки выполнения работ. 

Впоследствии  сторонами подписано дополнительное соглашение от 28.02.2018 № 1 к договору от 19.02.2018 №07-У/2018  подряда,  в соответствии с которым стороны договорились  пункт 2.2 договора изложить в следующей редакции: «заказчик обязан обеспечить подходы и подъезды к объекту работ. Объектом работ является строительная площадка Сектора «С» стадиона на 45000 зрительских мест, расположенная в Волгограде, проспект им. В.И. Ленина, 76; для обеспечения выполнения работ передать подрядчику откорректированную исполнительную схему Шифр 27-02-01B-К «Система электроснабжения» (силовое электрооборудование 0,4кВ). Распределительная сеть. Сектор «С», выполненную после проведения электромонтажных работ по рабочей документации Шифр 27-02-01В-К. «Система электроснабжения (Силовое электрооборудование 0,4кВ). Распределительная сеть. Сектор «С», подтверждающую факт выполнения строительно-монтажных работ с целью производства работ в пригодном для выполнения последующих работ по измерениям и испытаниям электрооборудования.

Утвердить и включить приложение к настоящему дополнительному соглашению №1 «Исполнительная схема системы электроснабжения (силовое электрооборудование 0,4кВ). Распределительная сеть. Сектор «С».

В соответствии  с дополнительным соглашением от 12.03.2018 №2 к договору от 19.02.2018 №07-У/2018  подряда в  связи с увеличением объемов работ по испытаниям и измерениям электрооборудования Системы электроснабжения (силовое электрооборудование 0,4кВ). Распределительная сеть. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Строительной площадки - Сектор «С» стадиона на 45 000 зрительских мест,  расположенной в Волгограде, проспект им. В.И. Ленина, 76, и увеличением цены договора на сумму 230 000 рублей стороны решили внести в договор следующие изменения. Дополнить пункт 2.2.2.1. договора раздела № 2.2. и изложить в следующей редакции: «заказчик  обязан для обеспечения выполнения работ передать подрядчику принятую строительным контролем заказчика следующую документацию, а именно: Исполнительную документацию Шифр 27-02-01B-К «Система электроснабжения. Силовое электрооборудование 0,4кВ. «Распределительная сеть». Сектор «С»; Исполнительную документацию Шифр 27-02-01B-К «Система электроснабжения. Силовое электрооборудование 0,4кВ. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение». Сектор «С», выполненную после проведения электромонтажных работ по утвержденной Рабочей документации Шифр 27-02-01B-К. «Система электроснабжения (Силовое электрооборудование 0,4кВ), подтверждающую факт выполнения строительно-монтажных работ с целью производства работ в пригодном для выполнения последующих работ по измерениям и испытаниям электрооборудования.»

Стороны также договорились, что общая стоимость работ по договору (цена договора) составляет 1 246 949  рублей 15 копеек (пункт 4.1 договора). 

Указанным дополнительным  соглашением  внесены изменения  в  пункт 1.4 договора, определяющий сроки начала и  окончания работ. Так, начало работ - с момента подписания договора сторонами, предоставления документации и выполнения пункта 4.3. договора подряда. Окончание работ - 25.03.2018 и выполнения пункта  4.1. договора подряда. 

Согласно акту  сдачи-приемки выполненных работ  от 19.03.2018 №1 и акту сдачи-приемки выполненных работ  от 23.03.2018 №2,  подписанным сторонами,  подрядчик  выполнил работы по договору на общую сумму 1 246 949  рублей 15 копеек (акту  сдачи-приемки выполненных работ  от 19.03.2018 №1 на сумму 1 016 949 рублей 15 копеек и по акту  сдачи-приемки выполненных работ  от 23.03.2018 №2  на сумму 230 000 рублей). 

Работы приняты и оплачены заказчиком  в полном объеме  платежными поручениями  от 20.02.2018 №290 на сумму 355 932 рубля,  от 20.03.2020 №534 на сумму 461 017 рублей 15 копеек,  от 29.03.20918 №617 на сумму 200 000 рублей, от  14.12.2018 №4282 на сумму 230 000 рублей. 

По утверждению истца,  подрядчик в рамках  спорного договора в первоначальной редакции направил 19.03.2018 в адрес заказчика первичные документы, подтверждающие выполнение  работ, а именно: акт приема - передачи технического отчета по измерениям и испытаниям электрооборудования по объекту: Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест,  Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 76, включающий в себя:  система электроснабжения (силовое электрооборудование 0,4кВ), Групповая сеть. Сектор «С»; система электроснабжения (силовое электрооборудование 0,4кВ), Внутреннее электроосвещение. Сектор «С»,  а  23.03.2018в рамках спорного договора подряда  с учетом дополнительного соглашения от 12.03.2018  №2 направил в адрес заказчика акт сдачи - приемки выполненных работ  от 23.03.2018 № 2,   включающий в себя технический отчет по выполненным работам: система электроснабжения (силовое электрооборудование 0,4кВ), Внутреннее электрооборудование и электроосвещение (РОЦ). Сектор «С», система электроснабжения (силовое электрооборудование 0,4кВ), Распределительная сеть. Сектор «С». Ответчик произвел оплату  в размере 1 246 949 рублей 15 копеек, однако выполненные истцом работы по договору  от 19.02.2018 №07-У/2018  в  первоначальной редакции  не оплачены. 

Общество с ограниченной ответственностью «Энерголинк-Волгоград»  письмом от 14.08.2020  № ЭЛВ-139  направило в адрес общества с ограниченной ответственностью «Брав-ТР» акт о приемке выполненных работ от 14.08.2020 №1, справку о стоимости выполненных работ и затрат от 14.08.2020 №1  на сумму 1 352 351 рублей

Указанные документы сформированы на основании принятых 19.03.2018 заказчиком результатов работ по акту приема-передачи технических отчетов по измерениям и испытаниям электрооборудования в части Групповой сети электроснабжения и Сети электроосвещения по объекту: «Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 76». 

Общество с ограниченной ответственностью «Брав-ТР» акт о приемке выполненных работ от 14.08.2020 №1, справку о стоимости выполненных работ и затрат от 14.08.2020 №1  на сумму 1 352 351 рублей не подписало ввиду отсутствия  каких-либо договорных отношений  и доказательств, подтверждающих  выполнение работ. 

В претензии истец потребовал от ответчика оплатить задолженность в полном объеме за выполненные работы. Общество с ограниченной ответственностью «Брав-ТР» данное требование не исполнило, в связи с этим общество с ограниченной ответственностью «Энерголинк-Волгоград»   обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Из пункта 3 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой.

В пункте 4 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что при отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате надлежащим образом выполненных работ является сдача подрядчиком результата работ (пункт 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другими законами или договором.

В пункте  4.1. договора от 19.02.2018 №07-У/2018  подряда  сторонами оговорено, что общая стоимость работ по договору составляет 1 016 949 рублей 15 копеек.  Указанная цена договора является предварительной. При этом стоимость фактически выполненных работ, превышающая стоимость договора, оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору подряда.

Из материалов дела следует и установлено судом, после заключения сторонами договора от 19.02.2018 №07-У/2018  подряда  письмом от 01.03.2018 №22/01  ООО «Брав-ТР» обратилось к  ООО «Энерголинк-Волгоград»    с просьбой провести работы по измерению и испытанию сопротивления изоляции кабельных проводников по системе РОЦ и кабельные проводники по системе ЭМ-1.3. в целях обеспечения непрерывности производства строительно-монтажных работ на объекте строительства стадиона на 45 000 зрительных мест, Волгоград и процедуры подтверждения качества выполненных работ, приложив копии исполнительной документации «Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест,  Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 76. Система электроснабжения (силовое электрооборудование 0,4кВ). Распределительная сеть 0,4кВ, Сектор «С»,  и исполнительной документации «Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 76. Система электроснабжения (силовое электрооборудование 0,4кВ). Внутреннее электрооборудование и электроосвещение.

В ответ на данную просьбу ООО «Энерголинк-Волгоград» письмом от 06.03.2018 №ЭЛ-В/101  направило в адрес ООО «Брав-ТР» коммерческое предложение на выполнение работ по испытаниям и измерениям электрооборудования Системы электроснабжения (силовое электрооборудование 0,4кВ). Распределительная сеть. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение, указав, что стоимость выполнения необходимых работ, а именно - измерение и испытания сопротивлений изоляции кабельных проводников по системе РОЦ и дополнительно проложенных кабельных проводников по системе ЭМ-1.3. (указанных в приложении к письму  от 01.03.2018 № 22/01) составляет 230 000 рублей. 

Впоследствии  стороны подписали дополнительное соглашение от 12.03.2018 №2 к договору от 19.02.2018 №07-У/2018  подряда в  связи с увеличением объемов работ по испытаниям и измерениям электрооборудования Системы электроснабжения (силовое электрооборудование 0,4кВ). Распределительная сеть. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Строительной площадки - Сектор «С» стадиона на 45 000 зрительских мест,  расположенной в Волгограде, проспект им. В.И. Ленина, 76, и увеличением цены договора на сумму 230 000 рублей.  Стороны договорились, что общая стоимость работ по договору составляет 1 246 949  рублей 15 копеек (пункт 4.1 договора).

Кроме того, в соответствии с актами  сдачи-приемки выполненных работ  от 19.03.2018 №1 и от 23.03.2018 №2,  подписанными сторонами,  подрядчик  выполнил работы по договору на общую сумму 1 246 949  рублей 15 копеек (акту  сдачи-приемки выполненных работ  от 19.03.2018 №1 на сумму 1 016 949 рублей 15 копеек и по акту  сдачи-приемки выполненных работ  от 23.03.2018 №2  на сумму 230 000 рублей).

Акты  сдачи-приемки выполненных работ  от 19.03.2018 №1 и от 23.03.2018 №2 направлялись подрядчиком заказчику вместе с  актами приема-передачи  технических отчетов  по измерениям  и испытаниям  электрооборудования. 

Согласно позиции ответчика итоговый объем, порядок выполнения и оплаты работ по договору подряда от 19.02.2018 № 07-У/2018 отражены в дополнительном соглашении от 12.03.2018 № 2  к договору. При этом итоговая стоимость полного объема работ по договору являлась твердой и согласно пункту 4.1 договора в редакции пункта 2.1 дополнительного соглашения от 12.03.2018 №2 к договору составила 1 246 949 рублей 15 копеек.  

Оплата работ по договору подряда от 19.02.2018 № 07-У/2018 (в его первоначальной редакции) на основании акта приема-передачи технического отчета по измерениям и испытаниям электрооборудования от 19.03.2018 и соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ от 19.03.2018 №1, счета на оплату от 19.03.2018 №3 осуществлена ООО «Брав-ТР» в полном объеме платежными поручениями  № 290 от 20.02.2018,  № 534 от 20.03.2018, № 617 от 29.03.2018. 

Оплата работ по договору с учетом дополнительного соглашения от 12.03.2018 №2 к договору на основании акта приема-передачи технического отчета по измерениям и испытаниям электрооборудования от 23.03.2018 и соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ от 23.03,2018 №2, счета на оплату от 23.03.2018 №11  осуществлена ООО «Брав-TP» в полном объеме платежным поручением № 4282 от 14.12.2018 на сумму 230 000 рублей. 

Договор от 19.02.2018 №07-У/2018  подряда прекратил свое действие  в связи с надлежащим исполнением.

В материалах  дела отсутствую  какие-либо доказательства, подтверждающих согласование проведения и оплаты  каких-либо  работ на сумму 1 352 351 рублей. 

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Исполнение обязанностей  подрядчиком  до вступления в силу договора без согласования такого исполнения с контрагентом является риском самого подрядчика,  за который не может нести ответственность контрагент.

В представленных ООО «Энерголинк-Волгоград» акте  о приемке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ от 14.08.2020 № 1 период выполнения работ указан с  19.03.2018 по 14.08.2020. При этом никаких доказательств практического осуществления работ в указанный период, а также передачи в адрес ООО «Брав-TP» технической документации, предусмотренной договором, ООО «Энерголинк-Волгоград» не представило. Дополнительного соглашения  о продлении  сроков  по договору   сторонами  не заключалось. 

Пунктом 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации предписано, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Согласно пункту 3 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам (пункт 4 и 5 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, обязанность ответчика по оплате дополнительных работ возникает, если будет установлено, что соблюдены условия, установленные пунктом 5 статьи 709 и пунктами 3 и 4 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Бремя доказывания правомерности отнесения работ к категории дополнительных, совершения действий по согласованию необходимости их выполнения, либо их срочный и неотложный характер, факт их выполнения и потребительская ценность для заказчика возлагается на подрядчика.

Поскольку истцом не представлено доказательства того, что выполнение дополнительных работ обусловливалось необходимостью немедленных действий в интересах заказчика, при этом увеличение объема и стоимости работ с заказчиком в установленном договором порядке не согласовано, суд не находит оснований  для  удовлетворения  исковых требований. 

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суд решает вопросы о распределении судебных расходов. 

Частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другой стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд

Р Е Ш И Л :

в удовлетворении исковых требований  отказать.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области. 

СУДЬЯ                                                                                                                Е.В. Пономарева