26110177_8803920 

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-3358/2021

15 ноября 2022 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи  Яшуковой Н.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района  (ОГРН 1078610000204, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 24.01.2007, адрес: 628100,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-он Октябрьский, пгт. Октябрьское,  ул. Калинина) к обществу с ограниченной ответственностью «Югратехсервис»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 16.02.2012, адрес: 628183,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>)  об обязании исполнить гарантийные обязательства,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора  администрация муниципального образования городского поселения Талинка, общество  с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Талинское Благоустройство»,  Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры, Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры,  

с участием представителей сторон: от истца – ФИО2 по доверенности от 29.12.2021 № 16/21 (онлайн), от ответчика – ФИО3 по доверенности от 01.04.2022, от третьих лиц – не явились, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства  администрации Октябрьского района удовлетворить.  

1. Обязать ответчика безвозмездно устранить выявленные в период гарантийной  эксплуатации недостатки (дефекты), допущенные им при строительстве жилого дома по  адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский  район, пгт. Талинка, ул. Молодежная, д. 20, с выполнением следующего перечня ремонтных  работ:  

1). Демонтаж облицовки лоджий снаружи в количестве 423,90м2 (состав: штукатурка  10мм., пенополистирол 100 мм.).  

2). Монтаж облицовки лоджий снаружи в количестве 423,90м2 (состав: Пароизоляция  пленка п-эт.марки «Т» ГОСТ 10354-63; Экструдированный пенопластирол плот.35-45кг/м3  с перехлестом швов; Декоративная штукатурка ЦМП раствором М150 по стекло-сетке R131  толщ. 10 мм; Окраска водно-дисперсной краской).  

3). Утепление чердачного перекрытия в количестве 90м2 (состав: Пароизоляция пленка  п-э марки «Т» ГОСТ 10354-63; Экстудированный пенополистирол плот.35-45 кг/м3 50х50  мм.; Разделитель-крафт-бумага; Раствор ЦМП М150 толщ.40мм с армированием сеткой  4Вр1 100х100 ГОСТ 8478-81).  

4). Утепление низа плиты лоджий первого этажа в количестве 90м2 (состав:  Пароизоляция пленка п-эт. марки «Т» ГОСТ 10354-63; Экструдированный пеноплатирол  плот.35-45 кг/м3 2х60 с перехлестом швов; Декоративная штукатурка ЦМП раствором М150  по стекло-сетке R131 толщ.10мм.; Окраска водно-дисперсной краской).  

2. Работы выполнить на основании проектно-сметной документации, разработанной  ответчиком с привлечением специализированной организации, имеющей право на данный  вид деятельности.  

3. Установить срок, в течение которого должны быть выполнены работы, в виде 5  (пяти) месяцев с момента вступления в силу решения суда по настоящему делу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Югратехсервис» в пользу  Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации  Октябрьского района расходы по проведению экспертизы в размере 310 000 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Югратехсервис»  в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6 000 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа  и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что  в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа  не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного  судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок  со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом  с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья Н.Ю. Яшукова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 09.12.2021 2:05:50

Кому выдана Яшукова Наталья Юрьевна