АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-2514/2018

25 июля 2018 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 25 июля 2018 года.

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гаврилюк М.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чиркиной О.П. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по искуГосударственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им.Н.И.Балабанова»

к Обществу с ограниченной ответственностью «РС ГРУПП»

о взыскании 980983,63 руб.

УСТАНОВИЛ:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «РС ГРУПП о взыскании, с учетом заявления об уменьшении суммы иска в порядке ст.49 АПК РФ, пени в размере 980983,63 руб., мотивируя свои требования тем, что ответчик ненадлежащее выполнил свои обязательства по контракту.

Ответчик, письменный отзыв суду не предоставил, явку уполномоченного представителя не обеспечил, о времени и месте проведения судебного заседания извещен путем направления судом копии определения по месту регистрации. В суд возвратились почтовые отправления с отметкой органа почтовой связи «за истечением срока хранения».

В соответствии с ч.3 ст.54 ГК РФ юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Информация о движении дела и определения суда опубликованы на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым в сети Интернет http://www.crimea.arbitr.ru и сайте http://kad.arbitr.ru.

В соответствии со статьёй 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Руководствуясь ст. 156 АПК РФ, арбитражный суд пришел к выводу, что неявка представителей лиц участвующих в деле, не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований ввиду следующего:

 Судом установлено, что  между Обществом с ограниченной ответственностью «РС ГРУПП» (подрядчик) и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1» (заказчик) заключен контракт № 2015.353265 от 21.09.2015г.

В соответствии с условиями данного контракта подрядчик обязан был выполнить работы по текущему ремонту котельной ГБУЗРК КРКПБ №1 по адресу: 

<

...>.

Дополнительным соглашением № 2 от 07.12.2015г. к контракту установлена стоимость работ по текущему ремонту котельной - 4 602 009,16 рублей.

Согласно пункта 4.1. контракта срок выполнения работ, являющихся его предметом - 14 рабочих дней с момента заключения контракта ( то есть с 21.09.2015г. по 09.10.2015г. включительно).

Пункт 5.1.1 устанавливает обязанность Подрядчика выполнить ремонтные работы, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и сметной документацией (Приложение 1 к контракту).

В соответствии с пунктом 5.1.6. Подрядчик в течение следующего рабочего дня после окончания выполнения работ передать Заказчику акты выполненных работ (КС-2), со всеми приложениями (КС-3, счет на оплату, счет-фактура).

Частично контракт был исполнен подрядчиком 23.09.2015г. и сторонами подписан акт о приемке части выполненных работ на сумму 2 887 451,74 руб. и 28.09.2015г., ГБУЗРК “КРКПБ №1» платежным поручением №154229 произвело оплату этих работ в сумме 2887 452,00 руб.

Работы по текущему ремонту котельной на сумму 1 714 557,16 рублей Обществом с ограниченной ответственностью «РС ГРУПП» не были выполнены в установленный контрактом срок.

Так, часть этих работ на сумму 800 474,24 рублей сдана Заказчику по акту выполненных работ от 23.11.2016г., еще одна часть работ на сумму 276 649,82 руб. сдана Заказчику по акту выполненных работ 28.12.2016г. В отношении оставшейся части работ на сумму 637 433,10 рублей 30.12.2016г. было заключено соглашение о расторжении контракта на эту сумму.

Таким образом, ООО «РС ГРУПП» выполнил часть своих обязательств с нарушением установленного контрактом срока. Период нарушения составил с 10.10.2015г. по 23.11.2016г. - 410 дня.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается..

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Согласно пункта 7.1.1 контракта в случае нарушения подрядчиком сроков исполнения обязательств контракта, заказчик вправе требовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Порядок расчета пени предусмотрен разделом 7 контракта №2015.353265 от 21.09.2015г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" и определяется по формуле:

П — (ц — в)х С.

В связи с нарушением сроков исполнения контрактных обязательств ООО «РС ГРУПП» начислена пеня.

Пеня рассчитана в соответствии с условиями контракта - разделом 7 контракта №2015.353265 от 21.09.2015г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком.

где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок «Подрядчиком» обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том- числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле С = С1(БхДП

где Сц/з - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным, банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100 %

где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком. Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным. 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном. 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком. Российской Федерации на дату уплаты пени.

Пеня за просрочку выполнения работ на сумму 800 474,24 руб. и 276 649,82 руб. за период с 10.10.2015г. по 23.11.2016г. (410 дней просрочки) по ключевой ставке равной 7,25% составляет 960 525,38 рублей.

К = ДП/ДКх\(){) %

ДГ1 — количество дней просрочки — 410 дней ДК - срок исполнения обязательства — 14 дней К = (410 : 14) х 100% = 2928,57 - 0,03 - коэффициентС = С ЦБ х ДП

С = (0,0725 х 0,03) х 410 = 0,89175 — размер ставки Я = (Д-Л)хСП —размер пени

Ц — цена контракта - 4 602 009,16 руб.

В — стоимость фактически исполненного обязательства — 2 887 452,00 руб.

С — размер ставки - 0,89175

П = (4 602 009,16 - 2 887 452,00 - 637 433,10 ) х 0,89175 = 960 525,38 руб.

Пеня за просрочку выполнения работ на сумму 276 649,82 руб. за период с 24.11.2016г. по 28.12.2016г. (34 дней просрочки) по ключевой ставке равной 7,25% составляет 20 458,25 рублей.к = дп/дк х I оо %

ДП -... количество дней просрочки 34 дней

ДК - срок исполнения обязательства — 14 дней К = (34 : 14) х 100% = 242,86 - 0,03 - коэффициентС = Сць х ДП

С = (0,0725 х 0,03) х 34 = 0,07395 — размер ставки П = {Ц - В)хСП — размер пени

Ц — цена контракта - 4 602 009,16 руб.

В — стоимость фактически исполненного обязательства — 2 887 452,00 и 800 474,24 руб. С — размер ставки - 0,07395

П = (4 602 009,16 - 2 887 452,00 — 800 474,24 - 637 433,10 ) х 0,07395 = 20 458,25 руб.

На основании Указа Главы Республики Крым от 09.10.2017г. №426-У «О присвоении Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1» почетного имени Н.И.Балабана» и Приказа Министерства здравоохранения Республики Крым №2162 от 18.10.2017г., произведено  изменение наименования истца с Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1» на Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1 им.Н.И.Балабана» .

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с пп.1) ч.1   ст.333.40  Налогового Кодекса РФ  уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено настоящей главой.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования   Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И.Балабанова» к Обществу с ограниченной ответственностью «РС ГРУПП»о взыскании 980983,63 руб.удовлетворить.

Взыскать с   Обществу с ограниченной ответственностью «РС ГРУПП»в пользу      Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И.Балабанова» пеню в размере 980983,63 руб.руб.,  а также расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 22620,00 руб.

Возвратить Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И.Балабанова» из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по платежному поручению №840335 от 22.12.2017 г. в размере 3629,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 4) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.                                                                     

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                            М.П. Гаврилюк