Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-40413/18-105-201

31 августа 2018 года

город Москва

Резолютивная часть решения объявлена 14 августа  2018 года.

Решение в полном объеме изготовлено 31 августа  2018 года.

Арбитражный суд в составе судьи Никоновой О.И.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Алексеевой Ю.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) 

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ СЛАВ СТРОЙ" (127051, 

<

...>, ПОМЕЩЕНИЕ VII КОМ 16, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата регистрации 22.01.2007)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТПРОЕКТ" (123368, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата регистрации 16.04.2013)

О взыскании задолженности по договору №09/07/14 СП от 09.07.14 в размере 26 386 283 руб. 41 коп.,  по договору №17-БСС/14 от 10.12.14 в размере 11 875 642 руб. 47 коп., по договору №2-БСС/14 от 03.02.14 в размере 37 151 894 руб. 46 коп., по договору №11-БСС/14 от 30.10.14 в размере 3 289 945 руб. 82 коп., по договору №13-БСС от 06.11.14  в   размере 3 707 855 руб. 48 коп.

при участии представителей:

от истца – ФИО1 по дов. от 15.01.2018г. 

от ответчика-  не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ СЛАВ СТРОЙ"  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТПРОЕКТ"  (далее – ответчик) о  взыскании задолженности по договору №09/07/14 СП от 09.07.14 в размере 26 386 283 руб. 41 коп.,  по договору №17-БСС/14 от 10.12.14 в размере 11 875 642 руб. 47 коп., по договору №2-БСС/14 от 03.02.14 в размере 37 151 894 руб. 46 коп., по договору №11-БСС/14 от 30.10.14 в размере 3 289 945 руб. 82 коп., по договору №13-БСС от 06.11.14  в   размере 3 707 855 руб. 48 коп.

Определением    Арбитражного суда г. Москвы от 12.10.2017г.   была признана недействительной сделка Акта взаимозачета № 33 от 31.01.2016г. на сумму 82 411 621,64  руб. между ООО «Бел Слав Строй» и ООО «МонолитПроект» и применении последствий недействительности указанной сделки.

Исковые требования мотивированы статьями 309, 310, 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил. В материалах дела имеются документы, подтверждающие надлежащее извещение ответчика о времени и месте судебного разбирательства. При таких обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие представителя ответчика в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ.

Согласно ст. 54 ГК РФ Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Согласно ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Согласно действующему гражданскому законодательству (ст. ст. 9, 10 ГК РФ) лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий уклонения от состязательности (непредставление доказательств, неявка в судебное заседание), поскольку это может повлечь принятие решения только по доказательствам, представленным другими лицами.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела и оценив в совокупности представленные доказательства, пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ СЛАВ СТРОЙ" и  ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТПРОЕКТ"  заключен договора подряда  №09/07/14 СП от 09.07.14 (Рассказовка школа).

В соответствии с условиями договора п. 3.4. Оплата фактически выполненным Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в течении 10 банковских дней с даты подписания Сторонами  актов  приемки выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета и счета-фактуры субподрядчика оформленной в установленном порядке исполнительной документации, актов на скрытые работы (и пр.акты), паспортов и сертификатов на материалы

Выполнение работ по договору подтверждается  подписанные обеими сторонами КС-3 от 31.10.2014 на сумму 47 913 781,06 руб. КС-3 от 30.11.2014 на сумму 79 337 827,19 руб. КС-3 от 31.12.2014г. на сумму 31 370 589,10 руб.

Накладная №236 на отпуск материалов на сторону от 30.09.2014 ООО «БСС» -основание Договор №09/07/14 СП от 09.07.14 (Рассказовка школа) ООО «МонолитПроект» - отпущено 167 наименований на сумму 40 677 730,93 руб.

Накладная №223 на отпуск материалов на сторону от 31.08.2014 ООО «БСС» -основание   Договор   №09/07/14   СП   от   09.07.14      (Рассказовка   школа)   -   ООО «МонолитПроект» - отпущено 140 наименований на сумму 22 494 814,22 руб.

Накладная №198 на отпуск материалов на сторону от 31.07.2014 ООО «БСС»  - основание   Договор   №09/07/14   СП   от   09.07.14    ООО «МонолитПроект» - отпущено 3 наименований на сумму 1 050 325,38 руб.

Накладная №252 на отпуск материалов на сторону от 30.09.2014 ООО «БСС» -основание Договор №09/07/14 СП от 09.07.14 (Рассказовка школа) - ООО «МонолитПроект»- отпущено 1 наименование на сумму 58 076,05руб.

Задолженность по указанному договору составляет 26 386 283 руб. 41 коп.

Между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ СЛАВ СТРОЙ" и  ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТПРОЕКТ"  заключен договора подряда   №17-БСС/14от 10.12.14 (ФИО2)

Согласно условиям договора п. 3.1 Общая стоимость работ включает все расходы Субподрядчика, необходимые для выполнения Работ включая затерты.

П. 3.2 Стоимость выполненных работ, указанная в Приложении№1к договору является твердой и действует в течении всего срока.

В соответствии с условиями договора п. 3.4. Оплата фактически выполненных Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в течении 10 банковских дней с даты подписания Сторонами актов  приемки выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета и счета-фактуры субподрядчика,  оформленной в установленном порядке исполнительной документации, актов на  скрытые работы  (и пр.акты), паспортов и сертификатов на материалы. (КС-3 от 30.04.2015, КС-3 от 30.04.2015, КС-2 на сумму 8 548 483,34руб., КС-2 на сумму 5 598 212,65руб.

Задолженность по указанному договору составляет 11 875 642 руб. 47 коп. 

Между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ СЛАВ СТРОЙ" и  ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТПРОЕКТ"  заключен договора подряда   №2-БСС/14 от 03.02.14 (Расказовка 5 кв).

Согласно условиям договора п. 3.1 Общая стоимость работ включает все расходы Субподрядчика, необходимые для выполнения Работ включая затраты.

П. 3.2 Стоимость выполненных работ, указанная в Приложении№1к договору является твердой и действует в течении всего срока.

В соответствии с условиями договора п. 3.4. Оплата фактически выполненных, Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в течении 10 банковских дней с даты подписания  Сторонами актов  приемки выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета и счета-фактуры субподрядчика,  оформленной в установленном порядке исполнительной документации, актов на  скрытые работы  (и пр.акты), паспортов и сертификатов на материалы.

Согласно имеющимся у Истца Накладным на отпуск материалов на сторону, Всего ООО «БСС» передало ответчику товаров на 121 397 823,77руб.

Между сторонами СЛОЖИЛИСЬ отношения по договору поставки.

В силу части 1 статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Актам КС-3 (КС-2) подтверждается выполнение ответчиком работ на сумму 187 958 118 руб. 99 коп. 

Согласно информации о движении денежных сред по счету истца, всего в счет оплаты по договору №2-БСС/14 от 03.02.14 истцом перечислено ответчику 101 376 443, 91 руб.

Задолженность по указанному договору составляет 37 151 894 руб. 46 коп. 

Между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ СЛАВ СТРОЙ" и  ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТПРОЕКТ"  заключен договора подряда   №11-БСС\14 от 30.10.14 (школа).

Согласно условиям договора п. 3.1 Общая стоимость работ включает все расходы, Субподрядчика, необходимые для выполнения Работ включая затраты.

П. 3.2 Стоимость выполненных работ, указанная в Приложении№1к договору является твердой и действует в течении всего срока.

В соответствии с условиями договора п. 3.4. Оплата фактически выполненных, Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в течении 10 банковских дней с даты подписания  Сторонами актов  приемки выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета и счета-фактуры субподрядчика,  оформленной в установленном порядке исполнительной документации, актов на  скрытые работы  (и пр.акты), паспортов и сертификатов на материалы.

Согласно информации о движении денежных сред по счету истца, всего в счет оплаты по договору  №11-БСС\14 от 30.10.14 Истцом перечислено ответчику 65 098 924,79 рублей.

Задолженность по указанному договору составляет 3 289 945 руб. 82 коп. 

Между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ СЛАВ СТРОЙ" и  ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТПРОЕКТ"  заключен договора подряда  №13-БСС от 06.11.14г. 

Согласно условиям договора п. 3.1 Общая стоимость работ включает все расходы, Субподрядчика, необходимые для выполнения Работ включая затраты.

П. 3.2 Стоимость выполненных работ, указанная в Приложении№1к договору является твердой и действует в течении всего срока.

В соответствии с условиями договора п. 3.4. Оплата фактически выполненных, Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в течении 10 банковских дней с даты подписания  Сторонами актов  приемки выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета и счета-фактуры субподрядчика,  оформленной в установленном порядке исполнительной документации, актов на  скрытые работы  (и пр.акты), паспортов и сертификатов на материалы.

Согласно информации о движении денежных сред по счету истца, всего в счет оплаты по договору  №№13-БСС от 06.11.14г.  Истцом перечислено ответчику 52 739 287, 50 рублей. 

Задолженность по указанному договору составляет 3 707 855 руб. 48 коп. 

Ответчиком оплата за выполненные истцом работы по договорам не произведена, общая сумма задолженности составила 82 411 621 руб. 64 коп. 

Направленная 27.02.2018г.  в адрес ответчика претензия с требованием оплатить задолженность, была оставлена без удовлетворения.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку ответчик не представил доказательств оплаты в полном объеме выполненных истцом работ, требование истца о взыскании 82 411 621 руб. 64 коп. долга в соответствии со ст.ст. 309, 310, 702, 711  ГК РФ подлежит удовлетворению.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика.

На основании изложенного, ст.ст. 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 64, 65, 71, 75, 110, 167-171, 176, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТПРОЕКТ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ СЛАВ СТРОЙ" задолженность в размере 82 411 621 руб. 64 коп. (Восемьдесят два миллиона четыреста одиннадцать тысяч шестьсот двадцать один рубль шестьдесят четыре копейки).

Взыскать с  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТПРОЕКТ в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб. (Двести тысяч рублей).

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.И. Никонова