﻿АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-10328/2021

г. Тюмень

16 ноября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2021 года. Полный текст решения изготовлен 16 ноября 2021 года.

 

Судья арбитражного суда Тюменской области Лоскутов В. В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда Тюменской области по адресу: город Тюмень улица Ленина дом 74 кабинет 407 (зал № 5), дело по первоначальному иску

Муниципального казенного учреждения «Имущественная казна города Тобольска»

К обществу с ограниченной ответственностью «Компания СибЭнергоРесурс»

О расторжении муниципального контракта и взыскании неустойки в размере 12 642, 20 рублей

И по встречному иску

Общества с ограниченной ответственностью «Компания СибЭнергоРесурс»

К муниципальному казенному учреждению «Имущественная казна города Тобольска»

О взыскании задолженности и неустойки в размере 391 661, 97 рублей

Лицо, ведущее протокол судебного заседания, помощник судья А.С. Ермолаева.

при участии в заседании от сторон: не явились. 

 

установил:

Заявлен первоначальный иск о расторжении муниципального контракта и взыскании неустойки (том 1 л.д. 8-11), также МКУ «Имущественная казна города Тобольска» заявило об уточнении исковых требований (том 1 л.д. 131-133).

ООО «Компания СибЭнергоРесурс» предъявило встречный иск о взыскании с истца задолженности в размере 374 584, 55 рублей и неустойки в размере 17 077, 42 рублей (том 2 л.д. 4-13, 16-20, 70-79), который определением Суда от 21 октября 2021 года принят к производству (том 2 л.д. 3). 

Впоследствии ООО «Компания СибЭнергоРесурс» уточнило встречные исковые требования (том 2 л.д. 150-151), также представило отзыв на первоначальное исковое заявление (том 3 л.д. 110-119) и дополнительный отзыв на исковое заявление. 

От МКУ «Имущественная казна города Тобольска» поступили отзыв на встречное исковое заявление (том 3 л.д. 58-64), дополнение к первоначальному иску (том 3 л.д. 1-8) и письменные объяснения (том 3 л.д. 51-54) и заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом в соответствии со статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив и исследовав материалы дела, Суд находит, что первоначальные и встречные исковые требования подлежат частичному удовлетворению, по следующим основаниям.

08 мая 2020 года МКУ «Имущественная казна города Тобольска» (заказчик) и ООО «Компания СибЭнергоРесурс» (Подрядчик) заключили муниципальный контракт № 0167300000820000068_213262 на выполнение работ по сносу аварийных домов, в соответствии с которым  ООО «Компания СибЭнергоРесурс» приняло на себя обязательства выполнить работы по сносу аварийных домов в городе Тобольске по адресу: поселок Сумкино, улица Мира 7, в течении трех месяцев (то есть до 09 августа 2020 года) согласно техническому заданию (приложение № 1 к контракту), локальным сметным расчетам (приложение № 3) и протоколу согласования контрактной цены (приложение № 4), а МКУ «Имущественная казна города Тобольска» обязалось принять и оплатить эти работы в сумме 1 100 733, 78 рублей (том 1 л.д. 15-27). 

13 июля 2020 года стороны заключили дополнительное соглашение к этому контракту (том 1 л.д. 28-29, том 2 л.д. 21-27, 80-86).

Как указано в техническом задании, в обязанности ООО «Компания СибЭнергоРесурс» входила утилизация строительного и бытового мусора на городском полигоне ТБО.  

Пунктом 1.7 контракта установлено, что строительный контроль в марках предмета настоящего контракта осуществляет МКУ «Тобольскстройзаказчик» («Учреждение»).

Статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

10 августа 2020 года стороны подписали акт приемки выполненных работ, в котором указали на то, что на территории на убраны остатки фундаментов, кирпичей, асфальтовый тротуар, бордюрный камень восстановлены (том 1 л.д. 103-104, 145-147, том 2 л.д. 28-30, 87-89, том 3 л.д. 15-17, 72-74, 122-124). С письмом № 412/1 от 11 августа 2020 года, ООО «Компания СибЭнергоРесурс» направил МКУ «Имущественная казна города Тобольска» фотоотчет об устранении замечаний (том 1 л.д. 105-109, том 2 л.д. 31, 90, том 3 л.д. 41-50, 102-109).

Впоследствии, с середины августа 2020 года и до середины ноября 2020 года, стороны вели переписку относительно полноты и правильности сдачи-приемки выполненных работ, включая предоставление исполнительной документации, в том числе по поводу того, были ли ООО «Компания СибЭнергоРесурс» выполнены работы по утилизации мусора, оставшегося после сноса аварийного дома, при этом ООО «Компания СибЭнергоРесурс» предоставляло дополнительную документацию (том 1 л.д. 110-112, 148-160, том 2 л.д. 32-50, 91-109, том 3 л.д. 18-28, 67, 75-82, 86, 125-143). 

Разделом 4 муниципального контракта установлен порядок сдачи и приемки работ.

В силу статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Согласно актам о приемке выполненных работ № 1 и № 2 от 18 ноября 2020 года, подписанным представителями всех сторон (том 1 л.д. 41-46, том 3 л.д. 11-14, 68-71), а также акту о приемке выполненных работ № 1 от 16 декабря 2020 года, подписанному только представителем МКУ «Имущественная казна города Тобольска» (том 1 л.д. 40), ООО «Компания СибЭнергоРесурс» выполнены работы на общую сумму 697 179, 92 рублей.

Работы по утилизации отходов на сумму 374 584, 55 рублей, включающие в себя погрузку и перевозку 1 592, 47 тонн мусора, МКУ «Имущественная казна города Тобольска» до настоящего времени не приняты и не оплачены (том 2 л.д. 51-52, 110-111, том 3 л.д. 144).

14 декабря 2020 года стороны заключили дополнительное соглашение к муниципальному контракту, согласовал приложения № 3 и № 4, то есть локальные сметные расчеты и протокол согласования контрактной цены, в новой редакции (том 1 л.д. 30-39). 

Платежными поручениями № 91392 и № 91393 от 24 декабря 2020 года, МКУ «Имущественная казна города Тобольска» перечислило ООО «Компания СибЭнергоРесурс» 697 179, 92 рублей.

В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 6.8 муниципального контракта, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

На основании данного пункта муниципального контракта, за период с 09 августа 2020 года по 14 декабря 2020 года МКУ «Имущественная казна города Тобольска» начислило неустойку в размере 12 642, 20 рублей, согласно представленному расчету (том 1 л.д. 12), которую ООО «Компания СибЭнергоРесурс» в претензионном порядке не оплатило (том 1 л.д. 47-48, 53-55). 

Также в письме № 01-14/1894 от 28 декабря 2020 года МКУ «Имущественная казна города Тобольска» предложило расторгнуть контракт в части исполненных обязательств по соглашению сторон (том 1 л.д. 49-52, том 3 л.д. 29, 87-88).

На основании пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 3.5 муниципального контракта, заказчик производит оплату, на основании выставленного подрядчиком счета на оплату и/или счет-фактуры, подписанных сторонами и не содержащих замечаний, акта выполненных работ и справка стоимости выполненных работ (формы КС-2, КС-3), в течении пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.

Как указано в части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. В силу части 1 статьи 65 Кодекса, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Часть 2 статьи 9 этого же Кодекса устанавливает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В определении об отложении рассмотрения дела от 26 октября 2021 года, Суд предложил ООО «Компания СибЭнергоРесурс» представить доказательства утилизации строительного мусора на полигоне ТБО, в том числе все первичные документы, включая платежные и передаточные, позволяющие установить объем образовавшегося от сноса аварийного жилого дома строительного мусора и его вывоз на полигон ТБО (том 3 л.д. 146).

В качестве доказательств надлежащего выполнения своих обязательств по вывозу строительного мусора, ООО «Компания СибЭнергоРесурс» представило договор № 39 на услугу по сбору, вывозу и размещению не твердых коммунальных отходов (ТКО), крупногабаритного мусора (КГМ) от 01 июля 2020 года, заключенный между ИП Чеканцевой Татьяной Валерьевной и ООО «Компания СибЭнергоРесурс» (том 2 л.д. 53-59, 112-115, том 3 л.д. 30-36, 89-95), справки ООО «Тюменское экологическое объединение», подтверждающие принятие от ИП Чеканцевой Т.В. отходов, не относящихся к твердым коммунальным (том 2 л.д. 60-61, 116-117, том 3 л.д. 83-85) и договор № 04/2020 ТБ оказания услуг по захоронению отходов, не относящихся к твердым коммунальным от 01 января 2020 года, заключенный между ООО «Тюменское экологическое объединение» и ИП Чеканцевой Т. В. (том 2 л.д. 62-64, 118-119, том 3 л.д. 38-40, 97-99). 

Согласно справке № 40 от 04 августа 2020 года, выданной ИП Чеканцеовй Т.В., за период с 01 июля 2020 года по 31 июля 2020 года на полигон ТБО города Тобольска от ООО «Компания СибЭнергоРесурс» было вывезено с адреса: город Тобольск, улица Мира, дом 7 и принято на полигоне 1 592, 47 тонн строительного мусора (том 3 л.д. 37, 96, 100-101).

Между тем, согласно справке ООО «Тюменское экологическое объединение», для размещения на полигоне ТБО города Тобольска в июле 2020 года от ИП Чеканцевой Т.В. было принято только 119, 73 тонн отходов, не относящихся к твердым коммунальным.

Если руководствоваться расценками, указанными в договоре № 39 на услугу по сбору, вывозу и размещению не твердых коммунальных отходов (ТКО), крупногабаритного мусора (КГМ) от 01 июля 2020 года, то за вывоз 1 592, 47 тонн строительного мусора ООО «Компания СибЭнергоРесурс» должна была заплатить 5 573 645 рублей (1 592, 47 тонн х 3 500 рублей), при цене договора, заключенного с МКУ «Имущественная казна города Тобольска», в размере 1 100 733, 78 рублей. Кроме того, ООО «Компания СибЭнергоРесурс» не предоставило платежных и передаточных документов, позволяющих установить объем образовавшегося от сноса аварийного жилого дома строительного мусора и его вывоз на полигон ТБО.

Таким образом, предоставленные ООО «Компания СибЭнергоРесурс» документы являются противоречивыми и не доказывают, что ООО «Компания СибЭнергоРесурс» действительно вывезло 1 592, 47 тонн строительного мусора на полигон ТБО города Тобольска.

Кроме того, те же самые документы в качестве доказательства вывоза строительного мусора с другого объекта,  ООО «Компания СибЭнергоРесурс» предоставило при рассмотрении дела № А70-10324/2021.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив в соответствии с этой нормой все представленные сторонами доказательства, Суд считает установленным, что ООО «Компания СибЭнергоРесурс» не выполнило работы по утилизации отходов на сумму 374 584, 55 рублей, включающие в себя погрузку и перевозку 1 592, 47 тонн строительного мусора.

Остальные работы на сумму 697 179, 92 рублей были выполнены и сданы ООО «Компания СибЭнергоРесурс» в соответствии с разделом 4 муниципального контракта, только 18 ноября 2020 года, таким образом, МКУ «Имущественная казна города Тобольска» должно было произвести оплату работ не позднее 10 декабря 2020 года.

С учетом этих выводов Суда, подлежат удовлетворению первоначальное исковое заявление в части взыскания пени, начисленных за период с 10 августа 2020 года по 18 ноября 2020 года, то есть за 101 день, в размере 9 975, 48 рублей.

Пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором. Согласно пункту 1 статьи 408 этого же Кодекса, надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Как указано в пункте 11.2 муниципального контракта, он действует по 31 августа 2020 года, в части неисполнения обязательств, до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

Поскольку обязательства ООО «Компания СибЭнергоРесурс» по контракту прекратились в связи с выполнением им работ, установленных этим контрактом, не подлежат удовлетворению требования о расторжении муниципального контракта. 

Согласно пункту 6.4 контракта, в случаях просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

В связи с несвоевременной оплатой МКУ «Имущественная казна города Тобольска», подлежат удовлетворению встречные исковые требования в части взыскания пени в размере 1 133, 39 рублей, начисленных за период с 11 декабря 2020 года по 24 декабря 2021 года.

При подаче первоначального иска МКУ «Имущественная казна города Тобольска» оплатило 8 000 рублей (том 1 л.д. 14, 92).

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 333.21 и 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина в размере 2 000 рублей взыскивается с ООО «Компания СибЭнергоРесурс», исходя из того, что Судом удовлетворена только часть имущественных требований. 

При придаче встречного иска ООО «Компания СибЭнергоРесурс» оплатило 10 833 рубля (том 2 л.д. 142). В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина взыскивается с МКУ «Имущественная казна города Тобольска» пропорционально удовлетворенной части заявленных требований, что составляет 0, 3 % от заявленных. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 181-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд 

 

Р     Е     Ш     И     Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания СибЭнергоРесурс» в пользу муниципального казенного учреждения «Имущественная казна города Тобольска» 11 975 рублей 48 копеек, в том числе пени в размере 9 975 рублей 48 копеек и государственную пошлину в размере 2 000 рублей. 

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

 

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Имущественная казна города Тобольска» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Компания СибЭнергоРесурс» 1 165 рублей 89 копеек, в том числе пени в размере 1 133 рубля 39 копеек и государственную пошлину в размере 32 рубля 50 копеек. 

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания СибЭнергоРесурс» в пользу муниципального казенного учреждения «Имущественная казна города Тобольска» 10 809 рублей 59 копеек.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через арбитражный суд Тюменской области.

 

 

 Судья

 

Лоскутов В.В.