АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-119559/24-19-876

г. Москва

11 февраля 2025 г.

Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания В.П. Ротарь рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЭЛКО-2000" (ИНН: 7729117803 ОГРН: 1027739386938)  

к ответчику: АО "ФОДД" (ИНН: 7729355935 ОГРН: 1027700259256) 

о взыскании 237 437 242 руб. 33 коп. задолженности за выполненные работы по договору от 15.08.2022 г., 157 338 765 руб. 60 коп. задолженности за переданные и принятые материалы по договору от 15.08.2022 г., 1 152 277 руб. 39 коп. неустойки за просрочку оплаты стоимости выполненных работ по акту КС-2 № 1 от 31.05.2023 г. за период с 29.06.2023 г. по 19.07.2023 г., 4 204 118 руб. 72 коп. неустойки за просрочку оплаты стоимости выполненных работ по акту КС-2 № 3 от 31.07.2023 г. за период с 29.08.2023 г. по 28.05.2024г., 19 539 623 руб. 71 коп. неустойки за просрочку оплаты стоимости выполненных работ по акту о приемке выполненных работ № 4 от 25.11.2023 г. за период с 14.01.2024 г. по 28.05.2024 г., 15 733 876 руб. 56 коп. неустойки за просрочку оплаты переданных материалов за период с 14.01.2024 г. по 28.05.2024г., 12 623 048 руб. 41 коп. неустойки за просрочку перечисления четырех авансовых платежей по договору от 15.08.2022 г. № 15.08/22-ВЭЛ.  

по встречному иску АО "ФОДД" (ИНН: 7729355935 ОГРН: 1027700259256) 

к ответчику ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЭЛКО-2000" (ИНН: 7729117803 ОГРН: 1027739386938)  

 о взыскании 258.571.175 руб. 20 коп. неосновательного обогащения по договору от 15.08.2022 г. № 15.08/22-ВЭЛ, 77.952.309 руб. 34 коп. неустойку за нарушение сроков окончания работ за период с 01.09.2023 г. по 14.12.2023 г., 32.321.396 руб. 90 коп. неустойку за просрочку возврата авансового платежа за период с 24.01.2024 г. по 27.05.2024 г. с последующим начислением до даты фактического исполнения обязательства  

при участии: 

от истца: Сазонтов П.И., доверенность, паспорт, диплом; Седых К.В. доверенность,  

паспорт, диплом, 

от ответчика: Суханова С.О., доверенность, паспорт, диплом; Егоров А.И., доверенность, паспорт, диплом, Тимощенкова О.В., доверенность, паспорт, диплом  

РЕШИЛ:

Требования ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЭЛКО-2000" удовлетворить в части.  

Взыскать с АО "ФОДД" (ИНН: 

<

***>) в пользу ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЭЛКО-2000" (ИНН: 

<

***>) 1 152 277 руб. 39 коп. неустойки за просрочку оплаты стоимости выполненных работ по акту КС-2 № 1 от 31.05.2023 г., 1 886 919 руб. 69 коп. неустойки за просрочку оплаты стоимости выполненных работ по акту КС-2 № 3 от 31.07.2023 г., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 38.196 руб. 00 коп.  

В остальной части исковых требований, отказать. Требования АО "ФОДД" по встречному иску, удовлетворить в части. 

Взыскать с ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЭЛКО-2000" (ИНН: 

<

***>) в пользу АО "ФОДД" (ИНН: 

<

***>) 258.571.175 руб. 20 коп. неосновательного обогащения, 25.857.117 руб. 52 коп. неустойки за нарушение сроков окончания работ за период с 01.09.2023 г. по 14.12.2023 г., 32.321.396 руб. 90 коп. неустойку за просрочку возврата авансового платежа за период с 24.01.2024 г. по 27.05.2024 г. с последующим начислением до даты фактического исполнения обязательства, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200.000 руб. 00 коп.  

Произвести взаимозачет требований. 

Взыскать с ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЭЛКО-2000" (ИНН: 

<

***>) в пользу АО "ФОДД" (ИНН: 

<

***>) денежные средства в размере 313.710.492 руб. 54 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 161.804 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд  

Судья: С.В. Подгорная