АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-5519/2022

г. Ярославль

28 августа 2024 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Коншиной А.Д.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Т.Ю., секретарем  судебного заседания Занимонцем В.А.,  

рассмотрев в судебном заседании с применением системы Веб-конференции исковое  заявление Акционерного общества "Управляющая организация многоквартирными домами  Кировского района" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов  Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки 

третье лицо: ООО «Промстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «СК Инжиниринг» (ИНН  

<

***>)  

Руководствуясь статьями 49, 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных  домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 70 дней  после вступления решения суда в законную силу устранить недостатки капитального  ремонта фасада дома № 2 по ул. Максимова в г. Ярославле в соответствии с Заключением  судебной экспертизы № 854/1-3-16.1 от 07.02.2024, выполненным ФБУ Ярославская  лаборатория судебной экспертизы, а именно:  

- устранить трещины первого типа в местах, пронумерованных на схеме: № 57, 65, 66,  72, 113, 114.  

Взыскать с Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных  домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  акционерного общества «Управляющая организация многоквартирными  домами Кировского района» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку  на случай неисполнения решения суда в размере в размере 1 000 руб. за каждый день  неисполнения судебного акта, начиная с 71-ого календарного дня с даты вступления  решения в законную силу до момента фактического исполнения судебного акта.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных  домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  акционерного общества «Управляющая организация многоквартирными  домами Кировского района» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. в  

возмещение расходов по оплате госпошлины, 160 000 руб. в возмещение расходов на оплату  судебной экспертизы.  

Исполнительные листы выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на  бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,   через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья А.Д. Коншина