355/2023-38042(1) 

 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-5293/2023

г. Челябинск

31 мая 2023 года

Дело № А07-20584/2022  

Резолютивная часть постановления объявлена 24 мая 2023 года.  Постановление изготовлено в полном объеме 31 мая 2023 года.  

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Бабиной О.Е., судей Напольской Н.Е., Ширяевой Е.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  

ограниченной ответственностью «Стройблоктехнология» на решение  

Арбитражного суда Республики Башкортостан от 09.03.2023 по делу № А0720584/2022.  

Открытое акционерное общество «Алексеевскдорстрой» (далее – ОАО  «Алексеевскдорстрой», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики  Башкортостан с иском к обществу с ограниченной ответственностью  «Стройблоктехнология» (далее – ООО «СБТ», ответчик, податель  апелляционной жалобы) о взыскании 17 252 392 руб. 15 коп. неустойки.  

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 09.03.2023 по  делу № А07-20584/2022 исковые требования ОАО «Алексеевскдорстрой»  удовлетворены частично, с ООО «СБТ» в пользу истца взыскано 17 192 428  руб. 55 коп. неустойки, расходы по оплате государственной пошлины в размере  108 882 руб.  

ООО «СБТ» с вынесенным судебным актом в части отказа в применении  положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не  согласилось, обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с  апелляционной жалобой, в которой просило решение суда отменить, принять  по делу новый судебный акт, которым уменьшить предъявленную неустойку в  пять раз до 3 438 485 руб. 71 коп.  

В обоснование доводов апелляционной жалобы указало, что по смыслу  части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд  обязан выяснить соответствие взыскиваемой неустойки наступившим у  кредитора негативным последствиям нарушения должником обязательства и  установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и  отрицательными последствиями, наступившими для кредитора, о чем  

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал в своих  Определениях (от 21 декабря 2000 года по жалобе гражданина ФИО2 на нарушение его конституционных прав частью первой статьи  333 ГК Российской Федерации; от 14 октября 2004 года № 293-0; от 20 декабря  2001 года № 292-0; от 21 декабря 2000 года № 277-0). Под соразмерностью  суммы неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается  выплата кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и  соизмерима с нарушенным интересом.  

Ссылаясь на пункт 74 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности  за нарушение обязательств» (далее – Пленум № 7), ответчик указывает, что  кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи  330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия  имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при  сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на  изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или  рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период,  валютных курсов и т.д.). Доказательств действительного наступления для истца  негативных последствий (реальных убытков) не представлено.  

Ответчик отмечает, что неустойка, предусмотренная договором (0,1 % от  неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки), составляет 36,5%  годовых. Применительно к периодам просрочки, за который начислена  неустойка, средневзвешенные процентные ставки по кредитам,  предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям  составляла от 5,94 до 8,17 % годовых (https://cbr.ru/statistics/bank sector/int rat/).  Указанные доказательства представлены в материалы дела.  

По мнению подателя апелляционной жалобы, при сопоставлении  процентных ставок по кредитам с процентным эквивалентом договорной  неустойки в переводе ее в показатель процентной ставки годовых,  усматривается явная несоразмерность заявленной к взысканию неустойки  последствиям неисполнения ответчиком своего денежного обязательства.  Средняя ставка по кредитам за указанный период составит 7,06% годовых, в  пересчете на каждый день: 7,06% / 365 дней = 0,019%. Истец начислил  неустойку исходя из ставки 0,1% за каждый день просрочки (36,5 % годовых),  что в 5 раз превышает среднюю ставку банковского кредита в Российской  Федерации - 7,06% годовых.  

С учетом изложенного и принимая во внимания фактические  обстоятельства по делу, учитывая компенсационную природу неустойки  (штрафа), которая способствует обеспечению баланса интересов  заинтересованных сторон, в отсутствие в материалах дела доказательств  возникновения каких-либо существенных негативных последствий для истца в  связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства (расчет убытков  не представлен), во избежание получения истцом необоснованной выгоды,  ответчик считает, что заявленная неустойка в сумме 17 192 428,55 руб. явно  

несоразмерна последствиям нарушения обязательства.  

Лица, участвующие в деле, уведомлены о дате, времени и месте  судебного разбирательства посредством почтовых отправлений, размещения  информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в  судебное заседание представителей не направили.  

Суд апелляционной инстанции, проверив уведомление указанных лиц о  времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, с учетом положений  части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся  представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о  месте и времени судебного разбирательства.  

В соответствии со статьями 121, 123, 156 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной  инстанции в отсутствие лиц, участвующих в деле.  

От ОАО «Алексеевскдорстрой» в материалы дела поступил отзыв на  апелляционную жалобу от 25.04.2023 (вход. № 24917).  

Судебная коллегия, руководствуясь положениями части 1 статьи 262  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во  внимание наличие доказательств направления копии отзыва в адрес ответчика,  приобщает отзыв на апелляционную жалобу к материалам дела.  

15.05.2023 от истца поступило ходатайство об отложении судебного  разбирательства (вход. № 28964).  

При рассмотрении ходатайства истца об отложении судебного заседания  апелляционная коллегия пришла к следующим выводам.  

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 158 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо,  участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте  судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного  разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание,  арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает  причины неявки уважительными; арбитражный суд может отложить судебное  разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в  судебное заседание его представителя по уважительной причине.  

Указанными положениями предусмотрено право, а не обязанность суда  отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле.  

Согласно части 1 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации ходатайства лиц, участвующих в деле, обосновываются  ими.  

При этом, апелляционная коллегия принимает во внимание те  обстоятельства, что истец надлежащим образом уведомлен о месте и времени  проведения судебного заседания.  

Заявляя ходатайство об отложении судебного разбирательства, истец не  привел доводов по обстоятельствам, ранее не заявленных в суде первой  инстанции, не ссылался на намерение представить новые доказательства.  

В качестве обоснование заявленного ходатайства истец ссылается на  

невозможность явки представителя ОАО «Алексеевскдорстрой», в связи с  проведением 24.05.2023 совета директоров, секретарем которого является  представитель.  

Между тем, приведенные ответчиком обстоятельства (невозможность  обеспечения явки своего представителя в судебное заседание) обязательным  основанием для применения статьи 158 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации не являются.  

При этом невозможность участия в судебном заседании конкретного  представителя юридического лица, не означает невозможность обеспечения  явки в судебное заседание другого представителя.  

Отложение судебного разбирательства при отсутствии в материалах дела  доказательств уважительности причин невозможности обеспечения явки в  судебное заседание представителя юридического лица, а также доказательств,  препятствующих рассмотрению дела, ведет к необоснованному увеличению  срока разрешения спора.  

Явка в судебное заседание представителей истца обязательной не  признана, а при наличии процессуальной заинтересованности в представлении  новых доказательств истец имел реальную возможность направления таких  доказательств одновременно либо вместо ходатайства об отложении судебного  разбирательства.  

Кроме того, заявление лицом, участвующим в деле, ходатайства об  отложении судебного разбирательства в отсутствие уважительных причин,  предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, не возлагает на суд обязанности отложить заседание  при условии представления в материалы дела достаточных доказательств,  позволяющих рассмотреть спор по существу.  

С учетом вышеизложенного, апелляционной коллегией в удовлетворении  ходатайства об отложении судебного заседания отказано.  

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом  апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Как следует из материалов дела, между ООО «СБТ» (генподрядчик) и  ОАО «Алексеевскдорстрой» (субподрядчик) был заключен договор подряда   № 28 от 22.08.2019, по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить  работы по устройству земляного полотна и конструкций дорожной одежды во  исполнение государственного контракта № 5342 от 20.11.2018  (идентификационный код закупки 181027800704802780100100881124211243)  на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего  пользования федерального значения, наименование объекта «Капитальный  ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования  федерального значения по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной  дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск км  1202+000 - км 1210+000, Оренбургская область» , местонахождение объекта  автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа -  Челябинск км 1202+000 - км 1210+000, Оренбургская область; на участке  

ПК80+00- ПК 105+00.в соответствии с условиями настоящего договора и  ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 1), а генподрядчик  обязуется принять работу и оплатить её в установленном настоящим договором  порядке.  

В соответствии с пунктом 2.1 договора стоимость работ, подлежащих  выполнению ориентировочно составляет 191 683 692 рубля с учетом НДС 20%.  Окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным  объемам работ. Расчет стоимости работ осуществляется на основании  ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему  договору).  

Согласно пункту 3.1 договора сроки выполнения работ определяются с  26.08.2019-30.06.2020.  

В соответствии с пунктом 4.2 договора оплата работ по настоящему  договору производится путем перечисления на расчетный счет субподрядчика  денежных средств на основании подписанных сторонами актов выполненных  работ (форма № КС-2), при этом оплата производится в течение 5 дней после  подписания сторонами актов выполненных и принятых работ и справки о  стоимости работ и затрат (формы № КС-2, КС-3).  

В соответствии с пунктом 4.3 договора генподрядчик предоставляет  субподрядчику аванс на приобретение строительных материалов в размере не  менее 30% от стоимости работ в течение 3-х дней с момента выставления счета.  Как указывает истец, им выполнены и переданы работы по актам о приемке  выполненных работ № 1 от 23.10.2019 на сумму 28 701 702 руб., № 2 от  25.10.2019 на сумму 12 751 236 руб., № 3 от 05.11.2019 на сумму 59 963 598  руб., № 4 от 24.04.2020 на сумму 7788533 руб.  

Работы по договору выполнены истцом в полном объеме, указанные  обстоятельства подтверждаются материалами настоящего дела, а также  установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда  Республики Башкортостан от 13.08.2021 по делу № А07-20584/22, в связи с чем  с ответчика в пользу истца взыскана задолженность по оплате работ в сумме  23788533 руб.  

По правилам части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные  вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее  рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным  судом другого дела, в котором участвуют те же лица.  

Установленным указанным выше вступившим в законную силу судебным  актом по делу № А07-5768/2021 обстоятельства имеют преюдициальное  значение для рассмотрения настоящего дела, в рамках которого общество  «Алексеевскдорстрой» просит взыскать с общества «СБТ» 17 252 392 руб. 15  коп. неустойки, начисленной за нарушение сроков оплаты выполненных работ  по договору за период с 29.10.2019 по 18.08.2021. По данным общества  «Алексеевскдорстрой», после принятия указанного решения оплата работ  произведена обществом «СБТ» в период с 29.10.2019 по 23.08.2021. Ссылаясь  на несвоевременное исполнение обществом «СБТ» обязанности по оплате  выполненных работ, общество «Алексеевскдорстрой» направило в его адрес  

претензию с требованием уплаты неустойки, а впоследствии обратилось в суд с  рассматриваемым иском.  

Оценив представленные доказательства в отдельности, относимость,  допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь  доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению,  основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке статьи 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к  выводу об удовлетворении заявленных исковых требований в части.  

Судебная коллегия, исследовав доводы апелляционной жалобы,  установила, что возражения ответчика сводятся исключительно к  необходимости применения положений статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации и снижения размера неустойки до 3 438 485 руб. 71 коп.  

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 27 Постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 12 от 30.06.2020 «О  применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», если  заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной  инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в  заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке  только части судебного акта.  

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных  возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной  инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по  собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной  жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального  права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Поскольку возражений относительно проверки обжалуемого судебного  акта в части ни в судебном заседании, ни до его начала от сторон не поступило,  судом апелляционной инстанции судебный акт проверен в рамках доводов  апелляционной жалобы в части отказа в снижении размера неустойки.  

Повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле  доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной  инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого  судебного акта.  

Факт несвоевременного исполнения ответчиком обязательств по оплате  доказан представленными по делу доказательствами, таким образом, истцом  обоснованно заявлено требование о взыскании неустойки.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской  Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой,  залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской  гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или  договором.  

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской  Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки  кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме  независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной  формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331  Гражданского кодекса).  

В пункте 9.3 договора предусмотрена ответственность генподрядчика за  нарушение условий договора по оплате выполненных субподрядчиком работ в  виде уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости выполненных, принятых  генподрядчиком за каждый день просрочки исполнения обязательства.  

Сумма неустойки по расчету истца за период с 29.10.2019 по 23.08.2021  составила 17 252 392 руб. 15 коп.  

Расчет неустойки судом первой инстанции проверен, в части определения  периода начисления признан неверным, в связи с чем принят контррасчет  ответчика, в соответствии с которым сумма неустойки составляет 17 192 428  руб. 55 коп.  

По мнению суда апелляционной инстанции, все представленные в  материалах дела доказательства оценены судом первой инстанции с точки  зрения их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и  взаимной связи надлежащим образом, результаты этой оценки отражены в  судебном акте.  

Судебная коллегия, оставляя вынесенный судебный акт без изменения,  принимает во внимание также следующие обстоятельства.  

В Пленуме № 7 даны следующие разъяснения положений статьи 333  Гражданского кодекса, подлежащие применению в настоящем споре.  

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный  предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею  приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается  только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть  сделано в любой форме. При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи  333 Гражданского кодекса могут применяться не только по заявлению  должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная  несоразмерность неустойки последствиям нарушения. В этом случае суд при  рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие  о такой несоразмерности (пункт 71 Пленума № 7).  

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности  выгоды кредитора возлагается на ответчика (пункт 73 Пленума № 7).  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать  преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное  пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным  

для должника, чем условия правомерного пользования (пункт 74 Пленума № 7).  

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный  предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею  приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается  только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть  сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности  выгоды кредитора возлагается на ответчика.  

Изложенные правоприменительные положения, а также редакция статьи  333 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяют сделать вывод о  том, что заявление об уменьшении неустойки может быть сделано только при  рассмотрении дела по правилам производства суда первой инстанции и должно  быть мотивированным, то есть, подтверждено доказательствами,  свидетельствующими о несоразмерности неустойки и необоснованности  выгоды кредитора.  

Ответчик с соответствующим заявлением обратился, изложив его в  отзыве на исковое заявление (л. д. 33-39).  

Отказывая в удовлетворении ходатайства о применении статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации суд первой инстанции, суд  первой инстанции указал, что в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлены  доказательства несоразмерности заявленной неустойки последствиям  нарушения обязательства, более того, какие-либо конкретные обстоятельства,  являющиеся основанием для ее снижения, не приведены.  

Оставляя вынесенный судебный акт без изменения, судебная коллегия с  учетом фактических обстоятельств дела, доводов апелляционной жалобы,  принимает во внимание следующие обстоятельства.  

Исходя из обычаев делового оборота, стороны устанавливают договором  повышенную по сравнению с предусмотренной законом ответственность за  ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Лицо, добровольно  приняв на себя соответствующие обязательства, несет риск их неисполнения в  соответствии с условиями обязательства.  

В силу статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации  граждане и юридические лица свободны в заключении договора (п. 1). Стороны  могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный  законом или иными правовыми актами (п. 2). Условия договора определяются  по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего  условия предписано законом или иными правовыми актами. В случаях, когда  условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку,  поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма),  стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить  условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого  соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой (п. 4).  

В пункте 75 Пленума № 7 указано, что доказательствами обоснованности  

размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере  платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств,  выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам,  выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период  нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий  период.  

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в  своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации),  неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации при наличии соответствующего заявления со  стороны ответчика. При этом, бремя доказывания несоразмерности неустойки и  необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.  Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в  том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть  вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной  неустойки (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации).  

В силу закрепленного в Арбитражном процессуальном кодексе  Российской Федерации принципа состязательности задача лиц, участвующих в  деле, собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их  правовые позиции, арбитражный суд не является самостоятельным субъектом  собирания доказательств.  

При таких обстоятельствах, арбитражный суд не может обязать сторону  спора представлять доказательства, как в обоснование своей позиции, так и в  обоснование правовой позиции другой стороны, поскольку в силу статьи 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо,  участвующее в деле, самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых  основывает свои требования и возражения.  

В ходе разрешения спора арбитражный суд первой инстанции  предоставил сторонам достаточно времени для подготовки своей позиции по  делу, представления доказательств в обоснование своих требований и  возражений.  

Объективных доказательств, свидетельствующих о неразумности и  чрезмерности заявленной к взысканию неустойки, в материалы дела  ответчиком не представлено. Кроме того, ответчиком не доказано, что  взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к  получению истцом необоснованной выгоды.  

Установленная договором неустойка в размере 0,1 % не является  завышенной и не выходит за рамки обычной деловой практики, требований  разумности и справедливости.  

Ответчик по своей воле принял предложенные условия и вступил в  договорные отношения, а соответственно, был обязан исполнить принятое  обязательство надлежащим образом.  

Размер неустойки согласован сторонами в добровольном порядке,  

уменьшение судом неустойки с экономической точки зрения позволит  ответчику получить доступ к финансированию за счет истца на нерыночных  условиях, что поставит истца в невыгодное положение.  

Злоупотребления правом со стороны истца, которая воспользовалась  установленным законом (статья 330 Гражданского кодекса Российской  Федерации) и условиями спорного договора правом на взыскание неустойки в  полном объеме, суд не усматривает.  

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации,  изложенной в определении судебной коллегии по экономическим спорам  Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2019 № 307-ЭС19-14101 по  делу № А56-64034/2018, возражение должника об обоснованности начисления  неустойки, равно как и ее размера, само по себе не является предусмотренным  статьей 333 Гражданского кодекса заявлением об уменьшении неустойки.  Более того, должнику недостаточно заявить об уменьшении неустойки, он  должен доказать наличие оснований для ее снижения. В каждом конкретном  случае при уменьшении неустойки необходимо оценивать доказательства по  своему внутреннему убеждению, судебная коллегия считает недопустимым  уменьшение неустойки при неисполнении должником бремени доказывания  несоразмерности, представления соответствующих доказательств, в отсутствие  должного обоснования и наличия на то оснований. Иной подход позволяет  недобросовестному должнику, нарушившему условия согласованных с  контрагентом обязательств, в том числе об избранных ими мерах  ответственности и способах урегулирования спора, извлекать преимущества из  своего незаконного поведения.  

В рассматриваемом случае, заявляя суду первой инстанции ходатайство о  применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  нарушение вышеназванных требований, ООО «СБТ» не представляло какие-либо доказательства в обоснование данного заявления (статьи 9, 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а лишь  ссылалось на размер ключевой ставки Банка России в период наличия  задолженности (л.д. 33-39).  

В апелляционной жалобе ответчик излагает аналогичные обстоятельства,  при этом не предоставляет доказательств в обоснование заявления о  применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

В рассматриваемом случае, ссылаясь на необходимость снижения размера  неустойки в пять раз, ответчик фактически просит снизить неустойку до  однократной ключевой ставки Центрального Банка России, действовавшей в  период наличия задолженности, тем самым пытается изменить в  одностороннем порядке согласованный сторонами в пункте 9.3 договора  порядок расчета неустойки, при этом не предоставляя каких-либо доказательств  чрезмерности размера неустойки.  

Вместе с тем, снижение размера договорной неустойки, подлежащей  уплате коммерческой организацией, нарушившей обязательство при  осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в  

исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям  нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором  необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

В настоящем случае и истец, и ответчик являются не только  коммерческими организациями, целью которых является получение прибыли,  но и профессиональными участниками подрядных правоотношений.  

При этом условия спорного договора содержат идентичную  ответственность за нарушенное обязательство, как для истца (пункт 9.2), так и  для ответчика (9.3), в связи с чем стороны находятся в равном положении и не  имеется оснований полагать, о наличии преимущества у какой-либо из сторон.  

Суд апелляционной инстанции отмечает, что снижение размера  неустойки, подлежащей уплате, допускается в исключительных случаях, если  она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может  повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.  

На основании пунктов 1, 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской  Федерации лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его  ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или  неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены  иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той  степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по  характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для  надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом,  нарушившим обязательство.  

В силу пункта 3 указанной статьи лицо, не исполнившее или  ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении  предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет,  что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие  непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных  условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности,  нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на  рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых  денежных средств.  

В настоящем случае неустойка начислена за несвоевременную оплату  ответчиком по договору субподряда № 28 от 28.08.2019, по которому истец  выполнял работы по устройству земляного полотно и конструкций дорожной  одежды на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог  общего пользования федерального значения, наименование объекта  «Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего  пользования федерального значения по объекту: «Капитальный ремонт  автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа -  Челябинск км 1202+000 - км 1210+000, Оренбургская область»,  местонахождение объекта автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва - Рязань -  Пенза - Самара - Уфа - Челябинск км 1202+000 - км 1210+000, Оренбургская  область.  

Таким образом, характер выполняемых истцом работ по договору  требовал материальных, финансовых и трудовых ресурсов, выражающихся в  привлечение специальной техники, покупке расходных материалов и сырья,  своевременной выплате заработной платы привлеченным работникам.  Указанные действия невозможно исполнять в отсутствие должного  финансового обеспечения.  

Из материалов дела следует, что общий период начисления неустойки  составил 29.10.2019 по 18.08.2021. При этом поскольку работы выполнены не  одномоментно, а сдавались с различной периодичностью, апелляционной  коллегией исследованы сроки нарушения ответчиком обязательств по оплате в  отношении каждого периода.  

По результатам исследования расчета неустойки апелляционным судом  установлено, что нарушение сроков оплаты составило от 7 до 652 дней (в  отношении задолженности в размере 59 963 598 руб., которая оплачивалась с  нарушением установленного срока (11.11.2019) только 21.11.2019, в сумме  10 000 000 руб., 11.12.2019 в сумме 5 000 000 руб., 17.12.2019 в сумме 5 000 000  руб., 19.12.2019 в сумме 4 000 000 руб., 24.12.2019, 25.12.2019, 26.12.2019,  22.03.2021 и оставшаяся задолженность в размере 16 000 000 руб. оплачена  только 23.08.2021.  

Также из расчета следует, что задолженность в размере 7 788 533 руб.,  возникшая 30.04.2020, оплачена ответчиком только 23.08.2021, то есть по  истечению 481 дня.  

Исходя из изложенного, размер неустойки обусловлен действиями самого  ответчика, выразившегося в несвоевременном исполнении своих обязательств.  

При этом если ответчик полагал, что при аналогичных обстоятельствах  негативные последствия Подрядчика (Субподрядчика), несвоевременно  получившего оплату, не возникают, либо являются меньше заявленной суммы  неустойки.  

Как следует из пункта 73 Пленума № 7, несоразмерность неустойки и  необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что  возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие  нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1  статьи 65 АПК РФ). Обязанность по доказыванию этих обстоятельств  возложена на ответчика.  

Вопреки позиции ответчика, бремя доказывания возможности  неприменения договорного условия об ответственности за нарушение  обязательства, как и возможный размер убытков кредитора, которые могли  возникнуть вследствие нарушения обязательства, возложено именно на  должника, заявившего о необходимости снижения размера неустойки.  

В соответствии со статьями 330, 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации, по требованию о взыскании неустойки кредитор не обязан  подтверждать факт причинения убытков, презюмируется, что при нарушении  договорного обязательства негативные последствия на стороне кредитора  возникают, бремя доказывания обратного (отсутствия убытков или их явной  несоразмерности сумме истребуемой неустойки) лежит на должнике (пункты  

73 и 74 Пленума № 7).  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской  Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 № 263-О,  предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее  чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств  направлена на установление баланса между применяемой к нарушителю мерой  ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного в  результате конкретного правонарушения.  

Как следует из разъяснений, приведенных в пункте 2 Постановления  Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 №  81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации», разрешая вопрос о соразмерности неустойки  последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя  величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут  исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей  в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины  неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из  сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по  краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым  кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в  месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или  ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же  период.  

Также для обоснования иной величины неустойки, соразмерной  последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить  доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на  пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями  субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в  период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки  Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки  ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных  случаях.  

Ответчик в нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств  явной несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения  обязательства.  

Учитывая соотношение суммы задолженности и размера неустойки,  апелляционный суд не усматривает явной несоразмерности неустойки и не  находит оснований для ее уменьшения.  

Таким образом, основания для снижения размера неустойки отсутствуют,  чрезмерность заявленной неустойки не доказана ответчиком в порядке статьи  65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

На основании пунктов 1, 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской  Федерации лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его  ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или  

неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены  иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той  степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по  характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для  надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом,  нарушившим обязательство.  

В силу пункта 3 указанной статьи лицо, не исполнившее или  ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении  предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет,  что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие  непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных  условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности,  нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на  рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых  денежных средств.  

В силу изложенных выше обстоятельств, период начисления, и как  следствие размер взыскиваемой неустойки обусловлен действиями и  бездействием самого ответчика, выразившихся в несвоевременной оплате,  выполненных работ.  

В материалах дела отсутствуют доказательства того, в чем конкретно  выразились обстоятельства и причины просрочки оплаты ответчика, не  раскрыты доказательства о наличии имущества у ответчика, в том числе о  наличии денежных средств посредством раскрытия данных о расчетных счетах,  о наличии/отсутствии на них денежных средств, бухгалтерской и налоговой  отчетности.  

Дополнительно апелляционным судом принимается во внимание, что  спорный договор заключен во исполнение государственного контракта, при  этом ответчиком не представлено доказательств того, что Заказчиком  допускали нарушения сроков оплаты, повлекшие задержки в расчетах с истцом.  

Принимая во внимание вышеизложенные фактические обстоятельства, в  рассматриваемом случае должник не доказал, что размер неустойки  несоразмерен последствиям нарушения обязательств, а обстоятельства, на  которые ссылается ответчик, в силу статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации не могут служить основанием для уменьшения в  рассматриваемом случае штрафной санкции. При этом, процент неустойки,  установленный в договоре в размере 0,1 %, не является чрезмерно высоким,  является общепринятым размером ответственности среди хозяйствующих  субъектов гражданских правоотношений, соответствует принципам свободы  договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации),  осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1  Гражданского кодекса Российской Федерации) и рыночным условиям.  

Таким образом, доводы подателя апелляционной жалобы о  необходимости применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации судебной коллегией исследованы, но подлежат отклонению.  

С учетом изложенного, приведенные ответчиком основания не образуют  

достаточных оснований для применения положений статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации.  

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не опровергают выводы  суда первой инстанции, а лишь выражают несогласие с ними, не подтверждены  отвечающими требованиям главы 7 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации доказательствами, основаны на ином толковании  правовых норм, направлены на переоценку выводов суда первой инстанции,  сделанных при правильном применении норм материального права, и не могут  быть признаны основанием к отмене или изменению определения.  

Иная оценка подателем жалобы обстоятельств спора не свидетельствует  об ошибочности выводов суда.  

Каких-либо новых обстоятельств, опровергающих выводы суда,  ответчиком не приведено.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4  статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  безусловным основанием для отмены судебного акта не установлено.  

С учетом изложенного решение суда следует оставить без изменения,  апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение  апелляционной жалобы относятся на ее подателя по правилам статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку  оснований для её удовлетворения не установлено.  

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  апелляционной инстанции  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 09.03.2023 по  делу № А07-20584/2022 в обжалуемой части оставить без изменения,  апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью  «Стройблоктехнология» - без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного  производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со  дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд  первой инстанции.  

Председательствующий судья О.Е. Бабина  

Судьи: Н.Е. Напольская  

Е.В. Ширяева