АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-19673/2023

г. Ярославль

14 июня 2024 года

Резолютивная часть решения оглашена 14 мая 2024 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Коншиной А.Д. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Занимонцем В.А.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Перформ Констракшин" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к акционерному обществу "Центр организации капитального ремонта" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании    20003153.25  руб.

Третье лицо: временный управляющий Акционерного общества "Центр организации капитального ремонта" ФИО1,

 

при участии:

от истца - ФИО2 - представитель по доверенности от 30.01.2024, диплом,

от ответчика - не явились,

от третьего лица - не явились 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Перформ Констракшин" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к акционерному обществу "Центр организации капитального ремонта" о взыскании 20003153.25 руб.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, письменный отзыв не представил, возражений не заявил, в связи с чем несет риск наступления последствий совершения или не совершения им процессуальных действий в соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещено.

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствии ответчика, третьего лица.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, суд установил следующее.

01.09.2022 между акционерным обществом "Центр организации капитального ремонта"  /Генподрядчик/ и Обществом с ограниченной ответственностью "Перформ Констракшин" /Субподрядчик/ заключен Договор  субподряда № СУБ-ФОК/ПЕРФОРМ/2022, согласно п. 1.1. которого строительство здания  физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Тамбовская область, Гавриловский район, с.  Гавриловка 2-я, в соответствии с  проектной документацией (Приложение № 1 к  Договору), являющейся его неотъемлемой частью. Генподрядчик обязуется  принять и оплатить выполненные работы.

В соответствии с п. 1.2. Договора Субподрядчик  обязуется  выполнить и передать Генподрядчику  работы по  строительству Объекта на условиях, предусмотренных Договором, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ по объекту, который  является  Приложением № 5 к Договору и его  неотъемлемой частью, а Генподрядчик  обязуется  принять и оплатить их.

В соответствии с п. 2.1. Договора цена договора работ  определена  на весь срок  исполнения договора и включает  в себя прибыль Субподрядчика, уплату  налогов, сборов, других обязательных платежей и иных  расходов Субподрядчика, связанных с  выполнением  обязательств  по Договору, и  без учета  ранее  выполненных работ составляет 81 960 926 руб., в том числе  налог на  добавленную  стоимость по налоговой  ставке 20  процентов, а в случае если договор  заключается  с лицами, не являющимися  в  соответствии с законодательством  РФ о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена  договора НДС не облагается.

В соответствии с п.  2.2. Договора в п. 2.1. Договора  стоимость  определена  без учета  дальнейшей  корректировки в сторону  увеличения стоимости  Муниципального  контракта 0164200003022001330_54343 от 31.05.2022, заключенного  между АО «ЦОКР»  и Администрацией Гавриловского района Тамбовской области в части   удорожания  стоимости  материалов и применяемых ресурсов.

В соответствии с п. 2.3. Договора окончательная цена  Договора  определяется  исходя из  фактически  выполненных Субподрядчиком  и принятых Генподрядчиком  работ (в соответствии с  актами сдачи-приемки работ по форме № КС2).

В соответствии с п. 3.2. Договора оплата  выполненных работ, в том числе  их отдельных этапов, осуществляется  на основании  первичных учетных  документов,  подтверждающих  их выполнение, составленных  после завершения  выполнения  конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании  сметы договора (Приложение № 4 е Договору) в сроки и в размерах, которые установлены настоящим договором, с учетом  Графика  выполнения  строительно-монтажных  работ по Объекту  (Приложение № 5 к Договору) и фактически  выполненных Субподрядчиком работ, в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Первичным учетным  документом, являющимся основанием  для оплаты работ, выполненных в соответствии с  Графиком  выполнения строительно-монтажных работ, по  завершении выполнения  соответствующих  конструктивных  решений (элементов),  комплексов (видов) работ, в том  числе работ, выполняемых поэтапно, является  Акт сдачи  приемки выполненных работ, оформленный  и подписанный  в установленном  договором порядке, составленный  по форме  согласно Приложению № 9 к Договору

Оплата выполненных работ, в том числе  отдельных этапов, осуществляется  с зачетом  ранее выплаченного аванса, в соответствии с  Приложением № 6.

В соответствии с п. 3.3. Договора  оплата выполненных по договору работ осуществляется Генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих  дней с даты  подписания  сторонами Акта  сдачи приемки выполненных  работ  (Приложение  № 8  к Договору) по фактически  выполненным  Субподрядчиком работам.

Оплата  выполненных  работ  производится  при отсутствии  у Генподрядчика  претензий по объему  и качеству  выполненных  работ.

Обязательства  Генподрядчика  по оплате цены  договора считаются  исполненными  с момента  списания  денежных средств  с лицевого счета  Генподрядчика. За дальнейшее  прохождение  денежных средств Генподрядчик  ответственности не несет.

В соответствии с п. 3.4. Договора авансовый платеж предусмотрен. Аванс Генподрядчиком перечисляется Субподрядчику на основании выставленного счета Субподрядчиком на получение авансового платежа, в сроках и размерах, указанных в Графике оплаты работ (Приложение № 6 к Договору).

В соответствии с п. 4.1. Договора место выполнения работ: Российская Федерация, Тамбовская область, Гавриловский район, с. Гавриловка 2-я.

В соответствии с п. 4.2. Договора сроки выполнения  работ: с даты  заключения договора до  01.12.2022 года.

09.09.2022 сторонами заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору.

12.12.2022 сторонами заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору.

15.12.2022 сторонами заключено Дополнительное соглашение № 3 к Договору.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ.

Генподрядчик произвел авансирование по договору субподряда, что подтверждается  платежными поручениями № 40 от 14.09.2022, № 53 от 29.12.2022, № 17 от 15.02.2023, № 21 от 24.03.2023, № 23 от 24.04.2023, № 27 от 08.06.2023 на общую сумму 78630969 руб.

Задолженность по договору составила 20 003 153,25 руб.

Истец обратился в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

На основании ст. 702, 711 Гражданского кодекса РФ основанием для оплаты работ является факт сдачи результата работ заказчику.

Согласно ст. 753 Гражданского кодекса РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Таким образом, основанием для оплаты работ является факт сдачи результата работ заказчику.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые ссылается в качестве основания своих требований или возражений.

Факт сдачи результата работ подтверждается представленными истцом в материалы дела актами выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 78630969 руб., направленными в адрес заказчика.

Ответчик мотивированных возражений на указанные акты не направил, в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не представил.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о принятии работ заказчиком и об отсутствии оснований к отказу в оплате выполненных работ.

По расчету истца за ответчиком числится задолженность в размере 20 003 153,25 руб.

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены материалами дела, доказательств оплаты задолженности или ее наличия в меньшем размере не представлено, требования подлежат удовлетворению в полном объеме в сумме 20 003 153,25 руб.

Расходы по уплате государственной пошлины суд в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  акционерного общества "Центр организации капитального ремонта" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Перформ Констракшин" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 20 003 153,25 руб. основного долга, 123 016 руб. в возмещение расходов на оплату государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

А.Д. Коншина