АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-22072/2018

г. Ставрополь

19 февраля 2019 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Минеева А.С., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Греховодовой Н.В., рассмотрел в судебном  заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Толстиковой Марины Дмитриевны,  Ставропольский край, г. Изобильный, пос. Сахзавода, ОГРНИП 316265100147025,  

к потребительскому домостроительному союзу «Домостроитель», г. Ставрополь,  ОГРН 1022601985944,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:  Демина Екатерина Вадимовна, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,  

о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков передачи квартиры за период с  01.11.2016 по 24.03.2017 в размере 165 369 рублей 60 копеек; штрафа в размере 50% от общей  суммы неустойки в размере 82 684 рублей; стоимости устранения дефектов строительных работ  в размере 52 189 рублей; неустойки (пени) за нарушение срока устранения недостатков  выполненных работ за период с 01.11.2016 по 25.01.2017 в размере 177 985 рублей 60 копеек;  штрафа за не устранение выявленных недостатков строительства на объекте строительства в  размере 192 472 рублей 90 копеек; излишне уплаченных денежных средств в счет разницы  площади квартиры в размере 31 900 рублей; оплаты стоимости услуг эксперта по подготовке  технического заключения о качестве строительных работ в сумме 35 000 рублей; расходов по  оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей и расходы по оплате почтовых услуг в  размере 215 рублей 50 копеек.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края  

РЕШИЛ:

исковые требования индивидуального предпринимателя Толстиковой Марины Дмитриевны,  Ставропольский край, г. Изобильный, пос. Сахзавода, ОГРНИП 316265100147025, удовлетворить  в полном объеме.  

Взыскать с потребительского домостроительного союза «Домостроитель», г. Ставрополь,  

ОГРН 1022601985944, в пользу индивидуального предпринимателя Толстиковой Марины  Дмитриевны, Ставропольский край, г. Изобильный, пос. Сахзавода, ОГРНИП 316265100147025,  737 601 (Семьсот тридцать семь тысяч шестьсот один) рубль 10 копеек, в том числе:  

– неустойки за нарушение сроков передачи квартиры за период с 01.11.2016 по 24.03.2017  в размере 165 369 (Сто шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят девять) рублей 60 копеек,  

– штрафа за отказ добровольно уплатить неустойку в размере 50% от общей суммы  неустойки в размере 82 684 (Восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рублей,  

– стоимости устранения дефектов строительных работ в размере 52 189 (Пятьдесят две  тысячи сто восемьдесят девять) рублей,  

– неустойки (пени) за нарушение срока устранения недостатков выполненных работ за  период с 01.11.2016 по 25.01.2017 в размере 177 985 (Сто семьдесят семь тысяч девятьсот  восемьдесят пять) рублей 60 копеек,  

– штрафа не устранение выявленных недостатков строительства на объекте строительства  в размере 192 472 (Сто девяносто две тысячи четыреста семьдесят два) рублей 90 копеек,  

– излишне уплаченных денежных средств в счет разницы площади квартиры в размере  31 900 (Тридцать одна тысяча девятьсот) рублей,  

– стоимости услуг эксперта по подготовке технического заключения от 28.02.2017   № 1/2017 о качестве строительных работ в сумме 35 000 (Тридцать пять) рублей,  

а также 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в счет возмещения расходов по оплате услуг  представителя и 215 (Двести пятнадцать) рублей 50 копеек в счет возмещения расходов по  оплате почтовых услуг.  

Взыскать с потребительского домостроительного союза «Домостроитель», г. Ставрополь,  ОГРН 1022601985944, в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в  размере 17 752 (Семнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рублей.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в двухмесячный срок в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.С. Минеев