РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-114567/18-105-560

05.12.2018г.

Резолютивная часть решения объявлена 04.10.2018

Текст решения изготовлен в полном объеме 05.12.2018

Арбитражный суд в составе судьи Никоновой О.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) 

истец:

          ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" (129110, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН:7702388027, дата регистрации: 06.08.2015)

ответчик:

             ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В.КЕЛДЫША" ( 125438, 

<

...>, НЕТ, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации:02.12.2002)

О взыскании неустойки в размере 51 238 143 руб. 34 коп.

при участии представителей:

от истца – ФИО2, дов. от 25.12.2017г.

от ответчика – ФИО3 по дов. от 11.01.2018г., ФИО4 по дов. от 11.01.2018г.

УСТАНОВИЛ:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" обратилась в суд с иском к ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В.КЕЛДЫША" о взыскании  с учетом уточнений неустойки в размере 49 585 300,00 рублей (Сорок девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч триста рублей 00 копеек) за нарушение сроков исполнения обязательств по этапам № 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.6, 5.7.1 и 5.7.2 государственного контракта от 08.08.2013 № 251-П002/13/244.

Исковые требования заявлены со ссылкой на ст.ст. 309, 310, 408 и 777 Гражданского кодекса Российской Федерации

Ответчик исковые требования не признает согласно доводам, изложенным в отзыве, заявил о пропуске срока давности по отдельным этапам.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания иска, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

Между Федеральным космическим агентством (правопреемник Госкорпорация «Роскосмос»)  (далее - Заказчик, Истец) и ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» (далее - Головной исполнитель, Ответчик) был заключен государственный контракт от 08.08.2013 № 251-П002/13/244 (шифр: ОКР «ТЭМ») (далее - государственный контракт), согласно которому Головной исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями государственного контракта опытно-конструкторскую работу и своевременно   сдать   Заказчику,   а   Заказчик   обязуется   принять   и оплатить опытно-конструкторскую работу на тему: «Создание транспортно-энергетичекого модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса» (в части работ 2013 - 2015 годов) (далее - ОКР) (пункт 1.1 государственного контракта).

В соответствии с пунктом 3.4 государственного контракта оплата ОКР (этапа ОКР) производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты утверждения Заказчиком акта приемки ОКР (акта приемки этапа ОКР) путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Головного исполнителя с учетом ранее выплаченного аванса.

Истцом обязательства по оплате этапов № 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.6, 5.7.1 и 5.7.2 государственного контракта выполнены своевременно и в полном объеме.

В соответствии с пунктом 2.1 государственного контракта в редакции дополнительного соглашения к государственному контракту от 30.06.2016 № 6 ОКР выполняется Головным исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания на ОКР с дополнениями № 1 - 3 и 5 (приложение № 1 к государственному контракту).

Согласно пункту 2.2 государственного контракта содержание ОКР (этапа ОКР) и сроки выполнения определяются ведомостью исполнения (приложение № 2 к государственному контракту).

В соответствии с ведомостью исполнения к государственному контракту, в том числе, в редакции дополнительных соглашений к государственному контракту от 12.12.2014 № 3, от 10.09.2015 № 4 и от 30.06.2016 № 6 срок окончания выполнения оплатить опытно-конструкторскую работу на тему: «Создание транспортно-энергетичекого модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса» (в части работ 2013 - 2015 годов) (далее - ОКР) (пункт 1.1 государственного контракта).

В соответствии с пунктом 3.4 государственного контракта оплата ОКР (этапа ОКР) производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты утверждения Заказчиком акта приемки ОКР (акта приемки этапа ОКР) путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Головного исполнителя с учетом ранее выплаченного аванса.

Истцом обязательства по оплате этапов № 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.6, 5.7.1 и 5.7.2 государственного контракта выполнены своевременно и в полном объеме.

В соответствии с пунктом 2.1 государственного контракта в редакции дополнительного соглашения к государственному контракту от 30.06.2016 № 6 ОКР выполняется Головным исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания на ОКР с дополнениями № 1 - 3 и 5 (приложение № 1 к государственному контракту).

Согласно пункту 2.2 государственного контракта содержание ОКР (этапа ОКР) и сроки выполнения определяются ведомостью исполнения (приложение № 2 к государственному контракту).

В соответствии с ведомостью исполнения к государственному контракту, в том числе, в редакции дополнительных соглашений к государственному контракту от 12.12.2014 № 3, от 10.09.2015 № 4 и от 30.06.2016 № 6 срок окончания выполнения работ по этапу 

№ 4.1 – 10.12.2013,цена этапа № 4.1 - 91 000 000,00 рублей, по этапу № 4.2 - 10.12.2014, цена этапа № 4.2 - 549 000 000,00 рублей, по этапу № 5.1 - 10.12.2013,цена этапа № 5.1 - 200 000 000,00 рублей, по этапу № 5.2 -30.11.2013,цена этапа № 5.2 - 450 000 000,00 рублей, по этапу № 5.3.1- 25.11.2013,цена этапа № 5.3.1 - 597 600 000,00 рублей, по этапу № 5.3.2 - 23.12.2013,цена этапа № 5.3.2 - 402 500 000,00 рублей, по этапу № 5.4 -25.11.2015, цена этапа № 5.4 - 200 000 000,00 рублей, по этапу № 5.6 - 30.11.2014,цена этапа № 5.6 - 416 000 000,00 рублей, по этапу № 5.7.1 - 25.11.2014,цена этапа № 5.7.1 - 579 500 000,00 рублей, по этапу № 5.7.2 - 30.10.2014,цена этапа № 5.7.2 - 449 400 000,00 рублей.

Согласно пункту 4.3 государственного контракта датой исполнения обязательств Головного исполнителя по этапам государственного контракта является дата утверждения Заказчиком акта приемки этапа ОКР.

В установленный срок обязательства по государственному контракту Головным исполнителем не выполнены:

акты приемки этапов ОКР по этапам № 4.1 и 5.1 утверждены Заказчиком 16.12.2013;

акт приемки этапа ОКР по этапу № 4.2 утвержден Заказчиком

25.12.2014;

акты приемки этапов ОКР по этапам № 5.2 и 5.6 утверждены Заказчиком 25.12.2014;

акты приемки этапов ОКР по этапам № 5.3.1, 5.4 и 5.7.1 утверждены Заказчиком 28.12.2015;

акт приемки этапа ОКР по этапу № 5.3.2 утвержден Заказчиком 20.12.2017;

акт приемки этапа ОКР по этапу № 5.7.2 утвержден Заказчиком 30.12.2016.

В связи с просрочкой исполнения обязательств Заказчик в адрес Головного исполнителя направил претензии об уплате неустойки:

по этапу № 5.3.2 - претензию от 15.03.2017 № АН-2239 об уплате неустойки в размере 9 794 166,67 рубля за период с 24.12.2016 по 06.03.2017;

по этапу № 5.7.2 - претензию от 27.12.2016 № АН-9802 об уплате неустойки в размере 7 490 000,00 рубля за период с 01.11.2016 по 19.12.2016.

Таким образом, срок просрочки исполнения обязательства по этапам № 4.1 и 5.1 составляет 6 дней (с 11.12.2013 по 16.12.2013), по этапу № 4.2 - 15 дней (с 11.12.2014 по 25.12,2014), по этапам № 5.2 и 5.6 - 25 дней (с 01.12.2014 по 25.12.2014), по этапам № 5.3.1, 5.4 и 5.7.1 - 33 дня (с 26.11.2015 по 28.12.2015), по этапу № 5.3.2 - 289 дней (с 07.03.2017 по 20.12.2017 с учетом ранее выставленной претензии от 15.03.2017 № АН-2239), по этапу № 5.7.2 - 11 дней (с 20.12.2016 по 30.12.2016 с учетом ранее выставленной претензии от 27.12.2016 № АН-9802).

В соответствии с пунктом 8.5 государственного контракта в случае просрочки исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом (этапа ОКР), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России на день уплаты неустойки от цены этапа ОКР.

Общая сумма неустойки составляет 136 500,00 + 2 058 750,00 + 300 000,00 + 2 812 500,00 + 4 930 200,00 + 29 080 625,00 + 1 650 000,00 + 2 600 000,00 + 4 780 875,00 + 1 235 850,00 - 49 585 300,00 рублей.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Согласно ст. 310 ГК РФ не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик заявил о пропуске срока исковой давности, указав на следующее.

Указанные Истцом периоды просрочки находятся на дату предъявления претензии от 29.12.2017 № АН-13154 и искового заявления от 14.05.2018 за пределами 3-х летнего срока исковой давности:

-по этапу 4.1 Истцом указана просрочка с 11.12.2013 по 16.12.2013, то есть срок исковой давности за весь период просрочки истек 17.12.2016;

-по этапу 4.2 Истцом указана просрочка с 11.12.2014 по 25.12.2014, то есть срок исковой давности истек 26.12.2017;

-по этапу 5.1 Истцом указана просрочка с 11.12.2013 по 16.12.2013, то есть срок исковой давности истек 17.12.2016;

-по этапу 5.2 Истцом указана просрочка с 01.12.2014 по 25.12.2014, то есть срок исковой давности истек 26.12.2017;

-по этапу 5.6 Истцом указана просрочка с 01.12.2014 по 25.12.2014 то есть срок исковой давности истек 26.12.2017.

Исковая давность не приостанавливалась по этим требованиям и не прерывалась.

Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года (статья 196 Кодекса).

В соответствии с частью 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В силу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В результате исследования фактических обстоятельств дела, изучения доводов, участвующих в деле лиц, оценки представленных в дело доказательств, суд пришел к выводу, что срок исковой давности пропущен по этапам 4.1,4.2,5.1,5.2,5.6 на сумму 7 907 750 руб.

В этой части требование о взыскании неустойки удовлетворению не подлежит.

Иные доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявления, являются несостоятельными, поскольку не соответствуют нормам права, подлежащим применению при рассмотрении настоящего спора и фактическим обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению частично в размере 41 677 550 руб.

Расходы по госпошлине распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.  8, 12, 199-200, 309, 310, 330, 702, ГК РФ, ст.ст.  65, 68,71, 75, 110, 123, 156, 167, 170, 171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В.КЕЛДЫША" в пользу ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" неустойку в размере 41 677 550 руб.( Сорок один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят рублей).

             Взыскать с ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В.КЕЛДЫША" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 200 000 руб.( Двести тысяч рублей).

             В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.И. Никонова