Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-90176/2025

31 декабря 2025 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Янбухтиной Р.Ф.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ТМ" (ИНН: 

<

***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИЗОЛ" (ИНН: 

<

***>)

при участии

- от истца: ФИО1

- от ответчика: не яв., изв.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ" (далее – ООО "ТМ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ГЕОИЗОЛ" (далее – ООО "ГЕОИЗОЛ") о взыскании:

– 23 876 868,58 руб. задолженности по договору от 16.10.2023 № К23/УКС-26/СУБ-ТМ (далее – Договор 1);

– 4 043 205,06 руб. задолженности по договору от 27.11.2019 № 1921187377872554164000000/2479-СУБ 8-2019 (далее – Договор 2);

– 3 182 020,41 руб. задолженности по договору от 26.03.2018 № 10/ЗП-2017/СУБ-12 (далее – Договор 3).

Истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнил исковые требования и просил взыскать 14 748 003,48 руб. задолженности по Договору 1, а также 187 815,30 руб. задолженности по Договору 2 и 3 182 020,41 руб. задолженности по Договору 3.

Уточнение принято судом.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием к рассмотрению дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

1. Между ООО "ТМ" (субподрядчиком) и ООО "ГЕОИЗОЛ" (подрядчиком) заключен Договор 1 на выполнение работы по монтажу монолитных железобетонных конструкций на объекте: «Проектирование нового автобусного парка в производственной зоне «Ржевка».

Оплата выполненных работ производится Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и при условии предоставления на почтовый адрес Подрядчика Субподрядчиком счета на оплату и оригинала счета-фактуры на сумму выполненных Работ, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ. Подрядчик осуществляет оплату принятых Работ при условии, если Подрядчиком в указанный в настоящем пункте срок не будет подготовлен письменный мотивированный отказ от подписания предоставленного Субподрядчиком Акта по форме № КС-2.

Подрядчик не позднее срока, указанного в настоящем подпункте, обязан уплатить Субподрядчику сумму, указанную в счете за выполненные работы, при этом Субподрядчик выставляет счет на оплату выполненных работ в размере 95% от суммы, указанной в Акте по форме № КС-2 (при условии, если Субподрядчиком одновременно с Актом по форме № КС-2 и Справкой по форме КС-3 предоставлен Подрядчику, а Подрядчиком принят и согласован полный комплект исполнительной документации, подтверждающий количество и качество выполненных работ в соответствии с данным Актом по форме КС-2, подписанной представителями Подрядчика, Подрядчика и Заказчика строительства с учетом вычета ранее оплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ в общей стоимости работ, если такой аванс выплачивался

Оставшаяся часть суммы (5%) за все выполненные работы по договору, принятые и отраженные в Актах по форме № КС-2 уплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения гарантийного срока на результат выполненных работ на основании надлежаще оформленного счета, полученного от Субподрядчика и при условии отсутствия недостатков произведенных работ в течение гарантийного срока. Указанная сумма обеспечивает надлежащее исполнение Субподрядчиком своих обязательств по выполнению работ и по устранению недостатков в течение гарантийного срока (п. 3.4).

Пункт 6.20 договора 1 исключен сторонами по протоколу согласования разногласий от 16.10.2023.

2. Между ООО "ТМ" (субподрядчиком) и ООО "ГЕОИЗОЛ" (подрядчиком) заключен Договор 2 на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с условиями Договора и Технического задания, по объекту: «Строительство филиала Нахимовского военно-морского училища на 560 мест в г. Калининграде», шифр объекта 3-23/19-20.

Цена Договора 77 513 570,68 руб.

Согласно п. 4.5. договора оплата выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных Работ по Договору производится Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Итогового акта приемки выполненных работ по форме №1, установленной Приложением № 3 к Договору на основании оригинала счета.

В силу п. 4.6. договора оплата выполненных Субподрядчиком Работ по Договору производится Подрядчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора за вычетом Генподрядных услуг и пропорциональной доли выплаченного аванса, до предела не превышающего 95 (девяносто пять) % от Цены Договора. Подрядчик вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Подрядчиком оформленных Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, оригиналов счета и счета-фактуры произвести оплату выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ.

По п. 4.7. договора денежная сумма в размере 5 % от стоимости выполненных работ по Договору, удерживается Подрядчиком в качестве обеспечения выполнения Субподрядчиком принятых на себя Гарантийных обязательств в установленный Договором гарантийный срок (гарантийное удержание).

По п. 4.9. договора, в ред. протокола разногласий от 27.11.2019, оплата гарантийного удержания производится по истечению одного года после подписания итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной приложением № 3 к договору на основании оригинала счета.

В силу п. 15.3. договора гарантийный срок начинает течь с даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ (с даты расторжения Договора в случае досрочного расторжения Договора) и устанавливается на срок 5 (пять) лет.

3. Между «ООО «СК Тор-Монолит» (субподрядчиком) и ООО "ГЕОИЗОЛ" (подрядчиком) заключен Договор 3 на выполнение работ Работы по устройство монолитных ж/б конструкций КР31, КР32.

Соглашением от 15.04.2020 соглашение о перемене лиц по договору все права и обязанности субподрядчика по договору переданы от «ООО «СК Тор-Монолит» к ООО "ТМ".

Стоимость Работ 32 730 532,39 руб.

Оплата выполненных работ производится Генподрядчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и при условии предоставления Генподрядчику Субподрядчиком счета на оплату и оригинала счета-фактуры на сумму выполненных Работ, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ. Генподрядчик осуществляет оплату принятых Работ при условии, если Генподрядчиком в указанный в настоящем пункте срок не будет подготовлен письменный мотивированный отказ от подписания предоставленного Субподрядчиком Акта по форме № КС-2 (абз. 1 п. 4.5.).

Генподрядчик не позднее срока, указанного в настоящем подпункте, обязан уплатить Субподрядчику сумму, указанную в счете за выполненные работы, при этом Субподрядчик выставляет счет на оплату выполненных работ в размере 95% от суммы, указанной в Акте по форме № КС-2 и Справкой по форме КС-3 предоставлен Генподрядчику, а Генподрядчиком принят и согласован полный комплект исполнительной документации, подтверждающий количество и качество выполненных работ в соответствии с данным Актом по форме КС-2 (абз. 1 п. 4.5. в ред. протокола разногласий от 26.03.2018).

Оплата выполненных работ по Договору производится при условии поступления денежных средств от Заказчика (ГБУ КО «Балтберегозащита») по Государственному контракту № 10/ЗП-2016 от 19.08.2016, заключенному с Генподрядчиком (абз. 3 п. 4.5.).

В случае, если Субподрядчиком одновременно с Актом по форме № КС-2 и Справкой по форме КС-3 не предоставлен Генподрядчику полный комплект исполнительной документации, подтверждающий количество и качество выполненных работ в соответствии с данным Актом по форме КС-2, либо у Генподрядчика имеются замечания к представленной исполнительной документации, Генподрядчик вправе удержать до 50% денежных средств из подлежащей оплате суммы, указанной в Акте по форме № КС-2, с учетом вычета ранее оплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ, если такой аванс выплачивался.

Удержанные денежные средства от суммы, указанной в Акте по форме № КС-2, оплачиваются Генподрядчиком в течение 5 банковских дней с даты предоставления Субподрядчиком Генподрядчику по акту приема-передачи полного комплекта исполнительной документации, подтверждающего количество и качество выполненых работ в соответствии с данным Актом по форме КС-2, в отношении которой у Генподрядчика отсутствуют замечания.

Оставшаяся часть суммы (5%) от суммы, указанной в Акте по форме № КС-2 оплачивается в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 Договора (п. 4.5.1. в ред. протокола разногласий от 26.03.2018).

Оставшаяся часть суммы (5%) за все выполненные работы по договору, принятые и отраженные в Актах по форме № КС-2 уплачивается Генподрядчиком после подписания рабочей комиссией с участием Заказчика акта приемки законченного строительством Объекта формы КС-11 и получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, на основании актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 в течение 15 банковских дней со дня подписания последнего акта о приемки выполненных работ по форме КС-2 и при условии, что работы выполнены в срок, предусмотренный договором и при условии отсутствия недостатков произведенных работ в течение гарантийного срока (п. 4.7. в ред. протокола разногласий от 26.03.2018).

Стороны подписали акты о приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Претензия об оплате долга оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Дата ввода объекта «Пляжеудерживающее сооружение (I этап строительства) в р-не пос. Отрадное – г. Светлогорск, Калининградскся обл.» - 29.12.2018.

Поскольку ответчик не представил доказательства оплаты долга, иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцу судом предоставлена отсрочка оплаты государственной пошлины.

В соответствии с ч. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации и ст. 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГЕОИЗОЛ" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТМ" (ИНН: 

<

***>):

- 14748003,47 руб. задолженности по договору субподряда от 16.10.2023 № К23/УКС-26/СУБ-ТМ

- 187815,30 руб. задолженности по договору от 27.11.2019 № 1921187377872554164000000/2479-СУБ 8-2019

- 3182020,41 руб. задолженности по договору субподряда от 26.03.2018 № 10/ЗП-2017/СУБ-12.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГЕОИЗОЛ" (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 406178 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья 	Косенко Т.А.