Арбитражный суд Мурманской области 

ул. Книповича, д. 20, г. Мурманск, 183049 e-mail: murmansk.info@arbitr.ru http://murmansk.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Мурманск Дело № А42-7329/2016  Резолютивная часть решения оглашена 24 января 2017 года.  

Решение в полном объеме изготовлено 27января 2017 года.  

Судья Арбитражного суда Мурманской области Быкова Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Муниципального учреждения Отдел имущественных отношений администрации  МО г. Кола (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; место нахождения:  ул.Каменный остров, д. 5, г. Кола, Кольский район, Мурманская область, 184381)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Служба инженерных сетей» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>; место нахождения: ул. Инженерная, д. 6 «А»,  

<

...>; ул. Папанина, д. 21, оф. 24, 

<

...>)  

об обязании выполнить работы по гарантийному ремонту по Муниципальному  контракту № 3-А/2015 На выполнение работ по капитальному строительству  стадиона, расположенного по адресу: 

<

...> район дома № 8, от 10.08.2015;  

при участии в судебном заседании представителей: истца – ФИО2 по доверенности; ответчика - ФИО3 по доверенности;  В судебном заседании 17.01.2017 объявлялся перерыв до 24.01.2017; 

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное учреждение Отдел имущественных отношений  администрации Муниципального образования г. Кола (далее – истец, Учреждение,  Заказчик) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к  обществу с ограниченной ответственностью «Служба инженерных сетей» (далее –  ответчик, Общество, Подрядчик) об обязании выполнить гарантийный ремонт по  Муниципальному контракту № 3-А/2015 На выполнение работ по капитальному  ремонту стадиона, расположенного по адресу: 

<

...> район дома № 8, от 10.08.2015: в течение 14  дней с момента вступления решения суда в законную силу заменить сетчатые  ограждения площадок для мини футбола и баскетбола в местах их искривления,  разрушения или отсутствия; в течение 54 календарных дней с момента вступления  решения в законную силу переасфальтировать асфальтовое покрытие площадки  для баскетбола в местах проседания и заменить искусственное покрытие для  футбольных полей в объеме 800 кв.м., предварительно устранив просадку  подстилающего основания. Все работы должны быть выполнены со всеми  предварительными работами, предусмотренными для данных видов работ, с  использованием материалов, технологий в соответствии с нормами СНИП и ГОСТ.  

В ходе рассмотрения дела Учреждение уточняет формулировку исковых  требований.  

Истец просит обязать Общество в течение 14 календарных дней с момента  вступления решения в законную силу выполнить гарантийный ремонт стадиона  заменить отдельные части металлического ограждения спортивных площадок для  мини футбола и баскетбола общей площадью 120 кв.м.; в период май-август 2017  года выполнить ямочный ремонт асфальта в местах проседания асфальта (около  стоек) в общем количестве 8,8 кв.м. и заменить искусственное покрытие на  футбольном поле в объеме 800 кв.м.. Все работы должны быть выполнены с  использованием материалов, указанных в приложении № 2 к Муниципальному  контракту № 3-А/2015 от 10.08.2015.  

В соответствии со статьей 49 АПК РФ уточнения принимаются судом. 

В судебном заседании истец на иске настаивает.  В судебном заседании ответчик против иска возражает. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил  следующее.  

Комитетом (заказчиком) и Обществом (подрядчиком) заключен  Муниципальный контракт № 3-А/2015 на выполнение работ по капитальному  ремонту стадиона, расположенного по адресу: 

<

...> район дома № 8, от 10.08.2015 (далее –  контракт), согласно которому Общество обязуется выполнить капитальный ремонт  стадиона в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1, № 2), рабочей  документацией (приложение № 3). Цена контракта составляет 8 256 916 рублей 49  копеек.  

Сторонами подписаны Приложение № 1 к контракту Техническое задание (с  ведомостью объемов работ), Приложение № 2 к контракту Перечень используемых  товаров (при выполнении работ будет использоваться следующие материалы).  

Согласно пункту 7.3 контракта гарантийные обязательства на выполнение  работ составляют 36 месяцев со дня подписания сторонам акта приемки  выполненных работ.  

Дополнительным соглашением от 16.10.2015 стороны согласовали увеличение  объема работ на 9.7% и пропорциональное увеличение стоимости работ по  контракту.  

В материалы дела представлены локальные сметы: № 01-01-01  Подготовительные работы, № 01-01-02 Подготовительные работы.  

Сторонами подписаны Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг  приемочной комиссией № 1 от 27.08.2015, № 2 от 27.08.2015, № 3 от 27.08.2015, №  4 от 08.09.2015, № 5 от 15.09.2015, № 6 от 17.09.2015, № 7 от 18.09.2015, № 8 от  18.09.2015, № 9 от 16.10.2015, № 10 от 16.10.2015, № 11 от 16.10.2015.  

В материалы дела представлены товарные накладные № 3 от 15.09.2015  (панели металлические, конструктивные элементы, полотна калиток сетчатые из  сварной сетки), № 2 от 09.09.2015 (камни железобетонные бортовые), № 1 от  02.09.2015 (песок природный, щебень из природного камня, щебень из гравия,  щебень кирпичный), № 4 от 18.09.2015 (подложка резиновая, трава искусственная).  

Работы по контракту окончены 16.10.2015. 

На основании обращений населения города Кола Учреждением 20.10.2016  комиссионно составлен Акт обследования стадиона, согласно которому  повреждены сетчатые ограждения площадок для мини-футбола и баскетбола со  стороны ворот мини-футбола; частично просело асфальтовое покрытие площадки  для баскетбола в местах установки ограждений; повреждено искусственное  покрытие площадки для мини-футбола: частичное отслоение швов, частичное  истирание искусственного покрытия, частичная просадка отдельными местами  подстилающего основания. Произведена фотофиксация.  

Истцом ответчику направлена 21.10.2016 претензия. В претензии истцом  указано, что присутствие рабочих будет проверено 24.10.2016 в 10.00 часов на  стадионе.  

Актом от 24.10.2016 зафиксировано отсутствие рабочих Общества на  стадионе.  

25.10.2016 Комитет обратился в суд с соответствующим иском. 

13.01.2017 стороны подписали Акт обследования (невозможно исследовать  покрытие футбольного поля и асфальтовой баскетбольной площадки ввиду  большого количества снега; отсутствуют ограждения 16 секций по 8 у каждых  ворот; имеются секции выгнутые от стояка наружу; прутья некоторых секций в  следствие механических повреждений выломаны наружу от футбольного поля;  ограждение периметра – сломаны 2 секции ограждения).  

Суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по  следующим основаниям.  

Согласно разделу 7 контракта гарантии качества распространяются на все  конструктивные элементы и работы, выполненные Обществом по контракту.  Гаратийные обязательства на выполненные работы составляют 36 месяцев со дня  подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Дефекты, обнаруженные  в период гарантийных обязательств, препятствующие нормальной работе и  вызванные некачественным выполнением Подрядчиком работ либо применением  некачественных материалов, изделий Подрядчик устраняет за свой счет в  согласованные с Заказчиком сроки.  

Согласно ведомости объемов работ (Приложение № 1 к контракту), в 

рамках контракта Подрядчик обязан был выполнить подготовительные работы:  установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки  высотой до 17 м., уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа  грунтов 1-2, Искусственные покрытия: Тип 1 - Покрытие проездов, площадок и  дорожек асфальтобетонные, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований из песка; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований из щебня. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих  асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, платность  каменных материалов 2,5-2,9 Т/м³ (толщ. 5 см). Тип IV покрытие площадок и  дорожек гранитным отсевом. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований из щебня. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований из песка. Ограждение площадки для мини футбола и баскетбольной  площадки. Монтаж столбов, закрепляемых на фундаментах.  

Печень используемых материалов согласован в Приложении № 2 к контракту:  Столб ограждения ООО «Динамические конструкции» Россия. Товарный знак  отсутствует. Секция ограждения ООО «Динамические конструкции» Россия.  Товарный знак отсутствует. Трава искусственная Ten Cate Thiolon. Россия.  

Согласно пункту 5.2.3. Контракта Подрядчик обязан: «Применять материалы  и изделия, конструкции и оборудование, используемые, при выполнении работ,  имеющие паспорта, сертификаты и декларации соответствия ГОСТ Р, TP, отвечать  предъявленным к ним нормативным требованиям, гигиенические и пожарные  сертификаты, или другие документы, удостоверяющие возможности их  применения, копии этих документов предоставить Заказчику.  

При выполнении работ, Подрядчик обязан неукоснительно соблюдать  технологию.  

В пункте 5.2.12 контракта согласовано, что Подрядчик обязан обеспечить  соответствие работ условиям Контракт о качестве в течение всего гарантийного  срока его эксплуатации».  

В соответствии со статьей 65 АПК РФ суд считает доказанным факт наличия  недостатков выполненных работ, возникших в течение гарантийного срока.  

Доказательств иного ответчиком не представлено. 

Если договором подряда предусмотрен гарантийный срок, то результат  работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям  договора о качестве (пункт 1 статьи 722 ГК РФ).  

Распространяя свое действие на период после приемки выполненных работ,  гарантийное обязательство придает отношениям сторон по договору подряда  длящийся характер. При обычной надлежащей эксплуатации предмета,  явившегося результатом работ, недостаток, появившийся в течение гарантийного  срока, возникает в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих  обязательств.  

Истцом доказан факт возникновения недостатков в течение гарантийного  срока.  

Обществом не представлено доказательств того, что недостатки возникли  вследствие неправильной эксплуатации либо нормального износа металлического  ограждения, асфальта и искусственного покрытия футбольного поля стадиона.  

Требование истца об обязании ответчика выполнить работы по гарантийному  ремонту по контракту материалами , указанными в приложении № 2 к контракту,  обоснованно ГК РФ, контрактом и подлежит удовлетворению.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального Кодекса  Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины в  сумме 6 000 рублей 00 копеек подлежат взысканию с Общества в доход  федерального бюджета.  

 Руководствуясь статьями 167-170, 110 Арбитражного процессуального  Кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Служба инженерных  сетей» в течение 14 дней с момента вступления решения в законную силу  выполнить гарантийный ремонт стадиона, расположенного по адресу: 

<

...> район дома № 8, -  

заменить отдельные части металлического ограждения спортивных площадок для  мини футбола и баскетбола общей площадью 120 кв.м.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Служба инженерных  сетей» в период май-август 2017 года выполнить гарантийный ремонт стадиона,  расположенного по адресу: 

<

...> район дома номер 8, а именно выполнить ямочный ремонт  асфальта в местах проседания асфальта (около стоек) в общем количестве 8,8 кв.м.  и заменить искусственное покрытие на футбольном поле в объеме 800 кв.м.  

 Все работы должны быть выполнены с использованием материалов, указанных в  приложении 2 к Муниципальному контракту № 3-А/2015 от 10.08.2015 на  выполнение работ по капитальному ремонту стадиона, расположенного по адресу:  

<

...> район дома   № 8.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Служба инженерный  сетей» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000  рублей 00 копеек..  

 Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции месячный  срок со дня принятия.  

 Судья: Н.В. Быкова