Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-5104/2021

20 октября 2021 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения "Главстрой" городского округа "Город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 29.11.2002, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677027, 

<

...>) от 19.07.2021 г. № б/н к обществу с ограниченной ответственностью Северная торговая компания "АЛААС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 21.02.2017, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677007, 

<

...>) о взыскании 363 953, 46 рублей неустойки по муниципальному контракту № Р-08/2020 от 27.05.2020,

без вызова сторон.

Суд, проверив расчет истца, признает его неверным по определению ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации.

Согласно п. 12.6 контракта            пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

При добровольной уплате названной пени ее размер по общему правилу подлежит исчислению по ставке, действующей на дату фактического платежа.

При этом закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае взыскания пени в судебном порядке.

Вместе с тем по смыслу данной нормы, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате товара, поставленного по муниципальному контракту, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения.

Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент разрешения спора в суде.

Указанный подход к определению размера ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации для расчета подлежащей взысканию в судебном порядке неустойки определен в п. 3 раздела «Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике» Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016).

В соответствии с указанием Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) от 11.12.2015 № 3894-у значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату, самостоятельное значение ставки рефинансирования с 01.01.2016 не устанавливается.

Согласно информации Центрального банка Российской Федерации на дату объявления резолютивной части решения (20.10.2021) при расчете неустойки подлежит применению ставка рефинансирования в размере 6, 75 %.

Между тем, истцом произведет расчет пени по периодам действия ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации.

Суд производит расчет пени.

- по справке о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 23.10.2020, акту о выполненных работах № 1 от 23.10.2020:

603 096, 06 * 102 (с 01.07.2020 по 10.10.2020)  * 1/300 * 6, 75% = 13 840, 99 руб.

14 716 058, 59 * 62 (с 11.08.2020 (с учетом статьи 193 ГК РФ) по 10.10.2020) * 1/300 * 6, 75% = 201 977, 90 руб.

1 649 172, 29 * 89 (с 14.07.2020 (с учетом статьи 193 ГК РФ) по 10.10.2020) * 1/300 * 6, 75% = 33 024, 68 руб.

- по справке о стоимости выполненных работ и затрат № 10 от 26.10.2020, акту о выполненных работах № 1 от 26.10.2020:

1 260 086, 49 * 2 (с 01.09.2020 по 03.09.2020) * 1/300 * 6,75% = 850,56 руб.

- по справке о стоимости выполненных работ и затрат № 11 от 17.11.2020, акту о выполненных работах № 1 от 17.11.2020:

408 102,98 * 127 (с 01.07.2020 по 04.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 11 661, 54 руб.

1 476 300, 86 *65 (с 01.09.2020 по 04.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 21 590, 90 руб.

1 482 758, 46 * 59 (с 08.09.2020 (с учетом статьи 193 ГК РФ) по 04.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 19 350 руб.

- по справке о стоимости выполненных работ и затрат № 12 от 19.11.2020, акту о выполненных работах № 1 от 19.11.2020:

11 336, 19 * 135 (с 01.07.2020 по 12.11.2020)  * 1/300 *6, 75% =344, 34 руб.

629 858, 20 * 66 (с 08.09.2020 (с учетом статьи 193 ГК РФ) по 12.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 9 353, 39 руб.

2 062 058, 30 * 59 (с 15.09.2020 (с учетом статьи 193 ГК РФ) по 12.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 8 361, 37 руб.

- по справке о стоимости выполненных работ и затрат № 14 от 03.12.2020, акту о выполненных работах № 14 от 03.12.2020:

242 709, 59 * 127 (с 01.07.2020 по 04.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 6 935, 43 руб.

1 199 663, 36 * 2 (с 03.11.2020 (с учетом статьи 193 ГК РФ) по 04.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 539, 85 руб.

315 310, 62 *17 (с 20.10.2020 (с учетом статьи 193 ГК РФ) по 04.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 1 135, 12 руб.

611 331, 62 *35 (с 01.10.2020 по 04.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 4 814, 24 руб.

- по справке о стоимости выполненных работ и затрат № 15 от 04.12.2020, акту о выполненных работах № 1 от 04.12.2020:

1 006 714, 94 * 135 (с 01.07.2020 по 12.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 30 578, 97 руб.

12 483 797, 94 * 59 (с 15.09.2020 (с учетом статьи 193 ГК РФ) по 12.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 165 722, 42 руб.

1 142 948, 39 * 59 (с 15.09.2020 (с учетом статьи 193 ГК РФ) по 12.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 15 172, 64 руб.

87 891, 75 * 60 (с 15.09.2020 (с учетом статьи 193 ГК РФ) по 12.11.2020) * 1/300 * 6,75% = 1 166, 76 руб.

- по справке о стоимости выполненных работ и затрат № 16 от 21.12.2020, акту о выполненных работах № 1 от 21.12.2020:

1 527 737, 10 * 59 (с 20.10.2020 (с учетом статьи 193 ГК РФ) по 17.12.2020) * 1/300 * 6, 75% = 20 280, 71 руб.

- по справке о стоимости выполненных работ и затрат № 17 от 22.12.2020, акту о выполненных работах № 1 от 22.12.2020:

156 608, 41 * 59 (с 20.10.2020 (с учетом статьи 193 ГК РФ) по 17.12.2020) * 1/300 * 6, 75% = 2 078, 98 руб.

Поскольку применительно к статьям 8, 9, 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не вправе выходить за пределы заявленных требований, в том числе в отношении их размера, требование подлежит удовлетворению в исчисленной истцом сумме.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика неустойки в размере 363 953, 46 рублей.

Истцом по платежным поручениям № 34369 от 05.04.2021, № 94266 от 03.08.2021 уплачена государственная пошлина в размере 12 335 рублей.

С учетом результатов рассмотрения дела, на основании ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины в сумме 10 279 рублей судом отнесены на ответчика.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 2 056 рублей, излишне уплаченная по платежному поручению № 94266 от 03.08.2021 , подлежит возврату истцу после предоставления оригинала платежного поручения, поскольку документ об уплате государственной пошлины представлен в суд электронно.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Северная торговая компания "АЛААС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 21.02.2017, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677007, 

<

...>) в пользу муниципального казенного учреждения "Главстрой" городского округа "Город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 29.11.2002, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677027, 

<

...>) 363 953, 46 рублей неустойки по муниципальному контракту № Р-08/2020 от 27.05.2020, а также 10 279 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

 

Судья

Семёнова У. Н.