АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-9862/2023

г. Новосибирск

22 мая 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2023 года      

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Герасимовой Д.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Сибдортехнология" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, 

к Администрации рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области (ОГРН 

<

***>), р.п. Маслянино, Маслянинского района, Новосибирская область,

о взыскании неустойки в сумме 41 353 рублей 28 копеек, 

при участии:

истца: ФИО1 (доверенность № 14/04 от 14.04.2023, паспорт, диплом), 

ответчика: не явился, извещен,,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сибдортехнология" (далее - истец) обратилось с исковым заявлением к Администрации рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области  (далее – ответчик) о взыскании неустойки в сумме 41 353 рублей 28 копеек.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и дате, в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил.

Дело по существу рассмотрено после завершения предварительного судебного заседания, при готовности дела к судебному разбирательству и отсутствии возражений ответчика относительно рассмотрения дела в его отсутствие, в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проанализировав исковые требования, исследовав и оценив все представленные доказательства в совокупности согласно части 2 статьи 64, статье 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд установил следующее.

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен контракт № 0851200000622005977 от 03.10.2022, на выполнение подрядных работ на объекте: Ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в рабочем поселке Маслянино Маслянинского района Новосибирской области.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта цена контракта составляет 6 354 711  рублей 39 копеек.

Пунктом 3.3 контракта установлен срок выполнения работ: в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта.

Во исполнение заключенного контракта, подрядчиком выполнены работы на сумму 6 354 711 рублей 39 копеек согласно акту приемки выполненных работ  № 1 от 27.12.2022, справке о стоимости выполненных работ № 1 от 27.12.2022. Указанные акт и справка подписаны заказчиком и подрядчиком, содержит оттиски печатей сторон. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии с пунктом 4.5 контракта, ответчик обязан рассмотреть и подписать документы о приемке в срок не более 20 рабочих дней с момента их поступления в EИС «Госзакупки», то есть до 31 января 2023 года.

В соответствии с пунктом 2.3 контракта оплата  производится  заказчиком  на расчетный  счет подрядчика, указанный в контракте, в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно - монтажных работ (отдельных этапов исполнения контракта) в срок не более 7рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке.

Поскольку претензий по объему и качеству выполненных работ заказчиком не предъявлено, акт о приемке выполненных работ подписан без возражений, факт выполнения работ подрядчиком и приемки их заказчиком суд считает подтвержденным, а обязанность оплаты заказчиком возникшей.

В соответствии с условиями контракта, оплата работ должна была быть произведена в срок не позднее 12.01.2023.

Истцом в материалы дела представлены платежные поручения №166 от 06.03.2023 и № 174 от 09.03.2023, содержащие сведения о поступлении на расчетный счет подрядчика денежных средств от ответчика в общей сумме 6 354 711 рублей 39 копеек.

14.03.2023 истцом нарочно была вручена ответчику претензия № 4 от 14.03.2023 с требованием об оплате неустойки.

В связи с просрочкой ответчиком принятых на себя обязанностей по оплате работ истец обратился в арбитражный суд с указанным иском.

Пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет сторонам возможность обеспечить исполнение обязательств, в том числе неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу пункта 7.2 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 действующей на дату уплаты пенейключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

С учетом данного пункта контракта истцом произведен расчет неустойки, который составил 41 353 рубля 28 копеек за период с 09.02.2023 по 09.03.2023.

Судом расчет проверен и признан арифметически верным.

В связи с чем, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании неустойки в сумме 41 353 рублей 28 копеек за период с 09.02.2023 по 09.03.2023 подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску распределяются судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Администрации рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сибдортехнология" (ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 41 353 рублей 28 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья

О.В. Суворова