Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А50-1116/2023

03 апреля  2023 года

город Пермь

Резолютивная часть решения объявлена 29.03.2023 года.

Полный текст решения изготовлен          03.04.2023 года.

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Е.Д. Антоновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ" (614990, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ ГОРОД, ПОПОВА УЛИЦА, ДОМ 11, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 04.02.2010, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАСТРОЙ" (618554, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, СОЛИКАМСК Г, ВСЕОБУЧА УЛ, Д. 99/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.04.2010, ИНН: 

<

***>)

о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств, о взыскании неустойки

 

при участии:

от истца – ФИО2 Д,А. (доверенность от 10.01.2023 г.), паспорт;

от ответчика – не явился, извещён

 

      Государственное казённое учреждение Пермского края «Управление капитального  строительства  Пермского края»  (далее – ГКУ ПК «УКС Пермского края», истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Камастрой» (далее – ООО «Камастрой», ответчик) (учётом принятого в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения размера иска)  о взыскании пени в размере 135 570 руб. 40 коп., начисленные на сумму 3 247 195 руб. 12 коп.  за период с 02.10.2022 г. по 17.03.2023 г., пени, начисленные на сумму 3 247 195 руб. 12 коп.  с 18.03.2023 г. по день фактической уплаты этой суммы исходя из 1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы. 

          В судебном заседании истец на иске настаивает.

          Ответчик отзыв на иск не представил.

Дело рассматривается судебным разбирательством  в отсутствие надлежащим образом  извещённого ответчика, по правилам ст. 156 АПК РФ.

 

          Исследовав материалы дела, доводы истца,  доводы ответчика, суд установил. 

              24.06.2019 г. между  24.06.2019 г. между ГКУ ПК «УКС Пермского края» (заказчик) и ООО  «Камастрой»  (подрядчик)  заключён государственный контракт       № 6/2019-СМР на выполнение работ по строительству объекта: «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Пермь».

              Цена контракта с учётом подписанных между сторонами дополнительных соглашений составляет 162 359 756 руб. 10 копеек,  в том числе НДС.

              Согласно п.8.10 контракта подрядчик в течение 10 (десяти)  календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки законченного строительством объекта, по форме, утверждённой  СП 68.13330.2017  предоставляет заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту в форме внесения денежных средств на расчётный счёт, предусмотренный пунктом 9.8.1 контракта, сроком действия, который составляет 3 (три) года с даты подписания акта.

              Согласно п.8.10.1 контракта обеспечение исполнения гарантийных обязательств установлено в размере 2 процента от цены настоящего контракта, что составляет: 3 247 195 руб. 12 коп.

          В соответствии с п.8.9.2 контракта Обеспечение предоставляется в связи с возможностью выявления Заказчиком после передачи ему Законченного строительством Объекта фактов ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту и невозможностью их своевременного устранения Подрядчиком, вследствие чего обеспечение должно быть направлено на:

- возмещение расходов и убытков в случае гибели и/или повреждения Объекта, создаваемого в рамках настоящего контракта;

- возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе зданий и сооружений, расположенных в зоне строительства, вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств и (или) использования в работе некачественных материалов и (или) оборудования; 

– возмещение расходов, возникающих в ходе  устранения недостатков результатов строительно-монтажных работ, по настоящему контракту;

-  уплату предъявленного Заказчиком требования неустойки (пени, штрафы).

Передача соответствующей денежной суммы подтверждается платежным поручением с оригиналом отметки банка о его принятии и списании денежных средств с расчетного счета Подрядчика. Возврат денежной суммы или ее удержание в счет погашения неустоек осуществляется в порядке, установленном пунктами 9.8.4.-9.8.6. контракта. (п.8.11 контракта).

              Приёмка законченного строительством Объекта согласно акту № 1 состоялась 20.06.2022 г., соответственно обеспечение исполнения гарантийных обязательств  согласно условиям контракта, должно было поступить в адрес заказчика в срок до 30.06.2022 г.

              Между тем, обеспечение исполнения гарантийных обязательств заказчику на дату 22.11.2022 г. не поступало.

              В соответствии с п.8.13 контракта за нарушение сроков предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту, подрядчик  уплачивает заказчику пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от размера обеспечения за каждый день такой просрочки.

              Начисленная пени истцом  с учётом принятого судом уточнения а составляет 135 570 руб. 40 коп. за заявленный период с 02.10.2022 г. по 17.03.2023 г. 

  Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статьи 309, 310 ГК РФ).

  На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

 Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с частью 3 статьи 96 Закона о контрактной системе исполнение контракта может обеспечиваться, в том числе, предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 данного закона. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (в редакции, действующей на момент опубликования извещения о закупке). Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц (в редакции, действующей на момент подписания контракта и выпуска банковской гарантии).

  В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 381.1 ГК РФ денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, по соглашению сторон могут быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой стороны определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства.

  Начисленные пени за период с 02.10.202 по 17.03.2023 г. составляют 135 570 руб. 40 коп.

  Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. (п.3.1 ст. 70 АПК РФ).

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ  судом не установлено.

  В силу п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Исковые требования подлежат удовлетворению. 

Расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика и подлежат  взысканию с него в пользу истца (ст. 110 АПК РФ). 

Руководствуясь ст. ст. 167,  168, 171, 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 

 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

      Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПЕРМСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

      Взыскать  с  ОБЩЕСТВА  С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ГОСУДАРСТВЕННОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ПЕРМСКОГО   КРАЯ  "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)   пени в размере 135 570 руб. 40 коп., начисленные на сумму 3 247 195 руб. 12 коп.  за период с 02.10.2022 г. по 17.03.2023 г.

      Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

      Взыскать  с  ОБЩЕСТВА  С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ГОСУДАРСТВЕННОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ПЕРМСКОГО   КРАЯ  "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  пени, начисленные на сумму 3 247 195 руб. 12 коп.  с 18.03.2023 г. по день фактической уплаты этой суммы исходя из 1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы. 

      Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

       Взыскать  с  ОБЩЕСТВА  С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 11 067 руб. 11 коп.

       Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

       Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

 

          Судья                                                                            Е.Д. Антонова